건설공사 안전관리

업무 매뉴얼

2014. 12

목   차

－  －

제1장 일반사항	1

1. 목적	2

2. 적용범위	2

3. 용어설명	3

4. 본 매뉴얼의 구성 및 특징	6

5. 관련법령, 기준 및 지침	7

6. 건설공사 단계별․참여자별 안전관리업무 내용 및 절차	8

제2장 발주자의 안전관리업무	9

1. 사업계획	10

1.1 안전관리 업무 총괄	10

1.2 위험요소의 발굴	10

2. 설계발주	11

2.1 건설안전을 고려한 설계서(과업지시서)의 작성	11

2.2 용지정보의 제공	12

3. 설계시행	12

3.1 설계검토	12

4. 설계완료	13

4.1 최종 설계 성과품의 검토	13

5. 공사발주 및 착공 이전	14

5.1 안전관리계획서 작성을 위한 정보 제공	14

5.2 안전관리계획서의 심사	14

5.3 안전관리비의 계상	17

6. 공사시행	18

6.1 안전관리계획서 이행여부 확인	18

6.2 안전관리비의 집행확인	19

6.3 안전점검 확인	19

6.4 안전교육 결과확인	20

6.5 건설현장에서 발생한 안전사고조사 결과 및 조치결과의 확인	21

7. 공사완료	21

7.1 건설공사안전점검종합보고서의 보관 및 제출	21

7.2 설계도서의 보관 및 활용	22

제3장 설계자의 안전관리업무	24

1. 설계발주	25

1.1 설계조건 검토 및 확인	25

2. 설계시행	26

2.1 건설안전을 고려한 설계(안)	26

2.2 타 공종별 설계자와의 상호 협력	27

2.3 설계내용의 보고	28

3. 설계완료	28

3.1 안전관리문서의 제출	28

제4장 시공자의 안전관리업무	29

1. 공사발주 및 착공 이전	30

1.1 건설현장 안전관리 관계자의 업무분담	30

1.2 안전관리계획서 작성을 위한 정보 확인	31

1.3 안전관리계획서의 작성 및 제출	32

1.4 안전관리비 집행계획 작성	34

2. 공사시행	35

2.1 안전관리계획서 이행	35

2.2 시공계획서의 작성 및 검토	35

2.3 건설기계 안전관리	35

2.4 안전관리비의 집행	35

2.5 안전교육의 실시	36

2.6 안전점검 실시	36

2.7 안전사고 발생시 비상동원 및 응급조치	38

3. 공사완료	39

3.1 건설공사 안전점검 종합보고서의 제출	39

3.2 안전관리문서의 제출	39

제5장 건설사업관리기술자의 안전관리업무	41

1. 공사착공 이전	42

1.1 건설현장 안전관리 관계자의 업무분담 적정성 검토	42

1.2 건설공사의 안전관리계획서 검토 및 확인	42

2. 공사시행	43

2.1 안전점검 이행여부 검토	43

2.2 안전관리비 집행여부 검토	43

2.3 안전관리	43

2.4 안전관리결과 보고서의 검토	47

2.5 사고처리	47

3. 공사완료	47

3.1 건설공사 안전점검 종합보고서의 검토	47

3.2 안전관리문서의 검토	47

제6장 취약공종의 안전관리업무	49

1. 가시설공 안전관리	50

1.1 가설구조물의 시공상세도 작성 및 안전성 검토	50

1.2 거푸집·동바리의 시공 및 관리	50

1.3 거푸집·동바리의 해체	51

1.4 교량용 이동식 가설구조물	52

1.5 터널 라이닝용 거푸집 및 동바리	53

2. 지반굴착(터파기) 안전관리	54

2.1 지반조사 및 안전작업 계획수립	54

2.2 토질 및 암질변화에 따른 추가조사의 실시	55

2.3 지반굴착작업의 페이스 맵핑 실시	55

2.4 지반굴착작업의 안전확보 조치	56

2.5 흙막이 지보공의 안전확보 조치	57

3. 비탈면 안전관리	58

3.1 비탈면 조사 및 계획수립	58

3.2 비탈면 쌓기공사	59

3.2 비탈면 깍기공사	59

4. 계측기 설치 및 관리	60

4.1 계측책임자의 선임 및 직무	60

4.2 계측관리업무 수행계획서의 작성	60

4.3 취약공정 안전관리 계측계획의 수립	61

4.4 계측기 설치준비 및 설치	62

4.5 계측기 보호	63

4.6 계측 빈도	63

4.7 계측실시 및 결과보고	64

부록 Ⅰ: 안전관리계획서의 공사별 주요 검토항목	66

부록 Ⅱ: 자체 및 정기안전점검표	77

부록 Ⅲ: 설계안전성검토 수행 방법	105

부록 Ⅳ: 건설공사 위험요소 체크리스트(교량,터널,하천,건축)	113

부록 Ⅴ: 건설공사 안전관리 지침	193

부록 Ⅵ: 건설사고 발생현황 보고 양식	305

제 1 장

일 반 사 항

		제1장 일반사항

1. 목적

건설공사의 계획 단계부터 준공에 이르기까지 발주자, 설계자, 건설사업관리기술자 및 시공자 등 건설공사 안전관리 참여자의 역할과 업무범위를 체계적으로 정립하고, 지하굴착공사의 흙막이벽 및 가시설 공사 등 안전사고가 빈발하고 있는 취약공종의 안전관리업무에 대한 매뉴얼을 발간․보급하고자 함

2. 적용범위

가.  이 매뉴얼은「건설기술 진흥법」제62조에 따라 건설공사의 안전을 확보하기 위하여 안전점검 및 안전관리조직 등 건설공사의 안전관리계획을 수립하여야 하는 다음에 해당하는 건설공사에 적용된다.

1)  「시설물의 안전관리에 관한 특별법」제2조제2호 및 제3호에 따른 1종시설물 및 2종시설물의 건설공사(같은 법 제2조제12호에 따른 유지관리를 위한 건설공사는 제외한다)

2) 지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사. 이 경우 굴착깊이 산정시 집수정(集水井), 엘리베이터 피트 및 정화조 등의 굴착부분은 제외하며, 토지에 높낮이차가 있는 경우 굴착 깊이의 산정방법은「건축법 시행령」제119조제2항을 따른다.

3) 폭발물을 사용하는 건설공사로서 20미터 안에 시설물이 있거나 100미터 안에 사육하는 가축이 있어 해당 건설공사로 인한 영향을 받을 것이 예상되는 건설공사

4) 10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사 또는 10층 이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사

5) 「건설기계관리법」제3조에 따라 등록된 건설기계 중 항타 및 항발기가 사용되는 건설공사

6) 1)부터 5)까지의 건설공사 외의 건설공사로서 발주자가 특히 안전관리가 필요하다고 인정하는 건설공사

나.  건설공사 안전관리 참여자의 안전관리업무에 관련하여 본 매뉴얼 이외의 사항은 건설공사의 특성에 따라 발주자가 별도로 정하여 적용할 수 있으며, 이 매뉴얼에 명시되지 않은 사항은 관계법령, 규정 및 지침 등을 따라야 한다.

3. 용어설명

가.  건설공사:「건설산업기본법」제2조제4호에서 정하는 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭에 관계없이 시설물을 설치․유지․보수하는 공사(시설물을 설치하기 위한 부지조성공사를 포함한다) 및 기계설비나 그 밖의 구조물의 설치 및 해체공사 등을 말한다.

나.  안전관리 참여자: 건설공사의 계획에서부터 준공에 이르기까지 안전관리업무를 수행하는 발주자, 설계자, 시공자, 건설사업관리기술자를 말한다.

다. 발주자: 건설공사를 건설업자에게 도급하는 자를 말한다.

라.  설계자:「엔지니어링산업 진흥법」제2조제2호에 따라 엔지니어링활동주체,「건축사법」제23조제2항에 따라 건축사사무소개설자 및「기술사법」제6조에 따라 사무소를 등록한 기술사 중 설계용역을 영업의 목적으로 하는 자를 말한다.

마.  시공자:「건설산업기본법」제2조7호 또는「주택법」제9조에 따라 면허를 받거나 등록을 하고 건설업 또는 주택건설업을 영위하는 건설업자 또는 주택건설등록업자를 말한다.

바.  건설안전점검기관:「시설물의 안전관리에 관한 특별법」제9조에 따라 등록한 안전진단 전문기관과 한국시설안전공단을 말한다.

사. 건설사업관리기술자:「건설기술 진흥법」제26조에 따른 건설사업관리업자에 소속되어 건설사업관리 업무를 수행하는 자(「건축사법」제2조제4호에 따른 공사감리 수행자 포함)

아.  안전관리계획서:「건설기술 진흥법」제62조에 따라 수립하는 건설공사 안전관리계획을 말한다.

자. 안전관리비:「건설기술 진흥법 시행규칙」제60조에 따른 안전관리계획의 작성 및 검토비용, 정기 안전점검비용, 발파․굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용, 공사장주변의 통행안전관리대책 비용 등을 말한다.

차.  안전점검:「건설기술 진흥법 시행령」제100조에 따른 자체 안전점검, 정기 및 정밀 안전점검 등을 말한다.

카. 자체안전점검:「건설기술 진흥법 시행령」제100조제1항에 따라 건설업자 또는 주택건설등록업자가 건설공사의 공사기간 동안 건설공사의 안전을 위하여 매일 실시하는 안전점검을 말한다.

파. 정기안전점검:「건설기술 진흥법 시행령」제100조제1항제1호에 따라 ‘건설공사 안전관리 지침’ 별표2의 건설공사별 정기안전점검 실시시기에 따라 발주자의 승인을 얻어 건설안전점검기관에 의뢰하여 실시하는 안전점검을 말한다.

타. 정밀안전점검:「건설기술 진흥법 시행령」제100조제1항제1호에 따른 정기안전점검 결과 건설공사의 물리적․기능적 결함 등이 발견되어 보수․보강 등의 필요한 조치를 취하기 위하여 건설안전점검기관에 의뢰하여 실시하는 안전점검을 말한다.

하. 초기점검:「건설기술 진흥법 시행령」제98조제1항제1호에 해당하는 건설공사에 대하여 해당 건설공사를 준공(임시사용을 포함한다)하기 직전에 같은 법 시행령 제100조제1항제1호에 따른 정기안전점검 수준 이상의 안전점검을 말한다.

갸. 공사재개 전(前) 안전점검 :「건설기술 진흥법 시행령」제100조제1항제4호에 따라 같은 법 시행령 제98조제1항 각 호의 건설공사가 시행 도중에 중단되어 1년 이상 방치된 시설물이 있는 경우에는 그 공사를 다시 시작하기 전에 그 시설물에 대하여 같은 법 시행령 제100조제1호제1항에 따라 시행하는 정기안전점검 수준의 안전점검을 말한다.

냐. 보수: 구조물에 작용한 위해요인에 의해 발생된 내구성, 방수성 등 내력이외의 기능상 결함을 치유하여 기능을 회복시키는 것을 말한다.

댜. 보강: 설계하중 이상의 하중 등 위해요인에 의해 손상된 구조물의 내력저하를 증진시키는 것을 말한다.

랴. 안전점검종합보고서(이하 “종합보고서”라 한다):「건설기술 진흥법 시행령」제100조제1항제1호부터 제4호까지의 규정에 의하여 실시한 안전점검의 내용 및 그 조치사항이 작성된 보고서를 말한다.

먀. 시설물정보통합관리시스템(http://www.fms.or.kr, 이하 □시스템□이라 한다) : 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제2조제2호 및 제3호에 따라 1종 시설물 및 2종 시설물에 관한 시설물의 기본현황, 상세제원, 안전점검 및 정밀안전진단 이력, 보수․보강이력 등의 정보를 입력하여 관리하기 위한 것으로 한국시설안전공단이 운영하는 전산시스템을 말한다.

뱌. 대가: 건설공사 안전점검 업무를 수행하는데 필요한 비용을 말한다.

샤. 실비정액가산 방식: 직접인건비, 직접경비, 기술료, 추가업무비용, 부가가치세 및 손해배상보험(공제)료 등을 합산하여 대가를 산출하는 방식을 말한다.

야. 공사비: 발주청의 총예정금액(자재대를 포함한다) 중 용지비, 보상비, 법률수속비 및 부바가치세를 제외한 일체의 공사비를 말한다.

쟈.  안전교육: 「건설기술 진흥법 시행령」제103조에 따라 시공 중인 공사 목적물의 안전과 작업자의 안전을 위해 공법의 이해, 세부 시공순서 및 안전시공절차 이해 등을 목적으로 실시하는 교육을 말한다.

캬.  중대건설현장사고:「건설기술 진흥법 시행규칙」제62조에 따라 같은 법 시행령 제 98조제1항제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 건설공사의 현장에서 시설물이 붕괴되거나 전도되어 재시공이 필요한 사고, 국토교통부장관, 발주청 및 인･허가기관의 장이 사고의 원인 규명 등을 위하여 사고조사가 필요하다고 인정하는 사고를 말한다.

탸.  위험요소: 건설현장의 공사목적물과 주변 건축물 등의 안전을 저해하는 유해위험과 이의 발생 가능성을 의미하는 요소를 말한다. 건설공사 위험요소 발생원인은 시공단계뿐만 아니라, 기획 및 설계단계에서도 발생한다.

퍄.  안전관리문서: 건설공사의 계획에서부터 준공에 이르기까지 건설안전을 확보하기 위해 발주자, 설계자, 시공자 및 건설사업관리기술자가 작성한 문서를 말한다.

4. 본 매뉴얼의 구성 및 특징

이 매뉴얼은 총 6장으로 구성되어 있으며, 각 장마다 안전사고 예방을 위해 건설공사 안전관리 참여자가 안전관리업무를 수행하기 위하여 필요한 법령 및 기준 등 관련 자료의 목록과 웹을 통한 검색방법이 제시되어 있다.

제 1장은 이 매뉴얼의 목적, 적용범위, 용어설명, 매뉴얼의 구성 및 특징,  관련법령, 지침 및 기준에 대해 설명하고 있다.

제 2장은 건설공사의 최종 의사결정자로서 발주자가 수행해야 할 안전관리업무를 설명하고 있다.

제 3장은 안전사고 예방을 위해 설계자가 수행해야 할 안전관리업무를 설명하고 있다.

제 4장은 건설공사 안전관리업무에 있어서 가장 큰 비중을 차지하는 시공자의 안전관리업무에 대해 설명하고 있다.

제 5장은 건설현장에서 발주자 대리인으로서의 기능을 담당하는 건설사업관리기술자의 안전관리업무를 설명하고 있다.

제 6장은 건설공사 안전사고 취약공종에 대한 안전관리업무를 설명하고 있다.

부록에서는 안전관리업무 수행 시 참조해야 할 각종 점검표, 위험성 평가기법, ｢건설공사 안전관리 지침｣, ｢건설사업관리 업무지침서｣, 안전사고 보고서(양식)을 수록하였다.

5. 관련법령, 기준 및 지침

가. 인터넷 주소 현황

- 건설공사 안전관리업무를 수행함에 있어 참조 하여야 할 법령 및 기준 등 관련 자료의 목록과 웹을 통한 검색방법을 아래와 같이 제시하였다.

법령/기준/지침	인터넷 주소
건설기술 진흥법, 시행령, 시행규칙	법제처 홈페이지(http://www.moleg.go.kr/)→‘건설기술 진흥법’ 검색란 입력
건설공사 안전관리 지침	국토교통부 홈페이지(http://www.molit.go.kr)→정보마당→훈령/지침/고시→‘건설공사 안전관리 지침’ 검색란 입력
건설공사 설계기준, 시방서	국토교통부 국토교통 전자정보관 (http://www.codil.or.kr) →공사정보→참조할 설계기준 또는 시방서 항목 선택
시설물의 안전관리에 관한 특별법, 시행령, 시행규칙	법제처 홈페이지(http://www.moleg.go.kr/)→‘시설물의 안전관리에 관한 특별법’ 검색란 입력
엔지니어링산업 진흥법, 시행령, 시행규칙	법제처 홈페이지(http://www.moleg.go.kr/)→‘엔지니어링산업 진흥법’ 검색란 입력
엔지니어링 사업대가기준:	한국엔지니어링진흥협회 홈페이지(www.kenca.or.kr)→정보자료실→대가기준 선택
산업안전보건법, 시행령, 시행규칙	법제처 홈페이지(http://www.moleg.go.kr/)→‘산업안전보건법 ’검색란 입력
기술상의 지침 및 작업환경의 표준	한국산업안전공단 홈페이지(http://www.kosha.net)→안전보건정보→산업안전보건기준/안전보건기술지침→참조할 공종별 표준작업지침 항목 선택

6. 건설공사 단계별․참여자별 안전관리업무 내용 및 절차

- 건설공사의 계획 및 설계발주에서부터 공사완료시까지 각 단계별로 발주자, 설계자, 시공자 및 건설사업관리기술자가 수행하여야 할 안전관리 역할을 체계도로 작성하였다.

구분	발주자	설계자	건설사업관리기술자	시공자
사업계획
설계발주
설계시행
설계완료
공사발주 및 착공이전
공사시행
공사완료

안전관리업무 총괄

위험요소의 발굴

설계조건 작성

설계조건 검토 및 확인

설계검토

건설안전을 고려한 설계실시

타 공종 설계자와의 협력

설계(안)의 지속적인 보고

최종 설계 성과물 검토

안전관리문서의 제출

안전관리비의 계상

안전관리계획서 기초자료 제공

안전관리계획서의 확인

건설현장 관계자의 업무분담 적정성 검토

안전관리 계획서 검토

건설현장 안전관리 관계자의 업무분담

안전관리계획서 기초자료의 확인

안전관리계획서 작성

안전관리비 집행계획 작성

안전관리계획서 이행

안전관리비 집행

안전교육의 실시

안전점검의 실시

안전관리계획서 이행여부 확인

안전관리비 집행확인

안전교육 결과의 확인

안전점검 결과의 확인

안전사고 조사결과의 확인

제재

안전점검결과보고서 보관

설계도서 보관 및 활용

안전관리계획서 이행여부 검토

안전관리비 집행여부 검토

안전교육의 실시여부 검토

안전사고 비상동원 및 응급조치

안전점검 결과보고서 검토

안전관리문서의 검토

안전사고 비상동원 및 응급조치

안전점검 결과보고서 제출

안전관리문서의 제출

제 2 장

발주자의 안전관리업무

		제2장 발주자의 안전관리업무

건설공사를 진행함에 있어 발생하는 각종 사안에 대해 발주자는 건설현장의 안전을 고려하여 의사결정을 해야 한다. 또한 건설안전 관련 법령에서 정한 요건을 준수하여 적절한 작업환경을 조성함으로써 건설공사 안전관리에 노력해야 한다.

발주자는 본 매뉴얼에서 제시된 안전관리업무를 수행하여야 한다. 다만, 필요한 경우 건설안전에 대한 외부 전문가의 도움을 받아 업무를 수행할 수 있다

1. 사업계획

1.1 안전관리 업무 총괄

1.1.1 건설공사 안전관리에 대한 궁극적 책임은 발주자에게 있으므로, 발주자는 본 매뉴얼에서 제시한 건설공사 안전관리 참여자의 업무가 제대로 이행되고 있는 지를 총괄하여야 한다.

1.1.2 건설공사 설계자, 시공자, 건설사업관리기술자 등의 업무와 책임을 본 매뉴얼을 바탕으로 사업계획 단계에서부터 분장하여 문서화하도록 한다.

1.2 위험요소의 발굴

1.2.1 발주자는 해당 건설공사에서 중점적으로 관리해야 할 위험요소, 원인, 저감대책을 관련 전문가의 자문, 유사 건설공사 설계도서에 포함된 안전관리문서의 검토를 통해 사전에 발굴하여야 한다.

2. 설계발주

2.1 건설안전을 고려한 설계서(과업지시서)의 작성

2.1.1 발주자는 사업계획 시 발굴한 해당 건설공사의 위험요소, 원인 및 저감대책을 바탕으로 설계서(과업지시서)의 설계조건을 작성하여야 한다.

2.1.2 또한 발주자는 건설안전을 고려한 설계가 될 수 있도록 다음과 같은 각 호의 설계조건을 설계서(과업지시서)에 포함하여야 한다. 이밖에도 필요한 경우 외부 전문가의 도움을 받아 건설안전을 고려할 수 있는 설계조건을 작성할 수 있다.

(1) 설계에서 가정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험요소가 회피, 제거, 감소되도록 한다.

(2) 시공단계에서 설치되는 가설 시설물의 안전한 설치 및 해체를 고려해야 한다.

(3) 깊은 지하 굴착을 최대한 배제하여야 한다.

(4) 위험장소에서의 작업을 최소화하기 위해 공장제작 자재의 활용을 적극적으로 고려한다.

(5) 동일 작업장소에서 시공절차가 충돌되지 않고 안전하게 작업이 이루어지도록 해야 한다.

(6) 시설물의 유지관리가 용이하도록 개․보수 및 청소를 위한 전용통로, 설비의 설치 및 제거가 용이한 반입구 등이 고려되어야 한다.

(7) 부서지기 쉬운 자재가 최소화되도록 하여야 하며, 석면 및 석면이 함유된 자재가 사용되지 않도록 하여야 한다.

(8) 해체 및 개․보수 공사 시 기존 구조물이 안전하도록 하여야 한다.

(9) 건설공사 중 근로자의 안전확보를 위하여「산업안전보건법」제23조부터 24조까지에서 정하는 내용을 고려해야 한다.

2.1.3 발주자는 설계완료 후 설계자로 하여금 다음 각 호의 내용이 포함된 문서를 제출하도록 설계 성과품으로 명시하여야 한다.

(1)  설계과정 중에 도출한 건설안전 위험요소(Hazard) 및 위험성(Risk)에 대한 평가를 실시한 결과로서 HRA(위험요소/위험성/저감대책) 형태로 작성된 설계안전성검토(DFS)보고서

(2) 설계에 가정된 각종 시공법과 절차에 관한 사항

(3) 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항

2.2 용지정보의 제공

2.2.1  발주자는 용지조건의 특수성에 의해 파생하거나 설계자 선임 이전에 수행한 작업에 의해 발생하는 위험요소를 설계자가 확인할 필요가 있을 경우에는 관련자료 및 정보를 제공하여야 한다.

2.2.2 발주자가 설계자에게 제공하는 용지정보는 다음 각 호와 같다.

(1) 용지 내에 석면이나 화학폐기물과 같은 유해물질 존재여부에 관한 사항

(2) 용지 근처의 철길이나 혼잡한 인접도로 등과 같은 현장 접근에 관한 사항

(3) 지하 매설물과 지하수 흐름에 관한 사항

(4) 붕괴를 유발할 수 있는 인접건물, 구조물 및 식수현황에 관한 사항

(5) 구조물에 부정적 영향을 끼칠 수 있는 지반침하에 관한 사항

(6) 용지 내 설비나 장비설치의 난이점에 관한 사항

(7) 소음을 비롯한 대지의 환경조건에 관한 사항

3. 설계시행

3.1 설계검토

3.1.1 발주자는 설계의 각 단계별로 설계서를 검토하여, 다음과 같은 각 호의 내용이 준수되고 있는 지를 검토·확인하여야 한다.

(1) 설계서(과업지시서)의 설계조건에 따라 해당 건설공사의 위험요소를 설계과정 중에 지속적으로 도출하고 저감대책을 강구하고 있는 지의 여부

(2) 설계에 가정된 시공법과 절차, 설계에 잔여된 위험요소의 유형, 통제하기 위한 수단이 문서로 정리되고 있는 지의 여부

(3) 다수의 공종별 설계자가 참여한 경우, 동일한 위험요소 도출 및 평가기준의 채용여부

(4) 건설안전을 고려한 설계를 협의하기 위한 공종별 설계자의 회의 개최여부

(5) 설계과정 중의 참여 기술자가 건설안전에 대한 전문성이 부족한 경우, 건설안전 전문가 참여 여부

3.1.2 설계자 또는 발주자 요구에 의해 설계 변경사항이 발생한 경우에도, 발주자는 설계서(과업지시서)의 설계조건 작성기준이 충족되도록 설계자에게 요구하여야 한다.

3.1.3 건설공사의 설계 및 시공 등의 적정성 검토를 위한 기술자문위원회(「건설기술 진흥법」 제6조)에는 해당분야 전문가가 참여하여야 한다.

4. 설계완료

4.1 최종 설계 성과품의 검토

4.1.1 발주자는 최종 설계 성과품으로 다음과 같은 각 호의 내용이 포함된 문서가 있는 지를 확인하고 시공자에게 전달하기 위해 정리하여야 한다.

(1)  설계과정 중에 도출한 건설안전 위험요소(Hazard) 및 위험성(Risk)에 대한 평가를 실시한 결과로서 HRA(위험요소/위험성/저감대책) 형태로 작성된 설계안전성검토(DFS)보고서

(2) 설계에 가정된 각종 시공법과 절차에 관한 사항

(3) 지반조사보고서(각종 실내 및 현장시험 결과 포함)

(4) 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항

4.1.2 발주자는 설계조건으로 제시한 해당 건설공사 위험요소의 저감대책이 설계에 적정하게 고려되고 있는 지를 건설안전 전문가의 자문을 받아 확인 할 수 있다.

4.1.3  발주자는 최종 설계 성과품이 설계서(과업지시서)의 설계조건을 충족하지 못한 경우에는 설계자로 하여금 수정․보완토록 하여야 한다.

5. 공사발주 및 착공 이전

5.1 안전관리계획서 작성을 위한 정보 제공

5.1.1  발주자는 용지조건의 특수성과 설계안전성검토보고서의 HRA(위험요소/위험성/저감대책)를 반영하여 시공자가 안전관리계획서를 작성하도록 다음과 같은 정보를 제공하여야 한다.

(1) 용지 내에 석면이나 화학폐기물과 같은 유해물질 존재여부에 관한 사항

(2) 용지 근처의 철길이나 혼잡한 인접도로 등과 같은 현장 접근에 관한 사항

(3) 지하 매설물과 지하수 흐름에 관한 사항

(4) 붕괴를 유발할 수 있는 인접건물, 구조물 및 식수현황에 관한 사항

(5) 구조물에 부정적 영향을 끼칠 수 있는 지반침하에 관한 사항

(6) 용지 내 설비나 장비설치의 난이점에 관한 사항

(7) 소음을 비롯한 용지의 환경조건에 관한 사항

(8) 설계에 가정된 각종 시공법과 절차에 관한 사항

(9) 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항

5.2 안전관리계획서의 심사

5.2.1 안전관리계획서 심사

(1) 발주청 또는 인․허가기관의 장은 시공자가 안전관리 계획을 작성한 때에는 안전관리계획에 대한 검토의견을 포함한 건설사업관리기술자의 확인서를 첨부하여 건설공사 착공(건설공사 현장의 부지정지 및 가설사무소 설치 등의 공사준비행위는 착공으로 보지 아니한다)하기 전에 발주자에게 제출토록 하여야 한다. 안전관리계획서를 변경한 때에도 또한 같다.

(2) 발주자 또는 인․허가기관의 장은「건설기술 진흥법 시행령」제98조제3항에 따라 시공자로부터 제출받은 안전관리계획을 15일 이내에 「건설기술 진흥법 시행규칙」제58조의 수립기준에 따라 그 내용을 심사하여 시공사에게 그 결과를 통보하여야 한다.

(3) 발주자 또는 인․허가기관의 장은 「건설기술 진흥법 시행령」제100조제2항에 따라 안전관리계획의 내용을 건설안전점검기관에 의뢰하여 검토하게 할 수 있다.

(3) 발주자 또는 인․허가기관의 장은「건설기술 진흥법 시행령」제98조제5항에 따라 안전관리계획의 심사결과를 다음 각 호와 같이 구분․판정한다.

①  적정: 안전에 필요한 조치가 구체적이고 명료하게 계획되어 건설공사의 시공상 안전성이 충분히 확보되어 있다고 인정될 때

② 조건부 적정: 안전성 확보에 치명적인 영향을 미치지는 아니하지만 일부 보완이 필요하다고 인정될 때

③ 부적정: 시공 시 안전사고가 발생할 우려가 있거나 계획에 근본적인 결함이 있다고 인정될 때

(4) 발주자 또는 인․허가기관의 장은 건설업자 또는 주택건설등록업자가 제출한 안전관리계획서가 (3)의 ③항에 따라 부적정 판정을 받은 경우에는 안전관리계획의 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

5.2.2 안전관리계획서 작성기준

(1) 안전관리계획

가. 건설공사의 개요: 공사전반에 대한 개략을 파악하기 위한 위치도·공사개요·전체공정표 및 설계도서(인·허가기관 등에 이미 제출된 경우는 제외한다)

나. 안전관리조직: 공사관리조직 및 임무에 관한 사항으로서 시설물의 시공안전 및 공사장 주변 안전에 대한 점검·확인 등을 위한 관리조직표

다. 공정별 안전점검계획: 자체안전점검, 정기안전점검 시기·내용·안전점검공정표 등 실시계획 등에 관한 사항

라. 공사장 주변 안전관리계획: 공사 중 지하매설물의 방호, 인접시설물의 보호 등 공사장 및 공사현장주변에 대한 안전관리에 관한 사항

마. 통행안전시설 설치 및 교통소통계획: 공사장 주변의 교통소통대책, 교통안전시설물, 교통사고예방대책 등 교통안전 관리에 관한 사항

바. 안전관리비 집행계획: 안전관리비의 계상액, 산정내역, 사용계획 등에 관한 사항

사. 안전교육계획: 안전교육계획표, 교육의 종류·내용 및 교육관리에 관한 사항

아. 비상시 긴급조치계획: 공사현장에서의 비상사태에 대비한 비상연락망, 비상동원조직, 경보체제, 응급조치 및 복구 등에 관한 사항

(2) 대상 시설물별 세부 안전관리계획(해당 공종 착공 전에 제출가능)

가. 가설공사

- 가설구조물의 설치개요, 시공상세도면

- 안전시공절차 및 주의사항

- 안전점검계획표 및 안전점검표

- 가설물 안전성 계산서

나. 굴착공사 및 발파공사

- 굴착, 흙막이, 발파, 항타 등의 개요 및 시공상세도면

- 안전시공절차 및 주의사항

- 안전점검계획표 및 안전점검표

- 굴착 비탈면, 흙막이 등 안전성 계산서

다. 콘크리트공사

- 거푸집, 동바리, 철근, 콘크리트 등 공사개요, 시공상세도면

- 안전시공 절차 및 주의사항

- 안전점검계획표 및 안전점검표

- 동바리 등 안전성계산서

라. 강구조물공사

- 자재·장비등의 개요, 시공상세도면

- 안전시공 절차 및 주의사항

- 안전점검계획표 및 안전점검표

- 강구조물의 안전성 계산서

마. 성토 및 절토공사(흙댐공사를 포함한다)

- 자재·장비 등의 개요, 시공상세도면

- 안전시공절차 및 주의사항

- 안전점검계획표 및 안전점검표

- 안전성계산서

바. 해체공사

- 구조물해체의 대상·공법 등의 개요, 시공상세도면

- 해체순서, 안전시설 및 안전조치 등에 대한 계획

사. 건축설비공사

- 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면

- 안전시공절차 및 주의사항

- 안전점검계획표 및 안전점검표

- 안전성 계산서

5.2.3 발주자는 시공자가 안전관리계획서의 작성 또는 변경 시 건설사업관리기술자로 하여금 안전관리계획서의 적정성을 검토하고 서면으로 보고하도록 하여야 한다. 또한 발주자는 건설사업관리기술자가 서면으로 보고한 안전관리계획서의 지적사항에 대해 확인하고, 필요시 시공자에게 시정․보완토록 하여야 한다.

5.3 안전관리비의 계상

5.3.1  발주자는「건설기술 진흥법」제63조 및 같은 법 시행규칙 제60조에 따라 안전관리계획서 작성 및 검토비용, 공사현장의 안전점검비용, 공사장 주변 안전관리 비용, 통행안전 및 교통소통 대책비용을 공사금액에 계상하여야 한다.

5.3.2  발주자는 「건설기술 진흥법」제63조에 따라 안전관리비를 공사금액에 계상하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 의하여야 한다.

(1)  안전관리계획 작성비용은 작성대상과 공사의 난이도 등을 감안하여「엔지니어링산업 진흥법」제31조에 따른 ‘엔지니어링 사업대가의 기준’을 적용할 것

(2)  정기안전점검비용은「건설기술 진흥법 시행령」제100조제8항에 따른 ‘건설공사 안전관리 지침’의 대가 산출기준을 적용할 것

(3) 건설공사로 인하여 불가피하게 발생할 수 있는 공사장 주변 건축물 등의 피해를 최소화하기 위한 사전보강, 보수, 임시이전 등에 소요되는 비용을 계상할 것

(4) 공사시행 중의 통행안전 및 교통소통을 위한 시설의 설치비용에 관하여는 토목․건축 등 관련분야의 설계기준을 적용할 것

6. 공사시행

6.1 안전관리계획서 이행여부 확인

6.1.1 발주자는 시공자가 안전관리계획을 제대로 이행하는지 확인하여야 한다. 다만, 해당 건설공사에 감독권한 대행 등 건설사업관리를 시행하는 경우에는 건설사업관리기술자로 하여금 안전관리계획의 이행여부를 확인하여 보고하도록 할 수 있다.

6.1.2 전 항에 따라 안전관리계획을 검토하여 지적사항(건설사업관리기술자가 보고한 안전관리계획 이행에 대한 지적사항을 말한다)이 있는 경우에는 발주자는 해당 사항을 검토하여 필요한 경우 시공자에게 시정하도록 하여야 한다.

6.2 안전관리비의 집행확인

6.2.1 발주자는 안전관리비가 사용기준에 맞게 사용되었는지 확인하여야 한다. 다만, 해당 건설공사에 감독권한 대행 등 건설사업관리를 시행하는 경우에는 건설사업관리기술자로 하여금 안전관리 활동실적에 따른 정산자료의 적정성을 검토하여 보고하도록 하여야 한다.

6.3 안전점검 확인

6.3.1 발주자는 건설사업관리기술자 및 시공자로 하여금 다음 각 호의 구분에 따라 안전점검을 실시토록 하여야 한다.

(1) 건설공사의 공사기간 동안 매일 자체 안전점검을 실시할 것

(2) 안전관리 계획에서 정한 시기와 횟수에 따라 정기안전점검을 실시할 것

(3) 정기안전점검 결과 건설공사의 물리적, 기능적 결함 등이 발견되어 보수, 보강 등의 조치를 취하기 위하여 필요한 경우에는 정밀안전점검을 실시할 것

(4) 「건설기술 진흥법 시행령」제98조제1항제1호(제1장 2.1호)에 해당하는 건설공사를 준공(임시사용을 포함한다)하기 직전에 (2)호에 따라 정기안전점검 수준 이상의 안전점검을 실시할 것

(5) 「건설기술 진흥법 시행령」제98조제1항제1호에 해당하는 건설공사를 시행하는 도중 그 공사의 중단으로 1년 이상 방치된 시설물이 있는 경우 그 공사를 재개하기 전에 그 시설물에 대해 정기안전점검 수준의 안전점검을 실시할 것

6.3.2 발주자는 건설사업관리기술자 및 시공자로 하여금 자체안전점검을 자체 및 정기안전점검표(부록 2 참조)를 활용하여 실시하도록 하여야 한다. 또한 정기안전점검 및 정밀 안전점검 등을 ‘건설공사 안전관리 지침’에 따라 실시토록 하여야 한다.

6.3.3 발주자는 자체 및 정기안전점검표에 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항이 반영되어 있는지를 검토한 후 안전관리계획서를 승인하여야 한다.

6.3.4 발주자는 시공자로 하여금 정기안전점검 및 정밀안전점검 등을 건설안전점검기관에게 의뢰하도록 해야 한다. 다만, 발주청이「시설물의 안전관리에 관한 특별법」제9조에 따른 안전진단 전문기관으로 등록한 경우에는 정기안전점검을 실시할 수 있다.

6.3.5 발주자는 시공자가 정기안전점검 또는 정밀안전점검 등의 실시를 건설안전점검기관에 의뢰하고자 하는 때에는 부록4의  ‘건설공사 안전관리 지침’ 별표1의 건설안전점검기관 승인조건에 적정한지 검토한 후 승인을 하여야 한다.

6.3.6 발주자는 안전점검을 실시한 건설안전점검기관이 점검표 및 의견서를 포함하는 안전점검 보고서를 ‘건설공사 안전관리 지침’을 기준으로 작성하여 건설사업관리기술자가 확인토록 해야 한다. 발주자도 안전점검 보고서를 검토하여 필요시 시공자에게 보수, 보강 등 필요한 조치를 요청하여야 한다.

6.4 안전교육 결과확인

6.4.1 발주자는「건설기술 진흥법」제65조에 따라 시공자로 하여금 다음 각 호의 내용을 중심으로 안전교육계획을 수립토록 하여야 하며, 이에 따라 안전교육을 실시하도록 하여야 한다.

(1) 교육의 필요성 발견

(2) 교육대상, 내용 및 방법 결정

(3) 교육준비

(4) 교육실시

(5) 교육평가

6.4.2 발주자는 건설사업관리기술자로 하여금 안전교육계획의 적정성을 확인토록 하여야 한다.

6.4.3 발주자는 건설사업관리기술자로 하여금 시공자의 분야별 안전관리책임자 또는 안전관리담당자가 다음의 내용 및 자료가 포함된 안전교육을 실시하는 것을 지도하도록 해야 한다.

(1) 안전사고에 관한 통계 및 정보

(2) 작업자의 자질에 관한 사항

(3) 안전관리조직에 관한 사항

(4) 안전제도, 기준 및 절차에 관한 사항

(5) 생산공정 및 공법에 관한 사항

(6) 시공 상세도면에 따른 세부 시공순서 및 시공기술상 주의사항

(7) 관계법규에 관한 사항

6.4.5 발주자는 건설사업관리기술자가 시공자의 안전관리책임자 및 안전관리자, 안전담당자, 작업반장, 조장을 대상으로 안전교육을 실시하여 계획, 조직, 지시 통제, 조정 등의 능력을 배양할 수 있도록 해야 한다.

6.4.6 발주자는 시공자로 하여금 안전교육의 내용을 기록․관리하도록 해야 하며, 건설사업관리기술자가 정기적으로 확인하도록 해야 한다. 또한 발주자는 준공 후 시공자가 실시한 안전교육의 결과를 서면으로 제출토록 해야 한다.

6.5 건설현장에서 발생한 안전사고조사 결과 및 조치결과의 확인

6.5.1 발주자는 해당 건설공사의 현장에서 안전사고가 발생하였을 경우에는 시공자로 하여금 즉시 필요한 응급조치를 취하도록 해야 한다.

※ 산업안전보건법에 의한 안전사고 처리 절차는 산업재해처리지침 준용

6.5.2 발주자는 안전사고가 발생한 경우에는 건설사업관리기술자로 하여금 건설사고조사 업무매뉴얼 별지 제2호 서식(본 매뉴얼 부록6)을 활용하여 사고의 원인 및 유발주체를 조사하도록 하고, 이의 결과 및 조치결과를 서면으로 보고하도록 해야 한다.

6.5.3 발주자는 「건설기술 진흥법」제67조제1항에 따른 중대건설현장사고인 경우 사고발생현황을 즉시 건설사고조사 업무매뉴얼 별지 제2호 서식을 활용하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

7. 공사완료

7.1 건설공사 안전점검 종합보고서의 보관 및 제출

7.1.1  시공자 등은 건설공사를 준공한 때에는 「건설기술 진흥법 시행령」제100조제1항제1호부터 제4호까지(6.3.1의 (2)∼(5))에 따라 실시한 안전점검의 내용 및 그 조치사항을 종합보고서로 작성하여 발주자에게 제출하여야 하며, 안전점검종합보고서를 발주자 및 시설물의 관리주체에게 제출하여야 한다.

7.1.2 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」제2조제2호 및 제3호에 따라 1종 시설물 및 2종 시설물에 관한 건설공사의 발주자(발주자가 발주청이 아닌 경우에는 인·허가기관의 장을 말한다)는 해당 건설공사의 준공 후 3개월 이내에 안전점검종합보고서를 한국시설안전공단에 제출하여야 한다.

7.1.3 발주자(「시설물의 안전관리에 관한 특별법」제2조제2호 및 제3호에 따라 1종 시설물 및 2종 시설물에 관한 건설공사의 발주자는 제외한다)는 해당 공사의 하자담보 책임기간 만료일까지 보관하고 있어야 하며, 필요시 안전점검종합보고서를 한국시설안전공단으로 하여금 보존 및 관리하게 할 수 있다.

7.1.4 발주자 또는 시공자 등은 안전점검종합보고서를 컴팩트디스크(이하 “CD”라 한다)로 제작하여 제출하여야 한다. 다만「시설물의 안전관리에 관한 특별법」제2조제2호 및 제3호에 따라 1종 시설물 및 2종 시설물에 관한 건설공사의 발주자는 안전점검종합보고서를 시스템을 통해 온라인으로 제출할 수 있다.

7.2 설계도서의 보관 및 활용

7.2.1 향후 유사 건설공사의 안전관리와 유지관리에 유용한 정보제공을 위해 발주자는 해당 건설공사가 준공되면, 각 안전관리 참여자가 작성한 안전관리문서를 취합하여 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」제17조에 따라 설계도서의 일부로 보관한다.

7.2.2 설계 및 시공단계에서 사용된 다음 각 호의 안전관련 문서들은 보존되어야 하며 준공 시 발주자에게 제출하여야 한다.

(1)  설계과정 중에 도출한 건설안전 위험요소(Hazard) 및 위험성(Risk)에 대한 평가를 실시한 결과로서 HRA(위험요소/위험성/저감대책) 형태로 작성된 설계안전성검토(DFS)보고서

(2) 설계에 가정된 각종 시공법과 절차에 관한 사항

(3) 지반조사보고서(각종 실내 및 현장시험 결과 포함)

(4) 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항

(5) 설계단계에서 넘겨받거나 시공단계에서 검토한 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항

(6) 공사를 진행하는 과정에서 도출되는 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항

(7) 중대건설현장사고가 발생한 현장의 경우 사고 개요, 원인, 재발방지대책 등이 포함된 사고조사보고서, 보고서는 HRA(위험요소/위험성/저감대책) 형태로 작성

(8) 시공단계에서 도출되어 유지관리단계에서 반드시 고려해야 하는 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항(유지관리계획에 반영되어야 함)

(9) 사용된 자재에 관련된 위험요소

(10) 설비․장비․기계의 위치 및 사양

(11) 설비․장비․기계의 제거 및 해체에 관한 요구사항

(12) 설비․장비․기계의 청소 및 유지관리에 관한 요구사항

(13) 설비․장비․기계의 사용 매뉴얼

(14) 기타 설계자, 시공자, 건설사업관리기술자 등이 작성한 안전관리문서

제 3 장

설계자의 안전관리업무

		제 3장 설계자의 안전관리업무

설계자의 의사결정이 건설사업에 미치는 영향은 매우 크며, 건설안전에 대해서도 마찬가지이다. 하지만 전통적으로 설계자는 설계대안 창출과정에서 최종 사용자의 안전에만 관심을 두어 왔으며 건설공사 중 안전은 간과해왔다는 점은 주지의 사실이다.

하지만 기능성, 심미성 등 다른 설계요소가 침해되지 않는 범위에서 작업자 및 공사목적물의 안전에 관한 설계자의 고려가 있다면, 또는 설계에 반영하지 못한 위험요소에 관한 정보를 시공자에게 전달할 수 있다면 건설공사의 안전성은 향상될 수 있다.

그러므로 설계자는 건설안전에 대한 위험요소를 가장 먼저 규명해야 하며, 공사목적물과 작업자들이 위험요소에 노출되지 않도록 설계 창출 시 적극적으로 노력해야 한다.

1. 설계발주

1.1 설계조건 검토 및 확인

1.1.1 설계자는 설계업무 착수 이전에 다음 각 호의 내용을 중심으로 해당 용지의 특성을 확인 및 검토하여야 한다.

(1) 현장 근처의 철길이나 혼잡한 인접도로 등과 같은 현장 접근에 관한 사항

(2) 지하 매설물과 지하수 흐름에 관한 사항

(3) 붕괴를 유발할 수 있는 인접건물, 구조물 및 식수현황에 관한 사항

(4) 구조물에 부정적 영향을 끼칠 수 있는 지반침하에 관한 사항

(5) 현장 내 설비나 장비설치의 난이점에 관한 사항

(6) 도시가스사업이 허가된 지역에서 굴착공사를 하는 경우 굴착공사전 「도시가스사업법」제30조의3에 따른 도시가스배관매설에 관한 사항

1.1.2 설계자는 발주자의 설계서(과업지시서) 설계조건에서 명시된 안전관리 부문의 요구사항을 확인 및 검토하여야 한다.

1.1.3 설계자는 발주자의 과업지시서에 안전관리 요구사항이 명시되지 않은 경우에도 관련 법규와 규정의 요구사항을 검토․확인하여야 한다.

2. 설계시행

2.1 건설안전을 고려한 설계(DFS, Design For Safety)

2.1.1 설계서(과업지시서)의 설계조건을 바탕으로 설계자는 부록 3(위험성 평가기법)의 표준시방서, 설계기준을 활용하여 설계과정 중에 건설안전에 치명적인 위험요소를 도출하여 이를 제거, 감소할 수 있는 저감대책을 다음 각 호의 우선순위에 따라 고려해야 한다.

(1) 위험요소의 제거

(2) 기능성, 심미성 등의 설계요소가 훼손되지 않는 범위 내에서 위험요소의 발생 가능성을 감소시키는 설계 창출

2.1.2 건설안전을 고려한 설계는 다음과 같은 각 호의 기준이 준수되도록 노력하여야 한다.

(1) 설계에서 가정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험요소가 회피, 제거, 감소되도록 한다.

(2) 시공단계에서 설치되는 가설 시설물의 안전한 설치 및 해체를 고려해야 한다.

(3) 깊은 지하 굴착을 최대한 배제하여야 한다.

(4) 위험장소에서의 작업을 최소화하기 위해 공장제작 자재의 활용을 적극적으로 고려한다.

(5) 동일 작업장소에서 시공절차가 충돌되지 않고 안전하게 작업이 이루어지도록 해야 한다.

(6) 시설물의 유지관리가 용이하도록 개․보수 및 청소를 위한 전용통로, 설비의 설치 및 제거가 용이한 반입구 등이 고려되어야 한다.

(7) 부서지기 쉬운 자재가 최소화되도록 하여야 하며, 석면 및 석면이 함유된 자재가 사용되지 않도록 하여야 한다.

(8) 해체 및 개․보수 공사 시 기존 구조물이 안전하도록 하여야 한다.

(9) 지반굴착공사의 시공시기가 장마철, 해빙기와 겹칠 경우에는 이에 대한 안전성검토를 실시하여야 한다.

(10) 건설공사 중 근로자의 안전확보를 위하여 「산업안전보건법」제23조부터 24조까지에서 정하는 내용을 고려해야 한다.

2.1.3 설계자는 설계에 가정된 시공법과 절차, 남아있는 위험요소의 유형, 통제하기 위한 수단을 안전관리문서로 정리하여야 한다.

2.1.4 다수의 공종별 설계자가 참여한 경우, 주설계자는 동일한 위험요소 도출 및 평가기준을 채용하여야 한다.

2.1.5 건설안전을 고려한 설계를 협의하기 위해 주설계자는 공종별 설계자와 회의를 개최하여야 한다.

2.1.6 건설안전을 저해하는 위험요소를 고려한 설계를 위해 설계자는 해당분야 전문가가 참여하여 시공법과 절차를 명확히 이해하고 있어야 한다.

2.1.7 건설신기술 또는 특허공법 등이 건설공사에 적용되는 경우에는 반드시 HRA(위험요소/위험성/저감대책) 검토를 실시하여야 한다.

2.1.8 건설공사의 가설구조물을 설계하는 경우에는 해당분야 전문가(특급기술자)가 검토를 실시하여야 한다.

2.1.9 시공법과 절차에 대한 이해도가 작거나, 건설안전에 관한 전문성이 부족한 경우 건설안전 전문가를 설계과정 중에 참여하도록 할 수 있다.

2.1.10 전항과 같은 과정을 거쳐 도출한 건설안전 위험요소(Hazard) 및 위험성(Risk)을 평가하여 HRA(위험요소/위험성/저감대책) 형태로 설계안전검토(DFS)보고서를 작성하여야 한다.

2.2 타 공종별 설계자와의 상호 협력

2.2.1 원설계자는 타 공종 설계자와 다음 각 호의 방법에 의해 상호 협력하여야 한다.

(1) 공통적인 건설안전 위험요소(Hazard) 및 위험성(Risk)에 대한 평가방법 적용

(2) 타 공종 설계자와의 정기적인 회의 개최

(3) 정기적인 설계의 교차 검토

2.3 설계내용의 보고

2.3.1 설계자는 각 호의 내용에 대하여 정기적으로 발주자에게 보고하여야 한다.

(1) 설계서(과업지시서)의 설계조건에 따른 해당 건설안전 위험요소(Hazard) 및 위험성(Risk)에 대한 지속적인 도출 및 저감대책 강구

(2) 현장조건을 추정하여 설계함에 따라 시공법과 절차, 설계에 남아있는 위험요소의 유형과 통제하기 위한 수단의 문서정리

(3) 공종별로 별도의 설계자가 참여한 경우, 위험요소 도출 및 평가기준의 동일한 적용

(4) 설계에 건설공사 안전을 고려한 사항을 반영하기 위한 공종별 설계자 협의회 개최

(5) 설계참여 기술자가 건설안전에 대한 전문성이 부족한 경우, 건설안전 전문가 설계참여

3. 설계완료

3.1 안전관리문서의 제출

3.1.1 설계자는 최종 설계 성과품의 하나로 다음과 같은 각 호의 내용이 포함된 문서를 발주자에게 제출하여야 한다.

(1) 설계과정 중에 도출한 건설안전 위험요소(Hazard) 및 위험성(Risk)에 대한 평가를 실시한 결과로서 HRA(위험요소/위험성/저감대책) 형태로 작성된 설계안전성검토(DFS)보고서

(2) 설계에 가정된 각종 시공법과 절차에 관한 사항

(3) 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항

(4) 시공시 유의사항 및 위험 요소에 대한 대처방안 등

제 4 장

시공자의 안전관리업무

		제4장 시공자의 안전관리업무

건설안전에 대한 시공자의 의사결정은 건설공사에 직접적으로 영향을 미친다. 공사일정, 공사비, 품질 등 다른 공사목표가 침해되지 않는 범위에서 작업자 및 공사목적물의 안전에 관한 시공자의 적극적인 고려가 있다면, 안전사고는 예방 또는 저감될 수 있다. 따라서 발주자 및 건설사업관리기술자는 안전사고의 예방을 위해 시공자로 하여금 본 매뉴얼에 제시된 안전관리업무를 수행토록 해야 한다.

1. 공사발주 및 착공 이전

1.1 건설현장 안전관리 관계자의 업무분담

1.1.1 건설공사 현장 안전관리에 대한 1차적인 책임이 시공자에게 있으므로, 시공자는「건설기술 진흥법」제64조에 따라 다음 각 호의 건설현장 안전관리 관계자의 안전관리업무가 제대로 이행되는 지를 총괄하여야 한다.

(1) 해당 건설공사의 시공 및 안전에 관한 업무를 총괄하여 관리하는 안전총괄책임자

(2) 토목, 건축, 전기, 기계, 설비 등 건설공사의 각 분야별 시공 및 안전관리를 지휘하는 분야별 안전관리책임자

(3) 건설공사 현장에서 직접 시공 및 안전관리를 담당하는 안전관리담당자

(4) 수급인과 하수급인으로 구성된 협의체의 구성원

1.1.2 시공자는 건설공사 현장 안전관리 참여자의 직무를 효율적으로 총괄 감독하기 위해 안전총괄책임자, 분야별 안전관리책임자, 안전관리담당자, 수급인 및 하수급인의 안전관리조직을 <그림 1>과 같이 구성하고 이들의 직무와 책임을 공사 착공단계에서부터 분장하여 문서화하도록 한다.

<그림 1> 건설공사 안전관리조직

							안전보건총괄책임자 (안전총괄책임자)
							현장소장
							연락처
안 전 관 리 자																	협 의 체
○ ○ ○																	(수급인 및 하수급인 사업주 전원)
관리감독자 (안전관리책임자)					관리감독자 (안전관리책임자)							관리감독자 (안전관리책임자)					관리감독자 (안전관리책임자)
(예)토목					○○							○○					○○
연락처					연락처							연락처					연락처
관리감독자 (안전관리담당자)					관리감독자 (안전관리담당자)							관리감독자 (안전관리담당자)					관리감독자 (안전관리담당자)
담당자					담당자							담당자					담당자
연락처					연락처							연락처					연락처
전 근 로 자

1.2 안전관리계획서 작성을 위한 정보 확인

1.2.1 시공자는 용지조건의 특수성과 설계에서 잔여된 위험요소를 고려한 안전관리계획서를 작성하기 위해 다음 각 호의 정보를 확인하여야 한다.

(1) 현장 근처의 철길이나 혼잡한 인접도로 등과 같은 현장 접근에 관한 사항

(2) 지하 매설물과 지하수 흐름에 관한 사항

(3) 붕괴를 유발할 수 있는 인접건물, 구조물 및 식수현황에 관한 사항

(4) 구조물에 부정적 영향을 끼칠 수 있는 지반침하에 관한 사항

(5) 용지 내 설비나 장비설치의 난이점에 관한 사항

(6) 설계에 가정된 각종 시공법과 절차에 관한 사항

(7) 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항

(8) 관련 법령과 규정에 명시된 요구사항

1.3 안전관리계획서의 작성 및 제출

1.3.1 시공자는 안전관리계획을 작성하고 안전관리계획에 대한 검토의견을 포함한 건설사업관리기술자의 확인서를 첨부하여 건설공사 착공하기 전에 발주자에게 제출하여야 한다. 안전관리계획서를 변경(공법변경 등이 아닌 경미한 사항은 제외한다)한 때에도 또한 같다.

1.3.2 시공자는 작업공종에 따라 공종별 안전관리계획서를 작성하여 해당 공종 착수 전에 건설사업관리기술자의 승인을 받고 작업현장에 비치하여야 한다.

1.3.3 시공자는 안전관리계획서 이행여부에 관한 보고서를 건설사업관리기술자에게 서면으로 보고하여야 한다.

1.3.2 안전관리계획서는 「건설기술 진흥법 시행규칙」별표7에 따른 ‘안전관리계획의 수립기준’에 따라 아래와 같이 작성한다.

(1) 안전관리계획

가. 건설공사의 개요: 공사 전반에 대한 개략을 파악하기 위한 위치도, 공사개요, 전체공정표 및 설계도서(인·허가기관 등에 이미 제출된 경우는 제외한다)

나. 안전관리조직: 공사관리조직 및 임무에 관한 사항으로서 시설물의 시공안전 및 공사장 주변 안전에 대한 점검·확인 등을 위한 관리조직표

다. 공정별 안전점검계획: 자체안전점검(자체안전점검표에는 설계단계에서 넘겨받거나 시공단계에서 검토한 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항을 반영하여야 하며, 특히 건설신기술 또는 특허공법 등이 건설공사에 적용되는 경우에는 반드시 HRA(위험요소/위험성/저감대책) 검토를 실시·반영하여야 한다.), 정기안전점검 시기·내용, 안전점검 공정표 등 실시계획 등에 관한 사항

라. 공사장 주변 안전관리계획: 공사 중 지하매설물의 방호, 인접시설물의 보호 등 공사장 및 공사현장주변에 대한 안전관리에 관한 사항

마. 통행안전시설 설치 및 교통소통계획: 공사장 주변의 교통소통대책, 교통안전시설물, 교통사고예방대책 등 교통안전 관리에 관한 사항

바. 안전관리비 집행계획: 안전관리비의 계상액, 산정내역, 사용계획 등에 관한 사항

사. 안전교육계획: 안전교육계획표, 교육의 종류·내용 및 교육관리에 관한 사항

아. 비상시 긴급조치계획: 공사현장에서의 비상사태에 대비한 비상연락망, 비상동원조직, 경보체제, 응급조치 및 복구 등에 관한 사항

(2) 대상시설물별 세부 안전관리계획(해당 공종 착공 전에 제출가능)

가. 가설공사

- 가설구조물의 설치개요 및 시공상세도면

- 안전시공 절차 및 주의사항

- 안전점검계획표 및 안전점검표

- 가설물 안전성 계산서

나. 굴착공사 및 발파공사

- 굴착, 흙막이, 발파, 항타 등의 개요, 시공상세도

- 안전시공 절차 및 주의사항

- 안전점검계획표 및 안전점검표

- 굴착 비탈면, 흙막이 등 안전성 계산서

다. 콘크리트공사

- 거푸집, 동바리, 철근, 콘크리트 등 공사개요 및 시공상세도면

- 안전시공 절차 및 주의사항

- 안전점검계획표 및 안전점검표

- 동바리 등 안전성 계산서

라. 강구조물공사

- 자재·장비 등의 개요, 시공상세도면

- 안전시공 절차 및 주의사항

- 안전점검계획표 및 안전점검표

- 강구조물의 안전성 계산서

마. 성토 및 절토공사(흙댐공사를 포함한다)

- 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면

- 안전시공 절차 및 주의사항

- 안전점검계획표 및 안전점검표

- 안전성계산서

바. 해체공사

- 구조물해체의 대상·공법 등의 개요 및 시공상세도면

- 해체순서, 안전시설 및 안전조치 등에 대한 계획

사. 건축설비공사

- 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면

- 안전시공 절차 및 주의사항

- 안전점검계획표 및 안전점검표

- 안전성 계산서

1.4 안전관리비 집행계획 작성

1.4.1  시공자는「건설기술 진흥법」제63조에 따라 안전관리비를 다음 각 호의 기준에 의해 공사금액에 계상하여 안전관리비 집행계획서를 작성하여야 한다.

(1) 안전관리계획작성비용은 작성대상과 공사의 난이도 등을 감안하여「엔지니어링산업 진흥법」제31조에 따른 ‘엔지니어링 사업대가의 기준’을 적용하여야 한다.

- 기술자인건비(고급기술자 작업일수)

- 직접경비(일비, 위험수당, 기계기구손료, 보고서등 인쇄비, 소모품비, 기타)

- 제경비(직접인건비의 110~120%)

- 기술료(직접인건비+제경비의 20~40%)

(2) 안전점검 비용은 ‘건설공사 안전관리 지침’에 따라 적용 할 수 있다. 다만, 건설공사의 발주자가 판단하여 이 기준을 적용할 수 없는 건설공사의 경우에는 그러하지 아니한다.

(3)  건설공사로 인하여 불가피하게 발생할 수 있는 공사장주변 건축물 등의 피해를 최소화하기 위한 사전보강․보수․임시이전 등에 소요되는 비용을 적용하여야 한다.

(4) 공사시행 중의 통행안전 및 교통소통을 위한 시설의 설치 및 유지관리비용에 관하여는 토목․건축 등 관련분야의 설계기준을 적용하여야 한다.

2. 공사시행

2.1 안전관리계획서 이행

2.1.1 시공자는 안전관리계획서에 따라 건설현장의 안전관리업무를 수행하여야 한다.

2.1.2 시공자는 안전관리계획서 이행여부에 관한 보고서를 건설사업관리기술자에게 서면으로 보고하여야 한다.

2.2 시공계획서 작성 및 검토

2.2.1 시공자는  「건설기술 진흥법 시행령」제98조에 따른 안전관리계획의 수립 대상공사 및 높이 20m이상 비탈면 흙깎기공사를 시공할 때에는 시공계획서를 작성하여 해당분야 기술지원기술자의 검토를 받아야 한다. 이때 시공계획서에는 안전관리계획서 상의 대상시설물별 세부 안전관리계획을 포함하여야 한다.

2.2.2 건설공사의 시공상세도 작성, 제출 및 승인은 ‘건설공사 시공상세도 작성지침’에 따른다.

2.3 건설기계 안전관리

2.3.1 건설기계의 관리, 운용 등에 대한 사항은「건설기계관리법」,「건설기계 안전기준에 관한 규칙」(국토교통부령 제111호),「산업안전보건기준에 관한 규칙」(고용노동부령 제77호)을 따른다.

2.4 안전관리비의 집행

2.4.1 시공자는 분기별 안전관리비 사용현황을 공사 진척에 따라 작성하여야 한다.

2.4.2 시공자는 안전관리비를 해당 목적에만 사용하도록 하여야 하며, 건설사업관리기술자에게 안전관리 활동실적에 따른 안전관리비 집행실적을 정기적으로 보고하여야 한다.

2.5 안전교육의 실시

2.5.1 시공자는「건설기술 진흥법」제65조에 따라 다음 각 호의 내용을 중심으로 안전교육계획을 수립하여야 하며, 이에 따라 안전교육을 실시하여야 한다.

(1) 교육의 필요성 발견

(2) 교육대상, 내용 및 방법 결정

(3) 교육준비

(4) 교육실시

(5) 교육평가

2.5.2 시공자는 안전교육계획에 따라 다음 각 호의 내용을 중심으로 안전교육을 실시하여야 한다.

(1) 안전사고에 관한 통계 및 정보

(2) 작업자의 자질에 관한 사항

(3) 안전관리조직에 관한 사항

(4) 안전제도, 기준 및 절차에 관한 사항

(5) 생산공정 및 공법에 관한 사항

(6) 시공상세도면에 따른 세부 시공순서 및 시공기술상 주의사항

(7) 관련 법규에 관한 사항

2.5.3 시공자는 안전교육의 내용을 기록․관리하여야 하고, 정기적으로 건설사업관리기술자에게 안전교육실적을 보고하여야 하며, 준공 후 안전교육의 결과를 서면으로 발주청에 제출하여야 한다.

2.6 안전점검 실시

2.6.1  시공자는 직접 또는 건설안전점검기관에 의뢰하여 다음 각 호의 구분에 따라 안전점검을 실시하여야 한다.

(1) 건설공사의 공사기간 동안 매일 자체 안전점검을 실시할 것

(2) 안전관리 계획에서 정한 시기와 횟수에 따라 정기안전점검을 실시할 것

(3) 정기안전점검 결과 건설공사의 물리적, 기능적 결함 등이 발견되어 보수, 보강 등의 조치를 취하기 위하여 필요한 경우에는 정밀안전점검을 실시할 것

(4)  「건설기술 진흥법 시행령」제98조제1항제1호(제1장 2.1호)의 규정에 해당하는 건설공사에 대하여는 해당 건설공사를 준공하기 직전에 (2)호의 에 따라 정기안전점검 수준 이상의 안전점검을 실시할 것

(5)  「건설기술 진흥법 시행령」제98조제1항제1호(제1장 2.1호)의 규정에 해당하는 건설공사를 시행하는 도중 그 공사의 중단으로 1년 이상 방치된 시설물이 있는 경우 그 공사를 재개하기 전에 그 시설물에 대해 정기안전점검 수준의 안전점검을 실시할 것

2.6.2. 정기안전점검과 정밀안전점검은 다음 각 호의 1에 해당하는 건설안전점검기관이 실시한다. 다만, 발주자가 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」제9조의 규정에 의하여 안전진단전문기관으로 등록한 경우에는 정기안전점검만을 실시할 수 있다.

(1)「시설물의 안전관리에 관한 특별법」제9조에 따라 등록한 안전진단전문기관

(2) 한국시설안전공단

2.6.3 시공자가 정기안전점검 또는 정밀안전점검의 실시를 건설안전점검기관에 의뢰하고자 하는 때에는 발주자(발주자가 발주청이 아닌 경우에는 인·허가기관의 장을 말한다)의 승인을 얻어야 한다. 이 경우 해당 건설공사를 발주․설계․시공 또는 감리하는 자와 동일계열회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제2조제3호에 따라 계열회사를 말한다)인 건설안전점검기관에 의뢰하여서는 아니 된다.

2.6.4 안전점검을 실시한 건설안전점검기관은 안전점검실시결과를 발주청, 인·허가기관의 장(발주자가 발주청이 아닌 경우에 한한다), 시공자에게 통보하여야 하며, 점검결과를 통보받은 발주청 또는 인․허가기관의 장은 시공자에게 보수․보강 등 필요한 조치를 요청할 수 있다.

2.6.5 시공자는 건설공사의 공사기간 동안 자체 및 정기안전점검표 등을 활용하여 자체 안전점검을 실시하여야 한다. 점검항목은 각 현장 실정에 따라 추가할 수 있다.

2.6.6 시공자는 자체안전점검의 결과에 따른 조치를 신속하게 이행하고, 이에 대한 보고서를 정기적으로 건설사업관리기술자에게 보고하여야 한다.

2.6.7 시공자는 건설안전점검기관과 착공부터 준공까지 장기계약을 체결하여 지속적이고 일관성 있는 정기 안전점검이 이루어지도록 해야 한다.

2.6.8 시공자는 건설안전점검기관이 다음 각 호의 내용을 중심으로 ‘건설공사 안전관리 지침’을 적용하여 정기 안전점검을 실시토록 해야 한다. 점검항목은 각 현장실정에 따라 추가할 수 있다.

2.6.9 건설안전점검기관이 공정별 점검표(Check List)에 의해 점검하고 의견서를 포함한 보고서를 ‘건설공사 안전관리 지침’을 기준으로 작성하여 제출하면, 시공자는 점검지적사항을 신속히 보완, 조치, 확인하고 그 기록을 보관하여야 한다.

2.6.10 시공자는 공정별 정기안전점검에 의해 시설물의 치명적인 물리적․기능적 결함에 대한 구조적 안전성 및 결함의 원인 등이 발견되었을 경우에는 이를 정밀 조사, 측정, 평가하여 보수․보강 등의 방법을 제시하여야 한다.

2.7 안전사고 발생 시 비상동원 및 응급조치

2.7.1 시공자는 해당 건설공사의 현장에서 안전사고가 발생하였을 경우 즉시 필요한 응급조치를 취하고 건설사고조사 업무매뉴얼에서 정한 사고의 경우 별지 제2호 서식(본 매뉴얼 부록6)을 활용 건설사업관리기술자 및 발주자에게 보고하여야 한다.

3. 공사완료

3.1 건설공사 안전점검 종합보고서의 제출

3.1.1  시공자는 건설공사를 준공한 때에는  「건설기술 진흥법 시행령」제100조제1항제1호부터 제4호까지(6.3.1의 (2)∼(5))에 따라 실시한 안전점검의 내용 및 그 조치사항을 종합보고서로 작성하여 발주자에게 제출하여야 하며, 안전점검종합보고서를 발주자 및 시설물의 관리주체에게 제출하여야 한다.

3.1.2 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」제2조제2호 및 제3호에 따라 1종 시설물 및 2종 시설물에 관한 건설공사의 발주자(발주자가 발주청이 아닌 경우에는 인·허가기관의 장을 말한다)는 해당 건설공사의 준공 후 3개월 이내에 안전점검종합보고서를 한국시설안전공단에 제출하여야 한다.

3.1.3  시공자(「시설물의 안전관리에 관한 특별법」제2조 제2호 및 제3호에 따른 1종 시설물 및 2종 시설물에 관한 건설공사의 시공자는 제외한다)는 해당 공사의 하자담보 책임기간 만료일까지 보관하고 있어야 한다.

3.1.4 발주자 또는 시공자는 안전점검종합보고서를 컴팩트디스크(이하 “CD”라 한다)로 제작하여 제출하여야 한다. 다만 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」제2조 제2호 및 제3호에 따른 1종 시설물 및 2종 시설물에 관한 건설공사의 발주자는 안전점검종합보고서를 시스템을 통해 온라인으로 제출할 수 있다.

3.2 안전관리문서의 제출

3.2.1  향후 유사 건설공사의 안전관리와 유지관리에 유용한 정보제공을 위해 해당 건설공사가 준공되면, 시공자는 다음 각 호의 내용을 중심으로 안전관리문서를 작성하여 건설사업관리기술자의 검토 후 발주청에게 제출하여야 한다.

(1) 시공자가 적용한 시공법, 절차 및 구조기준

(2) 사용된 자재에 관련된 위험요소

(3) 설비․장비․기계의 위치와 사양, 사용 매뉴얼

(4) 설비․장비․기계의 제거나 해체, 청소와 유지관리에 관한 요구사항

(5) 설계단계에서 넘겨받거나 시공단계에서 검토한 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항

(6) 중대건설현장사고가 발생한 현장의 경우 사고 개요, 원인, 재발방지대책 등이 포함된 사고조사보고서, 보고서는 HRA(위험요소/위험성/저감대책) 형태로 작성

(7) 시공단계에서 도출되어 유지관리단계에서 반드시 고려해야 하는 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항(유지관리계획에 반영되어야 함)

제 5 장

건설사업관리기술자의 안전관리업무

		제5장 건설사업관리기술자의 안전관리업무

이 매뉴얼에서 건설사업관리기술자는「건설기술 진흥법」제26조에 따른 건설사업관리용역업자에 소속되어 건설사업관리 업무를 수행하는 자를 말한다.

건설사업관리기술자는 건설현장에서 발주자 대리인으로서의 기능을 담당한다. 건설안전에 대한 시공자의 의사결정이 공사일정, 공사비, 품질 등 다른 공사목표가 침해되지 않는 범위에서 적극적으로 이루어졌는지의 여부를 검토하는 것이 주요 업무가 된다. 이와 같은 건설사업관리기술자의 업무를 통해서 안전사고를 예방 또는 저감할 수 있다.

따라서 발주자는 안전사고의 예방을 위해 건설사업관리기술자로 하여금 본 매뉴얼에서 제시된 안전관리업무를 수행토록 해야 한다.

1. 공사착공 이전

1.1 건설현장 안전관리 관계자의 업무분담 적정성 검토

1.1.1 건설사업관리기술자는 다음 각 호의 건설현장 안전관리 관계자를 대상으로 시공자가 구성한 안전관리조직의 편성 및 안전관리업무가 법상 구비조건을 충족하고 있는지를 검토하여야 한다.

(1)  해당 건설공사의 시공 및 안전에 관한 업무를 총괄하여 관리하는 안전총괄책임자

(2) 토목, 건축, 전기, 기계, 설비 등 건설공사의 각 분야별 시공 및 안전관리를 지휘하는 분야별 안전관리책임자

(3) 건설공사현장에서 직접 시공 및 안전관리를 담당하는 안전관리 책임자

(4) 수급인과 하수급인으로 구성된 협의체의 구성원

1.2 건설공사의 안전관리계획서 검토 및 확인

1.2.1 건설사업관리기술자는 시공자가  「건설기술 진흥법 시행령」제98조 및 제99조에 따라 작성한 건설공사 안전관리계획서의 적정성을 공사 착공 전에 검토·확인하여야 하며, 보완하여야 할 사항이 있는 경우에는 시공자로 하여금 이를 보완토록 해야 한다

2. 공사시행

2.1 안전점검 이행여부 검토

2.1.1 건설사업관리기술자는 건설공사 안전관리계획서 내용에 따라 안전조치․점검 등의 이행을 하였는지의 여부를 확인하고 미이행 시 시공자로 하여금 안전조치․ 점검 등을 선행한 후 시공하게 하여야 한다.

2.1.2 건설사업관리기술자는 시공자가 「건설기술 진흥법 시행령」제100조에 따라 자체안전점검을 매일 실시하였는지의 여부와 자체안전점검표에는 설계단계에서 넘겨받거나 시공단계에서 검토한 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항들이 반영되어 있는지를 확인하여야 하며, 건설안전점검전문기관에 의뢰하여야 하는 정기․정밀 안전점검 시에는 입회하여 적정한 점검이 이루어지는지를 확인하여야 한다.

2.1.3 건설사업관리기술자는 「건설기술 진흥법 시행령」제100조에 따라 시행한 정기․정밀 안전점검 결과를 시공자로부터 제출받아 검토하여 발주자에게 보고하고, 발주자의 지시에 따라 시공자에게 필요한 조치를 하게 하여야 한다.

2.2 안전관리비 집행여부 검토

2.2.1  건설사업관리기술자는 시공자가 건설공사 안전관리계획서에 따라 안전관리비를 해당 목적에 적합하게 사용하였는지 확인하여야 한다.

2.2.2 건설사업관리기술자는 건설공사 안전관리비 사용에 관한 사항을 지도․확인하여야 한다.

2.3 안전관리

2.3.1  건설사업관리기술자는 건설공사의 안전시공 추진을 위해서 안전조직을 갖추도록 하여야 하고 안전조직은 현장규모와 작업내용에 따라 구성하며 동시에「산업안전보건법」의 해당규정(산업안전보건법 제13조 안전보건 관리책임자 선임, 제14조 관리․감독자 및 안전담당자 지정, 제15조 안전관리자 배치, 제18조 안전보건 총괄책임자 선임 및 안전보건협의회 운영)에 명시된 업무도 수행되도록 조직편성을 다음과 같이 한다.

	건설사업 관리기술자			안전보건관리책임자		: 현장대리인
		안전관리자				안전보건협의회
									: 안전보건관리책임자 안전관리자 관리감독(책임)자 협력업체 대표자 전원
				관리․감독자		: 작업별 책임자
		안전담당자				안전담당자			: 직영작업반장, 전문업체 작업책임자

2.3.2  건설사업관리기술자는 시공자가 「건설기술 진흥법 시행령」제98조와 제99조에 따라 작성한 건설공사 안전관리계획서를 공사 착공 전에 제출 받아 적정성을 확인하여야 하며, 보완하여야 할 사항이 있는 경우에는 시공자로 하여금 이를 보완하도록 하여야 한다.

2.3.4 건설사업관리기술자는 소속 건설사업관리기술자 중 안전관리담당자를 지정하여 시공자의 안전관리자를 지도․감독 하도록 하여야 하며 공사전반에 대한 안전관리계획의 사전검토, 실시확인 및 평가, 자료의 기록유지 등 사고예방을 위한 제반 안전관리 업무에 대하여 확인을 하도록 하여야 한다.

2.3.5 건설사업관리기술자는 시공자 중 안전보건관리책임자(현장대리인)와 안전관리자(법정자격자)를 지정하게 하여 현장의 전반적인 안전․보건문제를 책임지고 추진하도록 하여야 한다.

2.3.6  건설사업관리기술자는 시공자로 하여금「근로기준법」,「산업안전보건법」, 「산업재해보상보험법」과 기타 관계법규를 준수하도록 하여야 한다.

2.3.7 건설사업관리기술자는 산업재해 예방을 위한 제반 안전관리 지도에 적극적인 노력을 경주하도록 함과 동시에 안전관계법규를 이행하도록 하기 위하여 다음 각 호와 같은 업무를 수행하여야 한다.

(1) 시공자의 안전조직 편성 및 임무의 법상 구비조건 충족 및 실질적인 활동 가능성 검토

(2) 안전관리자에 대한 임무수행 능력 보유 및 권한 부여 검토

(3) 시공계획과 연계된 안전계획의 수립 및 그 내용의 실효성 검토

(4) 유해, 위험 방지계획(수립 대상에 한함) 내용 및 실천 가능성 검토(「산업안전보건법」제48조제3항, 제4항)

(5) 안전점검 및 안전교육 계획의 수립 여부와 내용의 적정성 검토

(6) 안전관리 예산편성 및 집행계획의 적정성 검토

(7) 현장 안전관리 규정의 비치 및 그 내용의 적정성 검토

(8) 표준안전관리비는 타 용도에 사용 불가

(9) 건설사업관리기술자가 시공자에게 시공과정 마다 발생될 수 있는 HRA(위험요소/위험성/저감대책)를 도출하고 이를 방지할 수 있는 절차, 수단 등을 규정한 “총체적 안전관리계획서 (TSC : Total Safety Control)”를 작성․활용토록 적극 권장 하여야 한다.

(10) 안전관리계획의 이행 및 여건 변동시 계획변경 여부

(11) 안전보건 협의회 구성 및 운영상태

(12) 안전점검계획 수립 및 실시 (일일, 주간, 우기 및 해빙기 등 자체안전점검,「건설기술 진흥법」에 따른 안전점검, 안전진단 등)

(13) 건설신기술 또는 특허공법 등이 건설공사에 적용되는 경우 HRA(위험요소/위험성/저감대책) 검토를 실시하여 자체안전점검표에 반영 여부

(14) 안전교육계획의 실시 (사내 안전교육, 직무교육)

(15) 위험장소 및 작업에 대한 안전조치 이행

(고소작업, 추락위험작업, 낙하비래 위험작업, 발파작업, 중량물 취급작업, 전기시설 및 취급작업, 화재위험작업, 건설기계 위험작업 등)

(16) 안전표지 부착 및 유지관리

(17) 안전통로 확보, 자재의 적치 및 정리정돈

(18) 사고조사 및 원인 분석, 각종 통계자료 유지

(19) 월간 안전관리비 사용실적 확인

(20) 종합보고서 및 안전관리문서 검토

2.3.8 건설사업관리기술자는 안전에 관한 업무를 수행하기 위하여 시공자에게 다음 각 호의 자료를 기록․유지토록 하고 이행상태를 점검한다.

(1) 안전업무 일지(일일보고)

(2) 안전점검 실시(안전업무일지에 포함 가능)

(3) 안전교육(안전업무일지에 포함가능)

(4) 각종 사고보고

(5) 월간 안전 통계(무재해, 사고)

(6) 안전관리비 사용실적 (수시로 점검․확인)

2.8.9 건설사업관리기술자는 건설공사 안전관리계획 내용에 따라 안전조치․점검 등 이행을 하였는지의 여부를 확인하고 미이행 시 시공자로 하여금 안전조치․점검 등을 선행한 후 시공하게 한다.

2.8.10 건설사업관리기술자는 시공자가 「건설기술 진흥법 시행령」제100조에 따라 자체 안전점검을 매일 실시하였는지의 여부와 자체안전점검표에 설계단계에서 넘겨받거나 시공단계에서 검토한 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항들이 반영되어 있는지를 확인하여야 하며, 건설안전점검전문기관에 의뢰하여야 하는 정기 ․정밀 안전점검을 할 때에는 입회하여 적정한 점검이 이루어지는지를 확인한다.

2.8.11 건설사업관리기술자는 「건설기술 진흥법 시행령」제100조에 따라 시행한 정기․정밀 안전점검 결과를 시공자로부터 제출 받아 검토하여 발주청에 보고하고 발주청의 지시에 따라 시공자에게 필요한 조치를 하게 한다.

2.8.12 건설사업관리기술자는 시공회사의 안전관리책임자와 안전관리자 등을 교육시키고 이들로 하여금 현장 근무자에게 다음 각 호의 내용과 자료가 포함된 안전교육을 실시토록 지도․감독하여야 한다.

(1) 산업재해에 관한 통계 및 정보

(2) 작업자의 자질에 관한 사항

(3) 안전관리조직에 관한 사항

(4) 안전제도, 기준 및 절차에 관한 사항

(5) 생산공정에 관한 사항

(6) 산업안전보건법 등 관계법규에 관한 사항

(7) 작업환경관리 및 안전작업 방법

(8) 현장안전 개선방법

(9) 안전관리 기법

(10) 이상발견 및 사고발생시 처리방법

(11) 안전점검 지도요령과 사고조사 분석요령

(12) HRA(위험요소/위험성/저감대책) 도출 및 HRA(위험요소/위험성/저감대책)를 반영한 자체안전점검표 작성 요령

2.4 안전관리결과 보고서의 검토

2.4.1 건설사업관리기술자는 매 분기별 시공사로부터 안전관리 결과보고서를 제출 받아 이를 검토하고 미비한 사항이 있을 시는 시정조치를 하여야 하며, 안전관리 결과보고서에는 다음과 같은 서류가 포함되도록 해야 한다.

(1) 안전관리 조직표

(2) 안전보건 관리체제

(3) 재해발생 현황

(4) 안전교육 실적표

(5) 설계단계에서 넘겨받거나 시공단계에서 검토한 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항

(6) 중대건설현장사고가 발생한 현장의 경우 사고 개요, 원인, 재발방지대책 등이 포함된 사고조사보고서, 보고서는 HRA(위험요소/위험성/저감대책) 형태로 작성

(7) 기타 필요한 서류

2.5 사고처리

2.5.1 건설사업관리기술자는 현장에서 사고가 발생하였을 경우에는 시공자에게 즉시 필요한 응급조치를 취하도록 하고 건설사고조사 업무매뉴얼 별지 제2호 서식(본 매뉴얼 부록6)을 활용하여 상세한 경위 및 검토의견서를 첨부하여 발주청에 지체 없이 보고하여야 한다.

3. 공사완료

3.1 건설공사 안전점검 종합보고서의 검토

3.1.1 건설사업관리기술자는 시공자가 제출한 건설공사 안전점검 종합보고서를 검토하여 적정성을 검토한 후 발주자에게 제출하여야 한다.

3.2 안전관리문서의 검토

3.2.1 향후 유사 건설공사의 안전관리와 유지관리에 유용한 정보제공을 위해 건설사업관리기술자는 해당 건설공사가 준공되면, 시공자가 작성한 다음 각 호의 사항들에 대한 안전관리문서의 적정성을 검토한 후, 발주청에 제출하여야 한다.

(1) 시공자가 적용한 시공법, 절차 및 구조기준의 포함 여부

(2) 사용된 자재에 관련된 위험요소의 포함 여부

(3) 설비․장비․기계의 위치와 사양, 사용 매뉴얼의 포함 여부

(4) 설비․장비․기계의 제거나 해체, 청소와 유지관리에 관한 요구사항의 포함여부

(5) 설계단계에서 넘겨받거나 시공단계에서 검토한 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항

(6) 중대건설현장사고가 발생한 현장의 경우 사고 개요, 원인, 재발방지대책 등이 포함된 사고조사보고서, 보고서는 HRA(위험요소/위험성/저감대책) 형태로 작성

(7) 시공단계에서 도출되어 유지관리단계에서 반드시 고려해야 하는 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항(유지관리계획에 반영되어야 함)

제 6 장

취약공종의 안전관리업무

		제6장 취약공종의 안전관리업무

건설공사에 있어 안전확보의 중요성은 매우 높으며 대형 건설사고는 감소하고 있으나, 터파기, 비탈면, 가시설공 등 취약공종에 대한 안전사고가 유사한 원인에 의하여 계속 발생되고 있다. 또한 지반굴착 안전성확보를 위하여 실시하는 계측에 대한 기준 미비로 부실공사 및 안전사고의 가능성을 내포하고 있어, 제시된 취약공종 및 계측에 대한 안전관리 기준 고려하여 시공이 이루어진다면, 안전사고를 예방 또는 저감할 수 있을 것이다. 따라서 발주자 및 건설사업관리기술자는 안전사고의 예방을 위해 시공자로 하여금 본 매뉴얼에 제시된 안전관리업무를 수행토록 해야 한다.

1. 가시설공 안전관리

1.1 가설구조물의 시공상세도 작성 및 안전성 검토

1.1.1 시공자는 다음 각 호의 건설공사에 해당하는 가설구조물을 시공하는 경우에는 시공상세도 및 구조계산서를 작성하고 이를 건설사업관리기술자 또는 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

(1) 높이 10m이상의 비탈면 흙깎기공사

(2) 터널굴착공사

(3) 지하 10m 이상을 굴착하는 건설공사(건축공사 포함)

※ 시공상세도 작성은 국토교통부 ‘건설공사 시공상세도 작성지침(2010)“ 참조

1.1.2 시공자는 콘크리트 시공 시에 작용하는 수직하중, 수평하중, 콘크리트 측압 및 풍하중 등에 대해 거푸집 및 동바리의 안전성을 검토하여야 한다. 이 경우 시공자는 가장 불리한 하중조건에 대한 가시설의 응력, 변형, 안정, 피로 등의 제반 거동에 대한 검토를 하여야 한다.

1.2 거푸집·동바리의 시공 및 관리

1.2.1 시공자는 거푸집 및 동바리를 시공계획서(안전관리계획서 상의 콘크리트공사 세부 안전관리계획 포함)에 따라 시공하여야 한다.

1.2.2 콘크리트를 시공한 경우에 시공허용오차를 넘는 변형이 발생하지 않도록 거푸집 및 동바리를 제작, 설치하여야 하여야 한다.

1.2.3 시스템동바리를 시공하는 경우에 시공자는 납품자가 제시한 설치 및 해체 방법과 안전수칙을 준수하여야 하며 시공상세도에 따라 정확히 설치한 후 검사하여 안전성을 확인하여야 한다.

1.2.4 시공자는 클라이밍 폼의 인양 및 상승 작업 전에 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

(1) 콘크리트 압축강도에 대한 상부 앵커의 강도

(2) 거푸집 긴결재(form tie) 및 앵커의 해체

(3) 지정된 인원을 제외한 근로자의 철수

(4) 간섭 또는 방해되는 요인

1.2.5 클라이밍 폼의 시공자는 거푸집 긴결재, 앵커 등의 위치와 클라이밍 폼의 수직도 및 레벨 등에 대한 측량 결과를 발주자 또는 건설사업관리기술자에게 승인받은 후에 콘크리트를 타설하여야 한다.

1.2.6 테이블 폼의 시공자는 테이블 폼의 설치 완료 후 시공상세도면과의 일치 여부 및 각 부재의 체결강도 등에 대한 검사를 실시하여야 하며, 발주자 또는 건설사업관리기술자에게 승인받은 후에 콘크리트를 타설하여야 한다.

1.2.7 노출 콘크리트용 거푸집은 외부진동, 재진동 및 슬럼프 값이 큰 콘크리트 타설 등에 대비하여 충분한 강성을 가져야하며, 시공자는 견품을 만들어 색상, 표면의 질과 모양 등을 사전에 발주자 또는 건설사업관리기술자에게 확인받아야 한다.

1.2.8 시공자가 거푸집 및 동바리를 재사용할 경우에는 손상, 변형, 작동 가능 여부를 검사하여 설계요건을 만족할 수 있는지를 발주자 또는 건설사업관리기술자가 확인받은 후에 재사용하여야 한다.

1.3 거푸집·동바리의 해체

1.3.1 거푸집 및 동바리는 타설한 콘크리트가 예상되는 하중에 충분히 견딜만한 강도를 발휘하기 전에 해체해서는 안 되며, 그 시기 및 순서는 공사시방으로 정하여야 한다.

1.3.2 동바리를 해체하는 경우 해당 부재에 가해지는 하중이 구조계산서에서 제시한 그 부재의 설계하중보다 큰 경우에는 구조계산에 의하여 충분히 안전한 것을 확인 한 후에 해체하여야 한다.

1.4 교량용 이동식 가설구조물

1.4.1 교량용 이동식 가설구조물을 설계하는 경우에는 작업하중과 장비하중의 실 중량을 기준으로 설계하여야 한다.

1.4.2 외국의 설계기준에 따라 설계한 교량용 이동식 가시설물을 시공하는 경우에는 해당분야 상주 또는 기술지원기술자의 검토 및 발주자의 승인을 받아 시공하여야 한다.

1.4.3 시공자는 가설구조물 제작자가 제공한 매뉴얼 및 설계도를 건설사업관리기술자의 검토 및 발주자의 승인을 받아야 하며 이의 변경 시에도 동일하다.

1.4.4 시공자는 주요공정 및 안전관리를 위하여 중요한 공정에 대하여 시공계획서(안전관리계획서 상의 세부 안전관리계획 포함)를 작성하여 건설사업관리기술자의 검토 및 발주자의 승인을 받아야 한다.

1.4.5 시공자는 이동식 가설구조물과 가설공사 전반에 대하여 구조공학적 지식과 시공관리 능력이 있는 가설공사 전담기술자(고급기술자 이상)를 배치하여야 한다.

1.4.6 시공자는 작업원이 작업 시작 전에 작업내용, 순서 및 역할 등을 숙지할 수 있도록 교육을 실시하여야 하며 PSM공법의 런칭거더 운전은 별도의 이론 및 실무교육을 받은 자 중 시공자가 승인한 운전원이 하도록 하여야 한다.

1.4.7 가설구조물의 연결부, 지점부에 사용되는 볼트, 앵커, 핀, 미끄럼판, 유압실린더는 설계도서와 일치하는 것을 사용하여야 하며, 이를 변경하는 경우에는 사전에 발주자의 승인을 받아야 한다.

1.4.8 시공자는 이동식 가시설공법을 활용하여 교량을 시공하는 경우 공법에 따라 다음 각 호의 사항에 대한 처짐을 관리하여야 한다.

(1) FCM : 세그먼트의 처짐, 교각 기초의 침하, 교각의 크리프 및 건조수축에 의한 영향, 작업차 각 부재의 변형, 주형의 횡방향 변형

(2) MSS : 주 거더의 자중에 의한 처짐, 교량 상부 시공하중에 의한 주 거더의 처짐, 후방지지 현수재 지점반력에 의한 주 거더의 처짐, 분할 시공 시 교량 상부구조 자중에 의한 교량 상부구조의 처짐, 포스트텐셔닝 및 크리프에 의한 교량 상부구조의 처짐

(3) 지반의 침하, 동바리 부재의 좌굴 및 탄성변형, 동바리 철거 후 교량 상부구조물의 변형, 콘크리트 크리프 등의 소성변형

1.5 터널 라이닝용 거푸집 및 동바리

1.5.1 거푸집은 터널의 굴착 및 콘크리트 타설공법 등에 따라 아치, 측벽 및 하부바닥 부분으로 분절하여 제작하거나 전단면으로 제작하여야 한다.

1.5.2 거푸집은 선로평면 중심과 종단 기공기면의 측량 기준점을 기준으로 정밀하게 측량하여 설치하여야 하며, 발주자 또는 건설사업관리기술자의 확인 후에 시공하여야 한다.

1.5.3 거푸집을 지지하는 유압잭은 콘크리트 타설 및 거푸집 이동 시에 손상 및 변형이 없도록 배치하고, 충분한 강성을 확보하도록 하여야 한다.

1.5.4 거푸집은 콘크리트 타설 후 최종 타설한 아치 상부의 콘크리트 강도가 자중에 견딜 수 있을 때까지 양생한 후에 해체하여야 한다.

2. 지반굴착(터파기) 안전관리

2.1 지반조사 및 안전작업 계획수립

2.1.1 지반의 굴착작업에 있어서 지반의 붕괴 또는 매설물 및 그 밖에 지하공작물(이하 "매설물등"이라 한다)의 손괴 등 우려가 있는 때에는 미리 작업장소 및 그 주변의 지반에 대하여 보링 등 적절한 방법으로 다음 각 호의 사항을 조사하여 굴착시기와 작업순서를 정하여야 한다.

(1) 지반 형상·지질 및 지층의 상태

(2) 균열·함수·용수 및 동결의 유무 또는 상태

(3) 지하매설물 도면 확인 및 매설물 등의 유무 또는 상태

(4) 지반의 지하수위 상태

(5) 인접구조물의 현황 및 상태

2.1.2 지반을 굴착하는 공종 착공 전에 다음 각 호의 사항에 대한 안전작업 계획을 수립하여야 한다.

(1) 지반형상, 지층상태, 지하수위 등 사전조사 결과를 바탕으로 굴착공법 및 순서, 토사반출 방법

(2) 공사물량에 따른 소요인원 및 장비 투입 운영계획

(3) 굴착예정지의 주변 및 지하매설물 조사결과에 따라 작업에 지장을 주는 가스관, 상·하수도관, 통신케이블 등 장애물이 있는 경우 이설·제거·거치 보전 대책

(4) 우수 및 용출수에 대비한 배수(배수장비, 배수경로)처리

(5) 굴착기계, 운반기계 등의 운전자와 작업자 또는 책임자 상호간 수기신호, 무선통신 등의 연락 신호체계

(6) 흙막이지보공을 설치하는 경우 계측 종류를 포함한 계측 계획

(7) 굴착장비별 안전대책

(8) 굴착작업 과정에서 발생되는 작업자 재해요인별 안전시설물 설치 방법

(9) 유해가스가 발생될 수 있는 굴착 작업장소인 경우 유해가스 측정 및 환기계획

(10) 토사반출을 목적으로 복공구조의 시설을 필요로 할 경우 적재하중 조건을 고려하여 구조계산에 의한 복공판 설치계획

(11) 소음 및 진동에 대한 대책

2.2 토질 및 암질변화에 따른 추가조사의 실시

2.2.1 비탈면, 터널, 터파기공사의 시공과정에서 다음 각 호의 사항이 발견되면 추가조사를 실시하여야 하며, 발주자(감독권한 대행 등건설사업관리를 실시하는 경우에는 건설사업관리기술자)에게 해당사항을 보고하여야 한다.

(1) 설계 시 예상하지 못했던 단층 발견 시

(2) 설계 시 발견하지 못했던 지하수맥 발견 시

(3) 심각한 토질 및 암질 변화가 확인 또는 예상되어 추가조사 및 설계변경이 필요하다고 인정되는 때

2.2.2 추가 지반조사(2.2.1항) 결과에 따라 작업계획을 재검토해야 할 필요가 있을 때에는 공법이 결정 될 때까지 해당 공종의 공사를 중지하여야 한다.

2.2.3 발주자(감독권한 대행 등 건설사업관리를 실시하는 경우에는 건설사업관리기술자)는 제2.2.1항에 따라 보고받은 경우에는 설계변경의 필요성을 검토하고 필요한 경우 시공자로 하여금 설계변경을 실시토록 하여야 한다. 또한 설계변경에 소요되는 비용은 발주자가 설계에 반영하여 지급하여야 한다.

2.2.4 시공자가 설계변경을 하는 경우 설계변경에 따른 안전성검토를 포함하여야 하며, 이를 발주자에게 제출하여야 한다.

2.3 지반굴착작업의 페이스 맵핑 실시

2.3.1 시공자는 아래 각 호의 건설공사시 시설물의 안전확보를 위하여 지반분야 고급기술자(토질 또는 응용지질분야 실무경력 5년 이상)에 의한 페이스 맵핑을 실시하여야 한다.

(1) 높이 10m이상의 비탈면 흙깎기공사

(2) 터널굴착공사

(3) 지하 10m 이상을 굴착하는 건설공사(건축공사 포함)

2.3.2 시공자는 터널 및 비탈면 흙깎기공사의 일정 단계(막장 또는 소단별)마다 다음 단계 진행 전에 페이스 맵핑을 실시하여야 한다.

2.3.3 시공자는 페이스 맵핑 결과를 고려하여 설계에 반영되어 있는 비탈면 보강 또는 터널 지보량의 적정성 여부를 평가하여야 하며, 설계와 다르게 급격한 토(암)질 변화가 발생되었을 경우, 또는 감독자가 필요하다고 판단한 경우에는 건설사업관리기술자 또는 지반분야 전문가(토질 및 기초기술사 또는 지질 및 지반기술사)에 의한 안전성 검토를 실시하여야 한다.

2.4 지반굴착작업의 안전확보 조치

2.4.1 지반굴착작업은 2.1.2항에서 수립한 계획에 따라 작업을 실시하여야 한다.

2.4.2 지반의 종류에 따라 지반조사와 안전성검토 결과에 따른 굴착면의 기울기를 준수하여야 한다.

2.4.3 굴착토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면에 쌓아두어서는 안 된다.

2.4.4 매설물, 장애물 등에 항상 주의하고 매설물이 손상되지 않도록 보호하여야 한다. 이 경우 도시가스매설배관보호를 위하여「도시가스사업법」제30조의4(가스안전 영향평가), 제30조의5(협의ㆍ순회점검), 제30조의6(도시가스배관 손상방지기준의 준수), 30조의7(도시가스배관의 안전조치 등)를 준수하여야 한다.

2.4.5 용수가 발생한 때에는 작업을 중단하고 신속하게 배수하여야 하며 흙막이지보공의 배면에 우수 등이 유입되지 않도록 차수시설을 하여야 한다.

2.4.6 배수를 위해 수중펌프를 설치·사용하는 경우에는 외함접지 및 누전차단기를 설치하고 이의 작동 여부를 확인하여야 한다.

2.4.7 도시가스의 누출, 메탄가스 등의 발생이 우려되는 경우에는 화기를 사용하여서는 아니 된다.

2.4.8 위험 장소에는 작업자 이외의 자가 접근하지 못하도록 표지판을 설치하거나 감시인을 배치하여야 한다.

2.4.9 토사 붕괴의 발생을 예방하기 위하여 작업과정에서 비온 후 또는 인접 작업구역에서 발파한 경우에 다음 각 호의 사항을 점검하여야 한다.

(1) 전 지표면의 답사

(2) 경사면의 지층 변화부 상황 확인

(3) 부석의 상황 변화의 확인

(4) 용수의 발생 유·무와 용수량의 변화 확인

(5) 결빙과 해빙에 대한 상황의 확인

(6) 각종 경사면 보호공의 변위, 탈락 유·무

(7) 계측계획 및 계측결과 확인

2.5 흙막이 지보공의 안전확보 조치

2.5.1 흙막이지보공을 설치하는 경우에는 지보공 부재의 설치순서에 맞도록 굴착을 진행하여야 하며, 과다한 굴착이 진행되지 않도록 적기에 흙막이지보공을 설치하여야 한다.

2.5.2 흙막이지보공을 설치하는 장소의 지하수, 지형 및 지질 등을 고려하여 다음 각 호의 계측기를 설치하여야 한다. 다만, 계측기의 설치가 곤란한 경우에는 데오도라이트, 트랜싯, 레벨 측량기 등으로 수직, 수평변위 발생여부를 측정하여야 한다.

(1) 지하수위계

(2) 경사계

(3) 하중 및 침하계

(4) 응력계

2.5.3 계측기기 판독 및 측량 결과 수직, 수평 변위량 등이 허용범위를 초과한 경우에는 이에 따른 조치를 즉시 취하여야 한다.

2.5.4 히빙(Heaving), 파이핑(Piping) 및 보일링(Boiling) 현상 발생에 대비하여 흙막이 지보공의 하단부를 굴착하는 경우에는 이상 유무를 정밀하게 관측하여야 한다.

2.5.5 앵커를 설치하는 경우에는 인장기는 충분한 인장을 가할 수 있는 규격품을 사용하여야 하며, 인장강선을 재인장에 대비하여 여유를 두고 절단하여야 한다.

2.5.6 정기적으로 앵커 인장력을 확인하여 인장력의 손실이 발생한 경우 재인장 등 보강대책을 마련하여야 한다.

3. 비탈면 안전관리

3.1 비탈면 조사 및 계획수립

3.1.1 비탈면 설계에 필요한 각종 자료와 정보를 얻기 위하여 해당 비탈면에 대한 예비조사, 본조사, 보완조사를 실시하여야 한다.

3.1.2 비탈면 조사는 사업규모 및 예상되는 비탈면의 규모를 고려하여 각 단계별 조사목적에 부합하도록 조사계획을 수립한 후 실시한다. 조사계획을 수립할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

(1) 조사목적

(2) 조사항목과 조사방법

(3) 조사위치 및 조사수량

3.1.3 예비조사, 본조사, 보완조사의 구체적인 조사방법, 수량 등은 ‘건설공사 비탈면 설계기준’에 따라 실시하여야 한다.

3.1.4 시공 중에 실시하는 비탈면 조사 내용은 다음과 같으며, 불안정요인을 갖는 지형․지질 조건인 경우에는 해당 요인별 조사를 추가로 실시하여야 한다.

(1) 설계단계에서 고려된 내용

(2) 녹화공법 적용을 위한 조사

(3) 배수시설 적용을 위한 조사

(4) 시공 중 안정해석을 위한 조사

3.2 비탈면 쌓기공사

3.2.1 쌓기재료는 설계도서에 표시된 두께로 층이 같은 수평층을 이루도록 포설하여야 하며, 다음 층을 포설하기 전에 소정의 다짐을 하여야 한다.

3.2.2 점성토, 사질토와 같이 그 특성이 다른 재료가 각기 다른 공급원에서 도입될 때에는 교대로 층을 이루도록 포설하여야 한다.

3.2.3 쌓기속도는 쌓기재료 및 지반조건을 고려하여 산정된 최적성토속도에 따라 시공하여 장기누적침하량을 최소로 하여야 한다.

3.2.4 쌓기･깎기 접속부는 지표수, 침투수 등이 집중하기 쉽고 기초지반과 쌓기부의 접착이 불충분하게 되기 쉬우므로 설계도서에 따라 층따기를 해야 한다.

3.3 비탈면 깎기공사

3.3.1 암비탈면의 경우에는 암발생 즉시 불연속면의 경사, 절리간격, 암종, 암질, 용수지점, 균열충진물질 등을 조사하여 비탈면의 안전여부를 판단하고, 그 결과를 발주자 또는 건설사업관리기술자에게 보고하고 현황도(페이스 맵핑)를 관리해야 한다.

3.3.2 높이 20m 이상의 비탈면 흙깎기공사는 단계(소단)별로 암분류(판정)을 실시하여  절취단계별로 보강을 실시한 후 다음 단계를 굴착하여야 한다.

3.3.3 깎기를 할 때는 비탈면 안정에 영향을 주지 않도록 해야 하며, 깎기시공 중에는 토질의 변화 및 용출수 상황을 관찰, 기록하여 발주자 또는 건설사업관리기술자에게 보고해야 한다.

3.3.4 비탈면 끝에서는 일시에 대량으로 깎기를 해서는 안 되며, 깎기 중 또는 깎기완료 후에 비탈면이 연약화된 경우는 관련분야 특급기술자의 검토서를 발주자 또는 건설사업관리기술자에게 제출해야 한다.

4. 계측기 설치 및 관리

4.1 계측책임자의 선임 및 직무

4.1.1 시공자는 해당 건설공사에서 계측을 실시하는 경우에는 건설공사 착공 전에 해당분야 특급기술자를 “계측책임기술자”로 선임하여 발주자(감독권한 대행 등 건설사업관리를 실시하는 경우에는 건설사업관리기술자)의 승인을 득하여야 한다.

4.1.2 계측책임기술자는 계측계획의 수립, 계측기기의 설치, 계측결과의 분석과 같은 제반 계측관리 업무를 수행하여야 한다.

4.1.3 발주자는 계측기설치 및 관리에 소요되는 비용을 공사비에 계상하여야 한다.

4.2 계측관리업무 수행계획서의 작성

4.2.1 계측책임기술자는 건설공사 수행 시 시공품질 확보를 위한 다양한 계측계획이 포함된 계측관리업무 수행계획서를 작성하여 건설사업관리기술자의 검토를 받아 발주자에게 제출하여야 한다. 다만, 시공자가 다음 각 호의 취약공정이 포함된 공사를 수행하는 경우에는 해당공정에 대한 안전관리 계측계획을 포함하여야 한다.

(1) 굴착심도 10m 이상의 지하터파기 공정

(2) 높이 5m, 길이 20m 이상의 비탈면 절취 공정

(3) 2차로 이상의 터널굴착 공정

(4) 그밖에 발주자 및 건설사업관리기술자가 계측이 필요하다고 인정하는 공정

4.2.2 계측책임기술자를 변경하는 경우에 시공자는 이를 발주자에게 보고하고 사전에 승인을 받아야 한다.

4.2.3 계측관리업무 수행계획에는 계측의 목적을 효과적으로 달성할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

(1) 계측대상시설물(공사)의 개요

(2) 계측대상시설물의 구조적 특성

(3) 계측업무 수행체계

(4) 계측목적, 계측항목 및 수량, 계측기기 설치위치, 측정방법 및 빈도, 계측시스템의 구성

(5) 계측기기의 종류, 사양

(6) 계측기기의 설치 및 유지관리 방안

(7) 계측자료의 분석방법 및 항목별 관리기준치 설정방법

(8) 계측자료의 보관, 활용 방안

(9) 관리기준치 초과 시 예상 대처방안

4.3 취약공정 안전관리 계측계획의 수립

4.3.1 계측책임기술자는 비탈면 절취공종에 대하여 다음 각 호에 따라 안전관리 계측계획을 수립하여야 한다.

(1) 비탈면 절취공사 수행 시 계측단면의 선정은 설계 시 실시한 지반조사를 토대로 굴착 시 비탈면의 안정성이 의심되는 단면, 큰 변형이 예상되는 단면, 굴착으로 인해 주변 시설물의 변형이 예상되는 단면 등을 대상으로 선정한다.

(2) 비탈면의 안전확보를 위한 계측항목으로는 지표거동(변위, 기울기, 균열변화 등), 지중거동(침하 및 경사), 지하수위변화, 강우량측정 등이 있으며, 계측기기 수량 및 설치위치는 현장상황을 감안하여 결정한다.

(3) 비탈면 굴착영향권 내에 시설물이 있는 경우에는 굴착으로 인한 시설물의 안전성을 확보하기 위한 별도의 계측항목을 추가한다.

4.3.2 계측책임기술자는 지하터파기 공종에 대하여 다음 각 호에 따라 안전관리 계측계획을 수립하여야 한다.

(1) 지하터파기 공사 수행 시 굴착면마다 최소 1개 이상의 계측단면을 선정하여야 한다.

(2) 계측단면에는 지반과 토류벽의 횡방향 거동을 측정하는 지중경사계, 토류벽을 지지하는 버팀대 및 어스앵커의 축력을 측정하는 축력계, 배면지반의 침하를 측정하는 지표 및 지중침하계, 지하수위의 변화를 측정하기 위한 지하수위계를 설치하여야 한다.

(3) 토류벽 배면에 공용중인 시설물이 있을 경우에는 굴착에 의한 시설물의 거동변화를 측정하는 경사계를 설치하여야 한다.

(4) 일련의 계측기기들을 동일한 단면에 설치함으로써 굴착공정의 진행에 따른 지반 및 지하수위의 변화, 가시설의 부재력, 인근 시설물의 거동변화를 상호 연계하여 분석할 수 있어야 한다.

4.4 계측기 설치준비 및 설치

4.4.1 시공자는 현장여건 및 사용목적에 적합한 계측장비를 확보하여야 하며, 계측기기의 구입 및 설치 전에 각종장비 및 센서의 사양 및 설치지침서를 발주자 또는 건설사업관리기술자에게 제출하고 승인을 득하여야 한다.

4.4.2 계측센서와 측정장비는 발주자 또는 건설사업관리기술자가 승인한 도면에 표시된 위치에 정확히 설치되어야 하며, 현장여건상 설치가 곤란하거나 설치위치를 변경하여야 할 때에는 사전에 발주자 또는 건설사업관리기술자의 승인을 득하여야 한다.

4.4.3 계측책임기술자는 계측기기 설치 전에 각 계측기기의 제작사가 제공한 설치지침서를 검토하여 계측기기 설치 시 발생될 수 있는 문제점을 미리 도출하여 대책을 수립하여야 하며, 설치지침서에 명시된 절차에 따라 정확하게 설치될 수 있도록 준비하여야 한다.

4.4.4 계측기기의 설치는 가능한 한 시공공정의 진행에 지장이 없도록 하여야 하며, 계측기기의 설치로 인해 공정에 영향이 예상될 경우 사전에 발주자와 협의하여 대책을 수립하여야 한다.

4.4.5 계측기기의 설치 시 매일 설치작업을 발주자 또는 건설사업관리기술자에게 통보하여 계측 및 시공 작업자가 상호간에 작업내용을 숙지할 수 있어야 하며, 설치작업자의 안전이 확보될 수 있도록 수시로 의견을 교환하여야 한다.

4.4.6 계측책임기술자는 계측기기의 설치 시 계측기기 주변에 계측결과에 영향을 주는 인자(온도, 습도, 진동, 전자기장 등)가 있는지 확인하여야 하며, 설치 시 또는 계측관리 시 이러한 영향인자가 발생하면 즉시 대책을 수립하여 조치하여야 한다.

4.4.7 계측책임기술자는 계측기기의 설치완료 후 전체 계측시스템에 대한 검증시험을 실시한 후, 설치완료보고서를 작성하고 이를 발주자에게 제출하여 승인을 득한 후 계측관리 업무를 진행하여야 한다.

4.5 계측기 보호

4.5.1 계측책임기술자는 계측기기의 파손여부를 수시로 확인하여야 하며, 파손이 발생하였을 경우에는 즉시 이를 원상 복구하여야 한다.

4.5.2 계측책임기술자는 계측기기의 설치 후 계측기기 주변에서 시행되는 각종 공사로 인하여 계측기기의 파손 및 작동불량 등이 발생하지 않도록 계측기기를 충분히 보호하여야 하며, 작업자가 이를 쉽게 인지할 수 있도록 안내판을 설치하여야 한다.

4.5.3 계측책임기술자는 계측기기 및 보호장치의 유지관리 책임도 동시에 가지며, 유지관리 책임자의 소속, 성명, 연락처를 명기하여 계측기기나 보호장치 외부에 부착하고 관리하여야 한다.

4.6 계측 빈도

4.6.1 계측은 자동계측을 원칙으로 하고, 현장 여건상 자동계측이 불가능한 경우 및 계측대상 지반, 시설물  특성 및 중요도 등을 고려할 때 자동계측이 불필요하다고 판단될 경우에는 발주자의 승인을 득하여 수동계측을 실시할 수 있다.

4.6.2 계측은 계측대상 지반 또는 시설물의 특성 및 현장 조건, 계측기기의 종류, 계측데이터의 변화속도 등을 종합적으로 고려하여 계측빈도를 정하고 건설사업관리기술자의 승인을 득하여 계측을 실시하여야 한다.

4.6.3 자동계측시스템은 이상거동이 측정될 경우 즉시 이를 시공자에게 공지할 수 있도록 경보장치가 포함되어야 한다.

4.7 계측실시 및 결과보고

4.7.1 계측은 해당공정의 시공이 완료되어 충분히 안전이 확보된 것으로 판단될 때까지 수행하며, 계측결과 및 계측 중 실시한 조치방안을 요약한 계측완료보고서를 작성하여 발주자에게 제출한다.

4.7.2 계측결과는 측정일자, 경과일수, 초기치, 금회/누계 측정치 등을 정해진 양식에 계측항목별로 정리하여 보고하여야 하며, 대상시설물의 안전여부를 쉽게 판단할 수 있도록 ‘시간-측정치’ 변화를 그래프로 작성하여 제출하여야 한다.

4.7.3 계측결과의 분석은 대상시설물의 종류에 따라 구조 및 지반을 전공한 특급기술자가 수행하여야 하며, 계측결과와 해석결과 및 유사 계측결과와의 비교분석을 통해 대상시설물의 안전성 여부를 정확하게 판단하여야 한다.

4.7.4 계측책임기술자는 계측분석 결과, 대상시설물에 이상이 발생한 것으로 판단될 경우에는 이를 즉시 발주자에게 통보하여야 하며, 발주자와 건설사업관리기술자와 같이 조치방안을 수립하여 적용하여야 한다.

4.7.5 계측책임기술자는 태풍, 지진, 홍수 등 이상기후에 의한 천재지변이 발생하였을 경우에도 전체 계측항목에 대한 계측분석을 즉시 실시함으로써 대상시설물의 안전성을 즉시 판단하여 조치여부를 발주자에게 통보하여야 한다.

4.7.6 계측책임기술자는 계측결과를 발주자에게 다음의 내용을 포함하여 일일보고, 주간보고, 월간보고의 형태로 보고하여야 한다.

(1) 일일보고 : 작업내용, 계측기기 이상 유무, 이상거동발생 등

(2) 주간보고 : 대상시설물의 거동변화량, 증감속도, 계측관리치와의 비교분석 결과 그래프 및 요약결과 등

(3) 월간보고 : 전체 계측항목 측정결과 정리 및 분석결과, 시공현황과의 비교분석, 추후 대상시설물의 예상거동 추정 등

부    록

부록 Ⅰ: 안전관리계획서의 공사별 주요 검토항목

1. 건축공사

공 종 구 분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 가설공사		∘가설구조물의 재료 및 설치상태 ∘비계 안전성 ∘가설물 및 기계설비등 배치의 적정 여부
2. 굴착 및 발파공사		∘굴착, 흙막이, 발파공사 등의 공법의 적정성 ∘안전관리계획서 작성 여부 ∘지하매설물 보호조치 ∘배수계획 및 계측관리실태 ∘기계, 설비 등 배치의 적정 여부 ∘인접구조물 보호조치 ∘시공 적정성
3. 지정 및 기초공사		∘지내력 시험방법 ∘지정공법 ∘파일항타 계획
4. 철근콘크리 트 공사	거푸집 공사	∘동바리 안전성 ∘거푸집 안전성
	철근가공 조립 공사	∘가공제작도 ∘철근 이음 및 정착 ∘철근 배근의 적정성
	콘크리트 공사	∘콘크리트 치기방법, 순서, 속도, 높이 ∘콘크리트의 양생방법 및 기간 ∘품질 및 시공관리상태 ∘시공이음의 방수 ∘공사용 장비등 배치계획 ∘PS 도입장치의 적정성 ∘PS 도입작업의 안전성
5. 철골공사		∘사용부재, 장비 등의 적정 여부 ∘이음․접합부위 시공의 적정성 ∘안전시공절차 및 주의사항
6. PC공사		∘부재․장비 등의 적정 여부 ∘조립용 크레인 주행로 지반상태 ∘조립순서의 적정성 및 가조립 상태 ∘접합부의 시공 및 마감상태
7. 조적공사		∘벽체배치 계획의 적정성 ∘쌓기모르터의 충진상태 ∘쌓기방법의 적정성

2. 교량공사

분 류	표준공종	점 검 항 목	비 고
1. 기초공사	(1) 터파기	1) 지내력 확인(지내력시험 등) 여부 점검 2) 최종 굴착 종료 판정 여부 점검 3) “주변에 미치는 영향” 여부 및 점검1) 지내력 판정 시행 여부 점검
	(2) 직접기초
	(3) 말뚝기초
	(4) 우물통기초
2. 하부공사	(1) 기초공	1) 기초와의 일체성 여부 점검 2) 세굴에 대한 안전 여부 점검
	(2) 콘크리트공	1) 동바리의 안전 여부 점검 2) 비계의 안전 여부 점검 3) 1회 콘크리트 치기높이 안전 여부 점검 4) 두부 콘크리트 치기시 안전 여부 점검
3. 상부공사	(1) 콘크리트공	1) 거푸집의 안전 여부 점검 2) 동바리 안전 여부 점검 3) 비계의 안전 여부 점검 4) 콘크리트 치기순서 5) 전도나 낙교에 대한 안전 여부 점검 6) 철재 가설물의 안전 여부 7) 각종 인양장치의 안전 여부 8) PS도입 장치의 적정 여부 9) PS도입 작업의 적정성
	(2) 강구조공	1) 교각부 조립상태의 안전 여부 2) 이음부 조립상태의 안전 여부 3) 케이블의 안정성 검토 여부
4. 부대공사	(1) 교 좌	1) 안정 및 적정 여부
	(2) 신축이음
	(3) 방 수
	(4) 배 수

3. 상하수도 공사

공 종 구 분	공 종 별 점 검 항 목	비고
1. 터파기공	∘설계도서 준수여부 ∘비탈면의 시공상태 ∘지하매설물 및 인접구조물의 조사 및 보호조치 ∘배수시설 등 수방대책 ∘흙막이공의 주변여건(흙막이공) ∘가설공법의 적정성 및 가설재의 설치상태(흙막이공) ∘계측관리 상태(흙막이공) ∘재료의 품질관리 및 시공관리 상태(흙막이공 및 연약지반 처리시)
2. 관부설공	∘설계도서 준수여부 ∘지하매설물 및 인접구조물의 조사 및 보호조치 ∘관 및 변류의 규격과 재질 ∘터파기 바닥 상태 ∘연약지반의 처리상태 ∘타 시설물과의 이격거리 ∘되메움 토양 ∘배수시설 등 수방대책 ∘상부지반의 침하방지대책(관추진공) ∘하천통수단면 감소에 대한 대책(하천횡단공) ∘홍수 등 급격한 수위상승에 대한 대책(하천횡단공) ∘재료의 품질관리 및 시공관리 상태
3. 관접합공	∘설계도서 준수여부 ∘접합방법 및 시공상태 ∘현장시험방법 및 결과 ∘정류기 및 양극의 규격, 설치상태(전기방식공) ∘절연부의 Bonding 상태(전기방식공) ∘재료의 품질관리 및 시공관리 상태

4. 터널공사

분 류	표 준 공 종	점 검 항 목	비고
1. 공통사항	(1) 안전관리	1) 안전관리 조직의 운영상태 2) 교통 및 통행안전시설 관리 상태 3) 화약관리 자격소지자 확인 4) 전기관련 설비 상태(플랜트 포함) 5) 주민 홍보시설 상태점검
	(2) 환경관리	1) 환기상태 2) 조명상태 3) 폐수 및 폐기물 처리상태 4) 통로상태
2. 공사장 주변 안전공	(1) 근접구조물 보호공	1) 근접구조물 보호공 상태
	(2) 양육,가축시설보호공	1) 소음저감대책 2) 진동저감대책 3) 발파공법의 적정성
	(3) 지하매설물 보호공	1) 지하매설물 보호공 상태
	(4) 지하굴착에 따른 갈수 및 용수 보호공	1) 지하굴착공사에 따른 갈수 및 용수 보호 상태
	(5) 기타 공사장 주변 보호공	1) 기타 공사장 주변 보호공 상태
3. 가시설공	(1) 토류 구조물공	1) 토류구조물의 설치상태 및 변위 여부 2) 계측관리 상태 3) 갱구보강 상태 및 변위 여부 4) H-pile 수직도 상태 5) H-pile 근입 상태 6) 띠장 및 버팀보 상태 7) 갱구 보강 상태
4. 굴착공	(1) 굴착공	1) 발파 굴착 2) 여굴발생 조치 상태 3) 뜬돌등 제거 상태 4) 용출수 및 배수처리 상태

5. 항만공사

(1) 계류시설(중력식안벽, 잔교식 안벽, 돌핀)

공 종 구 분	점 검 항 목	비고
1. 기초공 (기초준설, 치환공)	1) 지질, 토질조사 여부 및 적정성 2) 매설물, 위험물 조사 여부 3) 배송관의 점검 4) 주변영향 조사 및 보호조치 여부 5) 해양오염 대책 6) 재료의 품질 및 규격의 적정성 7) 시공의 허용오차
2. 사석공	1) 단계별 시공조건에 따른 안정성 2) 시공중 파랑 내습에 대한 피해 방지책 유무 3) 세굴발생 여부 4) 침하계측관리 여부 5) 재료의 품질 및 규격의 적정성 6) 시공의 허용오차
3. 제작 및 거치공	1) 제작장의 상태 2) 해상운반계획 및 거치방법의 적정성 3) 거치간격의 적정성 4) 시공의 허용오차
4. 항타공	1) 말뚝(파일)의 적치상태 2) 재료의 품질 및 규격의 적정성 3) 항타계획 4) 말뚝선단 및 두부보강 5) 말뚝의 이음 6) 소음 및 진동측정과 대책 7) 말뚝의 항타 기록 8) 시공의 허용오차
5. 동바리공	1) 조위 및 파랑 적응대책 2) 말뚝손상 방지대책 3) 구조검토의 적정성 4) 콘크리트 치기전의 점검여부

공 종 구 분	점 검 항 목	비고
6. 콘크리트공	1) 비계, 동바리, 거푸집의 설치상태 2) 철근 가공 및 조립 상태 3) 콘크리트 치기방법, 순서, 속도 4) 콘크리트의 양생방법 및 기간 5) 시공이음의 방수 6) 품질 및 시공관리 상태 7) 시공의 허용오차
7. 속채움 및 뒷채움공	1) 재료의 품질 및 규격의 적정성 2) 사석투하공 및 토사 유출방지 대책 3) 시공의 허용오차
8. 매립공	1) 매립방법의 타당성 2) 펌프준설토 이용시 점검사항 3) 해양오염 방지대책 4) 침하계측관리 5) 재료의 품질 및 규격의 적정성 6) 시공의 허용오차
9. 부대공	1) 재료의 품질 및 규격의 적정성 2) 시공의 허용오차

(2) 외곽시설(방파제, 갑문, 호안)

공 종 구 분	점 검 항 목	비고
1. 기초공 (기초준설, 치환공)	1) 지질, 토질조사 여부 및 적정성 2) 매설물, 위험물 조사 여부 3) 배송관의 점검 4) 주변영향 조사 및 보호조치 여부 5) 해양오염 대책 6) 재료의 품질 및 규격의 적정성 7) 시공의 허용오차
2. 사석공	1) 단계별 시공조건에 따른 안정성 2) 시공중 파랑 내습에 대한 피해 방지책 유무 3) 세굴발생 여부 4) 침하계측관리 여부 5) 재료의 품질 및 규격의 적정성 6) 시공의 허용오차
3. 제작 및 거치공	1) 제작장의 상태 2) 해상운반계획 및 거치방법의 적정성 3) 거치간격의 적정성 4) 시공의 허용오차
4. 콘크리트공	1) 비계, 동바리, 거푸집의 설치상태 2) 철근 가공 및 조립 상태 3) 콘크리트 치기방법, 순서, 속도 4) 콘크리트의 양생방법 및 기간 5) 시공이음의 방수 6) 품질 및 시공관리 상태 7) 시공의 허용오차
5. 속채움 및 뒷채움	1) 재료의 품질 및 규격의 적정성 2) 사석투하공 및 토사 유출방지 대책 3) 시공의 허용오차
6. 가물막이공	1) 시공계획 2) 구조적 안전성 3) 파이핑 발생 유무
7. 부대공	1) 재료의 품질 및 규격의 적정성 2) 시공의 허용오차

6. 댐공사

분 류	표 준 공 종	점 검 항 목	비 고
1. 공통사항	(1) 안전관리 및 품질관리	1) 안전관리계획서 및 품질관리계획서의 적정성
	(2) 유수전환시설	1) 홍수기시 비상방류대책 2) 상․하류지역 비상연락체계 3) 월류시 피해저감 및 복구대책 4) 가물막이 및 가배수 터널
	(3) 기초굴착 및 기초처리	1) 석산, 공사용 도로 및 이설도로 2) 기초굴착상태 3) 기초처리상태 4) 파쇄대․용출수 등의 처리 5) 양안부 굴착사면
2. 필댐	(1) 댐 축조(초기단계)	1) 재료선정의 적정성 2) 다짐관리의 적정성 3) 품질관리의 적정성 4) 취수구, 방수로의 접합상태 5) 계측기 매설
	(2) 댐 축조(중간단계)	1) 수평시공과 품질관리 2) 계측계기 설치
	(3) 여수로	1) 대절토 사면 2) 기초굴착 3) 콘크리트 구조물 4) 수문설치의 적정성 5) 공사장 주변의 안전조치 적정성
	(4) 담수직후	1) 유수전환시설의 폐쇄 2) 누수 상태 3) 여수로 수문작동 상태 4) 계측기 작동 상태
3. 콘크리트댐	(1) 댐 축조 (하상기초 완료후)	1) 배수처리와 우천시 대책 2) 비계의 안전성 3) 거푸집의 안전성 4) 동바리의 안전성 5) 치기순서, 치기높이 및 치기구획의 적합성 6) 콘크리트의 품질관리 7) 양생 8) 지수설계에 대한 적정성 및 시공상태
	(2) 댐 축조(중간단계)	1) 콘크리트 치기과정의 적합성 2) 품질관리 3) 공사용 시설 안전관리 4) 콘크리트 치기용 장비운영 및 관리
	(3) 여수로	1) 콘크리트 구조물 치기상태 2) 수문설치공사의 적정성
	(4) 담수직전	1) 유수전환시설 폐쇄 2) 댐체 시공 상태 3) 여수로 수문작동 상태 4) 매설계기 관리 상태

7. 하천공사

(1) 수로

공 종 구 분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 가시설공	(1) 흙막이공 (2) 가물막이공	∘설계도서 준수여부 ∘흙막이공의 주변여건 ∘가설재의 설치상태 ∘지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치 ∘배수시설 등 수방대책 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태 ∘설계도서 준수여부 ∘가물막이공의 주변여건 ∘가설재의 설치상태 ∘지하매설물 및 주변환경에 대한 검토 및 보호조치 ∘하천의 통수단면 감소에 대한 대책 ∘홍수 등 급격한 수위상승 및 배수시설 등의 수방대책 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태
2. 기초 및 콘크리트공	(1) 기초공 (2) 비계, 동바리, 거푸집공 (3) 철근공 (4) 콘크리트공	∘설계도서 준수여부 ∘지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치 ∘말뚝길이, 수량, 위치의 설계도 부합여부 ∘항타기록 등 현장시험 실시여부 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태 ∘설계도서 준수여부 ∘비계, 동바리, 거푸집의 설치상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태 ∘설계도서 준수여부 ∘철근가공 및 조립상태 ∘철근의 치수, 간격, 이음상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태 ∘설계도서 준수여부 ∘치기방법, 순서, 속도 ∘양생방법 및 기간 ∘거푸집, 동바리 존치기간 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태
3. 되메우기 및 호안공	되메우기 및 호안공	∘설계도서 준수여부 ∘다짐방법, 순서, 시험의 준수여부 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태

(2) 제방

공 종 구 분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 하천 바닥파기, 누수방지, 연약지반보강, 기초처리공		∘설계도서 준수여부 ∘사면의 시공상태 ∘지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치 ∘배수시설 등 수방대책 ∘계측관리상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태
2. 기초 및 콘크리트공	(1) 기초공 (2) 비계, 동바리, 거푸집공 (3) 철근공 (4) 콘크리트치기, 양생공	∘설계도서 준수여부 ∘지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치 ∘말뚝길이, 수량, 위치의 설계도 부합여부 ∘항타기록 등 현장시험 실시여부 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태 ∘설계도서 준수여부 ∘비계, 동바리, 거푸집의 설치상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태 ∘설계도서 준수여부 ∘철근가공 및 조립상태 ∘철근의 치수, 간격, 이음상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태 ∘설계도서 준수여부 ∘타설방법, 순서, 속도 ∘양생방법 및 기간 ∘거푸집, 동바리 존치기간 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태
3. 본체 및 비탈면 흙 쌓기공		∘설계도서 준수여부 ∘다짐방법, 순서, 시험의 준수여부 ∘성토두께의 준수여부 ∘때붙임 시공상태 ∘호안공 시공상태 ∘계측관리상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태 ∘파이핑 여부 점검

(3) 하구둑

공 종 구 분	공 종 별 점 검 항 목		비 고
1. 배수갑문 가물막이공		∘설계도서 준수여부 ∘가물막이공의 주변여건 ∘가설재의 설치상태 ∘지하매설물 및 주변환경에 대한 검토 및 보호조치 ∘하천의 통수단면 감소에 대한 대책 ∘홍수 등 급격한 수위상승 및 배수시설 등의 수방대책 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태
2. 배수갑문 기초공		∘설계도서 준수여부 ∘지하매설물 및 인근 구조물의 조사 및 보호조치 ∘말뚝길이, 수량, 위치의 설계도 부합여부 ∘항타기록 등 현장시험 실시여부 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태
3. 배수갑문 콘크리트공	(1) 비계, 동바리, 거푸집공 (2) 철근공 (3) 콘크리트공	∘설계도서 준수여부 ∘비계, 동바리, 거푸집의 설치상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태 ∘설계도서 준수여부 ∘철근가공 및 조립상태 ∘철근의 치수, 간격, 이음상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태 ∘설계도서 준수여부 ∘치기방법, 순서, 속도 ∘양생방법 및 기간 ∘거푸집, 동바리 존치기간 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태
4. 제체 연약지반 보강공		∘설계도서 준수여부 ∘지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치 ∘계측관리상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태
5. 제체사석공		∘설계도서 준수여부 ∘체절방법, 순서의 준수여부 ∘계측관리상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태
6. 제체성토공		∘설계도서 준수여부 ∘다짐방법, 순서, 시험의 준수여부 ∘성토두께의 준수여부 ∘필터공 시공상태 ∘피복공 시공상태 ∘계측관리 상태 ∘재료의 품질관리 및 시공관리상태

부록 Ⅱ: 자체 및 정기안전점검표

1. 가설공사

(1) 자체 안전점검표

		점검대상 :		결재
NO.1		점검일자 :
구 분			점 검 사 항					점검 결과		조치 사항
1. 가 설 비 계	(1) 강관비계		∘강관 및 부속철물은 KS규격에 합당한 것인가
			∘강관은 외력에 의한 균열, 뒤틀림 등의 변형 및 부식은 없는가
			∘각부에는 깔판, 깔목 등을 사용하고 밑둥잡이를 설치하였는가
			∘비계기둥 간격은 보방향 1.5～1.8m, 간사이 방향 1.5m이하로 하였는가
			∘지상에서 첫 번째 띠장은 높이 2m 이하의 위치에 설치하였는가
			∘띠장 및 장선은 1.5m이하 간격으로 설치하였는가
			∘비계기둥의 적재하중은 400kg이하로 하였는가
			∘비계기둥의 최고부로부터 31m 되는 지점의 밑부분은 2본의 강관으로 묶어 세웠는가
			∘구조체와 수직․수평으로 5m이내마다 견고히 연결하였는가
			∘기둥간격 10m 마다 45°각도의 처마방향 가새를 설치하였으며, 가새에 접속되지 않은 기둥은 없는가
			∘지주, 띠장, 수평재, 가새 등의 접합은 전용철물(꺽쇠, 보울트 등)을 사용하였는가
			∘지주나 띠장의 이음은 동일 직선 상에 오지 않도록 하였는가
			∘벽이음이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1.0m 이내로 하였는가
			∘작업발판의 설치가 필요한 경우에는 쌍줄비계로 하였는가
			∘다음 사항을 수시로 점검하는가 - 비계발판의 손상이나 위험하게 돌출된 곳은 없는가 - 지주, 수평재, 띠장의 긴결상태가 이완된 곳은 없는가 - 벽이음이나 연결대가 풀어진 곳은 없는가 - 지주가 침하하였거나, 미끄러진 곳은 없는가

NO. 2

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1. 가 설 비 계	(2) 틀비계	∘부재에 외력에 의한 변형 또는 불량품은 없는가
		∘전체 높이가 20m를 초과할 때는 주틀의 높이를 2m 이내로 하고, 주틀간의 간격은 1.8m 이하로 하였는가
		∘주틀간의 교차 가새를 설치하고, 최상층과 5층이내 마다 수평재를 설치하였는가
		∘구조체와 수직 6m, 수평 8m 이내마다 견고히 연결하였는가
		∘밑받침을 설치하고, 고저차가 있을 때는 조절형 받침을 설치 수평․수직을 유지시켰는가
		∘각 부재, 프레트 등의 연결핀, 접합철물 또는 고정핀은 완전히 조였는가
		∘벽이음이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1m 이내로 하였는가
		∘띠장 방향으로 길이가 4m이하이고, 높이 10m를 초과하는 경우 높이 10m이내마다 띠장방향으로 버팀 기둥을 설치하였는가
		∘다음 사항은 수시로 점검하는가 - 지주의 지지물이나 각 부재의 이음 부분이 풀려있지 않은가 - 지주와 수평강관 그리고 가새의 이음 부분에 변형은 없는가 - 벽이음이나 연결대가 풀린곳은 없는가 - 지주가 침하하거나 미끄러진 곳은 없는가
	(3) 달비계	∘결속선은 #8 또는 #10 철선으로서 새것을 사용하였는가
		∘다음에 해당하는 달기 와이어로우프를 사용하지 않는가 - 한 가닥에서 소선(필러선은 제외한다)의 수가 10% 이상 절단된 것 - 지름의 감소가 공칭지름의 7%를 넘는 것 - 현저한 변형이나 부식된 것
		∘다음에 해당하는 달기 체인을 사용하지 않는가 - 길이가 제조 당시 보다 5%이상 늘어난 것 - 고리의 단면 직경이 10%이상 감소된 것
		∘달기 와이어로우프 및 달기 강선의 안전율은 10이상, 달기 체인 및 달기 후크의 안전율은 5이상으로 설치하였는가
		∘권상기에는 제동장치를 설치하였는가
		∘와이어로우프 일단은 콘크리트 구조물, 앵커 또는 권상기에 2개소 이상 묶어 결속하였는가

NO. 3

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1. 가 설 비 계	(4) 이동식 비계	∘비계에 사용된 강관은 KS규격에 합당하고, 부식, 균열, 변형 등이 없는 것으로 하였는가
		∘비계의 최대 높이는 밑변 최소 폭의 4배 이하로 설치하였는가
		∘비계의 일부를 건물에 체결하여 이동, 전도 등을 방지하였는가
		∘최대 적재하중 및 사용 책임자를 명시하였는가
		∘부재의 접속부, 교차부는 확실하게 연결하였는가
		∘최상층 및 5층 이내마다 수평재를 설치하였는가
2. 가 설 통 로	(1) 가설 경사로	∘비탈면의 경사각은 30°이내로 하고 미끄럼 방지 조치를 하였는가
		∘목재는 미송․육송 또는 동등 이상의 재질을 가진 것과, 철재는 6mm이상의 철판을 바닥판으로 사용하였는가
		∘경사로 지지기둥은 3m 이내마다 설치하였는가
		∘경사로의 폭은 최소 90cm 이상으로 하고 높이 7m 마다 계단참을 설치하였는가
	(2) 가설계단	∘가설계단은 1단의 높이가 22cm, 너비 25～30cm를 표준으로 설치하였는가
		∘계단의 폭을 옥내에서 75cm 이상, 옥외에서는 60cm 이상으로 하였는가
		∘지주 및 난간기둥 간격은 120～150cm로 적당하며 적절한 조명설비를 갖추었는가
		∘높이 7m 이내마다 계단참을 설치하였는가
		∘계단 및 계단참은 500kg/m2 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도로 설치하였는가
	(3) 작업발판	∘발판 1개는 폭 40cm 이상, 두께 3.5cm 이상, 길이 3.6m 이하의 것을 사용하였는가
		∘최대적재하중(400kg 이하), 위험경고 및 지지판을 부착하였는가
		∘작업발판 폭은 40cm 이상, 간격 3cm 이하로 발판 1개당 2개소 이상 지지하였는가
		∘이음부는 발판간에 20cm이상 겹치고 중앙부는 장선 위에 고정하였는가
		∘작업발판의 최대 폭은 1.6m 이내인가

NO. 4

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
4. 낙 하 물 방 지	(1) 방호철망	∘철망호칭 #13 내지 #16의 것, 또는 아연 도금한 철선 0.9mm 이상의 것을 사용하였는가
		∘15cm 이상 겹쳐 대고 60cm 이내의 간격으로 긴결하여 틈이 생기지 않도록 하였는가
	(2) 방호시트	∘재료의 인장강도와 신율의 곱이 500kg․mm 이상인 것을 사용하였는가
		∘방호시트 둘레 및 모서리를 잡아매는 멍에는 천을 덧대거나 기타의 방법으로 보강하였는가
		∘단열처리를 한 재료를 사용하였는가
		∘구조체와 45cm 이하의 간격으로 틈새가 없도록 설치하고 시트 상호간에도 틈새가 없도록 하였는가
	(3) 방호선반	∘시공하는 부분의 높이가 20m 이하의 높이일 때는 2단 이상으로 설치하였는가
		∘비계 발판의 외측에서 2m 이상 내밀고 수평면과 선반이 이루는 각도는 20°내지 30°정도로 하였는가
		∘선반 널은 두께 1.5cm이상의 나무판자 또는 이와 동등 이상의 효과가 있는 것을 사용한다

(2) 정기안전점검표

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1.가 설 계 획	∘가설공사 계획의 적정성
	∘가설물의 형식과 배치계획의 작성 여부
2.비계 및 발판	∘비계용 자재의 규격과 상태
	∘외부비계의 설치 상태 (지주․띠장간격)
	∘외부비계와 구조물과의 연결 상태
	∘발판의 설치 상태 (재질,틈,고정)
	∘비계용 브라켓을 사용할 때 브라켓의 고정상태 및 강도
	∘틀비계의 전도 방지 시설
3.낙하물 방지	∘낙하물 방지시설 재료의 규격과 상태
	∘낙하물 방지망의 돌출길이 및 설치 각도
	∘벽면과 비계사이에 낙하물 방지망의 설치 상태

2. 콘크리트공사

(1) 자체 안전검검표

		점검대상 :		결재
NO.1		점검일자 :
구 분			점 검 사 항					점검 결과		조치 사항
1. 거 푸 집	(1) 일반사항		∘여러번 사용으로 인하여 흠집이 많거나 접착 부분이 떨어져 구조적으로 약한 것을 사용하지 않는가
			∘거푸집의 띠장은 부러지거나 금이 나있는 것은 없는가
			∘거푸집에 못이 돌출되어 있거나 날카로운 것이 돌출되어 있지 않은가
			∘강재 거푸집은 형상이 찌그러지거나 비틀려 있는 것을 교정한 후 사용하는가
			∘강재 거푸집의 표면에 녹이 나 있는 것은 쇠솔(Wire Brush) 또는 사포 등으로 닦아 내고 박리제(Form oil)를 엷게 칠해 두었는가
			∘강재 거푸집에 붙은 콘크리트 부착물을 완전히 제거하고 박리제를 칠해 두었는가
			∘강판, 목재, 합판 거푸집은 창고에 보관하여 두거나 야적시에는 천막 등으로 덮어두고 녹 또는 부식의 방지 조치를 하였는가
			∘거푸집이 곡면일 경우에는 버팀대의 부착 등 해당 거푸집의 부상을 방지하기 위한 조치를 하였는가
			∘거푸집은 다음 순서에 의하여 조립하고 있는가 기초→기둥→벽체→보→바닥
			∘흔들림 막이 턴버클, 가새 등은 필요한 곳에 적절히 설치되었는가
	(2) 기초 거푸집		∘거푸집 설치를 위한 터파기는 여유있게 되어 있는가
			∘거푸집선 및 조립 상태가 정확한가
			∘관통구멍, 앵커보울트, 차출근의 위치, 수량, 지름 등은 정확한가
			∘독립기초의 경우 거푸집이 콘크리트 타설시에 떠오르거나 이동하지 않도록 고정되어 있는가
			∘밑창 콘크리트면의 기초 먹줄의 치수와 위치는 정확하며 도면과 일치하는가

NO. 2

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1. 거 푸 집	(3) 기둥, 벽의 거푸집	∘거푸집 하부의 위치는 정확한가
		∘기둥 및 벽거푸집은 추를 내렸을 때 수직인가
		∘건물의 요철 부분은 콘크리트 타설시 이탈되지 않도록 견고하게 조립되어 있는가
		∘하부에는 청소구가 있는지를 확인하고, 콘크리트 타설시는 완전히 닫도록 조치되어 있는가
		∘개구부의 위치와 치수 및 상자 넣기(나무토막) 등의 설치 위치는 정확한가
	(4) 보, 슬래브의 거푸집	∘거푸집의 치수는 정확한가
		∘모서리는 정확하게 조립되어 있는가
		∘슬래브의 중앙부는 처짐에 대한 약간 솟음을 두었는가
		∘기계설비 및 천정설치용 고정 장치는 설치되어 있는가
2. 철 근 공	(1) 가공	∘철근은 철근구조도에 의하여 절단, 구부리기 등의 가공을 하였는가
		∘철근 구조도에 제시된 철근과 다른 강도의 철근을 사용하지 않았는가
		∘구부림은 냉간가공으로 하였는가(부득이 가열가공을 실시할 경우 현장책임자의 승인을 받았는가)
		∘유해한 휨이나 손상이 있는 철근을 사용하지 않았는가
		∘코일 모양의 철근은 직선기를 사용하는가
		∘철근 구조도에 제시된 가공형상, 치수로 가공하되 바깥쪽 치수를 따라서 가공하였는가
		∘용접한 철근은 구부려서는 안되며 부득이하게 구부릴 경우 용접부위에서 철근 지름의 10배이상 떨어진 곳에서 구부렸는가
		∘한번 가공한 철근을 재 가공하여 사용하지 않았는가
	(2) 조립	∘들뜬 녹 등 철근과 콘크리트와의 부착을 해치는 유해 물질을 제거하였는가
		∘철근을 바른 위치에 배치했는가
		∘콘크리트를 타설 할 때 움직이지 않도록 견고하게 조립했는가
		∘철근의 교점을 지름 9mm 이상의 풀림철선 또는 적절한 클립(Clip)으로 긴결하는가

NO. 3

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
2. 철 근 공	(2) 조립	∘벽이나 슬래브의 개구부에는 보강철근을 사용하였는가
		∘간격재(Spacer)를 적절히 배치하였는가
		∘철근의 조립 후 다음 사항을 규정대로 시공했는지 확인하였는가 - 철근의 개수와 직경 - 이음의 위치 - 철근 상호간의 위치 및 간격 - 거푸집 내에서의 지지 상태
		∘철근을 조립하고 장시간이 경과한 경우 콘크리트를 치기전에 다시 조립검사를 하였는가
	(3) 정착․이음	∘인장 철근의 이음은 가급적 피해야 하며 특히 보의 중앙부근 이음을 피하도록 하였는가
		∘이음 및 정착길이는 큰 인장력을 받은 것은 철근 지름의 40배, 압축 또는 적은 인장력을 받은 것은 지름의 25배로 하며, 이음철근의 지름이 다를 경우는 그 평균 지름으로 하였는가
		∘철근의 이음 위치는 큰 응력을 받는 곳을 피하여 엇갈려 잇도록 하였는가
		∘철근의 정착위치는 다음과 같이 하였는가 - 기둥의 주근은 기초 - 보의 주근은 기둥 - 작은보의 주근은 큰보 - 직교하는 끝부분의 보 밑에 기둥이 없을 경우는 보 상호간 - 지중보의 주근은 기초 또는 기둥 - 벽 철근은 기둥, 보, 기초 또는 바닥판 - 바닥판의 철근은 보 또는 벽체
3. 콘 크 리 트	(1) 타설	∘작업 당일 작업 전에 거푸집 동바리 등의 변형․변위 및 지반의 침하 유무를 점검하고 이상 발견시는 보수하였는가
		∘작업중에 거푸집 동바리 등의 변형․변위 및 침하 유무 등을 감시할 수 있는 감시자를 배치하였는가
		∘타설 중 배근이나 매설물이 이동하지 않도록 하였는가
		∘타설 속도는 표준시방서에 정해진 속도를 유지하도록 하는가
		∘콘크리트 타설 한계 위치는 정확히 표시되어 있는가
		∘거푸집 동바리에 측압이 작용하지 않도록 사전에 타설순서 및 일일 타설 높이를 정하였는가

NO. 4

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
3. 콘 크 리 트	(2) 이어치기	∘보, 슬래브의 이어치기는 스팬(Span)의 중앙부에서 수직으로 하였는가
		∘캔틸레버보나 슬래브는 절대로 이어치지 않도록 하였는가
		∘보의 어어치기는 수평으로 두지 않도록 하였는가
		∘슬래브의 중앙부에 작은보가 있을 때에는 작은보 나비의 2배정도 떨어진 곳에서 이어치기 하였는가
		∘벽은 개구부 등의 끊기 좋고, 이음자리 막기와 떼어내기가 편리한 곳에 수직 또는 수평으로 이음 하였는가
		∘아치(Arch)의 이음은 아치 축에 직각으로 하였는가
		∘수평으로 이어치기를 할 때 레이턴스를 막기 위하여 거푸집에 구멍을 뚫거나 적당한 방법으로 표면의 물을 제거하였는가
		∘이어치기 할 곳은 레이턴스를 제거하고 그 면을 거칠게 하였는가
		∘이어치게 되는 면을 깨끗이 하고 물로 적셔 두었는가
	(3) 다짐	∘진동기를 가지고 거푸집 속의 콘크리트를 옆 방향으로 이동시키지 않도록 하였는가
		∘여러 층으로 나누어서 진동 다지기를 할 때는 진동기를 밑의 층 속에 약 10cm 정도 삽입하였는가
		∘막대형 진동기는 수직 방향으로 넣고, 넣는 간격은 약 60cm이하로 하였는가
		∘막대형 진동기(꽂이 진동기) 및 표면 진동기 등은 각기 특성에 맞는 곳에 사용하는가
		∘진동기는 철근 또는 철골에 직접 접촉되지 않도록 하고 뽑을 때에는 천천히 뽑아 내어 콘크리트에 구멍이 남지 않도록 하였는가
	(4) 양생	∘타설후 수화 작용을 돕기 위하여 최소 5일간은 수분을 보존(조강일 경우 3일)하도록 하였는가
		∘양생기간 온도는 항상 5℃ 이상을 유지하도록 하였는가
		∘콘크리트 타설후 그 위를 보행하거나 공구 등 중량물을 올려놓지 않도록 하였는가
		∘강우, 폭설 등의 기상 변화에 대비하여 콘크리트 노출면을 보호하였는가
		∘일광의 직사, 급격한 건조 및 한기에 대하여 대책을강구 하였는가

NO. 5

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
4. 거 푸 집 지 보 공	(1) 일반사항	∘지보공의 위치와 간격, 부재를 제대로 설치하고 견고히 연결하였는가
		∘지반에 설치할 때에는 밑둥잡이 또는 깔목을 설치하여 부동 침하를 방지하도록 하였는가
		∘경사진 바닥면에 세울 때에는 미끄러지지 않도록 조치하였는가
		∘횡목의 중앙에 설치하는 등 편심하중이 걸리지 않도록 하였는가
		∘높이 조절용 받침목, 철판 등은 이탈되지 않았는가
		∘이동용 틀비계를 지보공 대용으로 사용할 때에는 활차가 고정되어 있는가
		∘지보공 및 보를 지지하는 주요 부분은 각각 규격품 또는 규정 이상의 것을 사용하였는가
		∘현저한 손상,변형 또는 부식이 있는 것을 사용하지 않도록 하였는가
		∘존치 기간은 기준에 적합성을 유지하는가
	(2) 강관지주	∘단관 및 잭 베이스(Jack Base)의 변형, 파손 등은 없는가
		∘각부의 베이스 플레이트(Base Plate)는 정확한 위치에 고정시켰는가
		∘강관 지주는 높이 2m 이내마다 수평 이음을 2방향으로 설치하고 견고한 것에 고정하였는가
		∘수평연결, 기초지주의 부재는 단관을 이용하여 지주에 클램프(Clamp)로 확실하게 연결하였는가
		∘두부의 잭 베이스는 멍에에 확실히 고정하였는가
		∘ 3개이상 이어서 사용하지 않도록 하였는가
		∘강관지주를 사용할 때 접속부의 나사는 마모되어 있지 않는가
	(3) 파이프 지주	∘파이프 받침을 3본이상 이어서 사용하지 않도록 하였는가
		∘파이프 받침을 이어서 사용할 때에는 4개 이상의 보울트 또는 전용철물을 사용하도록 하였는가
		∘높이 2m이내 마다 수평 연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위 방지 조치를 하였는가
		∘파이프 받침의 두부 및 각부는 견고하게 고정하였는가

NO. 6

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
4. 거 푸 집 지 보 공	(3) 파이프 지주	∘파이프 받침은 조립전에 상태의 결함이 있는지를 점검하였는가
		∘파이프 받침의 꽂기핀은 전용의 철물을 사용하였는가
		∘조립시 수평 연결의 설치를 고려하였는가
		∘스팬이 긴 건물의 경우는 스팬의 양단부 및 중앙부의 지주를 먼저 세워 높이를 정하도록 하였는가
	(4) 강관틀 지주	∘강관틀과 강관틀 사이에 교차가새를 설치하였는가
		∘최상층 및 5층 이내마다 거푸집 지보공의 측면과 틀면의 방향 및 교차가새의 방향에 수평연결재를 설치하고 수평연결재의 변위를 방지하도록 하였는가
		∘보 또는 멍에를 상단에 올릴 때에는 지주 상단에 강재의 단판을 부착하여 보 또는 멍에에 고정시켰는가
	(5) 목재	∘높이 2m이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지하도록 하였는가
		∘목재를 이어서 사용할 때에는 2본 이상의 덧댐목을 대고 4개소 이상 견고하게 묶은 후 상단을 보 또는 멍에에 고정시키도록 하였는가

(2) 정기 안전점검표

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1.거푸집공사	∘부위별 거푸집의 조립도 작성 여부
	∘거푸집의 재질 및 상태
	∘부위별 거푸집 사용 횟수의 적정성
	∘거푸집의 수직 및 수평 상태
	∘박리제 도포 상태
	∘거푸집의 존치기간 준수 여부
	∘거푸집이 곡면일 경우 부상 방지 조치
	∘개구부 등의 정확한 위치
	∘거푸집 하부 및 모서리 등의 조립 상태
2.철근공사	∘가공제작 도면의 작성 여부
	∘철근 이음 및 이음 위치의 적정성
	∘철근 정착길이 및 방법의 적정성
	∘철근의 배근간격
	∘철근 교차부위의 결속 상태
	∘간격재(Spacer)의 재질과 설치간격
	∘신축이음 부위, 지하층의 배근 방법 및 상태
3.콘크리트 공사	∘콘크리트 타설 속도와 방법
	∘Slump Test의 유무
	∘골재 분리 및 균열의 발생 여부
	∘콘크리트 다짐 상태
	∘콘크리트 타설전 청소 상태
	∘이어치기 위치 및 방법의 적정성
	∘콘크리트 양생시 보호조치
	∘구조물에 매설되는 배관의 위치 및 피복두께
4.거푸집 지보공	∘콘크리트의 강도조사
	∘지보공의 재질 및 상태
	∘지보공의 이음부, 접속부, 교차부 연결 및 고정상태
	∘지보공 설치 간격의 적정성
	∘경사면에서의 지보공 수직도와 Base Plate 정착상태
	∘지보공의 침하방지 조치
	∘파이프 지보공 연결시 전용철물 사용 여부

3. 강구조물공사

(1) 자체 안전점검표

		점검대상 :		결재
NO.1		점검일자 :
구 분			점 검 사 항					점검 결과		조치 사항
1. 건 립 작 업	(1) 일반사항		∘현장건립 순서와 공장제작 순서는 일치하는가
			∘2층 이상을 한 번에 세우고자 할 경우는 1개폭이상 조립이 되도록 계획하여 도괴 방지에 대한 대책을 강구하였는가
			∘건립 기계의 작업 반경과 진행 방향을 고려하여 먼저 세운 것이 방해가 되지 않도록 계획하였는가
			∘기둥을 2본 이상 세울 때는 기둥을 세울 때마다 보를 설치하고 안정성을 검토하면서 건립을 진행시켜 나가도록 하였는가
			∘건립중 도괴를 방지하기 위하여 가보울트 체결을 가능한 단축하도록 후속공사를 계획하였는가
			∘기둥의 기둥밑판(Base Plate)은 중심선 및 높이를 정확히 설치하고 앵커보울트로 완전히 조이도록 하였는가
			∘조립한 부재에 달아 올리는 부재가 충돌되지 않도록 하는가
			∘데릭을 설치하는 철골부분은 리벳조임을 하거나 보울트조임을 완전히 하고 필요할 때에는 그 부분을 보강하도록 하였는가
			∘지붕 트러스등 구성재를 달아 올릴 때는 반대하중으로 변형되기 쉬운 것을 보강하거나, 지주를 세워 대고 조립하는가
			∘앵커보울트는 전체를 평균하게 조이도록 하였는가
			∘기둥 밑판은 모르타르 채움공법을 사용할 때 모르타르가 경화되기 전 진동, 충격을 주지 않도록 하였는가
			∘기둥 건립시 가조립 보울트가 종료될 때까지는 인장 와이어로우프를 늦추지 않도록 하는가
			∘보의 부착이 불가능할 경우 버팀줄 또는 버팀대로 보호하였는가
			∘기둥밑둥 부분이 핀일 때는 버팀대를 설치한 후 인장 와이어로우프를 철거하는가
			∘분할핀은 사전에 철골에 연결하였는가
			∘브래킷(Bracket), 커버플레이트(Cover Plate) 등은 탈락하지 않도록 확실하게 부착하였는가

NO. 2

구 분			점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1. 건 립 작 업	(2) 인양작업		∘인양부재의 중량, 중심을 확인하고 달아 올리는가
			∘기둥 인양시는 기둥의 꼭대기 보울트 구멍을 이용해 인양용 작은 평철판을 덧대어 하중에 충분히 견디도록 하였는가
			∘매어 달 철판에 와이어로우프를 설치할 때는 새클을 사용하도록 하였는가
			∘브래킷(Bracket) 아래 부분에 와이어로우프를 걸 경우에는 보호용 굄재를 넣어 인양하도록 하였는가
			∘기둥은 일으켜 세울 때는 밑부분이 미끄러지지 않게 서서히 들어올리도록 하였는가
			∘기둥 밑부분에 무리한 하중이 실리지 않도록 하였는가
			∘인양 와이어로우프를 제거 할 때는 새클핀이나 로우프가 손상되지 않았나를 확인하였는가
			∘클램프는 수평으로 체결하고 2군데 이상 설치하였는가
			∘클램프는 정격용량 이상 인양하지 않도록 하였는가
			∘사용전 반드시 클램프의 작동상태를 점검하고 정상작동이 되는지를 확인하였는가
2. 접 합	(1) 용접	① 전기용접	∘용접기의 바깥 상자를 접지하였는가
			∘용접부의 접지는 하였는가
			∘케이블의 절연상태는 완전한가
			∘절연 호울더(Holder)를 사용하는가
			∘사용전압기의 전압은 높지 않은가
			∘작업중단시 스위치는 껐는가
			∘우천, 폭설시 작업을 하지 않는가
			∘용접 작업장 부근에 가연물이나 인화물은 없는가
			∘접지의 부착상태는 양호한가
			∘교류아크 용접기는 자동 전격방지 장치를 사용하였는가
			∘어스의 부착을 완전하게 하였는가
			∘케이블의 접속을 완전하게 하였는가

NO. 3

구 분			점 검 사 항	점검 결과		조치 사항
2. 접 합	(1) 용접	② 아세틸렌 용접	∘작업장 가까이는 소화설비 또는 소화기를 준비하여 놓았는가
			∘인화물을 제거한 뒤 작업을 하는가
			∘가스용기 취급은 조심해서 하며, 팽개치거나 충격을 주지 않도록 하였는가
			∘압력계, 꼭지쇠는 수시 검사를 받아 완전한 것을 사용하는가
			∘인화성 또는 폭발성 재료를 넣은 용기를 용접 또는 절단하는 경우 용기를 깨끗하게 씻고나서 작업하는가
			∘작업전에 취관, 호스, 감압밸브를 점검하였는가
			∘동결 우려가 있을 때는 용기를 비에 젖은 곳이나 습기가 많은 곳에 놓아두지 않도록 하는가
			∘환기상태가 나쁜 좁은 실내에서 작업하는 경우에는 가스 누출에 주의하도록 하는가
			∘용기 온도는 40℃이하로 유지하는가
			∘용기는 전도 우려가 없도록 지지하였는가
			∘용기는 빈용기와 충만용기를 구별 표시하여 보관하는가
			∘용기는 전기장치 어스선의 부근에 두지 않도록 하였는가
	(2) 보울트		∘진동, 충격 또는 반복응력을 받는 접합부에는 보울트를 사용하지 않도록 하였는가
			∘처마 높이가 9m를 초과하고 스팬이 13m를 초과하는 강구조 건축물의 구조상 주요 부분에는 보울트를 사용하지 않도록 하였는가
			∘보울트 구멍 지름은 보울트의 공칭축 지름에 0.5mm 더한 것 이하로 하였는가
			∘보울트로 체결하는 판의 총두께는 지름의 5배이하로 하였는가
			∘보울트와 너트는 진동 등에 의하여 풀리는 일을 막기 위하여 2중 너트, 스링 등의 조치를 취하였는가
3.도장작업			∘현장도장전에 공장도장을 한 강재의 표면을 깨끗이 청소하였는가
			∘칠 작업전 바탕 만들기 상태는 양호한가
			∘칠 작업을 해서는 안되는 부분에 칠을 하지는 않았는가
			∘작업중 손상된 도막에 대한 보수상태는 양호한가

NO. 4

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
3.도장작업	∘바탕 만들기가 완료된 후 신속히 칠 작업이 실시되는가
	∘먼저 부재의 운반, 조립중에 공장도장이 벗겨진 부분에 같은 도료로 도장을 하는가
	∘전체적으로 균일한 도막칠이 이루어졌는가
	∘5℃이하, 상대습도 80%이상일 때 칠 작업을 하지 않도록 하였는가
	∘칠 작업시 또는 도막이 마르기 전에 수분이나 분진 등에 노출되지 않도록 하였는가

(2) 정기 안전점검표

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1.건립작업	∘공사계획의 적합성 여부 - 부재의 형상 - 철골의 자립 안정도 - 보울트 구멍, 이음부, 접합방법 - 가설부재 및 부품 - 건립용 장비 및 건립작업성 - 건립순서 및 현장 접합의 시기
	∘조립 순서도의 작성여부 및 적정성
	∘양중 계획의 적정성
	∘부재의 수직 수평도
	∘부재의 야적방법
	∘PC공사의 코킹재질 및 시공상태
	∘고정철물 부식의 방지조치
	∘철골 공사의 용접 및 볼트 체결 상태
	∘가조립 상태의 방치 여부
	∘크레인의 와이어로우프 상태
2.접합 및 도장작업	∘용접기 및 가스용기의 보관 상태
	∘도장작업의 적정성
	∘손상된 도막의 보수 상태

4. 굴착공사

(1) 자체 안전점검표

		점검대상 :		결재
NO.1		점검일자 :
구 분			점 검 사 항					점검 결과		조치 사항
1.일반사항			∘굴착면 및 굴착심도 기준을 준수하는가
			∘절토면을 장기간 방치할 경우는 경사면에 비닐이나 가마니를 덮는 등의 적절한 보호조치를 하였는가
2. 굴 착 공 사	(1) 인력굴착		∘굴착면의 구배는 토질의 굴착높이에 따른 안전구배 기준 이하로 하였는가
			∘파낸 토사 등을 굴착부의 상부 또는 경사면 상부 부근에 적치하지 않도록 하였는가(적치할 경우에는 굴착면의 붕락이나 토사 등의 낙하가 발생하지 않도록 조치를 하였는가)
	(2) 기계굴착		∘공사의 규모, 주변환경, 토질, 공기 등의 조건을 고려한 적절한 기계를 선정하였는가
			∘작업전에 기계를 점검하였는가
			∘기계가 운반될 통로를 확보하고 통로의 상태를 점검하였는가
			∘사면이나 무너지기 쉬운 지반에 장비를 세워두지 않았는가
			∘굴착장비등은 안전능력 이상으로 사용하거나 용도외 사용하지 않도록 하였는가
			∘기존의 설치된 구조물 주변을 굴착하는 경우 전도 및 붕괴를 고려하였는가
			∘작업구역을 로프울타리, 붉은 깃발 등으로 표시하였는가
			∘야간작업을 할 때는 조명을 충분히 설치하여 작업시야를 확보하였는가
			∘도로에서 작업하는 경우는 각종 표식, 방호대, 야간조명 등을 충분히 설치하였는가
			∘기계의 무리한 사용을 금지하고 노면의 끝단이 연약지반일 경우는 유도자를 배치시켰는가
			∘흙막이 동바리를 설치할 경우는 동바리 부재의 설치 순서에 맞도록 굴착을 진행하는가
			∘전선이나 구조물 등에 인접하여 붐을 선회해야 될 작업에는 사전에 방호조치를 강구하였는가

NO. 2

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
2. 굴 착 공 사	(3) 발파굴착	∘인가를 받은 안전한 장소에 화약을 저장하였는가
		∘1일 화약류 소비량이 규정 이상인 경우 화약류의 관리 및 발파 준비를 위한 화약류 취급소를 마련하였는가
		∘화약 관계자 외는 사람이 출입하지 않는 청결하고 건조한 장소로서 햇빛의 직사를 받지 않는 곳에 두었는가
		∘화기 또는 낙석의 위험이 있는 곳에 설치하지 않았는가
		∘화약, 폭약과 뇌관을 동일한 상자, 자루 등에 집어넣지 않았는가
		∘모선은 절단, 결선빠짐, 결선틀림 등이 없도록 각선에 연결하기 전에 반드시 점검하였는가
		∘모선결선 후 안전한 개소에서 도통시험을 하였는가
		∘모선을 지상의 레일, 파이프 또는 기타 전기가 흐를 수 있을 가능성이 있는 개소에 접속시키지 않았는가
		∘발파작업을 하기 전에 발파개소 상부의 표토는 제거하였는가
		∘전기발파를 할 때는 미변전류가 없는 것을 확인하였는가
		∘낙뢰 위험이 있을 시는 발파작업을 중지하도록 하였는가
		∘부근의 지형, 건물, 교통로 등의 도면을 작성하여 우회로, 대피장소, 피난 구역을 계획하였는가
		∘전회 발파의 불발 구멍이나 잔류화약이 없는 것을 확인한 뒤에 천공하는가
		∘발파 후 막장을 점검하여 불발화약의 유무를 확인하고 조치하였는가
		∘전회 발파한 구멍을 이용하여 천공하지 않도록 하였는가
		∘전기뇌관을 운반할 때는 각선이 벗겨지지 않도록 하고 누전우려가 있는 것에 가까이 두지 않도록 하였는가
		∘장전작업에 대해서는 발파구멍이나 암반상황을 검사하여 안전을 확인하고 나서 장전하였는가
		∘발파 장소에 전기 누전 여부를 점검하였는가
		∘장전중 부근에서 천공이나 기타 작업을 하지 않도록 하였는가
		∘장약시에는 구멍을 잘 청소해서 자갈 등이 남아 있지 않도록 하였는가

NO. 3

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
2. 굴 착 공 사	(3) 발파굴착	∘점화위치는 폭파의 정도에 따라 격리된 안전한 장소로 하였는가
		∘발파기의 손잡이는 점화할 때 외는 자물쇠는 채우거나 떼어놓도록 하였는가
		∘발파기와 모선과의 연결은 점화직전에 하도록 하는가
		∘전기발파에서 발파모선을 발파기로부터 떼어 내고 재점화 되지 않도록 조치하고 5분이상 경과후 발파장소에 접근하고 있는가
		∘터널 내에서는 잔류 가스 및 지반의 붕괴 위험이 없어진 후 발파장소에 접근하고 있는가
		∘불발공에 대한 점검 및 처리 규정은 설정되어 있는가
		∘불발공 폭파를 위한 천공은 평행으로 천공하고 그 간격은 기계굴착시 60cm 이상, 인력 굴착시 30cm 이상인가
4.흙막이		∘공사현장 및 주변 지역으로부터 침투하는 지표수와 지하수의 차단 상태는 적절한가
		∘인접 구조물에 대한 안전대책은 강구되어 있는가
		∘현장 내외의 집수통 설치, 배수도량의 설치 등을 완료하였는가
		∘조립도에 따라 조립되고 위험한 곳은 없는가
		∘버팀목 및 띠장은 보울트, 쐐기 등으로 견고하게 설치하였는가
		∘버팀목 및 흙막이판들의 사이에 틈은 없는가
		∘부재의 연결부분은 확실하게 이음이 되어 있는가
		∘중간지주가 있을 때 이것이 띠장에 확실히 고정되어 있는가
		∘흙막이재가 심하게 갈라지거나 부식된 것은 없는가
		∘흙막이판 뒷면에 틈이 없고 누수나 토사의 유출이 없도록 하였는가
		∘부재설치가 지연되거나 동바리에 근접한 상단에 재료를 쌓아 두지 않았는가

(2) 정기 안전점검표

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1.굴착공사	∘굴착예정지의 실지조사 여부 - 지형, 지질, 지하수위, 암거, 지하매설물의 상태 - 주변시설물, 전주, 가공선의 상태 - 유동성 물질의 상태
	∘다음에 대한 계획의 수립여부 및 적정성 - 지하매설물의 방호 및 인접시설물 보호 - 굴착순서, 굴착면의 경사 및 높이 - 건설기계의 종류 및 점검․정비 - 흙막이 공사
	∘지반의 종류에 따른 굴착높이 및 구배의 준수여부
	∘발파굴착시 화약의 보관 상태
	∘발파후 처리 상태
	∘전기발파시 누전여부의 확인
2.흙막이공사	∘조립상세도의 적정성 여부
	∘시공시 부재의 품질, 토질 및 수압 등의 고려 여부
	∘보일링 또는 히이빙의 발생 또는 위험 여부
	∘부재연결 부분의 상태
	∘누수 및 토사의 유출여부
	∘버팀목 및 흙막이판의 조립상태
	∘지보공 주변 지반면의 균열 상태

5. 성토 및 절토공사

(1) 자체 안전점검표

	점검대상 :		결재
NO.1	점검일자 :
구 분		점 검 사 항					점검 결과		조치 사항
1.흙쌓기공사		∘사전에 나무뿌리 등의 유해한 잡물을 제거하였는가
		∘우수에 의한 토사의 유출 및 붕괴 방지를 위하여 바닥면에 지하 배수구를 설치하였는가
		∘성토중에 항상 배수에 유의하여 쌓는 각 층에 물이 고이지 않도록 하였는가
		∘변상상태 등의 관찰(함몰, 균열등)을 수시로 하는가
		∘비탈면의 하부 및 상부, 작은 단부 등에 배수시설을 설치하였는가
		∘비탈면 상부에 물의 침투 방지조치(시트 등의 활용, 가설배수로 설치, 조기식재 등)를 하였는가
		∘비탈면 상부에 중량물을 두지 않으며, 또한 중장비의 주행을 삼가하도록 하였는가
2.흙깍기공사		∘상부 비탈면에 내리는 우수나 용수가 비탈면을 흐르지 않도록 비탈면 상단부에 배수구를 설치하였는가
		∘비탈면이 높은 경우 보통 5～10m높이마다 소단을 설치하고 거기에 측구를 설치하여 우수의 유도를 하도록 하였는가
		∘소단을 설치하지 않은 경우에는 비탈면 하단에 배수구를 설치하였는가
		∘하향 배수의 유도를 위하여 비탈면을 따라 종배수시설을 설치하였는가
		∘우수후에는 토사붕괴의 예방을 위해 균열 등 비탈면의 상태를 반드시 점검하는가

(2) 정기 안전점검표

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1.흙쌓기 공사	∘원지반의 유해물 제거여부
	∘흙쌓기 부위의 다짐상태
	∘배수시설 설치상태
	∘흙쌓기면의 함수비
	∘흙쌓기 재료의 적정성
2.흙깍기 공사	∘시공전․후 현장상태의 기록 보관유무
	∘지질조사 및 지하 매설물의 검토 확인여부
	∘지하 매설물의 보호대책 수립여부
	∘비탈면 배수시설의 적정성
	∘비탈면 구배의 안전성

6. 교통안전관리

(1) 자체 안전점검표

	점검대상 :		결재
NO.1	점검일자 :
구 분		점 검 사 항					점검 결과		조치 사항
1. 도로의관리		∘도로를 점유․사용하는 경우 출입방지시설을 포함하여 항상 보수관리를 하도록 하였는가
		∘차선의 차단,우회 등의 통해경로의 변경시 임시 노면표시를 하였는가
		∘간판, 표식 등은 소정의 장소에 통행을 방해하지 않도록 설치하고, 항상 정비・점검을 하는가
		∘야간조명, 보안등, 유도등 등은 전구가 끊어졌는가를 점검하여 항상 보수관리를 하는가
2. 간판,표식의 정비		∘공사간판, 우회로 안내판, 등 각종 표지등은 진동이나 바람 등에 쓰러지지 않도록 고정조치를 하였는가
		∘안내표식, 협력요청 간판 등은 조종자 및 보행자가 보기 쉬운 장소에 설치하였는가
		∘표시판, 표식등 간판류는 표시내용이 야간에도 명확이 보이도록 조치를 하였는가
3. 공사현장의 출입구		∘현재 사용하는 도로에 면한 보도를 낮추거나 높여서 출입구를 설치하는 경우 단차, 빈틈, 미끄러짐 등이 없는 구조로 하였는가
		∘출입구에는 필요에 따라 교통 정리원을 배치하였는가
4. 기타		∘공사장소 주변에 학교등이 있는 경우 학생들의 등・하교시 공사 차량의 통행에 대한 유의사항을 공사 관계자에게 주지시켰는가
		∘공사착수전 주변 주민들에게 공사개요를 알리고 협력요청을 하였는가
		∘공사현장밖이라도 작업원이 운전하는 차량 등의 교통안전에 대해 주의시켰는가

(2) 정기 안전점검표

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1.교통안전	∘교통관리 계획서의 작성여부 및 적정성
	∘교통통제 시설의 설치상태
	∘도로의 점유 및 사용상태
	∘교통관리 구간의 점검상태

7. 공사현장 및 인접구조물

(1) 자체 안전점검표

	점검대상 :		결재
NO.1	점검일자 :
구 분		점 검 사 항					점검 결과		조치 사항
1. 공 사 현 장	(1) 작업 환경	∘자연환기가 불충분한 곳에서 내연기관을 사용할 때에는 충분한 환기조치를 하였는가
		∘분진․비산의 방지 조치를 하였는가
		∘토석, 암석 등의 분진이 심하게 발생하는 갱내, 옥내의 작업장 등에서 분진측정을 하였는가
		∘통풍설비가 설치되는 갱내 작업장에서의 통풍량, 기온, 탄산가스 등의 측정을 하였는가
		∘산소결핍 등의 위험이 있는 작업장에서의 산소, 황화수소 등의 농도측정을 하였는가
	(2) 좁은 공간의 작업	∘작업공간이 좁은 곳에서 기계와 인력의 공동작업이 이루어질 때는 작업계획을 사전에 검토하여 안전확보를 위한 대책을 세웠는가
		∘시공장소나 공간크기에 따른 동작범위․능력을갖는 기계 등을 선정하였는가
		∘기계의 주행로, 또는 설치장소의 지반안전성을 확보하였는가
		∘될 수 있는 한 기계와 사람의 동시작업을 피하도록 하였는가
		∘작업방법 및 신호 등에 관하여 충분히 검토하였는가
	(3) 출입 방지 시설	∘공사현장의 주위는 강판, 시트, 또는 가아드펜스 등의 울타리를 설치하여 공사구역을 명확히 하였는가
		∘출입방지시설은 관계자외 쉽게 들어올 수 없는구조로 하였는가
		∘출입구에 잠금장치를 설치하였는가
		∘도로에 근접하여 굴착등 땅을 파고 있는 경우에는 보호덮개 또는 보호울타리를 설치하여 빠지지 않도록 하였는가

NO.2

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
2.인접구조물	∘기초 상태와 지질조건 및 구조형태를 점검하였는가
	∘작업방식, 공법에 따른 안전대책을 수립하였는가
	∘구조물 하부 및 인접 굴착시 크기, 높이, 하중 및 외력(진동,침하,전도등)을 충분히 고려하였는가
	∘기존 구조물의 침하방지 조치를 하였는가
	∘웰포인트공법을 사용하는 경우 그라우팅, 화학적 고결방법 등의 대책을 강구하였는가
	∘비상투입용 보강재를 준비하였는가
	∘인접구조물의 피해발생시 대책은 강구되어 있는가

(2) 정기 안전점검표

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1.공사현장	∘현장 주변의 정리․정돈상태
	∘현장 출입방지 시설의 상태
	∘현장주변의 계시물 상태
2.인접구조물	∘인접구조물 현황의 파악 상태
	∘피해발생시의 대책
	∘작업방식,공법에 따른 안전대책의 수립여부와 적정성
	∘인접구조물의 피해발생여부

8. 해체작업

(1) 자체 안전점검표

점검대상 :		결재
점검일자 :
구 분	점 검 사 항					점검 결과		조치 사항
(1) 가설공사	∘해체시 부딪칠 수 있는 가설전기선에 대해서 절연 방호장치를 확인하였는 가
	∘자재의 낙하․비산방지 조치를 하였는가
	∘해체는 조립의 역순으로 하는가
(2) 흙막이공사	∘인접 시설물에 근접해서 타설한 강널말뚝이나 H형강 말뚝을 인발하지 않고 그대로 놔두는 것을 고려하였는 가
	∘흙막이 해체작업전 변위상태를 확인하였는가
	∘인발장비의 주행로, 또는 설치장소의 지반안전성을 확보하였는가
	∘장비작업과 인력작업을 동시에 하는 것을 피하도록 하였는가
(3) 콘크리트 공사	∘거푸집해체시 표준시방서의 규정대로 존치기간을 확보하였는가
	∘지주의 바꾸어대기를 시행하고 있는가
	∘해체작업시 구조체에 충격을 주지 않는가
	∘상ㆍ하작업이 동시에 이루어질 때 상호간에 연락체계를 갖추었는가

부록 Ⅲ: 설계(안)의 건설안전 위험성 평가기법

1. 설계자는 건설안전에 치명적인 위험요소의 유형과 수준을 설계과정 중에서 <그림 2>와 같은 위험성 평가절차를 통해 지속적으로 도출할 필요가 있다. 하지만 여기서 제시된 설계(안)의 건설안전 위험성 평가기법은 참고자료로써의 의미를 가진다.

<그림 2> 설계(안)의 건설안전 위험성 평가절차

2. 발주자는 설계서(과업지시서)의 설계조건을 중심으로 설계(안)에 존재하는 주요 위험요소를 아래의 표에서 보는 바와 같은 건설안전 위험성 평가표에 도면검토, 각종 지침, 자유로운 토론을 통해 확인하여 표시하여야 한다.

(1) A영역은 해당 건설공사의 설계 패키지나 공종을 의미하며, B영역은 해당 설계패키지 또는 공종에 존재하는 위험요소를 말한다.

(2) C영역은 해당 위험요소로 인해 발생할 수 있는 사고의 유형을 기록한다.

No.	작업명 (A영역)	위험성 평가				위험요소 제어방안 (F영역)	위험요소 관리주체 (G영역)
		위험요소 (B영역)	사건 (C영역)	발생 가능성 (D영역)	발생강도 (E영역)
1.1	현장 준비	1 엄격한 현장 출입제한	1 운반기구와 자산의 충돌	상	상	1 새로운 위치 지정과 현장출입구의 재배치	설계자
						1 현장 G.L.에서 적재를 위한 설계, 더 적은 양중을 위한 설계 2 시공 절차의 상세 3 가설지지물의상세	구조 기술자
2.1	철골 세우기	1 부적절한 가설 버 팀대 등	1 완료된 구조물의 부분적 붕괴	중	상
		2 결합부의 잘못된 설치 /고소작업	2 추락과 작업 도구의 낙하	중	상	1 치수적으로 견뎌내기 위한 연결부분을 설계	구조 기술자

3. 각 위험요소의 발생 가능성(D영역)과 발생강도(E영역)에 대해 아래의 표에서 보는 바와 같이 상, 중, 하의 간단한 정성적 기준으로서 평가하여야 한다.

(1)「상/상」의 평가결과는 관련 설계 패키지의 위험요소 수준이 치명적이므로 관련 설계요소에 대해 설계(안)이 반드시 수정되어야만 한다는 것을 의미한다. 또한 「하/하」는 설계(안) 수정에 대해 가장 낮은 우선순위를 나타낸다.

(2) 평가결과는 위험요소 제어방안을 강구함에 있어 참고될 수 있는 우선순위만을 의미할 뿐, 모든 설계 패키지 또는 공종에 존재하는 위험요소는 적정수준으로 최대한 저감되어야 한다.

발생 가능성(Likelihood, L)		발생강도(Severity, S)
상	매우 많이 발생	상	사망, 장기적인 장애를 일으키는 부상, 질병
증	많이 발생	중	단기적인 장애를 일으키는 부상, 질병
하	보통	하	기타 부상이나 질병

4. 각 설계 패키지 또는 공종에 존재하는 위험요소를 제어하기 위한 모든 방안을 강구하여 상기 표의 F영역에 기록한다. 또한 해당 위험요소 제어방안을 담당할 관리주체는 G영역에 표시한다.

5. 위험요소 제어방안의 대안평가를 안전, 심미성, 기능성, 엔지니어링, 비용, 시간 및 환경 측면으로 구분하여 적정성을 평가한다. 다양한 측면에서 제어방안에 대한 대안평가가 이루어지기 위해서는 아래 표와 같은 양식을 활용하고, 평가결과를 기록한다.

(1) A영역에서는 해당 위험요소를 제어하기 위한 모든 대안이 기입된다.

(2) B영역에서는 심미성, 기능성, 엔지니어링, 비용, 시간 환경의 다양한 요인들에 대해 각 대안의 적절성에 대한 내용과 점수가 기록된다. 점수는 A: 매우 적절, B: 적절, C: 보통을 기준으로 부여된다.

(3) C영역에서는 해당 위험요소 제어방안의 각종 대안 중 선택된 대안이 표시된다.

(4) D영역에서는 선택한 위험요소 제어방안의 승인과 대안평가가 적절하게 수행되었다는 점을 나타내기 위해 해당 건설공사의 설계에 대한 책임을 가진 자들이 서명한다.

평가 관점과 주요 목적:
Option 1(A영역)				고정 사다리와 보도의 규정
Option 2				필요할 때 사용하기 위한 ‘이동식 크레인‘ 이동 통로 platform의 규정
(B영역)	안전관리			미			기능			기술			비용			시간			환경
대안 1	항상 안전한 작업 수단 제공,			시각적인 침입			모든 지역으로의 영구적인 접근로를 제공			부가적인 하중이 불분명함 (1)			낮은 초기비용 낮은 유지관리 비용			초기 설치시간 소요			명확한 영향없음
		평가	A		평가	C		평가	A		평가	B		평가	A		평가	A		평가	B
대안 2				영구적으로 건물에 설치한 것이 없음			모든 지역으로 접근로를 제공하기 위해, platform이 사용될 때, 좌석이 있는 지역이 정리될 필요가 있음			아트리움구조의 부가적인 하중이 없음			높은 초기 비용 중간정도의 유지관리비용			초기시공이 필요 없음, 해당 지역의 정리, 설치, 제거에 시간이 소요			명확한 영향없음
		평가	B		평가	A		평가	B		평가	A		평가	B		평가	B		평가	B
평가 : A - 바람직 B -받아들임 C-받아들일 수 없음
결정(C영역)				대안 1			대안 2 √			설명 :
서명(D영역)				설계자			설계Manager			Project Leader			견적가

6. 위험요소 제어방안에 대한 가정과 제3자가 적용할 필요가 있는 제어방안을 아래의 표와 같은 양식에 기록하여야 한다.

(1) A영역에서는 설계(안)에 고려된 위험요소 제어방안의 주요한 가정과 제3자가 건설안전을 확보하기 위해 적용할 필요가 있는 제어방안의 개요를 기록한다.

(2) B영역에서는 시공자가 알 필요가 있는 위험요소 또는 설계(안)에 잔여된 위험요소를 파악하여 이들이 안전관리문서를 작성하는 지를 기록하여야 한다.

No.	작업명	위험요소 보유자	위험요소 제어방안의 가정/제3자에 의한 제어방안 개요 (A영역)	잔여 위험요소(B영역)
				Yes /No	위험요소 보유자	안전관리문서
1.1	현장 준비	설계자	현장 업무의 표준	N	-	-
2.1	철골 세우기	구조 기술자	도면(xxx/yyy/ab)의 시공절차와 가설지지 상세를 시공자는 준수해야함 구조 기술자의 검토를 위한 공법 설명을 시공자는 준비해야함	Y	철골 세우기공	P/B (6)
		구조 기술자	현장 업무의 표준	N	-	- (6)

3.2.7 설계(안)의 위험요소가 수용할만한 수준이 되면 설계업무는 종료되며, 여기서 도출된 결과는 모든 설계참여자가 회람하여 검토 및 확인한다.

부록Ⅳ: 건설공사 위험요소 체크리스트(교량, 터널, 하천, 건축)

1. 교량공사

공종명	Hazard	Risk				단계별 저감대책				관련기준
		물적(사고결과_사고유발원인)	인적	L	S	설계	발주	시공	관리감독
가. 하부공
1.01 토공
a 구조물터파기
구조물터파기	굴착사면(고심도)_작업범위	붕괴_지반조사미흡	매몰		M	∙구조물 기초별 시공보링 반영 ∙임시 사면보호 설계시 반영 ∙보행통로(계단)설계시 반영 ∙지하수위에 따른 양수처리 반영 ∙굴착사면 보호공 설계에 반영	∙계획수립 여부 확인	∙시공 보링 결과에따라 시공계획서(안전관리계획서)에 Safe Construction Line 설정 → 안전팬스 계획 ∙낮은 굴착 심도도 안식각을 고려한 굴착 시 영향범위를 설정하고 이를 고려하여 작업자 동선 및 공사장 안전팬스 설치	∙설계에 준한 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
	굴착사면(고심도)_정리	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙안전 Fence Line 설계시 반영	∙설계자의 계획수립 여부 확인	∙시공계획서(안전관리계획서)에 Safe Construction Line 설정 → 안전팬스 계획 ∙낮은 굴착 심도도 안식각을 고려한 굴착 시 영향범위를 설정하고 이를 고려하여 작업자 동선 및 공사장 안전팬스 설치 ∙시공계획서에 지하수위 및 배수로 고려한 터파기 방법 작성	∙설계에 준한 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
		붕괴_흙막이 지보공 미설치	매몰		M	∙안전 Fence Line 설계시 반영	∙계획수립 여부 확인	∙시공계획서(안전관리계획서)에 Safe Construction Line 설정 → 안전팬스 계획 ∙낮은 굴착 심도도 안식각을 고려한 굴착 시 영향범위를 설정하고 이를 고려하여 작업자 동선 및 공사장 안전팬스 설치 ∙외부 침투수의 차단 및 필요서 구조검토를 통안 사면의 안정성 확보	∙설계에 준한 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
	굴착사면(고심도)_준비	붕괴_터파기 구배 부적정	매몰		M	∙설계시 터파기 표준구배 적용 적정성 검토하여 반영	∙계획수립 여부 확인	∙시공보링 결과에 따른 설계 터파기 구배 적정성 확인	∙설계에 준한 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
		추락_안전휀스 부적정			M	∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙계획수립 여부 확인	∙시공계획서(안전관리계획서)에 Safe Construction Line 설정 → 안전팬스 계획	∙계획서 수행 여부 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
		붕괴_시공계획도 미작성			M	∙장비의 진출입로 및 시공계획 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙굴착장비 및 굴착토 반출 계획의 수립(설계서 반영)	∙계획수립 여부 확인	∙현장 여건에 맞게 시공계획도 재검토하여 시공계획서 작성	∙계획서 수행 여부 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
		붕괴_흙막이 지보공 미설치	매몰		M	∙터파기 깊이별, 현장 여건별 가시설 설치의 경제성, 안전성을 분석하여 가시설 반영	∙계획수립 여부 확인	∙현장 여건, 지반 상황을 확인하고 설계의 적정성 여부를 검토하여 시공계획 수립	∙현장 여건에 맞는 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
	굴착사면(고심도)_해체	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙계획수립 여부 확인	∙대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토 ∙설계서 ⇒ 발주	∙도로공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
		붕괴_흙막이 지보공 미설치
	굴착사면(옹벽저판)_철근배근	붕괴_수직굴착	매몰		H	∙안전 Fence Line 설계시 반영 ∙보행통로(계단) 설계시 반영	∙계획수립 여부 확인	∙시공계획서(안전관리계획서)에 Safe Construction Line 설정 → 안전팬스 계획 ∙낮은 굴착 심도도 안식각을 고려한 굴착 시 영향범위를 설정하고 이를 고려하여 작업자 동선 및 공사장 안전팬스 설치	∙설계에 준한 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인	∙토목공사 표준일반시방서 2005
	굴착사면(하부)_굴착	붕괴_이토 슬라이딩	매몰		M	∙흙막이 설계(계측기 설계 반영) ∙지반조사 중 이토 슬라이딩 여부 확인시 대책 설계 반영		∙불량 지층에 대한 시공계획, 계측계획 수립 ∙계측계획 수립 및 시행 ∙시공계획에 이토 슬라이딩 발생에 따른 안전관리 계획서 수립	∙시공계획의 적합성 검토 ∙설계에 준한 시공계획서 수립여부 확인 ∙설계서, 시공계획서의 적합성 검사
	굴착사면(하천인접)_정리	붕괴_굴착면 기울기	매몰		H	∙소규모 공사도 세심한 흙막이 설계	∙계획수립 여부 확인	∙설계 내용을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행 ∙계측주기 수립	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토 ∙설계서 ⇒ 발주	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	굴착사면_굴착	붕괴_굴착 시공 순서 부적정	매몰		H	∙가시설을 포함한 굴착작업에 대한 단계별 시공계획도 설계시 반영 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙계획수립 여부 확인	∙설계시 수립된 시공 순서도의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토 ∙설계서 ⇒ 발주	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙상수도공사 표준시방서 200 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙통상적인 흙의 기울기를 적용하지 않고 토질의 상태를 고려하여 흙의 안식각 결정 ∙사면 조성 작업은 임시 낙석 방지 시설과 관련하여 시설물 설계 안전 팬스에 대해서도 도면상 표시	∙계획수립 여부 확인	∙시공 계획서 및 안전관리 계획서에 설계 내용을 충분히 검토, 반영 후 공사 시행		∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙도로공사 표준시방서 2009
		붕괴_건설물 미제거(돌담)	매몰		H	∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙계획수립 여부 확인	∙대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공		∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_흙막이 가시설 미설치	매몰		H
		붕괴_흙막이 지보공 미설치	매몰		M	∙지보공 설치 반영 ∙통상적인 흙의 기울기를 적용하지 않고 토질의 상태를 고려하여 흙의 안식각 결정	∙계획수립 여부 확인	∙설계 내용을 반영한 시공계획 수립 ∙시공계획서에 충분한 흙의 안식각을 고려하여 작업자 동선 및 공사장 안전휀스 설치
	굴착사면_용접	붕괴_토류판 미설치	매몰		M
	굴착사면_맞버팀/이음부위정리	붕괴_굴착면 기울기	매몰		H	∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영) ∙자연 터파기 대상(공사장 환경 반영)과 흙막이 설치에 대한 검토를 설계보고서에 반드시 반영	∙계획수립 여부 확인	∙대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토 ∙설계서 ⇒ 발주	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
		붕괴_흙막이 가시설 미설치
	굴착사면_점검	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙안전 Fence Line 설계시 반영	∙계획수립 여부 확인	∙시공계획서(안전관리계획서)에 Safe Construction Line 설정 → 안전팬스 계획 ∙낮은 굴착 심도도 안식각을 고려한 굴착 시 영향범위를 설정하고 이를 고려하여 작업자 동선 및 공사장 안전팬스 설치 ∙굴착부위 지반침하 확인	∙설계에 준한 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인	∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
	굴착사면_정리	붕괴_굴착면 기울기	협착		M	∙설계 시 굴착면 주변의 지반 상황에 부합하는 검토 및 보강 반영 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙계획수립 여부 확인	∙설계 내용에 대한 시공 전 설계도서 검토 의무 시행. ∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토 ∙설계서 ⇒ 발주	∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙가설공사 표준시방서 2006
		붕괴_흙막이 지보공 미설치
		붕괴_사면보호 및 배수 부적정	매몰		M	∙시공계획도(평면도, 황단면도)에 배수로 표기 ∙우천시 사면보호를 위한 덮개 반영		∙시공 계획서 및 안전관리 계획서에 설계 내용을 충분히 검토, 반영 후 공사 시행		∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙가설공사 표준시방서 2006
		낙석	충돌		M	∙사면 조성 작업은 임시 낙석 방지 시설과 관련하여 시설물 설계 안전 팬스에 대해서도 도면상 표시	∙설계자의 계획수립 여부 확인
	굴착사면_준비	붕괴_굴착면 기울기	매몰		H	∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙설계자의 계획수립 여부 확인	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인 ∙설계서 ⇒ 발주	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙가설공사 표준시방서 2006
		붕괴_흙막이 지보공 미설치
	굴착사면_측량	붕괴_굴착면 기울기 및 위치 측량 부적정	매몰		M	∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공범위의 기본설정(설계서 반영) ∙TBM 및 IP점 구조물도에 표기.	∙계획수립 여부 확인	∙확인 측량후 확인된 측량 자료를 이용하여 시공계획 수립	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
	흙막이가시설_용접	붕괴_흙막이 지보공 조립 미흡	매몰		H	∙안전 Fence Line 설계 시 반영 ∙종방향 시공범위의 기본설정(설계서 반영) ∙자연 터파기 대상(공사장 환경 반영)과 흙막이 설치에 대한 검토를 설계보고서에 반드시 반영.	∙계획수립 여부 확인	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공 ∙시공계획서(안전관리계획서)에 Safe Construction Line 설정 → 안전팬스 계획 ∙낮은 굴착 심도도 안식각을 고려한 굴착 시 영향범위를 설정하고 이를 고려하여 작업자 동선 및 공사장 안전팬스 설치 ∙시공계획서에 용접선 거치 방법 작성	∙설계에 준한 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
	굴삭기(사면)	전락_유도자 미배치	협착		M	∙장비신호수 설계시 반영	∙계획수립 여부 확인	∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
	백호(교각 가도)_이동	전도_임의 이동	익사		M	∙안전 Fence Line 설계 시 반영 ∙가도 사용전 지지력 시험 반영	∙시험 계획수립 여부 확인	∙시공계획서(안전관리계획서)에 Safe Construction Line 설정 → 안전팬스 계획 ∙일정한 지지력에 대한 장비 안전성 확보 방안 수립	∙설계에 준한 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인 ∙계획수립 이행 여부 확인	∙도로교 표준시방서 2013 ∙산업안전보건법 시행령
b 일반청소
c 되메우기
d 물푸기공
1.02 강관 말뚝공
강관 말뚝공	진입로 및 작업장_주행 및 시공	전도_지반 지지력 부족	매몰		H	∙설계 시 장비 및 파일중량을 포함한 접지력에 대한 지반 소요 지지력 산정하여 반영	∙계획수립 여부 확인	∙설계시 반영된 장비와 지반 지지력을 시공 계획서 수립시 반영하고 시험을 시행하여 확인	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
	항타 및 천공	감전_지장물 협의 부적정	감전		H	∙설계 시 지장물(고압선등)을 시공계획도(평면도, 황단면도)에 표시		∙현장 여건(KTX, 전철, 고압선)을 조사하여 시공전 지장물 조치계획을 시공 계획서 수립시 반영	∙설계에 준한 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인
	장비 조립 및 해체	추락_안전조치부적정	추락		H			∙시공 계획서 및 안전관리 계획서에 설계 내용을 충분히 검토, 반영 후 공사 시행	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토
1.03 복합 말뚝공
1.04 뒷채움 및 다짐공
1.05 교대앞성토
교대앞성토	성토사면(하단부)_거적고정	-	전락		L
1.06 거푸집공
거푸집공	거푸집(고소)_설치	붕괴_거푸집 지지대 위로 인양	추락		M
		-	추락		L			∙시공계획서 수립 시 작업자 동선 확보 준수(안전난간, 가설재의 유격 및 변위의 확인)		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	거푸집(고소)_자재인양	붕괴_중량물 하중집중	추락		M			∙시공계획서 수립시 재제 적치 위치 표기	∙계획서 수행 여부 확인
	거푸집(고소)_철근적재	붕괴_지지대 미설치	추락		M			∙시공계획서 수립시 지지대 설치 위치 계획	∙계획서 수행 여부 확인
		붕괴_철근 과적재	추락		M			∙자재 적재에 대한 기준 마련 ∙장비 사용계획서 제출시 중량물에 대한 적정장비 사용 계획 수립	∙적재 기준에 따른 이행 여부 확인 ∙계획서 수행 여부 확인
	거푸집(고소)_해체	붕괴_작업하중	추락		M			∙작업하중을 고려한 거푸집 설치 계획 수립	∙계획서 수행 여부 확인
		낙하_크레인줄걸이 미설치	추락		L	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영 ∙신호수 배치 및 시뮬레이션을 통한 사전 안전계획 수립 및 이행 ∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙기계장비 사전 검사 후 시공 투입 ∙사용자재의 성능검사의 기록 및 관리	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
	거푸집(슬래브)	붕괴_중량물 하중집중	추락		M	∙슬래브 구조검토 설계시 작성	∙구조검토서 확인	∙시공계획서 작성 시 자재의 적재위치, 방법, 방호 조치에 대한 방안 수립 ∙적재 장소의 여건에 따라 필요시 적정한 구조설계에 준한 적치, 보관 ∙자재의 이동(고정, 양중, 운반 등)에 대한 안전계획 수립 ∙장비 인양허용하중에 대한 사전 검토계획 수립	∙시공계획 및 안전계획에 준한 자재 적재, 이동의 감독	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	거푸집(하부 용접부)_타설	비산_용접불량	-		L
	거푸집(클라이밍폼)_인양	낙하_작업발판 고정용 폼타이볼트 용접부위 파단	추락		M
	거푸집_설치	전도_거푸집 수직도 미확보	협착		M
	거푸집_정리	전도_버팀대 미설치	협착		M	∙중요 또는 위험부 시공 시 가설물에 대한 정확한 설계(필요시 3차원 해석 포함)		∙설계서에 준한 시공계획 및 시공 ∙구조계산을 통한 관리		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	거푸집_조립	전도_버팀목 및 지지물 설치 미흡	매몰		M
	거푸집_철근배근	붕괴_외력	추락		H	∙시스템 동바리 설계 반영 ∙설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수 ∙사용자재의 성능검사 성적서 및 반입시의 자재의 인수 및 반입검사 확인	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보
	거푸집_해체	붕괴_해체방법 미흡	협착		L			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영	∙각 종 건설장비 주변 안전조치 여부 확인 ∙위험성평가를 통해 2주간 위험작업공종에 대한 작업자들에 대해 교육 ∙건설장비 월간점검시 체크리스트를 이용하여 건설사업관리기술자 주관 장비 점검 ∙작업전 산업안전보건법 제33조제1항제27호관련 특별안전교육 필히 실시	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		붕괴_버팀목 미설치	매몰		M	∙거푸집 동바리 등의 설치 및 해체 순서도 상세히 정리하여 작성		∙설계를 기준으로 거푸집의 설치,해체 순서를 상세히 정리하여 시공계획서에 반영		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		탈락_거푸집 하단 미고정	충돌		M	∙고소위치에서 거푸집 해체에 대한 표준 시공 순서도 설계 반영
		전도_우수유입	매몰		M			∙시공계획상의 침투수 유입방지 및 필요시 구조계산을 통안 안정성 확보
	거푸집_형틀	전도_버팀목 및 지지물 설치 미흡	매몰		M	∙거푸집에 대한 표준 설계도 작성(구조검토 포함) → 동바리 설치 및 지지시스템 설계 시 구조검토 필수		∙거푸집에 대한 동바리 설치 시 정확한 간격 및 변위방지 고정장치 확인 ∙동바리와 맞닫는 지면 쐐기목 설치	∙설계도에 의한 적정성 검토	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	연결통로(팔각벤딩폼)	탈락_작업하중	추락		M
	작업발판(거푸집)_해체	충돌_중량물 취급 미흡	추락		M
	작업발판(교각)_인양	낙하_폼타이 볼트 용접부위 파단	추락		L	∙ 임시시설에 대한 설계		∙임시시설 설계에 따른 작업절차 시공계획 작성 ∙공사 착수전 자재 점검 및 보수, 교체 ∙육안검사 및 자재검사 주기적 시행	∙시공계획서 작성여부 및 준수사항 여부 확인 ∙사용 자재 적합여부 확인	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	작업발판(거푸집)_이동	파손_자중 및 작업하중	추락		M			∙공사 착수전 자재 점검 및 보수, 교체	∙사용 자재 적합여부 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
	타워크레인_인양	비래_작업신호 불량	충돌		L			∙안전관리계획에 따른 신호수 배치	∙안전관리 이행여부 확인	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
	철골브라켓(거푸집지지용)_인양	낙하_와이어로프 파단	충돌		M	∙장비별 사용 와이어로프 설정	∙설계 반영 여부 확인	∙공사 착수전 자재 점검 및 보수, 교체 ∙장비 규격별 사용 와이어로프에 대한 시공계획 수립	∙사용 자재 적합여부 확인 ∙시공계획서 준수사항 확인	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
1.06 비계
비계	ACS폼(고소)_인상	낙하_탈락	추락		M	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성	∙지지용 앵커의 규격, 근입깊이, 수량 등의 표준도, 상세도 적정성 여부 확인 ∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수 ∙비계의 고정 및 연결상태 확인	∙지지용 앵커의 규격, 근입깊이, 수량 등의 표준도, 상세도 적정성 여부 확인 ∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
	비계(고소)_이동	-	추락		L	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영 ∙환경적 영향(바람,눈,우천)을 고려한 가시설의 시공전 검토가 필요하며 지역을 고려한 최악의 상황을 고려한 설치(필요시 구조계산서 포함	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙도로교 표준 시방서2013 ∙토목공사 표준일반 시방서 2005
	비계(고소)_자재이동	붕괴_구조기준 미준수	추락		M	∙고소위치에서 거푸집 해체에 대한 표준 시공 순서도 설계 반영		∙위치별, 상황별 시공상세도(shop DWG.) 수립	∙시공계획서의 적정성 확인 ∙설계 및 시공계획서의 준수 여부 확인	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	비계(고소)_철거	붕괴_해체작업 방법 및 순서 부적절	추락		H				∙시공계획서의 적정성 확인 ∙설계 및 시공계획서의 준수 여부 확인
	비계(달비계)_도장	낙하_로프 매듭풀림	추락		M			∙시공 전 작업자 안전교육 철저	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토. ∙건설사업관리기술자 작업전 교육 및 보호구 착용 확인여부를 작업안전 적합성 검사 체크리스트를 이용하여 체크.	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	비계(달비계)_청소	낙하_탈락
	비계(외부쌍줄비계)_이동	-
	비계_돌붙임 및 줄눈 설치	붕괴_벽이음 일부해체	-		H	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계(연결 시 문제 발생이 연계됨) ∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8
	비계(고소)_해체	전도_작업발판 고정 철선 절단	추락		M	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성 ∙설치,해체 순서도 작성	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영 ∙추락방지망 설치	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙도로교 표준 시방서 2013 ∙토목공사 표준일반 시방서 2005
	비계파이프_이동	-	전락		L			∙작업 전 주요공정 관련 사전 안전교육(TBM)	∙작업전 산업안전보건법 제 33조제1항제27호관련 특별안전교육 필히 실시 ∙작업 전 주요공정 관련 사전 안전교육(TBM) 운영방안 건설사업관리기술자 실시	∙산업안전보건법 시행령
	달비계(고소)_수평단차확인	낙하_작업발판을 빔위에서 인력으로 인양	추락		M
	사다리(고소)	-	추락		L	∙사다리 사용 표준 마련 (높이, 등받이, 경사)		∙작업 전 주요공정 관련 사전 안전교육(TBM) ∙안전교육시 사다리 표준 사용제원 교육		∙산업안전보건법 시행령
	시스템비계(고소)_정비	전도_비계 조립시 부재 누락	추락		H	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수 ∙시공상세도를 작성하여 관리,성능검사 필증 및 반입시 외간 검사 ∙강관 Pipe 6M이용 X-브레싱 설치	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트공사 표준시방서 2009
	이동식 비계(고소)_이동	낙하_이동식 비계 조정 및 추진방향 판단 미흡	충돌		H
	작업발판 지지대(이동식 비계)_설치	낙하_탈락	추락		M			∙시공 전 작업자 안전교육 철저 ∙작업발판의 설치전 자재반입시 성능검사 및 외관감사 실시 재품안전성검사,주기적인 외관검사의 시행	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	작업발판	-	추락		L			∙작업 전 주요공정 관련 사전 안전교육(TBM) ∙작업발판의 설치전 자재반입시 성능검사 및 외관감사 실시 재품안전성검사,주기적인 외관검사의 시행		∙산업안전보건법 시행령
	작업발판(비계)	낙하_탈락	추락		M	∙가시설의 설치,해체 순서도 작성	∙감독확인서 검토 ∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧확인	∙위험작업 반경 내 안전팬스 및 접근차단 조치 시행 ∙가시설의 설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영 ∙작업발판의 설치전 자재반입시 성능검사 및 외관감사 실시 재품안전성검사,주기적인 외관검사의 시행	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 ∙안전반경 확보 여부 및 안전시설물의 설치 적정성 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
	작업발판(비계)_설치	파손	추락		M			∙시공 전 작업자 안전교육 철저 ∙주기적 외관검사 실시	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	작업발판(이동식 비계)_설치	낙하_탈락	추락		M	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계 ∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성		∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수 ∙설치위치의 확인 반입자재의 성능검사 확인	∙지지용 앵커의 규격, 근입깊이, 수량 등의 표준도, 상세도 적정성 여부 확인 ∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
	작업발판(이동식 비계)_해체	전도_과하중 발생	추락		M	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙감독확인서 검토 ∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인	∙가시설의 설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영 ∙안전교육 및 안전장구의 착용 여부 확인 ∙위치별 지반상태 확인 및 시공계획 반영 ∙설치 해체 공종의 시공전 안전교육의 시행	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 ∙안전반경 확보 여부 및 안전시설물의 설치 적정성 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
	고소작업대_정리	낙하_탈락	추락		H
	고소작업대 붐 와이어_제거	파손	추락		M	∙고소작업대에 대한 표준도 작성 (구조검토서 포함)	∙시공계획서, 확인서 검토	∙제원, 작업반경 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영 ∙주요장비 반입시 체크리스트를 통안 장비점검 후 시행	∙건설장비 초기 현장 투입시 제조년 10년이하 장비 사용 및 안전인증제 도입 ∙월1회 장비검사 인증기관 입회하 장비점검실시 ∙장비운전원 특별안전교육 실시(2시간) ∙건설사업관리기술자 지휘감독하에 장비작업 실시 ∙산업안전보건법 시행규칙 제30조 4항에 관한 중량물, 하역계 및 차량계 운전작업계획서 작업전 제출	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8, ∙기타 장비관련 공인 기술자료
	고소작업대(받침대 연결부)_설치	낙하_장애물 충돌	추락		M			∙시공 전 작업자 안전교육 철저	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
	고소작업대 붐_설치	파손	추락		M			∙제원, 작업반경 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영
	고소작업대_연결	전도_고소작업대 설치 미흡	추락		M
	고소작업대_인양	전도_지지용 로프 풀림	추락		M	∙장비 신호수 반영		∙제원, 작업반경 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영 ∙사용 로프의 외관검사 시행 및 파단여부의 확인 주기적 로프점검 후 작업시행
	고소작업대_정리	낙하_탈락	추락		H
	카고크레인 붐_하역	전도_턴테이블 파단	충돌		M	∙장비 신호수 반영		∙제원, 작업반경 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
	카고크레인_설치	파손_볼트 결함	추락		H
	카고크레인(작업대)_하역	낙하_탈락	충돌		M				∙건설장비 초기 현장 투입시 제조년 10년이하 장비 사용 및 안전인증제 도입. ∙월1회 장비검사 인증기관 입회하 장비점검실시. ∙장비운전원 특별안전교육 실시(2시간). ∙건설사업관리기술자 지휘감독하에 장비 작업 실시. ∙산업안전보건법 시행규칙 제30조 4항에 관한 중량물, 하역계 및 차량계 운전작업계획서 작업전 승인
	카고크레인_인양	전도_중량물 급하강에 의한 충격하중	추락		M			∙제원, 작업반경 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영 ∙Rigging 플랜 작성 및 승인
		전도_아웃트리거 설치 미흡	충돌		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영 ∙장비의 작업 위치 및 공간을 사전 확인
1.07 동바리
동바리	거푸집동바리_타설	붕괴_하중의 지지상태 미흡	추락		L	∙하중을 지지할수 있는 지반 강도명기 및 대책 수립	∙설계내용 반영 여부 확인	∙시공계획서 작성시 지반 강도 확보 방안 명기	∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인
		붕괴_가새 미설치	추락		L	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계 ∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
		붕괴_설치상태 불량	매몰		M
		붕괴_동바리 조립도 미작성	매몰		H
		붕괴_구조안전성 미검토 및 조립도 미작성	매몰		H
	시스템동바리_거치	붕괴_가새 미설치	충돌		M	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성 ∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성 -표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) -시공계획 수립 시 반영	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
	시스템동바리_타설	붕괴_가새 설치 미흡	매몰		H
		붕괴_구조안정성 미검토	추락		M			∙시스템 동바리 구조계산 실시	∙동바리설계의 적정성 검토 (감리자, 기술지원 감리원)	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_상재하중	추락		M	∙설치지반 보완기준 반영		∙설계서에 준한 시공계획 및 시공		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
1.08 철근가공조립
철근가공조립	수직철근_철근조립	전도_수평보강 및 지지 미흡	협착		M
		전도_돌풍	협착		M
	수직철근_설치	전도_작업자 하중	추락		M	∙표준 작업대 설계 반영	∙반영 여부 확인	∙시공 전 작업자 안전교육 철저 ∙턴버클 지지	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토. ∙표준 작업대에 의한 작업 확인	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	교각 기초_철근조립	전도_철근 전도방지 미조치	협착		M
	교대 기초_철근조립	붕괴_철근결속 미흡	협착		M
	케이슨_철근조립	붕괴_수직철근 분절시공 미실시	추락		M
	절토사면(교대 배면)_철근조립	붕괴_임의 설계변경	매몰		H	∙토질 특성을 반영한 설계	∙(임시)사면설계의 적정성 검토 (감리자, 기술지원 감리원)		∙(임시)사면설계의 적정성 검토 (감리자, 기술지원 감리원)
1.09 콘크리트 타설
콘크리트 타설	슬래브_정리	붕괴_타설 작업방법 및 순서 미준수	매몰		M	∙고소위치에서 거푸집 해체에 대한 표준 시공 순서도 설계 반영		∙동바리 설치 시 정확한 간격 및 변위방지 고정장치 확인 ∙동바리 설치 시 정확한 간격 및 변위방지 고정장치 확인(구조검토) ∙슬래브 타설시 타설 순서도 작성으로 거푸집 하중분산	∙시공계획 준수 확인 ∙시공순서의 적합성 검토확인	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_구조안전성 미검토 및 조립도 미작성	매몰		M
	슬래브_타설	붕괴_설계도서 미준수	추락		M
		붕괴_설계두께 미준수	추락		M
		붕괴_거푸집 용접 불량	추락		M			∙작업 전 주요공정 관련 사전 안전교육(TBM) ∙캔틸레버부 간격 확인		∙산업안전보건법 시행령
		붕괴_부적정한 이음방법	매몰		M	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함)		∙재사용 자재 사용시는 간격과 정밀도에 대한 충분한 검토 후 시공 ∙거푸집, 동바리 자재 검수 시 결함, 불량 자재 확인 철저 ∙부재별 이음부 시공방법 설계도서 이행, 준수	∙거푸집, 동바리 자재 검수 시 결함, 불량 자재 확인 철저	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_철골보 접합부 불량	매몰		L
		붕괴_시스템 동바리 가새 미설치	매몰		H	∙현행 : 시스템 동바리 설계시 국부적인 단순 해석으로 전체 구조계 및 하중이 미반영		∙설계서에 준한 시공계획 및 시공 ∙거푸집에 대한 동바리 설치 시 정확한 간격 및 변위방지 고정장치 확인 ∙거푸집, 동바리 자재 검수 시 결함, 불량 자재 확인 철저	∙거푸집, 동바리 자재 검수 시 결함, 불량 자재 확인 철저	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_시스템 동바리 수직재 연결핀 미설치	매몰		H
	슬래브_평탄	붕괴_철골빔 앵커볼트 이탈	추락		M	∙고정앵커에 대한 설계를 반드시 반영		∙설계서에 명기된 앵커 규격 및 시방의 준수 ∙앵커관리 규정 시공계획서에 반영	∙시공계획서에 준한 앵커 시공, 규격의 적정성 확인	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙강구조공사 표준시방서2012
	거푸집_타설	전도_작업하중(진동)	추락		L	∙거푸집 및 사방향 동바리에 대한 구조검토(좌굴변형 여부 확인)		∙플랫 타이만 설치하고 지지가설물이 없거나 또는 동바리를 철근과 용접 지지하는 것은 원칙적으로 불가 ∙반드시 사방향 동바리를 견고히 고정하고 좌굴변형이 발행사지 않도록 시공.		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_타설하중 집중	추락		M
		붕괴_가새 및 지지대 미설치	매몰		H	∙거푸집 동바리 등의 설치 및 해체 순서도 작성		∙설계를 기준으로 거푸집의 설치,해체순서를 상세히 정리하여 시공계획서에 반영 ∙거푸집, 동바리 자재 검수 시 결함, 불량 자재 확인 철저	∙거푸집, 동바리 자재 검수 시 결함, 불량 자재 확인 철저	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_동절기 콘크리트 타설	매몰		H			∙시공계획서에 동절기 콘크리트 타설계획(순서 및 타설높이) 수립	∙타설계획의 적정성 검토‧확인
		붕괴_타설순서 미준수	매몰		H	∙타설순서의 표준화 제정	∙설계 반영 확인	∙타설순서 시공계획에 반영 ∙시공계획서 제출시 타설순서 명기	∙시공계획 준수 여부 확인 ∙시공계획서에 의한 타설순서 준수상태 확인
		붕괴_구조안전성 미검토 및 조립도 미작성	매몰		H			∙시공계획서에 구조계산서 포함 작성	∙구조계산서의 적정성 검토‧확인
		붕괴_타설속도 미준수	추락		H	∙거푸집설계 기본도 ∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙부재별 거푸집 시공상세도 작성 ∙타설 순서도 작성		∙타설 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 타설 순서 및 상세 시공도 작성(필반드시 구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영	∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙철도건설공사 전문시방서 2013
		붕괴_과하중 적치	추락		M			∙작업하중을 고려한 거푸집 설치 계획 수립	∙시공계획 준수 여부 확인
		붕괴_긴결 미흡	추락		M			∙시공상세도 작성 및 시공 철저	∙시공상태 확인 철저
		전도_콘크리트 유동화현상	추락		H	∙거푸집에 대한 표준 설계도 작성(구조검토 포함) → 사방향 동바리 설치 및 지지시스템 설계 시 구조검토 필수		∙거푸집에 대한 동바리 설치 시 정확한 간격 및 변위방지 고정장치 확인		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	거푸집동바리_타설	붕괴_가새 미설치	추락		L	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수 ∙U-헤드, 멍에제 가운데 조정	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
		붕괴_구조안전성 미검토 및 조립도 미작성	매몰		H			∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수		∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		붕괴_설치상태 불량	매몰		M
		붕괴_동바리 조립도 미작성	매몰		H			∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수 ∙경사가세 설치(동바리)		∙가설공사 표준시방서 2014.8
	시스템동바리_거치	붕괴_가새 미설치	충돌		M	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
	시스템동바리_타설	붕괴_가새 설치 미흡	매몰		H
		붕괴_구조안정성 미검토	추락		M			∙시스템 동바리 구조계산 실시	∙동바리설계의 적정성 검토 (감리자, 기술지원 감리원) ∙사전 구조검토의 적정성 확인 ∙시공계획서 준수상태 확보 ∙구조계산서의 적정성 검토 확인	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_상재하중	추락		M	∙설치지반 보완기준 반영		∙설계서에 준한 시공계획 및 시공		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_타설하중 집중	추락		M
	펌프카 붐_인양 및 상승	낙하_지지부재 이탈(C.P.B 마스트)	충돌		M			∙시공계획서 작성 시 자재의 적재위치, 이동 및 적재의 방법, 방호 조치에 대한 방안 수립 ∙자재의 이동(고정, 양중, 운반 등)에 대한 안전계획 수립 ∙지반 상태 확인, 아웃트리거 확인	∙시공계획 및 안전계획에 준한 자재 적재, 이동의 감독	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	펌프카 붐_타설	낙하_붐 연결핀 파단	충돌		L			∙건설기계 검사 확인(년한, 장비의 개조 여부, 수입차의 정확한 제원 및 개조여부 등)		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙산업안전보건법 시행령
	펌프카_타설	비래_건설기계 작업순서 미흡	충돌		M			∙시공 전 작업자 안전교육 철저
		전도_지반침하	충돌		M	∙급사면, 고저차가 큰 부위에 대한 설계 시 중장비 운용에 대한 검토(설계서, 별도 보고서 등에 반영)		∙시공계획서에 장비 운용에 대한 계획 반영 ∙고정 아웃트리거 설치계획 반영 ∙노후된 장비 반입, 사용 지양	∙시공계획의 적정성 확인 ∙시공계획서 이행 여부 확인	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	흙막이가시설(벽체)	붕괴_조사심도와 근입심도 차이	-		L			∙시공 보링 결과 및 줄파기를 실시하여 설계시와 현장 여건을 확인하여 시공계획 수립	∙시공계획의 적적성 검토 및 이행 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
		붕괴_줄파기공 미실시	-		L			∙줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황(지하수)을 확인하여 시공
1.10 표면처리
1.11 교량받침
1.12 배수파이프
1.13 다웰바설치공
1.14 무수축 콘크리트
1.15 시공 이음
1.16 방수공
1.17 교대보호블럭 설치
1.18 스페이셔 설치
1.19 교량유지관리용 표지판
1.20 점검통로
1.21 점검용계단
1.22 가시설
a H-BEAM 및 토류판	흙막이가시설(벽체)	붕괴_조사심도와 근입심도 차이	-		L
		붕괴_줄파기공 미실시	-		L
		붕괴_우수유입	-		L	∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영) ∙흙막이 설계 시 시공단계별 3차원 해석에 의한 설계 ∙시공중 계측기 설치 반영	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공 ∙구조계산서 및 시공상세도 작성 ∙토류판 설치시 되메우기 철저	∙시공계획서의 적합성 검토	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙건설공사 비탈면표준시방서 2011 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
		붕괴_우수유입 및 지하수 침투	-		L	∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)		∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공		∙건설공사 비탈면 표준시방서2011 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_응력집중			L
		붕괴_지지구조물 설치 미흡	-		L	∙근접시공과 관련 영향 검토 실시(해석 및 계측)	∙계획수립 여부 확인	∙설계 변경 시 검토 내용 원설계자와 검토 의무화 ∙시공계획서에 근접 시설물 관리사항 포함.	∙설계 검토 사항에 대한 기술지원 감리원의 확인	∙건설공사 비탈면 표준시방서2011 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
		붕괴_코너버팀대의 포스트 파일 일부 미설치	-		L
		붕괴_과잉굴착	-		L			∙시공계획서 굴착심도 명기	∙시공계획서 준수 여부 확인
		붕괴_근입심도 부족	-		L
		붕괴_사면활동	-		L	∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영) ∙흙막이 설계 시 시공단계별 3차원 해석에 의한 설계	∙설계자의 계획수립 여부 확인	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면 표준시방서2011 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
		붕괴_설계도서 미준수	-		L	∙근접시공과 관련 영향 검토 실시(해석 및 계측)	∙계획수립 여부 확인	∙설계 변경 시 검토 내용 원설계자와 검토 의무화 ∙시공계획서에 근접 시설물 관리사항 포함.	∙설계 검토 사항에 대한 기술지원 감리원의 확인	∙건설공사 비탈면 표준시방서2011 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
		붕괴_설계보다 큰 토압 작용	충돌		M	∙설계 시 굴착면 주변의 지반 상황에 부합하는 검토 및 보강 반영 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영) ∙시공단계별 3차원 해석	∙설계 내용에 대한 시공 전 설계도서 검토	∙설계 내용에 대한 시공 전 설계도서 검토 의무 시행. ∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공 ∙설계 외 주변 여건을 고려한 시공상세도 작성 및 이행 ∙작업중의 토질의 확인 및 필요시 보강	∙시공계획서의 적합성 검토	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙산업안전보건법 시행령
		붕괴_전단변형 미고려	-		L	∙현재 암반분류에 지질학적 암반특성을 반영하지 않는 상황 → 지질공학적 암반분류 및 특성을 반영하여 설계	∙설계자의 계획수립 여부 확인	∙지질공학적 설계 내용을 반영한 시공계획서 작성 및 시공 ∙토류벽 토사유출, X-브레이싱 보강	∙지질공학적 분류에 암석의 상태 확인 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인	∙토목공사 표준 일반시방서 2005
	흙막이가시설(벽체)_설치	붕괴_흙막이 지보공 미설치	매몰		M	∙흙막이 설계 시 시공단계별 3차원 해석에 의한 설계	∙계획수립 여부 확인	∙3차원 검토 결과에 의한 계측시행 및 계측관리	∙설계 검토사항에 대한 기술지원 감리원의 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준일반시방서 2005 ∙건축공사 표준시방서 2013.
		붕괴_지반조건이 설계조건과 상이	매몰		M			∙지반조건에 적합한 구조해석 재실시 및 변경 현황 보고	∙구조계산의 적정성 검토 및 확인(기술지원감리원)
	흙막이가시설(벽체)_해체	붕괴_해체작업 순서 미준수	매몰		M	∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙설계자 계획수립 여부 확인	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공 ∙계측을 통한 관리	∙시공계획서의 적합성 검토	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙산업안전보건법 시행령
		붕괴_해체작업 순서 미흡	매몰		M	∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공범위의 기본설정(설계서 반영) ∙절취, 굴토된 토사 및 암석의 적치 계획 수립	∙설계자 계획수립 여부 확인	∙절취, 굴토된 토사 및 암석의 적치 계획 수립.(시공계획서 반영) ∙사용 자재의 적재 위치 및 적정 적재 수량 계획 수립.(시공계획서 반영) ∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토. ∙설계서 및 시공계획서의 준수 여부 확인.	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준일반시방서 2009
	흙막이가시설(벽체)_엄지말뚝 인발	붕괴_해체작업시 적재하중	매몰		M	∙시공단계를 고려한 3차원 흙막이 설계 시방서 제시 ∙설계 도면에 흙막이 해체단계의 구주물과 연계상태를 표시	∙설계자 계획수립 여부 확인	∙설계 내용을 반영한 시공계획 및 계측 계획 수립 후 시공. ∙수직도 확인	∙시공계획서의 적합성 검토	∙가설공사 표준시방서 2014.8
	흙막이가시설(접합부)_설계변경	붕괴_설계 및 시공자료 유실	-		L	∙근접시공과 관련 영향 검토 실시(해석 및 계측)	∙계획수립 여부 확인	∙설계 변경 시 검토 내용 원설계자와 검토 의무화 ∙시공계획서에 근접 시설물 관리사항 포함.	∙설계 검토 사항에 대한 기술지원 감리원의 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8
	흙막이가시설(버팀대)	붕괴_지반 함수량 증가	-		L	∙충분한 지반조사 결과를 반영한 흙막이 설계 준수 ∙기하학정 비정형 흙막이의 설계는 반드시 3차원 모델링(시공 단계별) 후 설계	∙계획수립 여부 확인	∙설계내용을 반영한 계측 시행 ∙계측관리 기준 - 설계 시 구조검토 결과를 반드시 적용 ∙시공계획의 수립 및 배수계획의 검토	∙상기 설계, 시공 조건의 준수사항 확인 ∙기술지원 감리원의 확인, 검토 필수	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
		붕괴_토사의 자중증가 및 기반암석	-		L
	흙막이가시설(버팀대)_해체	파손_토압	충돌		M
	흙막이가시설(버팀보)_반출	낙하_해체상태 방치	충돌		M
	흙막이가시설(시설물 인접)	붕괴_설계보다 큰 토압 작용	-		L
	흙막이가시설(코너 스트러트)	붕괴_응력집중	-		L	∙소규모 공사도 세심한 흙막이 설계(계측 결과를 반영한 3차원 및 시공단계를 반영한 설계)	∙설계자의 계획수립 및 제출 여부 확인	∙설계 내용을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행 ∙자재의 성능검사 확인 코너부의 응력집중을 방지하기 위한 사용자재의 단면손실을 최소화 부수자재의 성능검사 ∙화타쐐기 각도 확인	∙시공계획서의 적합성 검토	∙토목공사 표준일반시방서 2005 ∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011
	흙막이가시설(코너 스트러트)_굴착	붕괴_지형조건과 설계해석조건 상이	-		L	∙충분한 지반조사 결과를 반영한 흙막이 설계 준수 ∙필요 시 3차원 모델링(시공 단계별) 후 설계	∙계획수립 여부 확인	∙설계내용을 반영한 계측 시행 ∙계측관리 기준 - 설계 시 구조검토 결과를 반드시 적용	∙상기 설계, 시공 조건의 준수사항 확인 ∙기술지원 감리원의 확인, 검토 필수	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
		붕괴_지하수압 증가
	흙막이가시설(코너 버팀보)_굴착	붕괴_전단철근보강보의 전단 부족	-		L	∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙설계자의 계획수립 여부 확인	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙시공계획서의 적합성 검토	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
a-1 강재사용료및운반비
a-2 천공및항타	항타기_항타	전도_장비운용 미흡	-		L	∙항타기 이동시 철판깔기에 대한 기준 마련	∙기준제시 여부 확인	∙장비설치 / 작업위치의 확인 ∙중장비 운용 시공계획서 작성	∙시공계획의 검토 및 준수 여부 확인
	어스오거(천공구멍 인접)_정리	붕괴_작업순서 미흡	비래		M
a-3 케이싱튜브설치철거
a-3 천공홀되메우기
a-4 스티프너설치
a-5 H-PILE 두부정리
a-6 H-PILE 연결및해체
a-7 모래채움
a-8 H-PILE 항발
a-9 토류판설치철거
a-10 화타쐐기 제작및설치철거								∙화타쐐기 제작시 도면준수 및 볼트구멍 천공시 펀칭기 사용
b 어스앵커
c 장설치 및 철거
	띠장_해체	낙하_탈락	충돌		M	∙띠장 해체에 대한 작업순서의 표준 제시 ∙가시설의 설치,해체 순서도 작성	∙감독확인서 검토	∙위험작업 반경 내 안전팬스 및 접근차단 조치 시행 ∙가시설의 설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영 ∙계측결과에 따른 띠장 해체 순서도 작성	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 ∙안전반경 확보 여부 및 안전시설물의 설치 적정성 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
d 걸이 설치 철거
e 보강재 제작 및 설치
f 형강 설치 및 철거
g JACK 설치 철거
h ROCK BOLT
I 숏크리트타설
	숏크리트 잔재물(지보배면부)_정리	낙하	충돌		L
j 숏크리트 생산 및 운반
k 가시설 계측
l 터파기
m 유공관
n 잡석채움
나. 상부공
2.01 거푸집공
거푸집공	거푸집(고소)_설치	붕괴_거푸집 지지대 위로 인양	추락		M
		-	추락		L			∙시공계획서 수립 시 작업자 동선 확보 준수(안전난간, 가설재의 유격 및 변위의 확인)		∙콘크리트공사 표준시방서 2009, 가설공사 표준시방서 2014.8
	거푸집(고소) _자재인양	붕괴_중량물 하중집중	추락		M			∙시공계획서 수립시 재제 적치 위치 표기	∙계획서 수행 여부 확인
	거푸집(고소) _철근적재	붕괴_지지대 미설치	추락		M			∙시공계획서 수립시 지지대 설치 위치 계획
		붕괴_철근 과적재	추락		M			∙장비 사용계획서 제출시 중량물에 대한 적정장비 사용 계획 수립
	거푸집(고소)_해체	붕괴_작업하중	추락		M			∙작업하중을 고려한 거푸집 설치 계획 수립	∙계획서 수행 여부 확인
		낙하_크레인줄걸이 미설치	추락		L	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성 ∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영 ∙상, 하 동시 작업 금지	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
	거푸집(슬래브)	붕괴_중량물 하중집중	추락		M			∙시공계획서 작성 시 자재의 적재위치, 방법, 방호 조치에 대한 방안 수립 ∙적재 장소의 여건에 따라 필요시 적정한 구조설계에 준한 적치, 보관 ∙자재의 이동(고정, 양중, 운반 등)에 대한 안전계획 수립	∙시공계획 및 안전계획에 준한 자재 적재, 이동의 감독	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	거푸집(하부 용접부)_타설	비산_용접불량	-		L
	거푸집(클라이밍폼)_인양	낙하_작업발판 고정용 폼타이볼트 용접부위 파단	추락		M
	거푸집_설치	전도_거푸집 수직도 미확보	협착		M
	거푸집_정리	전도_버팀대 미설치	협착		M	∙중요 또는 위험부 시공 시 가설물에 대한 정확한 설계(필요시 3차원 해석 포함)		∙설계서에 준한 시공계획 및 시공		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	거푸집_조립	전도_버팀목 및 지지물 설치 미흡	매몰		M
	거푸집_철근배근	붕괴_외력	추락		H	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계(연결 시 문제 발생이 연계됨)	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙건축공사 표준 시방서 ∙콘크리트 표준시방서 2009
	거푸집_해체	붕괴_해체방법 미흡	협착		L	∙표준 작업 방법의 제시	∙반영 여부 확인	∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영 ∙작업자간 무전기 연락	∙각 종 건설장비 주변 안전조치 여부 확인 ∙작업 전 건설사업관리기술자 작업안전 적합성검사를 이용 안전여부 검토 실시	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		붕괴_버팀목 미설치	매몰		M	∙거푸집 동바리 등의 설치 및 해체 순서도 작성		∙설계를 기준으로 거푸집의 설치,해체 순서를 상세히 정리하여 시공계획서에 반영		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		탈락_거푸집 하단 미고정	충돌		M	∙고소위치에서 거푸집 해체에 대한 표준 시공 순서도 설계 반영				∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		전도_우수유입	매몰		M	∙우기 후 진반 지지력 확인 반영	∙반영 여부 확인		∙ 우기 전․후 지지력 확인 및 파손 유무 점검	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	거푸집_형틀	전도_버팀목 및 지지물 설치 미흡	매몰		M	∙거푸집에 대한 표준 설계도 작성(구조검토 포함) → 동바리 설치 및 지지시스템 설계 시 구조검토 필수		∙거푸집에 대한 동바리 설치 시 정확한 간격 및 변위방지 고정장치 확인 ∙시공상세도의 작성,사용자재의 성능시험 확인		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	타워크레인_인양	-	비래		L
	드릴_조립	-	협착		L
2.02 비계
비계	ACS폼(고소)_인상	낙하_탈락	추락		M	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) - 앵커의 규격, 시공기준 등을 명기한 시공상세도 표준도 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영 ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계		∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수 ∙단계별 시공상세도 작성 및 이행철저	∙지지용 앵커의 규격, 근입깊이, 수량 등의 표준도, 상세도 적정성 여부 확인 ∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
	비계(고소)_이동	-	추락		L	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성 ∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙도로교 표준 시방서2013 ∙토목공사 표준일반 시방서 2005
	비계(고소)_자재이동	붕괴_구조기준 미준수	추락		M	∙고소위치에서 거푸집 해체에 대한 표준 시공 순서도 설계 반영			∙시공계획서의 적정성 확인 ∙설계 및 시공계획서의 준수 여부 확인	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	비계(고소)_철거	붕괴_해체작업 방법 및 순서 부적절	추락		H
	비계(달비계)_도장	낙하_로프 매듭풀림	추락		M	∙시공상세도 작성		∙시공 전 작업자 안전교육 철저	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토. ∙건설업 기초안전보건교육 이수자 투입 및 보호구 지급.(단발성 작업자 제외)	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	비계(달비계)_청소	낙하_탈락	추락		M				∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	비계(외부쌍줄비계)_이동	-	추락		M
	비계_돌붙임 및 줄눈 설치	붕괴_벽이음 일부해체	-		H	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계(연결 시 문제 발생이 연계됨)	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8
	비계(고소)_해체	전도_작업발판 고정 철선 절단	추락		M	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성 ∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성 -표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) -시공계획 수립 시 반영	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙도로교 표준 시방서2013 ∙토목공사 표준일반 시방서 2005
	비계파이프_이동	-	전락		L			∙작업 전 주요공정 관련 사전 안전교육(TBM)		∙산업안전보건법 시행령
	달비계(고소)_수평단차확인	낙하_작업발판을 빔위에서 인력으로 인양	추락		M
	사다리(고소)	-	추락		L			∙작업 전 주요공정 관련 사전 안전교육(TBM)	∙사다리 기준안에 맞는 제품 사용 ∙부적격시 반입금지	∙산업안전보건법 시행령
	시스템비계(고소)_정비	전도_비계 조립시 부재 누락	추락		H	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트공사 표준시방서 2009
	이동식 비계(고소)_이동	낙하_이동식 비계 조정 및 추진방향 판단 미흡	충돌		H
	작업발판	-	추락		L			∙작업 전 주요공정 관련 사전 안전교육(TBM)	∙정	∙산업안전보건법 시행령
	작업발판(비계)	탈락	추락		M		∙시공계획서, 감독확인서 검토	∙위험작업 반경 내 안전팬스 및 접근차단 조치 시행 ∙가시설의 설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 ∙안전반경 확보 여부 및 안전시설물의 설치 적정성 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
	작업발판(비계)_설치	파손	추락		M			∙시공 전 작업자 안전교육 철저	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2006
	작업발판(이동식 비계)_설치	탈락	추락		M	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계		∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수 ∙사용자재의 성능검사 확인	∙지지용 앵커의 규격, 근입깊이, 수량 등의 표준도, 상세도 적정성 여부 확인 ∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
	작업발판(이동식 비계)_해체	전도_과하중 발생					∙시공계획서, 감독확인서 검토	∙가시설의 설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) -시공계획 수립 시 반영 ∙안전교육 및 안전장구의 착용 여부 확인	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 ∙안전반경 확보 여부 및 안전시설물의 설치 적정성 확인
	작업발판 지지대(이동식 비계)_설치	탈락	추락		M	∙작업발판 설치 표준화 제시	∙반영 여부 확인	∙시공 전 작업자 안전교육 철저	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	타워크레인(마스트)_운반	전도_앵커볼트 파손	추락		M	∙타워크레인의 지지구조에 대한 상세설계(기초 등) ∙타워크레인의 고정방법(앵커, 기타 기초와 연결하는 적정 연결방법)에 대한 상세설계		∙장비에 대한 정확한 제원의 확보 및 설치관련 기술자료의 확보 ∙상세설계도 및 기술자료에 의한 장비의 설치 및 해체에 대한 내용이 반영된 시공계획서의 작성	∙기초, 접합(연결) 등에 대한 적정성 확인	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
	타워크레인(마스트)_인양		충돌		M
	타워크레인(마스트와 턴테이블)_고정	전도_설치작업순서 미준수	추락		M
	타워크레인(테레스코픽케이지)_분리	탈락	충돌		M
	타워크레인_설치	전도_Counter Jib 연결에 따른 편하중과 작업하중	협착		H
	타워크레인_해체	전도_수평붐대 파손	추락		H
2.03 동바리
동바리	거푸집동바리_타설	붕괴_가새 미설치	추락		L	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
		붕괴_설치상태 불량	매몰		M					∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트공사 표준시방서 2009
		붕괴_동바리 조립도 미작성	매몰		H					∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_하중의 지지상태 미흡	추락		L
		붕괴_구조안전성 미검토 및 조립도 미작성	매몰		H	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수 ∙사용 자재의 검수 및 확인	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
	시스템동바리_타설	붕괴_가새 미설치	충돌		M	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성 ∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		붕괴_가새 설치 미흡	매몰		H
		붕괴_구조안정성 미검토	추락		M	∙시스템동바리 설치시 지반 지지력 확인 반영		∙설계서에 준한 시공계획 및 시공	∙시공계획의 적합성 검토	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_상재하중	추락		M		∙반영 여부 확인	∙설계서에 준한 시공계획 및 시공		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	타워크레인_인양	-	비래		L
2.04 철근가공조립
철근가공조립	거더_철근조립	-	추락		L			∙시공 전 작업자 안전교육 철저	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령
2.05 콘크리트 타설
콘크리트 타설	슬래브_정리	붕괴_타설 작업방법 및 순서 미준수	매몰		M	∙고소위치에서 거푸집 해체에 대한 표준 시공 순서도 설계 반영	∙시공계획서 반영 여부 확인	∙동바리 설치 시 정확한 간격 및 변위방지 고정장치 확인 ∙타설순서 구조검토, 계획서 반영		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_구조안전성 미검토 및 조립도 미작성	매몰		M
	슬래브_타설	붕괴_설계도서 미준수	추락		M
		붕괴_설계두께 미준수	추락		M
		붕괴_거푸집 용접 불량	추락		M			∙작업 전 주요공정 관련 사전 안전교육(TBM)		∙산업안전보건법 시행령
		붕괴_부적정한 이음방법	매몰		M	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함)		∙재사용 자재 사용시는 간격과 정밀도에 대한 충분한 검토 후 시공	∙거푸집, 동바리 자재 검수 시 결함, 불량 자재 확인 철저	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_철골보 접합부 불량	매몰		L
		붕괴_시스템 동바리 가새/수직재 미설치	매몰		H			∙설계서에 준한 시공계획 및 시공 ∙거푸집에 대한 동바리 설치 시 정확한 간격 및 변위방지 고정장치 확인	∙거푸집, 동바리 자재 검수 시 결함, 불량 자재 확인 철저	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	슬래브_평탄	붕괴_철골빔 앵커볼트 빠짐	추락		M	∙고정앵커에 대한 설계를 반드시 반영		∙설계서에 명기된 앵커 규격 및 시방의 준수 ∙앵커관리 규정 시공계획서에 반영	∙설계 및 시공계획서에 준한 앵커 시공, 규격의 적정성 확인	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙강구조공사 표준시방서2012
	거더_타설	전도_설계시 교량내외측 하중 편차	매몰		H	∙장비 운용을 고려한 시공단계별 구조검토 시행		∙시공단계가 고려된 설계 자료를 기반으로 시공계획 수립 ∙설계적용 제원의 장비 투입	∙시공계획서의 적정성 검토 ∙장비의 제원 검토
		전도_작업하중(진동)	추락		L	∙거푸집 및 사방향 동바리에 대한 구조검토(좌굴변형 여부 확인)		∙플랫 타이만 설치하고 지지가설물이 없거나 또는 동바리를 철근과 용접 지지하는 것은 원칙적으로 불가 ∙반드시 사방향 동바리를 견고히 고정하고 좌굴변형이 발행사지 않도록 시공 ∙슬래브 타설시 타설 순서도 작성으로 거푸집 하중분산		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_타설하중 집중	추락		M
	거푸집_타설	붕괴_가새 및 지지대 미설치	매몰		H	∙거푸집 동바리 등의 설치 및 해체 순서도 작성		∙설계를 기준으로 거푸집의 설치,해체 순서를 상세히 정리하여 시공계획서에 반영	∙거푸집, 동바리 자재 검수 시 결함, 불량 자재 확인 철저	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_동절기 콘크리트 타설	매몰		H			∙시공계획서에 동절기 콘크리트 타설계획(순서 및 타설높이) 수립	∙타설계획의 적정성 검토∙ 확인
		붕괴_타설순서 미준수	매몰		H	∙타설순서의 표준도 제시	∙반영 여부 확인	∙시공계획 수립시에 반영 ∙시공계획서 제출시 타설순서 명기	∙적합성 검토 확인 ∙시공계획에 의한 타설순서 준수 상태 확인
		붕괴_구조안전성 미검토 및 조립도 미작성	매몰		H			∙시공계획서에 구조계산서 포함 작성	∙구조계산의 적정성 검토∙확인
		붕괴_타설속도 미준수	추락		H	∙거푸집설계 기본도 ∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함)		∙타설 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 타설 순서 및 상세 시공도 작성(필요 시 구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영	∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙철도건설공사 전문시방서 2013
		붕괴_과하중 적치	추락		M			∙작업하중을 고려한 거푸집 설치 계획 수립	∙시공계획 준수 여부 확인
		붕괴_긴결 미흡	추락		M			∙시공상세도 작성 및 시공 철저	∙시공상태 확인 철저
		전도_콘크리트 유동화현상	추락		H	∙거푸집에 대한 표준 설계도 작성(구조검토 포함) → 동바리 설치 및 지지시스템 설계 시 구조검토 필수		∙거푸집에 대한 동바리 설치 시 정확한 간격 및 변위방지 고정장치 확인 ∙시공계획서의 작성의 타설높이 및 타설속도관리, 및 타설시 변형관리		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	거푸집동바리_타설	붕괴_가새 미설치	추락		L	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005 ∙콘크리트공사 표준시방서 2009
		붕괴_구조안전성 미검토 및 조립도 미작성	매몰		H
		붕괴_동바리 조립도 미작성	매몰		H
		붕괴_설치상태 불량	매몰		M
	시스템동바리_거치	붕괴_가새 미설치	충돌		M	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성 ∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영 ∙공사 시행전 지반의 육안검사	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
	시스템동바리_타설	붕괴_가새 설치 미흡	매몰		H	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성 ∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		붕괴_구조안정성 미검토	추락		M	∙시스템동바리 설치시 지반 지지력 확인 반영	∙반영 여부 확인	∙설계서에 준한 시공계획 및 시공		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_타설하중	매몰		H	∙임시시설에 대한 설계 - 거푸집, 동바리 설계 시행 ∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2006 ∙도로교 표준 시방서 2013 ∙토목공사 표준일반 시방서 2005
		붕괴_상재하중	추락		M			∙설계서에 준한 시공계획 및 시공		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	펌프카 붐_인양 및 상승	낙하_지지부재 이탈(C.P.B 마스트)	충돌		M			∙시공계획서 작성 시 자재의 적재위치, 이동 및 적재의 방법, 방호 조치에 대한 방안 수립 ∙자재의 이동(고정, 양중, 운반 등)에 대한 안전계획 수립	∙시공계획 및 안전계획에 준한 자재 적재, 이동의 감독	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	펌프카 붐_타설	낙하_붐 연결핀 파단	충돌		L			∙장비 정기점검 등을 통한 이상유무 확이 철저		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙산업안전보건법 시행령
	펌프카_타설	비래_건설기계 작업순서 미흡	충돌		M			∙장비 정기점검 등을 통한 이상유무 확이 철저
		전도_지반침하	충돌		M	∙급사면, 고저차가 큰 부위에 대한 설계 시 중장비 운용에 대한 검토(설계서, 별도 보고서 등에 반영)	∙반영 여부 확인	∙시공계획서에 장비 운용에 대한 계획 반영	∙시공계획의 적합성 검토	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
2.06 표면처리
2.07 P.S.C BOX 교
P.S.C BOX교	PSC궤도빔(상부)_설치	전도_인력으로 안전작업대 설치	추락		M
	PSC빔_거치	낙하_인양로프 해체방법 미흡	추락		H
	거더(교대)	전도_수직철근 전도모멘트 발생	추락		M	∙거더 전도 방지 시설을 설계 시 반영 - 지지, 결속 방법 등에 대한 검토 내용 포함 ∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치, 해체 순서도 작성	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙도로교 표준 시방서 2013 ∙토목공사 표준일반 시방서 2005
	교량 상부(고소)_슬래브	-	추락		-
	교량 상부(고소)_앵커천공	-	추락		L
	사장교(주탑)_연결	붕괴_가설시 발생하중 미검토 시공	-		H	∙시공 단계별 구조검토 시행		∙시공 단계별 구조검토 자료에 준한 시공계획 수립 및 시공계획서 작성	∙시공계획 준수 여부 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙도로교 표준 시방서 2013 ∙토목공사 표준일반 시방서 2005
	슬래브_인상	낙하_슬래브 1경간 침하로 인한 단차발생	-		H				∙불량자재에 대한 자재 검수 철저	∙도로교 표준 시방서 2013 ∙토목공사 표준일반 시방서 2005
	슬래브(고소)_타설	붕괴_좌굴강도 부족	추락		H	∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙건설기계 검사 확인(년한, 장비의 개조 여부, 수입차의 정확한 제원 및 개조여부 등)		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
2.08 I.L.M공
2.09 신축장치
2.10 낙하물방지공
낙하물방지공	낙하물방지망(고소)_설치	낙하_탈락(지지용 앵커)	추락		M				∙지지용 앵커의 규격, 근입깊이, 수량 등의 표준도, 상세도 적정성 여부 확인 ∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		-	추락		L	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인	∙산업안전보건법 시행령
	방호선반(고소)_해체	-	추락		M
2.11 무수축 콘크리트
2.12 신구콘크리트접합
2.13 교량배수시설공
2.14 스페이셔 설치
2.15 교명판,교명주
2.16 측량기준점 설치
2.17 유도 배수용 홈설치
2.19 가드휀스
2.20 난간방호벽
2.21 교량유지관리용 표지판
2.22 신축이음 덮개시설
2.23 가로등기초
2.24 내부출입문

2. 터널공사

공종명	Hazard	Risk				단계별 저감대책				관련기준
		물적(사고결과_사고유발원인)	인적	L	S	설계	발주	시공	관리감독
1.01 굴착
굴착	굴착사면(터널입구)_자재정리	낙석_부석 미제거	충돌		M	∙적정 시방서의 제시	∙발주서류 목록중 ∙공사현장 안전수칙에 제시∙암반 불량 구간 W/M 반영 (소형 낙반 예방)	∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시-비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙사면 정리 후 부석화 조사 공종을 시공계획서에 반영 ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙굴착사면(갱구입구)천단부 수목정리 → 강풍 및 호우시 수목 낙하로 인한 피해대책 수립 ·붕락·낙반대비용 장비 투입(작업차량 덮게 등) ·붕락대비 유선전화 설치, 비상자재 비치	∙시공계획서의 적정성 검토 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙현장여건에 따른 사면안정공법 변경시 시공성, 경제성, 적합성 검토	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
	막장(상부)	붕괴_암층	-		L	∙암반분류에 지질학적 특성을 반영하여 명기 ∙시추 시험 결과 및 기타 비파괴 시험을 종합적으로 분석하여 시공 중 예측되는 위험사항을 제시하고 확인하도록 지시	∙발주서류 목록중 ∙공사현장 안전수칙에 제시 ∙인접시설물(도로, 철도 등) 반영	∙지질공학적 설계 내용을 반영한 시공계획서 작성 및 시공 ∙시공 중 Face Mapping 빈도 조정 필요(증가) ∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙ 터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함 ∙F/M, 계측 지반조사 결광 방안 반영	∙지질공학적 분류에 암석의 상태확인 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙기술지원 감리의 현장지원(Face Mapping) ∙계측치수시 확인 및 관찰 ∙지반보강공법 추가시행 검토	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
		붕괴_석회암/풍화암층 파쇄대	-		L	∙적정 시방서의 제시 ∙인접 구조물의 영향 평가 및 계측 감시	∙공사설계시방서에 제시 ∙지반 이상징후에 따른 터널붕락 대책수립 등 제시 ∙발파 패턴 세분화 ∙인접시설물(도로, 철도 등) 반영	∙계측 시행 및 사전 조사, 평가 ∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙시공 중 Face Mapping 빈도 조정 필요(증가) ∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함 ∙막장 상황에 맞는 굴착 및 보강 순서, 수집 - 부분발파, 분할 굴착 등 ∙터널 상부(지표면) 보안 물건 관리 방안 ∙막장, 지질조사, 계측 연계 검토	∙시공계획서의 적정성 검토 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙기술지원 감리의 현장지원(Face Mapping) ∙계측치수시 확인 및 관찰 ∙지반보강공법 추가시행 검토	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005 ∙도로공사 표준시방서 2009
	막장(천단부)	붕괴_파쇄대(단층/쐐기형/풍화암층), 연약대, 절리	-		L	∙적정 시방서의 제시 ∙인접구조물의 영향 평가 및 계측감시	∙공사설계시방서에 제시 ∙지반 이상징후에 따른 터널붕락 대책수립 등 제시 ∙발파 패턴 세분화 ∙인접시설물(도로, 철도 등) 반영	∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙시공 중 Face Mapping 빈도 조정 필요(증가) ∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함 ∙막장 상황에 맞는 굴착 및 보강 순서, 수집 - 부분발파, 분할 굴착 등 터널 상부(지표면) 보안 물건 관리 방안 ·막장, 지질조사, 계측 연계 검토	∙시공계획서의 적정성 검토 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙기술지원 감리의 현장지원(Face Mapping) ∙계측치수시 확인 및 관찰 ∙지반보강공법 추가시행 검토	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
		붕괴_불연속면 미립자유실 및 이완하중 증가	-		L	∙절리를 고려한 지질공학적 암반 분류 및 특성을 반영한 설계 ∙시추시험결과 및 기타 비파괴시험을 종합적으로 분석하여 시공중 예측되는 위험사항을 제시하고 확인하도록 지시	∙공사설계시방서에 제시 ∙지반 이상징후에 따른 터널붕락 대책수립 등 제시 ∙터널상부 공동조사 방법 제시	∙지질공학적 설계 내용을 반영한 시공계획서 작성 및 시공 ∙시공계획서에 시공 시 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함 ∙시공중 Face Mapping 빈도조정 필요(증가) ∙막장 상황에 맞는 굴착 및 보강 순서, 수집 - 부분발파, 분할 굴착 등 ∙터널 상부(지표면) 보안 물건 관리 방안 ∙막장, 지질조사, 계측 연계 검토	∙지질공학적 분류에 암석의 상태 확인 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙계측치수시 확인 및 관찰 ∙지반보강공법 추가시행 검토 ∙기술지원감리원 현장지원(Face Mapping)	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
		붕괴_풍화토 및 풍화암	-		L	∙적정 시방서의 제시	∙공사설계시방서에 제시 ∙지반 이상징후에 따른 터널붕락 대책수립 등 제시 ∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함 ∙시공중 Face Mapping 빈도조정 필요(증가) ∙막장 상황에 맞는 굴착 및 보강 순서, 수집 - 부분발파, 분할 굴착 등 ∙터널 상부(지표면) 보안 물건 관리 방안 ∙막장, 지질조사, 계측 연계 검토	∙시공계획서의 적정성 검토 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙계측치수시 확인 및 관찰 ∙지반보강공법 추가시행 검토 ∙기술지원감리원 현장지원(Free Mapping)	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	막장면_결선	낙하_부석 미제거 및 락볼트 설치 미실시	충돌		M		∙공사설계시방서에 제시 ∙지반 이상징후에 따른 터널붕락 대책수립 등 제시	∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함 ∙시공중 Face Mapping 빈도조정 필요(증가) ∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙사면 정리 후 부석화 조사 공종을 시공계획서에 반영. ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙막장 상황에 맞는 굴착 및 보강 순서, 수집 - 부분발파, 분할 굴착 등 ∙터널 상부(지표면) 보안 물건 관리 방안 ∙막장, 지질조사, 계측 연계 검토	∙시공계획서의 적정성 검토 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인
	막장면_굴착	붕괴_파쇄대 및 편암	-		L	∙터널굴착 진행에 따른 절리 및 주향경사 예측 - 암석시험 결과 및 기타 비파괴 시험을 종합적으로 분석하여 시공 중 예측되는 위험사항을 제시하고 확인하도록 지시 ∙암반분류에 지질학적 특성을 반영하여 명기	∙공사설계시방서에 제시 ∙지반 이상징후에 따른 터널붕락 대책수립 등 제시 ∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙설계 시 예측되는 절리 및 주향방향을 고려한 시공계획 수립 ∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함 ∙시공중 Face Mapping 빈도조정 필요(증가) ∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙사면 정리 후 부석화 조사 공종을 시공계획서에 반영. ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙막장 상황에 맞는 굴착 및 보강 순서, 수집 - 부분발파, 분할 굴착 등 ∙터널 상부(지표면) 보안 물건 관리 방안 ∙막장, 지질조사, 계측 연계 검토 ∙막장 상황에 맞는 굴착 및 보강 순서, 수집 - 부분발파, 분할 굴착 등 ∙터널 상부(지표면) 보안 물건 관리 방안 ∙막장, 지질조사, 계측 연계 검토	∙설계 시 예측한 절리 및 주향결사를 현장에서 확인(막장면의 Face Mapping) ∙시공계획서의 적정성 검토 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		붕괴_풍화암층 파쇄대 및 지하수 유입	-		L	∙현재 암반분류에 지질학적 암반특성을 반영하지 않는 상황 → 터널 해석 및 발파 설계 시는 지질공학적 암반분류 및 특성을 반영하여 설계 ∙암석시험결과 및 기타 비파괴시험을 종합적으로 분석하여 시공중 예측되는 위험사항을 제시하고 확인하도록 지시 ∙지하수 유입에 따른 지반 안정성 검토 필요	∙공사설계시방서에 제시 ∙지반 이상징후에 따른 터널붕락 대책수립 등 제시 ∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙지질공학적 설계 내용을 반영한 시공계획서 작성 및 시공 ∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함 ∙시공중 Face Mapping 빈도조정 필요(증가) ∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙사면 정리 후 부석화 조사 공종을 시공계획서에 반영. ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙막장 상황에 맞는 굴착 및 보강 순서, 수집 - 부분발파, 분할 굴착 등 ∙터널 상부(지표면) 보안 물건 관리 방안 ∙막장, 지질조사, 계측 연계 검토 ∙막장 상황에 맞는 굴착 및 보강 순서, 수집 - 부분발파, 분할 굴착 등 ∙터널 상부(지표면) 보안 물건 관리 방안 ∙막장, 지질조사, 계측 연계 검토	∙지질공학적 분류에 암석의 상태 확인 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙시공계획서의 적정성 검토 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
		붕괴_풍화토	-		L	∙암반분류에 지질학적 특성을 반영하여 명기 ∙시추 시험 결과 및 기타 비파괴 시험을 종합적으로 분석하여 시공 중 예측되는 위험사항을 제시하고 확인하도록 지시 ∙적정 시방서의 제시	∙공사설계시방서에 제시 ∙지반 이상징후에 따른 터널붕락 대책수립 등 제시 ∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙지질공학적 설계 내용을 반영한 시공계획서 작성 및 시공 ∙시공 중 Face Mapping 빈도 조정 필요(증가) ∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함 ∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙사면 정리 후 부석화 조사 공종을 시공계획서에 반영. ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙막장 상황에 맞는 굴착 및 보강 순서, 수집 - 부분발파, 분할 굴착 등 ∙터널 상부(지표면) 보안 물건 관리 방안 ∙막장, 지질조사, 계측 연계 검토	∙지질공학적 분류에 암석의 상태 확인 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙기술지원 감리의 현장지원(Face Mapping) ∙계측치수시 확인 및 관찰 ∙지반보강공법 추가시행 검토	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005 ∙콘크리트 표준시방서 2009
	막장면_장약 및 발파	폭발_낙뢰	폭발		H
		낙하_부석 미제거 및 락볼트 설치 미실시	협착		M	∙적정시방서의 제시	∙공사설계시방서에제시 ∙공사현장 안전수칙에 제시	∙터널내부 출입시 인원확인 및 지정된 대피경보 ∙발파시 위험지역 설정 ∙비산방지용 차단막 설치 ∙이동식 절연기기의 절연체 손상여부 확인 ∙비전기뇌관위주사용(전기뇌관 사용시 누전, 낙뢰 확인) ∙작업전 부석제거 확인	∙시공계획서의 적정성 검토 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙현장여건에 따른 사면안정공법 변경시 시공성, 경제성, 적합성 검토
		붕괴_부석제거 미흡	매몰		H
	막장면_작업장 출입	붕괴_부석 미제거	매몰		M
	막장면_천공	낙석_수직형태의 절리에 방해석 협재	충돌		H	∙현재 암반분류에 지질학적 암반특성을 반영하지 않는 상황 → 터널 해석 및 발파 설계 시는 지질공학적 암반분류 및 특성을 반영하여 설계 ∙암석시험결과 및 기타 비파괴시험을 종합적으로 분석하여 시공중 예측되는 위험사항을 제시하고 확인하도록 지시	∙공사설계시방서에 제시 ∙지반 이상징후에 따른 터널붕락 대책수립 등 제시 ∙발파 패턴 세분화	∙지질공학적 설계 내용을 반영한 시공계획서 작성 및 시공 ∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함 ∙시공중 Free Mapping 빈도조정 필요(증가) ∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙사면 정리 후 부석화 조사 공종을 시공계획서에 반영. ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙막장 상황에 맞는 굴착 및 보강 순서, 수집 - 부분발파, 분할 굴착 등 ∙터널 상부(지표면) 보안 물건 관리 방안 ∙막장, 지질조사, 계측 연계 검토	∙지질공학적 분류에 암석의 상태 확인 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙시공계획서의 적정성 검토 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙현장여건에 따른 사면안정공법 변경시 시공성, 경제성, 적합성 검토	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
		낙석_부석 미제거	매몰		M	∙적정시방서의 제시	∙공사설계시방서에 제시 ∙지반 이상징후에 따른 터널붕락 대책수립 등 제시	∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함 ∙시공중 Face Mapping 빈도조정 필요(증가) ∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙사면 정리 후 부석화 조사 공종을 시공계획서에 반영. ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙막장 상황에 맞는 굴착 및 보강 순서, 수집 - 부분발파, 분할 굴착 등 ∙터널 상부(지표면) 보안 물건 관리 방안 ∙막장, 지질조사, 계측 연계 검토	∙시공계획서의 적정성 검토 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인
	지보공(터널 상부)	붕괴_풍화토 및 지하수 유입	-		L	∙암석시험결과 및 기타 비파괴시험을 종합적으로 분석하여 시공중 예측되는 위험사항을 제시하고 확인하도록 지시 ∙지하수 유입에 따른 지반 안정성 검토 필요	∙유도배수공 반영	∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함 ∙시공중 Face Mapping 빈도조정 필요(증가) ∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙사면 정리 후 부석화 조사 공종을 시공계획서에 반영. ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙막장 상황에 맞는 굴착 및 보강 순서, 수집 - 부분발파, 분할 굴착 등 ∙ 터널 상부(지표면) 보안 물건 관리 방안 ∙ 막장, 지질조사, 계측 연계 검토	∙시공계획서의 적정성 검토 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙현장여건에 따른 사면안정공법 변경시 시공성, 경제성, 적합성 검토
	지보공_굴착	붕괴_단층파쇄대 및 절리	-		L	∙적정 시방서의 제시 ∙인접구조물의 영향 평가 및 계측감시	∙공사설계시방서에 제시 ∙지반 이상징후에 따른 터널붕락 대책수립 등 제시	∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙시공 중 Face Mapping 빈도 조정 필요(증가) ∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함 ∙막장 상황에 맞는 굴착 및 보강 순서, 수집 - 부분발파, 분할 굴착 등 ∙터널 상부(지표면) 보안 물건 관리 방안 ∙막장, 지질조사, 계측 연계 검토	∙시공계획서의 적정성 검토 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙기술지원 감리의 현장지원(Face Mapping) ∙계측치수시 확인 및 관찰 ∙지반보강공법 추가시행 검토	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
	터널(갱구부)_하반굴착	붕괴_터널 관통지점 및 취약지구에서 지반굴착	-		L
	터널(상부)	붕괴_단층파쇄대	-		L
	터널(상부)	붕괴_연약단층대	-		L	∙현재 암반분류에 지질학적 특성을 반영하여 명기 ∙시추 시험 결과 및 기타 비파괴 시험을 종합적으로 분석하여 시공 중 예측되는 위험사항을 제시하고 확인하도록 지시	∙공사설계시방서에 제시 ∙지반 이상징후에 따른 터널붕락 대책수립 등 제시 ∙설계서,시공계획서의 적합성 검토	∙지질공학적 설계 내용을 반영한 시공계획서 작성 및 시공 ∙시공 중 Face Mapping 빈도 조정 필요(증가) ∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함 ∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙사면 정리 후 부석화 조사 공종을 시공계획서에 반영. ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙막장 상황에 맞는 굴착 및 보강 순서, 수집 - 부분발파, 분할 굴착 등 ∙터널 상부(지표면) 보안 물건 관리 방안 ∙막장, 지질조사, 계측 연계 검토	∙지질공학적 분류에 암석의 상태 확인 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙기술지원 감리의 현장지원(Face Mapping) ∙계측치수시 확인 및 관찰 ∙지반보강공법 추가시행 검토	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
		붕괴_지하수 유입	-		L		∙공사설계시방서에 제시 ∙지반 이상징후에 따른 터널붕락 대책수립 등 제시 ∙유도배수공 반영	∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함 ∙시공중 Face Mapping 빈도조정 필요(증가) ∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙사면 정리 후 부석화 조사 공종을 시공계획서에 반영. ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙지하수처리 대책 포함제시 ∙막장 상황에 맞는 굴착 및 보강 순서, 수집 - 부분발파, 분할 굴착 등 ∙터널 상부(지표면) 보안 물건 관리 방안 ∙막장, 지질조사, 계측 연계 검토	∙계측치수시 확인 및 관찰 ∙지반보강공법 추가 시행 검토
	터널(상부)_발파	붕괴_석회암 파쇄대	-		L	∙암반분류에 지질학적 특성을 반영하여 명기 ∙시추 시험 결과 및 기타 비파괴 시험을 종합적으로 분석하여 시공 중 예측되는 위험사항을 제시하고 확인하도록 지시	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙지질공학적 설계 내용을 반영한 시공계획서 작성 및 시공 ∙시공 중 Face Mapping 빈도 조정 필요(증가) ∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함 ∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙사면 정리 후 부석화 조사 공종을 시공계획서에 반영. ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등)설치 운용 ∙터널내부 출입시 인원확인 및 지정된 대피경보 ∙발파시 위험지역 설정 ∙비산방지용 차단막 설치 ∙이동식 절연기기의 절연체 손상여부 확인 ∙비전기뇌관위주사용(전기뇌관 사용시 누전, 낙뢰 확인) ∙작업전 부석제거 확인	∙지질공학적 분류에 암석의 상태 확인 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙기술지원 감리의 현장지원(Face Mapping) ∙계측치수시 확인 및 관찰 ∙지반보강공법 추가 시행 검토	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
	터널(천단부)	붕괴_단층파쇄대/우수유입	-		L	∙터널굴착 진행에 따른 절리 및 주향경사 예측 - 암석시험 결과 및 기타 비파괴 시험을 종합적으로 분석하여 시공 중 예측되는 위험사항을 제시하고 확인하도록 지시 ∙암반분류에 지질학적 특성을 반영하여 명기	∙공사설계시방서에 제시 ∙지반 이상징후에 따른 터널붕락 대책수립 등 제시 ∙설계서,시공계획서의 적합성 검토	∙설계 시 예측되는 절리 및 주향방향을 고려한 시공계획 수립 ∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함 ∙시공중 Face Mapping 빈도조정 필요(증가) ∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙사면 정리 후 부석화 조사 공종을 시공계획서에 반영. ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용	∙설계시 예측한 절리 및 주향결사를 현장에서 확인(막장면의 Face Mapping) ∙시공계획서의 적정성 검토 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙시공계획서의 적정성 검토 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
		붕괴_쐐기형 절리	-		L	∙현재 암반분류에 지질학적 암반특성을 반영하지 않는 상황 → 터널 해석 및 발파 설계 시는 지질공학적 암반분류 및 특성을 반영하여 설계 ∙암석시험결과 및 기타 비파괴시험을 종합적으로 분석하여 시공중 예측되는 위험사항을 제시하고 확인하도록 지시	∙공사설계시방서에 제시 ∙지반 이상징후에 따른 터널붕락 대책수립 등 제시 ∙설계서,시공계획서의 적합성 검토	∙지질공학적 설계 내용을 반영한 시공계획서 작성 및 시공 ∙시공 중 Face Mapping 빈도 조정 필요(증가) ∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함 ∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙사면 정리 후 부석화 조사 공종을 시공계획서에 반영. ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용	∙지질공학적 분류에 암석의 상태 확인 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙기술지원 감리의 현장지원(Face Mapping)	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙철도건설공사 전문시방서 2013 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
		붕괴_풍화암 및 우수유입	-		L	∙암반분류에 지질학적 특성을 반영하여 명기 ∙시추 시험결과 및 기타 비파괴 시험을 종합적으로 분석하여 시공 중 예측되는 위험사항을 제시하고 확인하도록 지시	∙공사설계시방서에 제시 ∙지반 이상징후에 따른 터널붕락 대책수립 등 제시 ∙유도배수공 반영	∙지질공학적 설계 내용을 반영한 시공계획서 작성 및 시공 ∙시공 중 Face Mapping 빈도 조정 필요(증가) ∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함 ∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙사면 정리 후 부석화 조사 공종을 시공계획서에 반영. ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙막장 상황에 맞는 굴착 및 보강 순서, 수집 - 부분발파, 분할 굴착 등 ∙터널 상부(지표면) 보안 물건 관리 방안 ∙막장, 지질조사, 계측 연계 검토	∙지질공학적 분류에 암석의 상태 확인 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙기술지원 감리의 현장지원(Face Mapping) ∙계측치수시 확인 및 관찰 ∙지반보강공법 추가시행 검토	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
	터널(천단부)_정리	낙석_부석 미제거	매몰		H	∙적정 시방서의 제시	∙공사설계 시방서에 제시 ∙지반 이상징후에 따른 터널붕락 대책수립 등 제시 ∙W/M 반영	∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함 ∙막장 상황에 맞는 굴착 및 보강 순서, 수집 - 부분발파, 분할 굴착 등 ∙터널 상부(지표면) 보안 물건 관리 방안 ∙막장, 지질조사, 계측 연계 검토	∙시공계획서의 적정성 검토 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙계측치수시 확인 및 관찰 ∙지반보강공법 추가시행 검토 ∙기술지원감리원 현장지원(Free Mapping)	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		낙하_터널 지보공 및 록볼트 미설치					∙공사설계 시방서에 제시 ∙지반 이상징후에 따른 터널붕락 대책수립 등 제시 ∙R/B 세분화 - 일반, 자천공 등 - 주입재
	터널(하부)_굴착	붕괴_석회암 공동	-		L	∙현재 암반분류에 지질학적 특성을 반영하여 명기 ∙시추 시험 결과 및 기타 비파괴 시험을 종합적으로 분석하여 시공 중 예측되는 위험사항을 제시하고 확인하도록 지시	∙공사설계시방서에 제시 ∙지반 이상징후에 따른 터널붕락 대책수립 등 제시 ∙지반조사 추가 반영	∙지질공학적 설계 내용을 반영한 시공계획서 작성 및 시공 ∙시공 중 Face Mapping 빈도 조정 필요(증가) ∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙사면 정리 후 부석화 조사 공종을 시공계획서에 반영. ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙막장 상황에 맞는 굴착 및 보강 순서, 수집 - 부분발파, 분할 굴착 등 ∙터널 상부(지표면) 보안 물건 관리 방안 ∙막장, 지질조사, 계측 연계 검토	∙지질공학적 분류에 암석의 상태 확인 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙기술지원 감리의 현장지원(Face Mapping) ∙계측치수시 확인 및 관찰 ∙지반보강공법 추가시행 검토	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
	터널(상부)	붕괴_단층파쇄대	-		L	∙현재 암반분류에 지질학적 암반특성을 반영하지 않는 상황 → 터널 해석 및 설계 시는 지질공학적 암반분류 및 특성을 반영하여 설계 ∙암석시험결과 및 기타 비파괴시험을 종합적으로 분석하여 시공중 예측되는 위험사항을 제시하고 확인하도록 지시	∙공사설계시방서에 제시 ∙지반 이상징후에 따른 터널붕락 대책수립 등 제시	∙지질공학적 설계 내용을 반영한 시공계획서 작성 및 시공 ∙시공 중 Face Mapping 빈도 조정 필요(증가) ∙계측관리 계획서에 붕락징후 확인 등 명시 ∙터널 작업관리 절차서에 붕락대책 포함 ∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙사면 정리 후 부석화 조사 공종을 시공계획서에 반영. ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙막장 상황에 맞는 굴착 및 보강 순서, 수집 - 부분발파, 분할 굴착 등 ∙터널 상부(지표면) 보안 물건 관리 방안 ∙막장, 지질조사, 계측 연계 검토	∙지질공학적 분류에 암석의 상태 확인 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙시공계획서의 적정성 검토 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙현장여건에 따른 사면안정공법 변경시 시공성, 경제성, 적합성 검토	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
1.02 버럭처리
버럭처리(전단면/반단면 /숏크리트)	지보공 가시설	파손_막장면 적치	-			∙적정시방서의 제시	∙공사설계시방서에 제시 - 버럭처리시 불발화약류 혼입상태 필히 확인 - 주변시설물 파손대책 수립	∙시공계획서에 버럭의 적재 운반시 주변지보공 및 가시설 손상되지 않도록 주의 ∙위험요소에는 운전자가 식별할수 있도록 운행속도, 회전주의, 후진금지 등 안전표지판 부착	∙버럭작업장 붕괴, 붕락, 뜬돌 유무상태 확인 ∙주변가시설, 지보파손되지 않도록 확인 ∙차량 안전표지판 설치 확인
	숏크리트 잔재물_인양	-	재해자 눈에 이물질 유입		L	∙적정시방서의 제시	∙공사시방서에 제시 - 버럭처리시 숏크리트 혼입여부 확인하여 분류처리 ∙숏크리트 잔재 수거 방안	∙시공계획서에 버럭처리시 숏크리트 폐기물 혼합대책 수립	∙버럭 처리시 숏크리트폐기물 별도 보관장소 선정 ∙숏크리트 버럭에 혼입되지 않도록 대책 수립
1.03 강지보공
강지보공	강지보 부재	전도_강지보 조립시	충돌/추락		M	∙적정시방서의 제시	∙공사시방서에 제시 - 버럭처리시 숏크리트 혼입여부 확인하여 분류처리	∙발파, 굴착면의 절리발달, 편암붕락 등 원지반 파괴응력 발생전 설치시공계획 수립	∙강지보 설치시 지질 및 지층 특성에 따라 침하발생 우려될 경우 쐐기, 앵커 등 고정장치 강구
1.04 숏크리트
숏크리트	막장(천단부)_타설	붕괴_풍화암 및 절리	-		L	∙암반분류에 지질학적 특성을 반영하여 명기 ∙시추 시험 결과 및 기타 비파괴 시험을 종합적으로 분석하여 시공 중 예측되는 위험사항을 제시하고 확인하도록 지시	∙발주 공사시방서에 제시 ∙유도배수 ∙막장 상황에 맞는 S/C 반영 -급결재(조기 강도 확보) -W/M 반영	∙지질공학적 설계 내용을 반영한 시공계획서 작성 및 시공 ∙시공 중 Face Mapping 빈도 조정 필요(증가) ∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙숏크리트공 외에 감시요원 추가배치	∙지질공학적 분류에 암석의 상태 확인 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙기술지원 감리의 현장지원(Face Mapping) ∙기술지원감리원 필요시 현장지원으로 수정	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		낙하_락볼트 설치간격과 정착방법	매몰		M	∙적정 시방서의 제시	∙발주 공사시방서에 제시 ∙유도배수 ∙막장 상황에 맞는 S/C 반영 -급결재(조기강도 확보) -W/M 반영	∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙현장상황에 맞는 R/B - 일반, 자천공 등 - 주입재 : 몰탈, 고착제, 페이스트 등	∙시공계획서의 적정성 검토 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙기술지원 감리의 현장지원(Face Mapping) ∙기술지원감리원 필요시 현장지원으로 수정	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	막장면_타설준비	붕괴_우수유입	매몰		M	∙절리를 고려한 지질공학적 암반분류 및 특성을 반영한 설계	∙발주 공사시방서에 제시 ∙유도배수 ∙막장 상황에 맞는 S/C 반영 -급결재(조기강도 확보) -W/M 반영	∙지질공학적 설계 내용을 반영한 시공계획서 작성 및 시공 ∙대상암반면의 절리상태, 부석, 탈락, 붕락 등의 사전조사실시 및 유동성부석 처리 ∙작업전 누수공설치 배수관 매입에 의한 누수유도 등 적절한 배수처리 ∙막장면에 출입자 통제	∙지질공학적 분류에 암석의 상태 확인 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		붕괴_단층파쇄대 및 우수유입	-		L	∙적정 시방서의 제시 ∙인접 구조물의 영향 평가 및 계측 감시	∙발주 공사시방서에 제시 ∙유도배수 ∙막장 상황에 맞는 S/C 반영 -급결재(조기강도 확보) -W/M 반영	∙계측 시행 및 사전 조사, 평가 ∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙시공 중 Face Mapping 빈도 조정 필요(증가) ∙대상암반면의 절리상태, 부석, 탈락, 붕락 등의 사전조사실시 및 유동성부석 처리 ∙작업전 누수공설치 배수관 매입에 의한 누수유도 등 적절한 배수처리 ∙막장면 출입자 통제	∙시공계획서의 적정성 검토 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙기술지원 감리의 현장지원(Face Mapping) ∙기술지원감리원 필요시 현장지원으로 수정	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
	숏크리트 잔재물(여굴부위)_청소	낙하_1차 숏크리트면의 이물질	매몰		M	∙적정 시방서의 제시	∙발주 공사시방서에 제시 ∙계획 수립 여부 확인	∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용	∙시공계획서의 적정성 검토 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙기술지원 감리의 현장지원(Face Mapping) ∙기술지원감리원 필요시 현장지원으로 수정	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005 ∙콘크리트 표준시방서 2009
1.05 락볼트
락볼트	터널(천단부)_락볼트설치	낙석_부석 미제거	충돌 / 추락		M	∙적정 시방서의 제시	∙발주 공사시방서에 제시 ∙R/B 세분화 - 주입재 -일반, 자천공 등	∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙현장 상황에 맞는 R/B 반영 - 몰탈, 페이스트, 일반, 자천공, 튜브형 등	∙시공계획서의 적정성 검토 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙기술지원감리원 필요시 현장지원	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
	막장(천단부)_타설	낙하_락볼트 설치간격과 정착방법	매몰		M	∙적정 시방서의 제시	∙발주 공사시방서에 제시 ∙R/B 세분화 - 주입재 - 일반, 자천공 등	∙시공계획서에 숏크리트 타설 후 관리시 양생 과정에서 부석화에 의한 박리‧탈락에 대한 검토(방법제시 - 비파괴방법 등)단계 반영 시공 ∙천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차랑(내민 지붕형태의 낙석 방지 차량 등) 설치 운용 ∙시공계획서에 원지반의 강도와 암반특성, 절리의 간격 및 방향등을 기입 ∙천공 작업시 천공 위치, 천공직경, 천공깊이 적정성을 확인하고 굴착면에 직각으로 천공하여, 볼트 삽입전에 녹∙ 석분등 이물질이 남지 않도록 청소	∙시공계획서의 적정성 검토 ∙시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인 ∙기술지원감리원 필요시 현장지원	∙터널공사 표준시방서 2009 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
1.06 콘크리트 라이닝
a 라이닝 콘크리트 타설	거푸집_타설	붕괴_가새 및 지지대 미설치	매몰		H	∙거푸집 동바리 등의 설치 및 해체 순서도 작성 ∙거푸집에 대한 표준설계도작성(구조검토포함)	∙발주 공사시방서에 제시	∙설계를 기준으로 거푸집의 설치,해체 순서를 상세히 정리하여 시공계획서에 반영 ∙거푸집 제작전 사전 점검	∙거푸집, 동바리 자재 검수 시 결함, 불량 자재 확인 철저	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_동절기 콘크리트 타설	매몰		H	∙적정 시방서의 제시	∙발주 공사시방서에 제시	∙시공계획서에 동절기 콘크리트 타설계획(순서 및 타설높이) 수립	∙동절기 라이닝 콘크리트 시공 관리 검측 확인 철저
		붕괴_타설순서 미준수	매몰		H	∙적정 시방서의 제시	∙발주 공사시방서에 제시	∙시공계획서에 콘크리트 타설 계획 반영
		붕괴_구조안전성 미검토 및 조립도 미작성	매몰		H	∙적정 시방서의 제시	∙발주 공사시방서에 제시	∙시공계획서에 거푸집 설계도 및 구조계산서, 절단, 용접, 시험조립, 운반등 제작 조립 계획서 반영	∙시공계획서 적정성 검토 ∙기술지원감리원 지원 (구조안정성 검토)
		붕괴_타설속도 미준수	추락		H	∙거푸집설계 기본도 ∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙적정 시방서 제시	∙발주 공사시방서에 제시 ∙여굴을 고려한 타설 순서	∙타설 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 타설 순서 및 상세 시공도 작성(필요 시 구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영 ∙여굴을 고려한 타설 순서 반영	∙시공계획서 확보 ∙시공계획서 확보 → 시공계획서 검토	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙철도건설공사 전문시방서 2013
		붕괴_과하중 적치	추락		M	∙적정 시방서의 제시	∙발주 공사시방서에 제시	∙거푸집은 콘크리트의 타설 속도 등을 고려하여 타설된 압력에 충분히 견디는 구조 설치	∙콘크리트 타설 시 타설 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
		붕괴_긴결 미흡	추락		M
		전도_콘크리트 유동화 현상	추락		H	∙거푸집에 대한 표준 설계도 작성(구조검토 포함) →동바리 설치 및 지지시스템 설계 시 구조검토 필수 ∙적정 시방서의 제시	∙발주 공사시방서에 제시 ∙계획 수립 여부 확인	∙거푸집에 대한 동바리 설치 시 정확한 간격 및 변위방지 고정장치 확인 ∙거푸집은 타설 하중 및 타설 충격에 의한 거푸집 변위, 이동 방지의 목적으로 가설 앵커, 쐐기등 필요시 추가 설치 ∙타설 순서 / 시간 고려 ∙변위 여부 계측 시행	∙콘크리트 타설 시 타설 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	거푸집동바리_타설	붕괴_가새 미설치	추락		L	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계 ∙적정 시방서의 제시	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인 ∙발주 공사시방서에 제시	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙시공계획서 확보 →시공계획서 검토	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
		붕괴_구조안전성 미검토 및 조립도 미작성	매몰		H	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계 ∙현행 : 시스템 동바리 설계시 국부적인 단순 해석으로 전체 구조계 및 하중이 미반영	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인 ∙발주 공사시방서에 제시	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙시공계획서 확보 → 시공계획서 검토	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		붕괴_동바리 조립도 미작성	매몰		H	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙시공계획서, 감독확인서 검토 / ∙ 설계 내용 반영 여부 확인 ∙발주 공사시방서에 제시	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙시공계획서 확보 → 시공계획서 검토	∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_설치상태 불량	매몰		M	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계 ∙현행 : 시스템 동바리 설계시 국부적인 단순 해석으로 전체 구조계 및 하중이 미반영	∙시공계획서, 감독확인서 검토 / ∙ 설계 내용 반영 여부 확인 ∙발주 공사시방서에 제시	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙시공계획서 확보 → 시공계획서 검토	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트공사 표준시방서 2009
	펌프카 붐_인양 및 상승	낙하_지지부재 이탈(C.P.B 마스트)	충돌		M	∙적정 시방서의 제시	∙발주서류 목록중 ∙공사현장 안전수칙에 제시	∙시공계획서 작성 시 자재의 적재위치, 이동 및 적재의 방법, 방호 조치에 대한 방안 수립 ∙자재의 이동(고정, 양중, 운반 등)에 대한 안전계획 수립	∙시공계획 및 안전계획에 준한 자재 적재, 이동의 감독	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙산업안전 보건기본법 시행령
	펌프카 붐_타설	낙하_붐 연결핀 파단	충돌		L
	펌프카_타설	비래_건설기계 작업순서 미흡	충돌		M
		전도_지반침하	충돌/추락		M	∙급사면, 고저차가 큰 부위에 대한 설계 시 중장비 운용에 대한 검토(설계서, 별도 보고서 등에 반영)	∙발주서류 목록중 ∙공사현장 안전수칙에 제시	∙시공계획서 작성 시 자재의 적재위치, 이동 및 적재의 방법, 방호 조치에 대한 방안 수립 ∙자재의 이동(고정, 양중, 운반 등)에 대한 안전계획 수립 ∙운반로 주변 가설전기 등 지장물 배치 ∙강재 거푸집	∙시공계획 및 안전계획에 준한 자재 적재, 이동의 감독 ∙장비 침하 방지 대책 확인 철저	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
b 강재동바리 및 거푸집	거푸집(상부)_운반	-	충돌		L		∙발주서류 목록중 ∙공사현장 안전수칙에 제시	∙시공계획서에 이동 거푸집 운반시 근로자 작업 공간 확보 할 수 있는 구조 반영 ∙거푸집 이동용 궤도 침하 방지 대책 수립	∙거푸집 이동(운반)에 대한 시공계획서 검토 및 확인 철저 ∙거푸집 이동시 지반 침하 방지 대책 수립 여부 확인 철저
	거푸집(하부 용접부)_타설	비산_용접불량	-		L		∙발주서류 목록중 ∙공사현장 안전수칙에 제시	∙시공계획서에 거푸집 조립시 볼트, 너트등으로 이완되지 않도록 견고하게 고정하고, 휨, 비틀림, 전단 응력 발생에 대한 점검 대책 수립	∙거푸집 조립에 대한 볼트, 너트 체결 용접 부위 변위 및 견고상태 확인
	거푸집_설치	전도_거푸집 수직도 미확보	협착		M		∙발주서류 목록중 ∙공사현장 안전수칙에 제시	∙시공계획서에 거푸집의 타설 하중 및 타설 충격에 의한 거푸집 변위 여부 확인하여 대책 수립	∙거푸집 조립 완료 후 수직도 검사 확인하여 필요시 조치
	거푸집_정리	전도_버팀대 미설치	협착		M	∙중요 또는 위험부 시공 시 가설물에 대한 정확한 설계(필요시 3차원 해석 포함)	∙발주서류 목록중 ∙공사현장 안전수칙에 제시	∙설계서에 준한 시공계획 및 시공 ∙시공계획서에 거푸집의 타설 하중 및 타설 충격에 의한 거푸집 변위 여부 확인하여 대책 수립 ∙운반로 주변 가설전기 등 지장물 배치 ∙강재 거푸집	∙거푸집 전도 방지 위한 대책 수립 확인	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	거푸집_조립	전도_버팀목/지지물 설치 미흡	매몰		M		∙발주서류 목록중 ∙공사현장 안전수칙에 제시	∙시공계획서에 거푸집의 타설 하중 및 타설 충격에 의한 거푸집 변위 여부 확인하여 대책 수립	∙거푸집 전도 방지 위한 대책 수립 확인
	거푸집_해체	붕괴_해체방법 미흡	협착		L		∙발주서류 목록중 ∙공사현장 안전수칙에 제시	∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영 ∙운반로 주변 가설전기 등 지장물 배치 ∙강재 거푸집	∙각 종 건설장비 주변 안전조치 여부 확인 ∙거푸집을 해체할때에는 순서에 의해 부재를 정리, 정돈하고, 조립과 해체의 반복 작업에 의한 자재 손상 상태 확인	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		붕괴_버팀목 미설치	매몰		M	∙거푸집 동바리 등의 설치 및 해체 순서도 작성	∙발주서류 목록중 ∙공사현장 안전수칙에 제시	∙설계를 기준으로 거푸집의 설치,해체 순서를 상세히 정리하여 시공계획서에 반영 ∙운반로 주변 가설전기 등 지장물 배치 ∙강재 거푸집	∙거푸집 전도 방지 위한 대책 수립 확인	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		탈락_거푸집 하단 미고정	충돌		M	∙고소위치에서 거푸집 해체에 대한 표준 시공 순서도 설계 반영	∙발주서류 목록중 ∙공사현장 안전수칙에 제시	∙운반로 주변 가설전기 등 지장물 배치 ∙강재 거푸집	∙거푸집 해체시 볼트, 너트등을 휨, 비틀림, 전단등의 응력 발생에 대하여 점검	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		전도_우수유입	매몰		M		∙발주서류 목록중 ∙공사현장 안전수칙에 제시	∙우기 전‧후 지반 지지력에 대한 확인 검토 ∙운반로 주변 가설전기 등 지장물 배치 ∙강재 거푸집	∙ 우기 전․후 지지력 확인 및 파손 유무 점검	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	거푸집_형틀	전도_버팀목 및 지지물 설치 미흡	매몰		M	∙거푸집에 대한 표준 설계도 작성(구조검토 포함) → 동바리 설치 및 지지시스템 설계 시 구조검토 필수	∙발주서류 목록중 ∙공사현장 안전수칙에 제시	∙거푸집에 대한 동바리 설치 시 정확한 간격 및 변위방지 고정장치 확인 ∙거푸집은 콘크리트 타설하중 및 타설충격에 의한 변위 이동방지의 목적으로 가설앵커,쐐기등 설치계획 수립 ∙운반로 주변 가설전기 등 지장물 배치 ∙강재 거푸집	∙거푸집 설치시 변위,이동방지대책 확인	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	작업발판(거푸집)_해체	충돌_중량물 취급 미흡	추락		M		∙발주서류 목록중 ∙공사현장 안전수칙에 제시	∙근로자의 재료와 공구가 낙하에 대비할 수있는 적절한 안전조치 계획 수립	∙근로자의 재료와 공구가 낙하에 대비할수있는 적절한 안전조치 확인
	거푸집동바리_타설	붕괴_가새 미설치	추락		L	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수 ∙운반로 주변 가설전기 등 지장물 배치 ∙강재 거푸집	∙시공계획서 확보 → 시공계획서 검토.	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		붕괴_구조안전성 미검토	매몰		H
		붕괴_동바리 조립도 미작성	매몰		H
		붕괴_설치상태 불량	매몰		M
	작업발판(거푸집)_인양	낙하_폼타이 볼트 용접부위 파단	추락		L		∙발주서류 목록중 ∙공사현장 안전수칙에 제시	∙근로자가 추락, 재료와 공구가 낙하에 대비 할 수 있는 적절한 안전조치 계획 수립	∙시공계획서 작성여부 및 준수사항 여부 확인 ∙근로자추락, 재료나 공구의 낙하대비 위한 안전대책 수립 확인
	작업발판(거푸집)_이동	파손_자중 및 작업하중	추락		M		∙발주서류 목록중 ∙공사현장 안전수칙에 제시	∙근로자가 추락, 재료와 공구가 낙하에 대비 할 수 있는 적절한 안전조치 계획 수립	∙근로자추락, 재료나 공구의 낙하대비 위한 안전대책 수립 확인
	철근_철근조립	붕괴_자중	협착		M
	터널(종점부)_철근조립	전도_철근자중 및 이상응력	협착		M	∙조립철근 자립도 검토 → 필요시 앵커 및 기타 보강	∙공사시방서에 제시	∙라이닝 조립철근의 지지상태에 대한 정밀 시공 ∙시공계획서에 터널 천단부 라이닝 철근은 철근망이 자중에 의한 붕괴위험 여부 검토 및 필요시 철근망 고정용 앵커 설치	∙설계표준도와 시공순서 및 상세도 적합성 검토 ∙시공계획서 검토 및 준수 상태 확인	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙터널공사 표준시방서 2009
	거푸집_철근배근	붕괴_외력	추락		H	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계(연결 시 문제 발생이 연계됨)	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계내용 반영 여부 확인 ∙공사시방서에 제시	∙설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수 ∙시공계획서에 철근망 자중에 의한 위험성 여부 검토 및 필요시 철근망 고정용 앵커 설치	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 ∙설계표준도와 시공순서 및 상세도 적합성 검토 ∙시공계획서 검토 및 준수 상태 확인	∙가설공사 표준시방서2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
d 신축이음	작업발판(거푸집)_이동	파손_자중 및 작업하중	추락		H	∙신축이음 위치는 C-찬넬 설치 고려하여 배치 설계	∙공사시방서에 제시	∙시공계획서에 신축이음 간격, 위치등 시공방법 계획 수립	∙신축이음 간격, 위치 등 시공계획서 검토
e 지수판						∙지수판 설치 표준도 작성	∙공사시방서에 제시	∙시공계획서에 지수판 부착방법 및 방수막 파손대책 수립	∙지수판 부착방법 등 시공계획서 검토
f 철근처짐방지용 앵커						∙조립철근자립도검토-필요시 앵커 및 기타 보강	∙공사시방서에 제시 ∙암반의 특성을 고려한 하중 반영	∙시공계획서에 터널 천단부 라이닝 철근은 철근망이 자중에 의한 붕괴위험 여부 검토 및 필요시 철근망 고정용 앵커 설치	∙설계표준도와 시공순서 및 상세도 적합성 검토 ∙시공계획서 검토 및 준수 상태확인
g 배면 그라우팅						∙적정시방서 제시	∙공사시방서에 제시	∙시공계획서에 라이닝 콘크리트 타설후 공극채움 대책수립	∙라이닝 콘크리트 배합 ∙시공계획 검토(뒷채움 공극 최소발생 대책 수립)
1.07 방수 및 배수
a 방수막 설치
b 필터콘크리트
c 배수관
d 배수구
e 배수맨홀
f 스틸그레이팅
g 터널배수공 비닐 깔기
h 공동구 콘크리트
j 공동구 바닥콘크리트
k 맹암거
l 잡석채움
m 거푸집	거푸집(하부용접부)_타설	비산_용접불량	-		L		∙공사시방서에 제시
	거푸집_설치	전도_거푸집 수직도 미확보	협착		M		∙공사시방서에 제시
	거푸집_정리	전도_버팀대 미설치	협착		M	∙중요 또는 위험부 시공시 가설물에 대한 정확한 설계(필요시 3차원 해석 포함)	∙공사시방서에 제시	∙설계서에 준한 시공계획 및 시공		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	거푸집_조립	전도_버팀목/지지물 설치 미흡	매몰		M	∙합판거푸집 및 유로폼에 대하여 설치 및 해체에 대한 작업순서도 작성	∙합판거푸집 및 유로폼의 조립 및 해체시 조립도 및 해체 작업순서도 작성 제출	∙시공계획서에 합판거푸집 및 유로폼 조립 및 해체에 대한 시공상세도 작성	∙승인된 시공계획에 의거 현장시공 점검 및 확인 ∙작업원들에게 정기적인 교육 실시
	거푸집_해체	붕괴_해체방법 미흡	협착		L	∙합판거푸집 및 유로폼에 대하여 설치 및 해체에 대한 작업순서도 작성	∙합판거푸집 및 유로폼의 조립 및 해체시 조립도 및 해체 작업순서도 작성 제출	∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영 ∙시공계획서에 합판거푸집 및 유로폼 조립 및 해체에 대한 시공상세도 작성	∙각종 건설장비 주변 안전조치 여부 확인 ∙승인된 시공계획에 의거 현장시공 점검 및 확인 ∙작업원들에게 정기적인 교육 실시	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		붕괴_버팀목 미설치	매몰		M	∙거푸집 동바리 등의 설치 및 해체 순서도 작성 ∙합판거푸집 및 유로폼에 대하여 설치 및 해체에 대한 작업순서도 작성	∙합판거푸집 및 유로폼의 조립 및 해체시 조립도 및 해체 작업순서도 작성 제출	∙설계를 기준으로 거푸집의 설치,해체 순서를 상세히 정리하여 시공계획서에 반영 ∙시공계획서에 합판거푸집 및 유로폼 조립 및 해체에 대한 시공상세도 작성	∙승인된 시공계획에 의거 현장시공 점검 및 확인 ∙작업원들에게 정기적인 교육 실시	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		탈락_거푸집 하단 미고정	충돌		M	∙고소위치에서 거푸집 해체에 대한 표준 시공 순서도 설계 반영 ∙합판거푸집 및 유로폼에 대하여 설치 및 해체에 대한 작업순서도 작성	∙합판거푸집 및 유로폼의 조립 및 해체시 조립도 및 해체 작업순서도 작성 제출	∙시공계획서에 합판거푸집 및 유로폼 조립 및 해체에 대한 시공상세도 작성	∙승인된 시공계획에 의거 현장시공 점검 및 확인 ∙작업원들에게 정기적인 교육 실시	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		전도_우수유입	매몰		M		∙공사시방서에 제시			∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	거푸집_형틀	전도_버팀목/지지물 설치 미흡	매몰		M	∙거푸집에 대한 표준 설계도 작성(구조검토 포함) → 동바리 설치 및 지지시스템 설계시 구조검토 필수	∙합판거푸집 및 유로폼의 조립 및 해체시 조립도 및 해체 작업순서도 작성 제출	∙거푸집에 대한 동바리 설치 시 정확한 간격 및 변위방지 고정장치 확인	∙승인된 시공계획에 의거 현장시공 점검 및 확인 ∙작업원들에게 정기적인 교육 실시	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
n 철근가공조립	수직철근_철근조립	전도_수평보강/지지 미흡	협착		M	∙전도방지를 위한 보강철근 조립도 작성	∙철근조립에 대한 시공상세도 작성 지시	∙배수공동구 시공계획서에 철근 전도방지를 위한 철근 조립 시공상세도 작성	∙승인된 시공계획과 현장 시공부분의 일치여부 점검 및 확인 ∙작업원들에 대한 정기적인 교육실시
		전도_작업자 하중	추락		M	∙전도방지를 위한 보강철근 조립도 작성	∙철근조립에 대한 시공상세도 작성 지시	∙시공 전 작업자 안전교육 철저 ∙배수공동구 시공계획서에 철근 전도방지를 위한 철근 조립 시공상세도 작성	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토. ∙승인된 시공계획과 현장 시공부분의 일치여부 점검 및 확인 ∙ 작업원들에 대한 정기적인 교육실시	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
o 신축이음	인버트 신축이음 조립	전도_수평보강 및 지지 미흡	협착		M	∙인버트부위 신축이음 설치시 수평보강 및 지지에 대한 도면작성	∙인버트부 신축이음 설치에 대한 시공계획 및 상세도 작성 명기	∙인버트부 신축이음 시공계획서에 콘크리트 타설시 측압에 대하여 견딜수 있는 수평보강 및 지지방법 작성	∙승인된 시공계획과 현장 시공부분의 일치여부 점검 및 확인 ∙작업원들에 대한 정기적인 교육실시
p 와이어메쉬
q 관삽입형 단열재
r 부착형 단열재
s 수팽창성재수재
1.08 그라우팅
그라우팅	막장면_천공	전도_천공장비				∙천공장비의 전도방지를 위한 기본적인 소요 지내력 명기	∙천공장비의 규격에 따라 필요한 지내력을 검토하여 시공계획 제출	∙시공계획서에 천공장비의 규격에 따라 필요한 지내력 및 바닥 평탄 작업계획서 제출하여 관리	∙천공장비 투입전 바닥면의 정지상태 및 지내력 확보 여부 확인 ∙작업원에 대한 정기적인 교육 실시
	터널바닥_천공
1.09 개착 및 갱문구조물
a 거푸집	절취사면(개착식 터널)_철근 및 거푸집 조립	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙충분한 지반조사 결과를 반영한 흙막이 설계 준수 ∙기하학정 비정형 흙막이의 설계는 반드시 3차원 모델링(시공 단계별) 후 설계	∙계획수립 여부 확인 ∙설계시 지반조사 내용의 확인을 위한 추가 지반조사 실시 ∙사면 계측 측정치는 분석하여 사면의 안정성 확보 여부 검토	∙설계내용을 반영한 계측 시행 ∙계측관리 기준 - 설계 시 구조검토 결과를 반드시 적용 ∙추가 지반조사 내용을 반영한 사면 안정성 검토 시행 ∙역해석을 통한 사면 안정성 여부 검토	∙상기 설계, 시공 조건의 준수사항 확인 ∙ 기술지원 감리원의 확인, 검토 필수	∙토목공사 표준일반시방서 2005 ∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011
	거푸집(고소)_설치	붕괴_거푸집 지지대 위로 인양	추락		M	∙구조계산에 따른 거푸집 설계도 작성 - 거푸집 설계하중 명시 - 거푸집 조립 및 해체 순서 설계도 작성	∙시공전 거푸집에 대한 구조검토후 거푸집 제작 상세도 제출 명기 ∙시공계획서에 거푸집 설치 및 해체 순서도 첨부	∙현장 여건을 반영하여 거푸집 설치 및 해체 순서를 시공계획서에 명기	∙승인된 시공계획에 의거 점검 및 확인 ∙작업원 등에 대한 정기적인 교육실시
		-	추락		L			∙시공계획서 수립 시 작업자 동선 확보 준수(안전난간, 가설재의 유격 및 변위의 확인)		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	거푸집(고소)_자재인양	붕괴_중량물 하중집중	추락		M	∙구조계산에 따른 거푸집 설계도 작성 - 거푸집 설계하중 명시 - 거푸집 조립 및 해체 순서 설계도 작성	∙시공전 거푸집에 대한 구조검토후 거푸집 제작 상세도 제출 명기 ∙시공계획서에 거푸집 설치 및 해체 순서도 첨부	∙시공계획서 작성 시 자재의 적재위치, 방법, 방호 조치에 대한 방안 수립 ∙적재 장소의 여건에 따라 필요시 적정한 구조설계에 준한 적치, 보관 ∙자재의 이동(고정, 양중, 운반 등)에 대한 안전계획 수립	∙시공계획 및 안전계획에 준한 자재 적재, 이동의 감독	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	거푸집(고소)_철근적재	붕괴_지지대 미설치	추락		M	∙구조계산에 따른 거푸집 설계도 작성 - 거푸집 설계하중 명시 - 거푸집 조립 및 해체 순서 설계도 작성	∙시공계획서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙현장 여건을 반영하여 거푸집 설치 및 해체 순서를 시공계획서에 명기	∙승인된 시공계획에 의거 점검 및 확인 ∙작업원 등에 대한 정기적인 교육실시
		붕괴_철근 과적재	추락		M
	거푸집(고소)_해체	붕괴_작업하중	추락		M
		낙하_크레인줄걸이 미설치	추락		L	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
	거푸집(하부 용접부)_타설	비산_용접불량	-		L	∙거푸집 용접 작업시 구조물 부위별 중요도에 따라 용접중 자격조건 명시	∙시공계획서 검토시 용접공 자격조건 충족 여부 확인	∙시공계획서에 거푸집 용접 부위별로 중요도 및 용접공 자격조건 명기	∙시공계획에 준한 작업 시행여부 감독
	거푸집_설치	전도_거푸집 수직도 미확보	협착		M	∙거푸집 조립 및 해체순서 설계도에 수직도 확인방법 명시	∙시공계획서에 설계 수직도 확인 방법 반영 여부 확인	∙시공계획서 작성시 수직도 확인 방안 수립	∙시공계획에 준한 작업 시행여부 감독
	거푸집_정리	전도_버팀대 미설치	협착		M	∙중요 또는 위험부 시공시 가설물에 대한 정확한 설계(필요시 3차원 해석 포함)	∙중요 또는 위험의 시공시 시공계획서에 가설물에 대한 구조검토 수행 여부 확인	∙설계서에 준한 시공계획 및 시공	∙시공계획에 준한 작업 시행여부 감독	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	거푸집_조립	전도_버팀목 및 지지물 설치 미흡	매몰		M	∙구조계산에 따른 거푸집 설계도 작성 - 거푸집 설계하중 명시 - 거푸집 조립 및 해체 순서 설계도 작성	∙시공계획서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙현장 여건을 반영하여 거푸집 설치 및 해체 순서를 시공계획서에 명기 ∙거푸집 작업시 설계하중 명기	∙승인된 시공계획에 의거 점검 및 확인 ∙작업원 등에 대한 정기적인 교육실시
	거푸집_철근배근	붕괴_외력	추락		H	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계(연결 시 문제 발생이 연계됨)	∙시공계획서, 감독확인서 검토 / ∙ 설계 내용 반영 여부 확인	∙설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
	거푸집_해체	붕괴_해체방법 미흡	협착		L	∙구조계산에 따른 거푸집 설계도 작성 - 거푸집 설계하중 명시 - 거푸집 조립 및 해체 순서 설계도 작성	∙시공계획서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영 ∙현장 여건을 반영하여 거푸집 설치 및 해체 순서를 시공계획서에 명기 ∙거푸집 작업시 설계하중 명기	∙각 종 건설장비 주변 안전조치 여부 확인 ∙승인된 시공계획에 의거 점검 및 확인 ∙작업원 등에 대한 정기적인 교육실시	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		붕괴_버팀목 미설치	매몰		M	∙거푸집 동바리 등의 설치 및 해체 순서도 작성 ∙구조계산에 따른 거푸집 설계도 작성 - 거푸집 설계하중 명시 - 거푸집 조립 및 해체 순서 설계도 작성	∙시공계획서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계를 기준으로 거푸집의 설치,해체 순서를 상세히 정리하여 시공계획서에 반영 ∙현장 여건을 반영하여 거푸집 설치 및 해체 순서를 시공계획서에 명기 ∙거푸집 작업시 설계하중 명기	∙승인된 시공계획에 의거 점검 및 확인 ∙작업원 등에 대한 정기적인 교육실시	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		탈락_거푸집 하단 미고정	충돌		M	∙고소위치에서 거푸집 해체에 대한 표준 시공 순서도 설계 반영 ∙구조계산에 따른 거푸집 설계도 작성 - 거푸집 설계하중 명시 - 거푸집 조립 및 해체 순서 설계도 작성	∙시공계획서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙현장 여건을 반영하여 거푸집 설치 및 해체 순서를 시공계획서에 명기 ∙거푸집 작업시 설계하중 명기	∙승인된 시공계획에 의거 점검 및 확인 ∙작업원 등에 대한 정기적인 교육실시	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		전도_우수유입	매몰		M	∙지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립	∙시공계획서에 지하수 및 강우에 따른 배수계획 수립 여부 확인	∙우기 전‧후 지반 지지력에 대한 확인 검토 ∙시공계획서에 배수계획 수립 ∙구조계산에 따른 소요 지지력 확인	∙승인된 시공계획에 의거 점검 및 확인 ∙작업원 등에 대한 정기적인 교육실시	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	거푸집_형틀	전도_버팀목 및 지지물 설치 미흡	매몰		M	∙거푸집에 대한 표준 설계도 작성(구조검토 포함) → 동바리 설치 및 지지시스템 설계시 구조검토 필수	∙시공계획서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙거푸집에 대한 동바리 설치 시 정확한 간격 및 변위방지 고정장치 확인	∙승인된 시공계획에 의거 점검 및 확인 ∙작업원 등에 대한 정기적인 교육실시	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
B 강관비계	비계(고소)_자재이동	붕괴_구조기준 미준수	추락		M	∙고소위치에서 거푸집 해체에 대한 표준 시공 순서도 설계 반영	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인		∙시공계획서의 적정성 확인 ∙설계 및 시공계획서의 준수 여부 확인	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	비계(고소)_철거	붕괴_해체작업 방법 및 순서 부적절	추락		H
	비계(고소)_이동	-	추락		L	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성		∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙도로교 표준 시방서 2013 ∙토목공사 표준일반 시방서2005
	비계(고소)_해체	전도_작업발판 고정 철선 절단	추락		M
	비계파이프_이동	-	전락		L			∙작업 전 주요공정 관련 사전 안전교육(TBM)		∙산업안전보건법 시행령
	작업발판	-	추락		L
		낙하_탈락	추락		M			∙위험작업 반경 내 안전팬스 및 접근차단 조치 시행 ∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 ∙안전반경 확보 여부 및 안전시설물의 설치 적정성 확인	∙가설공사 표준시방서 2006 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		파손	추락		M		∙자재 반입시 자재 검수 기준 수립 여부 확인	∙시공 전 작업자 안전교육 철저	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
c 철근 가공조립	절취사면(개착식 터널)_철근 및 거푸집 조립	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙충분한 지반조사 결과를 반영한 흙막이 설계 준수 ∙기하학정 비정형 흙막이의 설계는 반드시 3차원 모델링(시공 단계별) 후 설계	∙계획수립 여부 확인 ∙설계 지반조사 내용확인을 위한 추가 지반조사 계획 수립 여부 확인	∙설계내용을 반영한 계측 시행 ∙계측관리 기준 - 설계 시 구조검토 결과를 반드시 적용	∙상기 설계, 시공 조건의 준수사항 확인 ∙기술지원 감리원의 확인, 검토 필수	∙토목공사 표준일반시방서 2005 ∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011
d 콘크리트타설	거푸집_타설	전도_작업하중(진동)	추락		L	∙거푸집 및 사방향 동바리에 대한 구조검토(좌굴변형 여부 확인) ∙구조계산에 따른 거푸집 및 동바리 설치 및 해체 순서도 작성	∙구조계산에 따른 거푸집 및 동바리 설치 및 해체 계획 수립여부 확인	∙플랫 타이만 설치하고 지지가설물이 없거나 또는 동바리를 철근과 용접 지지하는 것은 원칙적으로 불가 ∙반드시 사방향 동바리를 견고히 고정하고 좌굴변형이 발행하지 않도록 시공 ∙시공계획서에 거푸집 및 동바리 설치 및 해쳬 계획 수립	∙시공계획서의 적정성 확인 ∙설계 및 시공계획서의 준수 여부 확인	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_타설하중 집중	추락		M	∙콘크리트 타설 순서도 작성	∙콘크리트 타설계획서 작성여부 확인	∙구조계산에 따른 콘크리트 타설 위치 및 타설 높이 수립	∙시공계획서의 적정성 확인 ∙설계 및 시공계획서의 준수 여부 확인
		붕괴_타설순서 미준수	매몰		H
		붕괴_가새/지지대 미설치	매몰		H	∙거푸집 동바리 등의 설치 및 해체 순서도 작성	∙구조계산에 따른 거푸집 및 동바리 설치 및 해체 계획 수립여부 확인	∙설계를 기준으로 거푸집의 설치,해체 순서를 상세히 정리하여 시공계획서에 반영	∙거푸집, 동바리 자재 검수 시 결함, 불량 자재 확인 철저	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_동절기 콘크리트 타설	매몰		H	∙동절기 콘크리트 타설기준 수립 ∙온도변화를 반영한 거푸집 설치 계획도 작성	∙온도변화를 반영한 동절기 거푸집 설치 및 해체 계획 수립 여부 확인	∙시공계획서에 동절기 콘크리트 타설계획(순서 및 타설높이) 수립	∙시공계획서의 적정성 확인 ∙설계 및 시공계획서의 준수 여부 확인
		붕괴_타설속도 미준수	추락		H	∙거푸집설계 기본도 ∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전 설계	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙타설 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 타설 순서 및 상세 시공도 작성(필요 시 구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영 ∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙시공계획서 확보 ∙시공계획서의 적정성 확인 ∙설계 및 시공계획서의 준수 여부 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙철도건설공사 전문시방서 2013
		붕괴_구조안전성 미검토 및 조립도 미작성	매몰		H	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전 설계	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙설계 및 시공계획서의 준수 여부 확인 ∙시공계획서 확보
		붕괴_과하중 적치	추락		M				∙시공계획서 확보
		붕괴_긴결 미흡	추락		M
		전도_콘크리트 유동화현상	추락		H	∙거푸집에 대한 표준 설계도 작성(구조검토 포함) → 동바리 설치 및 지지시스템 설계 시 구조검토 필수		∙거푸집에 대한 동바리 설치 시 정확한 간격 및 변위방지 고정장치 확인		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	거푸집동바리_타설	붕괴_가새 미설치	추락		L	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
		붕괴_동바리 조립도 미작성	매몰		H
		붕괴_구조안전성 미검토 및 조립도 미작성	매몰		H	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계 ∙현행 : 시스템 동바리 설계시 국부적인 단순 해석으로 전체 구조계 및 하중이 미반영 → 실제 3차원 해석 시공단계를 고려하여 별도의 동바리 설계
		붕괴_설치상태 불량	매몰		M
	펌프카 붐_인양 및 상승	낙하_지지부재 이탈(C.P.B 마스트)	충돌		M	∙콘크리트 타설계획서에 타설장비의 규격 및 사양 명기 및 장비 거치위치 표기	∙콘크리트 타설시공계획서, 감독확인서 검토	∙시공계획서 작성 시 자재의 적재위치, 이동 및 적재의 방법, 방호 조치에 대한 방안 수립 ∙자재의 이동(고정, 양중, 운반 등)에 대한 안전계획 수립 ∙콘크리트 타설계획 작성시 장비의 규격 및 사양 확인 ∙장비의 타설 위치 선정 및 이동시 방호대책 수립	∙시공계획 및 안전계획에 준한 자재 적재, 이동의 감독	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	펌프카 붐_타설	낙하_붐 연결핀 파단	충돌		M	∙작업전 건설기계 검사의 의무화	∙작업전 기계 장비의 확인서 발급후 작업 시행	∙시공계획서 작성시 장비의 점검 부위 및 타설 물량에 따른 점검 빈도 계획 수립
			충돌		L	∙콘크리트 타설계획서에 타설장비의 규격 및 사양 명기 및 장비 거치위치 표기	∙콘크리트 타설시공계획서, 감독확인서 검토	∙시공계획서 작성시 장비의 점검 부위 및 타설 물량에 따른 점검 빈도 계획 수립		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙산업안전 보건기본법 시행령
	펌프카_타설	비래_건설기계 작업순서 미흡	충돌		M
		전도_지반침하	충돌/추락		M	∙급사면, 고저차가 큰 부위에 대한 설계 시 중장비 운용에 대한 검토(설계서, 별도 보고서 등에 반영)		∙시공계획서에 장비 운용에 대한 계획 반영	∙시공계획 및 안전계획에 따른 장비의 운용 및 이동 감독	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
e 배수공
f 방수공
g 터널 배수공 비닐 깔기
h 공동구 콘크리트
i 신축이음
j 수팽창 고무 지수재
k 지수판
l JOINT FILLER
m 터널 내부 오염도장
n 다우웰바
o PVC반달관설치
p NAILING 공
1.10 터널부속 시설물
a 터널 명판 및 안내판
b 임시가시설
b-1 임시환기시설
b-2 임시전기시설
b-3 작업용 비계
b-4 임시배수설비
b-4 작업용대차
b-4 작업용대차
b-4 라이닝 살수대차
b-4 라이닝 양생대차
b-5 임시급수설비
b-6 방음문
b-7 갱구부 방음커텐
c 영구시설물
c-2 폐수처리시설
1.11 부대공
a 공사용갱문
a-1 Base Plate
a-2 Anchor Bolt
a-3 스페이서
a-4 합 판
a-5 강지보 설치철거
a-6 콘크리트타설
a-7 와이어메쉬
a-8 숏크리트
b 터널내부내장
b-1 터널 내오염도장
d 기타부대시설물
d-1 방화문설치
d-2 라이닝 식별 표지판
d-3 폐수처리시설
e 바닥면청소및정리
f 유도배수공
1.12 계측
a 계측
b TSP 탐사
c 시험발파
1.13 숏크리트 생산 및 운반
1.14 골재생산 및 운반
1.15 자재운반
a 시멘트 운반
b 모래 운반
c 자갈 운반
1.16 자재대
a 시멘트
b 철근
c 모래
1.17 고철대(고재)

3. 하천공사

공종명	Hazard	Risk				단계별 저감대책				관련기준
		물적(사고결과_사고유발원인)	인적	L	S	설계	발주	시공	관리감독
가. 축제공
1.01 터파기 및 되메우기
a 구조물터파기	굴착사면_굴착	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙굴착고 1.5m이상, 굴착 사면 경사 1:2.0이상의 급경사의 경우 적용을 고려 ∙사면 조성 작업은 임시 낙석 방지 시설과 관련하여 시설물 설계 안전 팬스에 대해서도 도면상 표시 ∙주변환경(도심하천, 산악, 운행선 인접 등)에 따른 안전설계 반영	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙시공 계획서 및 안전관리 계획서에 설계 내용을 충분히 검토, 반영 후 공사 시행 ∙공사중 임시 낙석방지시설과 같은 안전휀스등에 대한 시공상세도 추가 작성 및 설계변경 반영	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙도로공사 표준시방서 2009
		붕괴_건설물 미제거(돌담)	매몰		H	∙굴착면과 지장물의 간격이 3.5m 이하의 협소한 경우 적용을 고려 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)		∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공		∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_흙막이 가시설 미설치	매몰		H	∙가시설 설치 도면(평면도, 종단면도, 황단면도) 작성 ∙가시설 설치 공사비 계상 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)
		붕괴_흙막이 지보공 미설치	매몰		M	∙지보공 설치 도면(평면도, 종단면도, 황단면도) 작성 ∙지보공 설치 공사비 계상 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)
	굴착사면_굴착 및 정지	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙하천수 유입을 방지하기 위한 수위표 설치 ∙주변환경(도심하천, 산악, 운행선 인접 등)에 따른 안전설계 반영		∙공사중 임시 낙석방지시설과 같은 안전휀스등에 대한 시공상세도 추가 작성 및 설계변경 반영
		붕괴_흙막이 가시설 미설치	매몰		M	∙가시설 설치 도면(평면도, 종단면도, 황단면도) 작성 ∙가시설 설치 공사비 계상
	굴착사면_레벨측정	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙굴착고 1.5m이상, 굴착 사면 경사 1:2.0이상의 급경사의 경우 적용을 고려 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공범위의 기본설정(설계서 반영) ∙자연 터파기 대상(공사장 환경 반영)과 흙막이 설치에 대한 검토를 설계보고서에 반드시 반영.	∙계획수립 여부 확인	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공 ∙공사중 임시 낙석방지시설과 같은 안전휀스등에 대한 시공상세도 추가 작성 및 설계변경 반영	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011
		붕괴_흙막이 지보공 미설치	매몰		M			∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공
	굴착사면_이동	붕괴_부착토 미제거	매몰		M
		붕괴_지반상태 불량	매몰		M	∙공사용 가도 설치 도면(평면도, 종단면도, 황단면도) 작성 ∙공사용 가도 설치 공사비 계상
	굴착사면_점검	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙안전 Fence Line 설계 시 반영	∙계획수립 여부 확인	∙시공계획서(안전관리계획서)에 Safe Construction Line 설정 → 안전팬스 계획 ∙낮은 굴착 심도도 안식각을 고려한 굴착 시 영향범위를 설정하고 이를 고려하여 작업자 동선 및 공사장 안전팬스 설치 ∙공사중 임시 낙석방지시설과 같은 안전휀스등에 대한 시공상세도 추가 작성 및 설계변경 반영	∙설계에 준한 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인 및 발주처 보고	∙토목공사 표준일반 시방서 2005
	굴착사면_정리	붕괴_굴착면 기울기	협착		M	∙굴착고 1.5m이상, 굴착 사면 경사 1:2.0이상의 급경사의 경우 적용을 고려. ∙설계 시 굴착면 주변의 지반 상황에 부합하는 검토 및 보강 반영 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙계획수립 여부 확인	∙설계 내용에 대한 시공 전 설계도서 검토 의무 시행. ∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_흙막이 지보공 미설치	협착		M
		낙석	충돌		M	∙굴착고 1.5m이상, 굴착 사면 경사 1:2.0이상의 급경사의 경우 적용을 고려. ∙사면 조성 작업은 임시 낙석 방지 시설과 관련하여 시설물 설계 안전 팬스에 대해서도 도면상 표시	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙시공 계획서 및 안전관리 계획서에 설계 내용을 충분히 검토, 반영 후 공사 시행	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	굴착사면_준비	붕괴_굴착면 기울기	매몰		H	∙굴착고 1.5m이상, 굴착 사면 경사 1:2.0이상의 급경사의 경우 적용을 고려. ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_흙막이 지보공 미설치	매몰		H
	굴삭기(사면)	전락_유도자 미배치	협착		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
	덤프트럭_운반	-	충돌		M	∙유도수 배치 계획 시방서에 명시 ∙안전 Fence Line 설계 시 반영	∙계획수립 여부 확인	∙시공계획서(안전관리계획서)에 Safe Construction Line 설정 → 안전팬스 계획	∙설계에 준한 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인 및 발주처 보고	∙하천공사 표준시방서 2007 ∙가설공사 표준시방서 2014.8, ∙산업안전보건법 시행령
b 되메우기 및 다짐	백호_다짐	전도_부동침하	협착		M	∙설계 시 굴착면 주변의 지반 상황에 부합하는 검토 및 보강 반영 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기	∙계획수립 여부 확인	∙설계 내용에 대한 시공 전 설계도서 검토 의무 시행. ∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	덤프트럭_운반	-	충돌		M	∙안전 Fence Line 설계 시 반영	∙계획수립 여부 확인	∙시공계획서(안전관리계획서)에 Safe Construction Line 설정 → 안전팬스 계획	∙설계에 준한 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인 및 발주처 보고	∙하천공사 표준시방서 2007 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙산업안전보건 기본법 시행령
1.02 흙막이
흙막이	흙막이가시설	붕괴				∙설계시와 시공시의 시간경과에 따른 현장여건 변화 설계반영	∙설계시와 시공시의 시간경과에 따른 현장여건 변화로 인한 흙막이등 설계조건 확인
	흙막이지보공	붕괴				∙흙막이 지보공 설치에따른 안전조치 설계반영
1.03 표토제거
1.04 사토 운반
사토 운반	덤프트럭_운반	-	충돌		M	∙유도수 배치 계획 시방서에 명시 ∙안전 Fence Line 설계 시 반영	∙계획수립 여부 확인	∙시공계획서(안전관리계획서)에 Safe Construction Line 설정 → 안전팬스 계획	∙설계에 준한 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인 및 발주처 보고	∙하천공사 표준시방서 2007 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙산업안전보건 기본법 시행령
1.05 흙쌓기
a 제방더돋기
b 흙쌓기
1.06 쌓기비탈면 다짐
1.07 비탈면보호공
나. 호안공
1.01 터파기 및 되메우기
a 구조물터파기	굴착사면_굴착	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙굴착고 1.5m이상, 굴착 사면 경사 1:2.0이상의 급경사의 경우 적용을 고려 ∙사면 조성 작업은 임시 낙석 방지 시설과 관련하여 시설물 설계 안전 팬스에 대해서도 도면상 표시	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙시공 계획서 및 안전관리 계획서에 설계 내용을 충분히 검토 반영 후 공사 시행	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙도로공사 표준시방서 2009
		붕괴_건설물 미제거(돌담)	매몰		H	∙굴착면과 지장물의 간격이 3.5m 이하의 협소한 경우 적용을 고려 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)		∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공		∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_흙막이 가시설 미설치	매몰		H	∙가시설 설치 도면(평면도, 종단면도, 황단면도) 작성 ∙가시설 설치 공사비 계상 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)		∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공
		붕괴_흙막이 지보공 미설치	매몰		M	∙지보공 설치 도면(평면도, 종단면도, 황단면도) 작성 ∙지보공 설치 공사비 계상 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)
	굴착사면_굴착 및 정지	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙하천수 유입을 방지하기 위한 수위표 설치
		붕괴_흙막이 가시설 미설치	매몰		M	∙가시설 설치 도면(평면도, 종단면도, 황단면도) 작성 ∙가시설 설치 공사비 계상
	굴착사면_레벨측정	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙굴착고 1.5m이상, 굴착 사면 경사 1:2.0이상의 급경사의 경우 적용을 고려 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공범위의 기본설정(설계서 반영) ∙자연 터파기 대상(공사장 환경 반영)과 흙막이 설치에 대한 검토를 설계보고서에 반드시 반영	∙계획수립 여부 확인	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011
		붕괴_흙막이 지보공 미설치
	굴착사면_이동	붕괴_부착토 미제거	매몰		M
		붕괴_지반상태 불량	매몰		M	∙공사용 가도 설치 도면(평면도, 종단면도, 황단면도) 작성 ∙공사용 가도 설치 공사비 계상
	굴착사면_점검	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙안전 Fence Line 설계 시 반영	∙계획수립 여부 확인	∙시공계획서(안전관리계획서)에 Safe Construction Line 설정 → 안전팬스 계획 ∙낮은 굴착 심도도 안식각을 고려한 굴착 시 영향범위를 설정하고 이를 고려하여 작업자 동선 및 공사장 안전팬스 설치	∙설계에 준한 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인 및 발주처 보고	∙토목공사 표준일반시방서 2005
	굴착사면_정리	붕괴_굴착면 기울기	협착		M	∙굴착고 1.5m이상, 굴착 사면 경사 1:2.0이상의 급경사의 경우 적용을 고려 ∙설계 시 굴착면 주변의 지반 상황에 부합하는 검토 및 보강 반영 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙계획수립 여부 확인	∙설계 내용에 대한 시공 전 설계도서 검토 의무 시행. ∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_흙막이 지보공 미설치	협착		M
		낙석	충돌		M	∙굴착고 1.5m이상, 굴착 사면 경사 1:2.0이상의 급경사의 경우 적용을 고려 ∙사면 조성 작업은 임시 낙석 방지 시설과 관련하여 시설물 설계 안전 팬스에 대해서도 도면상 표시	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙시공 계획서 및 안전관리 계획서에 설계 내용을 충분히 검토, 반영 후 공사 시행
	굴착사면_준비	붕괴_굴착면 기울기	매몰		H	∙굴착고 1.5m이상, 굴착 사면 경사 1:2.0이상의 급경사의 경우 적용을 고려 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_흙막이 지보공 미설치
	굴삭기(사면)	전락_유도자 미배치	협착		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령, ∙가설공사 표준시방서 2006 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
	덤프트럭_운반	-	충돌		M	∙유도수 배치 계획 시방서에 명시 ∙안전 Fence Line 설계 시 반영	∙계획수립 여부 확인	∙시공계획서(안전관리계획서)에 Safe Construction Line 설정 → 안전팬스 계획	∙설계에 준한 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인 및 발주처 보고	∙하천공사 표준시방서 2007 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙산업안전보건법 시행령
b 되메우기 및 다짐	백호_다짐	전도_부동침하	협착		M	∙설계 시 굴착면 주변의 지반 상황에 부합하는 검토 및 보강 반영 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기	∙계획수립 여부 확인	∙설계 내용에 대한 시공 전 설계도서 검토 의무 시행. ∙ 길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	덤프트럭_운반	-	충돌		M	∙유도수 배치 계획 시방서에 명시 ∙안전 Fence Line 설계 시 반영	∙계획수립 여부 확인	∙시공계획서(안전관리계획서)에 Safe Construction Line 설정 → 안전팬스 계획	∙설계에 준한 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인 및 발주처 보고	∙하천공사 표준시방서 2007 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙산업안전보건법 시행령
1.02 호안블록
a 호안블록 설치	고 절성토사면의 장비작업					∙고 절성토사면의 장비작업에 대한 작업절차 및 안전계획 설계반영
	고성토 사면	붕괴				∙고성토 사면의 낙석방지용 울타리 검토등 설계반영
b 부직포 설치
c 호안블록 천단
c-1 콘크리트타설	거푸집(하부 용접부)_타설	비산_용접불량	-		L
	펌프카 붐_타설	낙하_붐 연결핀 파단	충돌		L
	펌프카_타설	전도_지반침하	충돌		M	∙유도수 배치 계획 시방서에 명시 ∙급사면, 고저차가 큰 부위에 대한 설계 시 중장비 운용에 대한 검토(설계서, 별도 보고서 등에 반영)		∙시공계획서에 장비 운용에 대한 계획 반영		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	운용장비	전도	추락					∙콘크리트 타설시 운용장비의 전도 및 추락 등에 대한 안전 계획 수립
c-2 거푸집
1.03 사석부설
다. 구조물공
1.01 흉벽설치
a 콘크리트 타설	거푸집(하부 용접부)_타설	비산_용접불량	-		L
	펌프카 붐_타설	낙하_붐 연결핀 파단	충돌		L
	펌프카_타설	전도_지반침하	충돌		M	∙유도수 배치 계획 시방서에 명시 ∙급사면, 고저차가 큰 부위에 대한 설계 시 중장비 운용에 대한 검토(설계서, 별도 보고서 등에 반영)		∙시공계획서에 장비 운용에 대한 계획 반영		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
b 거푸집	거푸집	전도/붕괴						∙설계상의 지지조건과 현장의 지지조건 현장확인
	거푸집(하부 용접부)_타설	비산_용접불량	-		L
	거푸집_설치	전도_거푸집 수직도 미확보	협착		M
	거푸집_정리	전도_버팀대 미설치	협착		M	∙중요 또는 위험부 시공 시 가설물에 대한 정확한 설계(필요시 3차원 해석 포함)		∙설계서에 준한 시공계획 및 시공		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	거푸집_조립	전도_버팀목 및 지지물 설치 미흡	매몰		M
	거푸집_해체	붕괴_해체방법 미흡	협착		L			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영	∙각 종 건설장비 주변 안전조치 여부 확인	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		붕괴_버팀목 미설치	매몰		M	∙거푸집 동바리 등의 설치 및 해체 순서도 작성		∙설계를 기준으로 거푸집의 설치,해체 순서를 상세히 정리하여 시공계획서에 반영		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		탈락_거푸집 하단 미고정	충돌		M	∙고소위치에서 거푸집 해체에 대한 표준 시공 순서도 설계 반영
		전도_우수유입	매몰		M			∙우기 전‧후 지반 지지력에 대한 확인 검토
	거푸집_형틀	전도_버팀목 및 지지물 설치 미흡	매몰		M	∙거푸집에 대한 표준 설계도 작성(구조검토 포함) → 동바리 설치 및 지지시스템 설계 시 구조검토 필수		∙거푸집에 대한 동바리 설치 시 정확한 간격 및 변위방지 고정장치 확인		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	백호_인양	-	충돌		L			∙장비 이동 경로 계획 ∙작업자 장비 작업반경내 접근 금지 등 사전교육		∙산업안전보건법 시행령
c 철근가공 조립(현장)	수직철근_철근조립	전도_수평보강 및 지지 미흡	협착		M
		전도_돌풍	협착		M
	수직철근_설치	전도_작업자 하중	추락		M			∙시공 전 작업자 안전교육 철저	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
d 비계	비계	전도/붕괴						∙설계상의 지지조건과 현장의 지지조건 현장확인 ∙작용 설계하중과 현장 재하하중의 비교 확인 ∙안전난간 등의 상세 설계반영
	비계(고소)_이동	-	추락		L	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙도로교 표준 시방서 2013 ∙토목공사 표준일반 시방서 2005
	비계(고소)_자재이동	붕괴_구조기준 미준수	추락		M	∙고소위치에서 거푸집 해체에 대한 표준 시공 순서도 설계 반영			∙시공계획서의 적정성 확인 ∙설계 및 시공계획서의 준수 여부 확인	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	비계(고소)_철거	붕괴_해체작업 방법 및 순서 부적절	추락		H
	비계(고소)_해체	전도_작업발판 고정 철선 절단	추락		M	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙도로교 표준 시방서 2013 ∙토목공사 표준일반 시방서 2005
	비계파이프_이동	-	전락		L			∙작업 전 주요공정 관련 사전 안전교육(TBM) ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독		∙산업안전보건법 시행령
	사다리(고소)	-	추락		L			∙작업 전 주요공정 관련 사전 안전교육(TBM) ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독		∙산업안전보건법 시행령
	이동식 비계(고소)_이동	낙하_이동식 비계 조정 및 추진방향 판단 미흡	충돌		H
	작업발판	-	추락		L			∙작업 전 주요공정 관련 사전 안전교육(TBM) ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독		∙산업안전보건법 시행령
	작업발판 지지대(이동식 비계)_설치	낙하_탈락	추락		M			∙시공 전 작업자 안전교육 철저 ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	작업발판(비계)	낙하_탈락	추락		M		∙시공계획서, 감독확인서 검토	∙위험작업 반경 내 안전팬스 및 접근차단 조치 시행 ∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영 - 시공계획 수립 시 반영	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 ∙안전반경 확보 여부 및 안전시설물의 설치 적정성 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
	작업발판(비계)_설치	파손	추락		M			∙시공 전 작업자 안전교육 철저 ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	작업발판(이동식 비계)_설치	낙하_탈락	추락		M	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계		∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙지지용 앵커의 규격, 근입깊이, 수량 등의 표준도, 상세도 적정성 여부 확인 ∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		전도_과하중 발생	추락		M	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙시공계획서, 감독확인서 검토	∙가시설의 설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영 ∙안전교육 및 안전장구의 착용 여부 확인	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 ∙안전반경 확보 여부 및 안전시설물의 설치 적정성 확인
e 동바리	거푸집동바리	붕괴						∙설계상의 지지조건과 현장의 지지조건 현장확인 ∙작용 설계하중과 현장 재하하중의 비교 확인 ∙안전난간 등의 상세 설계반영
	거푸집동바리_타설	붕괴_구조안전성 미검토 및 조립도 미작성	매몰		H	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙시공계획서, 감독확인서 검토 / ∙ 설계 내용 반영 여부 확인	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		붕괴_설치상태 불량	매몰		M
f 스페이셔
g 배수파이프
h 신축이음 설치
i 흉벽마감 및 두겁석 설치
j 케미컬앵커 설치
1.02 조경석(전석) 쌓기
1.03 방수문 설치
a 방수문 설치
b 방수문 기초제작 설치
b-1 콘크리트타설	거푸집(하부 용접부)_타설	비산_용접불량	-		L
	펌프카 붐_타설	낙하_붐 연결핀 파단	충돌		L					∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙산업안전보건법 시행령
	펌프카_타설	전도_지반침하	충돌		M	∙유도수 배치 계획 시방서에 명시 ∙급사면, 고저차가 큰 부위에 대한 설계 시 중장비 운용에 대한 검토(설계서, 별도 보고서 등에 반영)		∙시공계획서에 장비 운용에 대한 계획 반영		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
b-2 거푸집	거푸집(하부 용접부)_타설	비산_용접불량	-		L
	거푸집_설치	전도_거푸집 수직도 미확보	협착		M
	거푸집_정리	전도_버팀대 미설치	협착		M	∙중요 또는 위험부 시공 시 가설물에 대한 정확한 설계(필요시 3차원 해석 포함)		∙설계서에 준한 시공계획 및 시공		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	거푸집_조립	전도_버팀목 및 지지물 설치 미흡	매몰		M
	거푸집_해체	붕괴_해체방법 미흡	협착		L			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영	∙각 종 건설장비 주변 안전조치 여부 확인	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		붕괴_버팀목 미설치	매몰		M	∙거푸집 동바리 등의 설치 및 해체 순서도 작성		∙설계를 기준으로 거푸집의 설치,해체 순서를 상세히 정리하여 시공계획서에 반영		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		탈락_거푸집 하단 미고정	충돌		M	∙고소위치에서 거푸집 해체에 대한 표준 시공 순서도 설계 반영
		전도_우수유입	매몰		M			∙우기 전‧후 지반 지지력에 대한 확인 검토
	거푸집_형틀	전도_버팀목 및 지지물 설치 미흡	매몰		M	∙거푸집에 대한 표준 설계도 작성(구조검토 포함) → 동바리 설치 및 지지시스템 설계 시 구조검토 필수		∙거푸집에 대한 동바리 설치 시 정확한 간격 및 변위방지 고정장치 확인		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	백호_인양	-	충돌		L			∙장비 이동 경로 계획 ∙작업자 장비 작업반경내 접근 금지 등 사전교육 ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독		∙산업안전보건법 시행령
b-3 철근가공조립(현장)	수직철근_철근조립	전도_수평보강 및 지지 미흡	협착		M
		전도_돌풍	협착		M
	수직철근_설치	전도_작업자 하중	추락		M			∙시공 전 작업자 안전교육 철저 ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급,/착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
b-4 스페이셔 설치
라. 조경공
1.01 토공사
a 구조물터파기	굴착사면_굴착	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙굴착고 1.5m이상, 굴착 사면 경사 1:2.0이상의 급경사의 경우 적용을 고려. ∙사면 조성 작업은 임시 낙석 방지 시설과 관련하여 시설물 설계 안전 팬스에 대해서도 도면상 표시	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙시공 계획서 및 안전관리 계획서에 설계 내용을 충분히 검토, 반영 후 공사 시행	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙도로공사 표준시방서 2009
		붕괴_건설물 미제거(돌담)	매몰		H	∙굴착면과 지장물의 간격이 3.5m 이하의 협소한 경우 적용을 고려 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)		∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공		∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_흙막이 가시설 미설치	매몰		H	∙가시설 설치 도면(평면도, 종단면도, 황단면도) 작성 ∙가시설 설치 공사비 계상 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)
		붕괴_흙막이 지보공 미설치	매몰		M	∙지보공 설치 도면(평면도, 종단면도, 황단면도) 작성 ∙지보공 설치 공사비 계상 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)
	굴착사면_굴착 및 정지	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙하천수 유입을 방지하기 위한 수위표 설치
		붕괴_흙막이 가시설 미설치	매몰		M	∙가시설 설치 도면(평면도, 종단면도, 황단면도) 작성 ∙가시설 설치 공사비 계상
	굴착사면_레벨측정	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙굴착고 1.5m이상, 굴착 사면 경사 1:2.0이상의 급경사의 경우 적용을 고려 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공범위의 기본설정(설계서 반영) ∙자연 터파기 대상(공사장 환경 반영)과 흙막이 설치에 대한 검토를 설계보고서에 반드시 반영	∙계획수립 여부 확인	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙상수도공사 표준시방서 2007
		붕괴_흙막이 지보공 미설치
	굴착사면_이동	붕괴_부착토 미제거	매몰		M
		붕괴_지반상태 불량	매몰		M	∙공사용 가도 설치 도면(평면도, 종단면도, 황단면도) 작성 ∙공사용 가도 설치 공사비 계상
	굴착사면_점검	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙안전 Fence Line 설계 시 반영	∙ 계획수립 여부 확인	∙시공계획서(안전관리계획서)에 Safe Construction Line 설정 → 안전팬스 계획 ∙낮은 굴착 심도도 안식각을 고려한 굴착 시 영향범위를 설정하고 이를 고려하여 작업자 동선 및 공사장 안전팬스 설치	∙설계에 준한 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인 및 발주처 보고	∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
	굴착사면_정리	붕괴_굴착면 기울기	협착		M	∙굴착고 1.5m이상, 굴착 사면 경사 1:2.0이상의 급경사의 경우 적용을 고려 ∙설계 시 굴착면 주변의 지반 상황에 부합하는 검토 및 보강 반영 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙계획수립 여부 확인	∙설계 내용에 대한 시공 전 설계도서 검토 의무 시행. ∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_흙막이 지보공 미설치
		낙석	충돌		M	∙굴착고 1.5m이상, 굴착 사면 경사 1:2.0이상의 급경사의 경우 적용을 고려 ∙사면 조성 작업은 임시 낙석 방지 시설과 관련하여 시설물 설계 안전 팬스에 대해서도 도면상 표시	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙시공 계획서 및 안전관리 계획서에 설계 내용을 충분히 검토, 반영 후 공사 시행	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	굴착사면_준비	붕괴_굴착면 기울기	매몰		H	∙굴착고 1.5m이상, 굴착 사면 경사 1:2.0이상의 급경사의 경우 적용을 고려 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_흙막이 지보공 미설치
	굴삭기(사면)	전락_유도자 미배치	협착		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
	덤프트럭_운반	-	충돌		M	∙유도수 배치 계획 시방서에 명시 ∙안전 Fence Line 설계 시 반영	∙계획수립 여부 확인	∙시공계획서(안전관리계획서)에 Safe Construction Line 설정 → 안전팬스 계획	∙설계에 준한 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인 및 발주처 보고	∙하천공사 표준시방서 2007 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙산업안전보건법 시행령
b 되메우기 및 다짐	백호_다짐	전도_부동침하	협착		M	∙설계 시 굴착면 주변의 지반 상황에 부합하는 검토 및 보강 반영 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기	∙계획수립 여부 확인	∙설계 내용에 대한 시공 전 설계도서 검토 의무 시행. ∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	덤프트럭_운반	-	충돌		M	∙유도수 배치 계획 시방서에 명시 ∙안전 Fence Line 설계 시 반영	∙계획수립 여부 확인	∙시공계획서(안전관리계획서)에 Safe Construction Line 설정 → 안전팬스 계획	∙설계에 준한 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인 및 발주처 보고	∙하천공사 표준시방서 2007 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙산업안전보건법 시행령
1.02 우배수공사
a 우수맨홀 설치
	맨홀_인양	낙하_로프 강도 불충분	충돌		M
	백호_인양	-	충돌		L			∙장비 이동 경로 계획 ∙작업자 장비 작업반경내 접근 금지 등 사전교육 ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독		∙산업안전보건법 시행령
b 빗물받이 설치
c 배수관 및 연결관 부설 및 접합	굴착사면_부설	붕괴_작업하중	매몰		M	∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기	∙계획수립 여부 확인	∙설계 내용에 대한 시공 전 설계도서 검토 의무 시행.	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙상수도공사 표준시방서 2008
		붕괴_흙막이가시설 미설치	매몰		M	∙가시설 설치 도면(평면도, 종단면도, 황단면도) 작성 ∙가시설 설치 공사비 계상 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기
	굴착사면_부설	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙근접시공과 관련 영향 검토 실시(해석 및 계측)	∙계획수립 여부 확인	∙설계 변경 시 검토 내용 원설계자와 검토 의무화 ∙시공계획서에 근접 시설물 관리사항 포함	∙설계 검토 사항에 대한 기술지원 감리원의 확인	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙상수도공사 표준시방서 2007
		붕괴_흙막이 지보공 미설치
	굴착사면_관거밴딩	붕괴_부적절한 흙막이 설치	매몰		H	∙흙막이 구조계산 결과 보고서 수록 ∙안전 Fence Line 설계 시 반영	∙계획수립 여부 확인	∙시공계획서(안전관리계획서)에 Safe Construction Line 설정 → 안전팬스 계획 ∙낮은 굴착 심도도 안식각을 고려한 굴착 시 영향범위를 설정하고 이를 고려하여 작업자 동선 및 공사장 안전팬스 설치	∙설계에 준한 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인 및 발주처 보고	∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
	굴착사면_굴착	붕괴_건설물 미제거(돌담)	매몰		H	∙굴착면과 지장물의 간격이 3.5m 이하의 협소한 경우 적용을 고려 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙굴착고 1.5m이상, 굴착 사면 경사 1:2.0이상의 급경사의 경우 적용을 고려 ∙사면 조성 작업은 임시 낙석 방지 시설과 관련하여 시설물 설계 안전 팬스에 대해서도 도면상 표시	∙계획수립 여부 확인	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_흙막이 가시설 미설치	매몰		H	∙가시설 설치 도면(평면도, 종단면도, 황단면도) 작성 ∙가시설 설치 공사비 계상 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	굴착사면_바닥면정리	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙계획수립 여부 확인	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_흙막이 지보공 미설치	매몰		M	∙지보공 설치 도면(평면도, 종단면도, 황단면도) 작성 ∙지보공 설치 공사비 계상 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)
	굴착사면_이음부위정리	붕괴_굴착면 기울기	매몰		H	∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영) ∙자연 터파기 대상(공사장 환경 반영)과 흙막이 설치에 대한 검토를 설계보고서에 반드시 반영	∙계획수립 여부 확인	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
		붕괴_흙막이 가시설 미설치
	굴착사면_준비	붕괴_굴착면 기울기	매몰		H	∙굴착고 1.5m이상, 굴착 사면 경사 1:2.0이상의 급경사의 경우 적용을 고려 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		붕괴_흙막이 지보공 미설치
	굴착사면_지장물 확인	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙설계 시 굴착면 주변의 지반 상황에 부합하는 검토 및 보강 반영 ∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙계획수립 여부 확인	∙설계 내용에 대한 시공 전 설계도서 검토 의무 시행. ∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙상수도공사 표준 시방서 2007 ∙산업안전보건법 시행령
		붕괴_흙막이 지보공 미설치
	굴착사면_평탄	붕괴_굴착면 기울기	매몰		H
		붕괴_흙막이 지보공 미설치	매몰		H
	굴착저면_운반	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M
		붕괴_흙막이 지보공 미설치	매몰		M
1.03 포장공사
a 흙포장
b 투수블럭포장
c 녹지경계석 설치	담장_쌓기	붕괴_집중하중	매몰		M
	이동식크레인_인양	충돌_안전대 부착설비 가격	추락		M			∙시공계획서 작성 시 자재의 적재위치, 방법, 방호 조치에 대한 방안 수립 ∙적재 장소의 여건에 따라 필요시 적정한 구조설계에 준한 적치, 보관 ∙자재의 이동(고정, 양중, 운반 등)에 대한 안전계획 수립	∙시공계획 및 안전계획에 준한 자재 적재, 이동의 감독	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		전도_경사각 미준수	충돌		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		전도_연약지반위 아웃트리거 설치
	카고크레인_인양	전도_중량물 급하강에 의한 충격하중	추락		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		전도_아웃트리거 설치 미흡
d 포장경계석 설치	담장_쌓기	붕괴_집중하중	매몰		M
	이동식크레인_인양	충돌_안전대 부착설비 가격	추락		M			∙시공계획서 작성 시 자재의 적재위치, 방법, 방호 조치에 대한 방안 수립 ∙적재 장소의 여건에 따라 필요시 적정한 구조설계에 준한 적치, 보관 ∙자재의 이동(고정, 양중, 운반 등)에 대한 안전계획 수립	∙시공계획 및 안전계획에 준한 자재 적재, 이동의 감독	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		전도_경사각 미준수	충돌		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		전도_연약지반위 아웃트리거 설치
	카고크레인_인양	전도_중량물 급하강에 의한 충격하중	추락		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		전도_아웃트리거 설치 미흡
1.04 시설물공사
a 파고라 설치
b 평의자 설치
c 등의자 설치
d 볼라드 설치
e 체력단련시설
f 계단설치
1.05 식재공사
마. 차수공
차수공	굴착사면_기성제 터파기	붕괴
	SheetPile_항타	붕괴/전도
	천공기/항타기/항발기	전도
	전도방지공_설치	붕괴
	보링기계	전도
	지하매설물	파손
	토양_약액주입	오염_그라우팅 약액 누출
	인접시설물_그라우팅 고압분사	파손_시공중 주입압 관리 미흡
바. 부대공
1.01 기존구조물철거
1.02 철근운반
1.03 골재구입 및 운반
1.04 세륜시설 설치
1.05 콘크리트깨기
1.06 가로수보호판 설치
1.07 기존포장복구
1.08 맨홀슬라브 복구
1.09 폐기물상차
1.10 가물막이 성토
1.11 호안블록헐기
1.12 P.P마대 쌓기 및 헐기
	톤마대쌓기	-	협착		L			∙장비 이동 경로 계획 ∙작업자 장비 작업반경내 접근 금지 등 사전교육 ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독		∙산업안전보건법 시행령
1.13 각종 표지판 설치
1.14 공사용가도 설치

4. 건축공사

공종	세부공종	Hazard	Risk				단계별 저감대책
			물적(사고결과_사고유발원인)	인적	L	S	설계	발주	시공	관리감독	관련기준
가설공	가설비계	비계(고소)_철거	붕괴_해체작업 방법 및 순서 부적절	추락		H
		비계(달비계)_도장	낙하_로프매듭풀림	추락		M			∙시공 전 작업자 안전교육 철저 ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
			낙하_탈락	추락		M			∙시공 전 작업자 안전교육 철저 ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		비계(외부쌍줄비계)_이동	-	추락		M			∙시공 전 작업자 안전교육 철저 ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		비계_돌붙임 및 줄눈 설치	붕괴_벽이음 일부해체	-		H	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계(연결시 문제 발생이 연계됨)	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8
		사다리(고소)	-	추락		L			∙작업 전 주요공정 관련 사전 안전교육(TBM) ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독		∙산업안전보건법 시행령
		사다리(고소)_배관	전도_배관 탈락	추락		M
	가설통로	RCS발판(고소)_인양	-	충돌		H			∙작업 전 주요공정 관련 사전 안전교육(TBM) ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독		∙산업안전보건법 시행령
		작업발판 지지대(이동식 비계)_설치	낙하_탈락	추락		M			∙시공 전 작업자 안전교육 철저 ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		작업발판(비계)_비닐보양	낙하_탈락	추락		M		∙시공계획서, 감독확인서 검토	∙위험작업 반경 내 안전팬스 및 접근차단 조치 시행 ∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 ∙안전반경 확보 여부 및 안전시설물의 설치 적정성 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		작업발판(비계)_설치	파손	추락		M			∙시공 전 작업자 안전교육 철저 ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		작업발판(이동식 비계)_설치	낙하_탈락	추락		M	∙가시설 시공표준도 작성(구조검토서 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계		∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙지지용 앵커의 규격, 근입깊이, 수량 등의 표준도, 상세도 적정성 여부 확인 ∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		작업발판(이동식 비계)_해체	전도_과하중 발생	추락		M	∙가시설 시공표준도 작성(구조검토서 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙시공계획서, 감독확인서 검토	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영 ∙안전교육 및 안전장구의 착용 여부 확인	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 ∙안전반경 확보 여부 및 안전시설물의 설치 적정성 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
	거푸집	ACS폼(고소)_인상	낙하_탈락	추락		M	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) - 앵커의 규격, 시공기준 등을 명기한 시공상세도 표준도 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영 ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계		∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙지지용 앵커의 규격, 근입깊이, 수량 등의 표준도, 상세도 적정성 여부 확인 ∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		갱폼(고소)_해체	낙하_연결볼트 해체	추락		M	∙거푸집설계 기본도 ∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함)		∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영	∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙도로교 표준 시방서 2013 ∙건축공사 표준시방서 ∙콘크리트 표준시방서 2009
			낙하_지지/고정장치 미흡	추락		M	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8
			낙하_탈락	추락		M	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성	∙시공계획서, 감독확인서 검토	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
			낙하_해체방법 미흡
		갱폼_타설	비산_재가공 불량핀 및 철선 사용	-		L
		거푸집(고소)_타설	붕괴_타설하중 집중	추락		M
		거푸집(보)_거치	낙하_탈락(상승하던 샤클에 걸림)	추락		M		∙시공계획서, 감독확인서 검토	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		거푸집(슬래브)	붕괴_중량물 하중집중	추락		M			∙시공계획서 작성 시 자재의 적재위치, 방법, 방호 조치에 대한 방안 수립 ∙적재 장소의 여건에 따라 필요시 적정한 구조설계에 준한 적치, 보관 ∙자재의 이동(고정, 양중, 운반 등)에 대한 안전계획 수립	∙시공계획 및 안전계획에 준한 자재 적재, 이동의 감독	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		거푸집(외벽)_해체	-	추락		M			∙시공 전 작업자 안전교육 철저 ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		거푸집(하부 용접부)_타설	비산_용접불량	-		L
		거푸집(호리빔 상부)_타설	붕괴_과하중 적치	추락		M
		거푸집_철근배근	붕괴_외력	추락		H	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계(연결 시 문제 발생이 연계됨)	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙건축공사 표준 시방서 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		거푸집_타설	붕괴_긴결 미흡	추락		M
		거푸집동바리_해체	전도	충돌		M		∙시공계획서, 감독확인서 검토	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙위험작업 반경 내 안전팬스 및 접근차단 조치 시행 ∙설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		벽체_설치	전도	협착		M		∙시공계획서, 감독확인서 검토	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		유로폼	낙하_탈락	충돌		M			∙위험작업 반경 내 안전팬스 및 접근차단 조치 시행	∙위험작업 반경 확보 및 관리 여부 확인	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		유로폼(고소)	붕괴_하중집중(철근다발 적재시)	추락		M			∙시공계획서 작성 시 자재의 적재위치, 방법, 방호 조치에 대한 방안 수립 ∙적재 장소의 여건에 따라 필요시 적정한 구조설계에 준한 적치, 보관 ∙자재의 이동(고정, 양중, 운반 등)에 대한 안전계획 수립	∙시공계획 및 안전계획에 준한 자재 적재, 이동의 감독	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		유로폼_해체	낙하_탈락	충돌		M			∙시공 전 작업자 안전교육 철저 ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	건설기계	타워크레인(마스트)_운반	전도_앵커볼트 파손	추락		M
		타워크레인(마스트)_인양	전도_앵커볼트 파손	충돌		M	∙타워크레인의 지지구조에 대한 상세설계(기초 등) ∙타워크레인의 고정방법(앵커, 기타 기초와 연결하는 적정 연결방법)에 대한 상세설계		∙장비에 대한 정확한 제원의 확보 및 설치관련 기술자료의 확보 ∙상세설계도 및 기술자료에 의한 장비의 설치 및 해체에 대한 내용이 반영된 시공계획서의 작성		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		타워크레인(마스트와 턴테이블)_고정	전도_설치작업순서 미준수	추락		M
		타워크레인(테레스코픽케이지)_분리	낙하_탈락	충돌		M
		타워크레인_설치	전도_Counter Jib 연결에 따른 편하중과 작업하중	협착		H
		타워크레인_해체	전도_수평붐대 파손	추락		H
	기타	석축	붕괴_우수유입 및 공사진동	-		L	∙소규모 공사도 세심한 흙막이 설계(계측 결과를 반영한 3차원 및 시공단계를 반영한 설계)	∙설계자와 시공자의 계획수립 및 제출 여부 확인	∙설계 내용을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙토목공사 표준일반시방서 2005 ∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011
		철골기둥_해체	전도_기초앵커 너트풀림	협착		M	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙시공계획서, 감독확인서 검토	∙가시설의 설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		흙막이가시설(코너 버팀보)_굴착	붕괴_전단철근보강보의 전단 부족	-		L	∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
	낙하물방지망	낙하물방지망(고소)_설치	낙하_탈락(지지용 앵커)	추락		M	∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계		∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙지지용 앵커의 규격, 근입깊이, 수량 등의 표준도, 상세도 적정성 여부 확인 ∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
	동바리	거푸집동바리_타설	붕괴_가새 미설치	추락		L	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
			붕괴_구조안전성 미검토 및 조립도 미작성	매몰		H	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
			붕괴_동바리 조립도 미작성	매몰		H	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8
			붕괴_분산균형 타설 미실시	매몰		H	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8
			붕괴_설치방법 불량	매몰		H	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
			붕괴_설치상태 불량	매몰		M	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트공사 표준시방서 2009
		시스템동바리_거치	붕괴_가새 미설치	충돌		M	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영 - 시공계획 수립 시 반영	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		시스템동바리_타설	붕괴_가새 설치 미흡	매몰		H	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
			붕괴_조립도 작성시 좌굴 미고려	추락		H	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함) ∙거푸집과 비계의 지지구조에 대한 별도의 안전설계	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙설계표준도에 따른 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 필요시 구조검토 ∙시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.)에 따른 시공계획서의 작성 및 준수	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 및 준수 상태 확인.	∙가설공사 표준시방서 2014.8, 콘크리트 표준시방서 2009
	슬래브	조형물_해체	붕괴_양생기간 미준수	협착		M		∙시공계획서, 감독확인서 검토	∙위험작업 반경 내 안전팬스 및 접근차단 조치 시행 ∙가시설의 설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 ∙안전반경 확보 여부 및 안전시설물의 설치 적정성 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
	흑막이	흙막이가시설(벽체)	붕괴_조사심도와 근입심도 차이	-		L
			붕괴_줄파기공 미실시	-		L
		띠장_해체	낙하_탈락	충돌		M		∙시공계획서, 감독확인서 검토	∙위험작업 반경 내 안전팬스 및 접근차단 조치 시행 ∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영 - 시공계획 수립 시 반영	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 ∙안전반경 확보 여부 및 안전시설물의 설치 적정성 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		버팀보_반출	낙하_해체상태 거치	충돌		M		∙시공계획서, 감독확인서 검토	∙위험작업 반경 내 안전팬스 및 접근차단 조치 시행 ∙가시설의 설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영	∙시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보 ∙안전반경 확보 여부 및 안전시설물의 설치 적정성 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙콘크리트 표준시방서 2009
		앵커 및 버팀보	붕괴_앵커/버팀보등 시스템 파괴	-		L
		흙막이가시설(벽체)	붕괴_강성 부족	-		L
			붕괴_과잉굴착	-		L
			붕괴_근입심도 부족	-		L
			붕괴_사면활동	-		L	∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영) ∙흙막이 설계 시 시공단계별 3차원 해석에 의한 설계	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면표준시방서 2011 ∙토목공사 표준 일반 시방서 2005
			붕괴_설계도서 미준수	-		L	∙근접시공과 관련 영향 검토 실시(해석 및 계측)	∙계획수립 여부 확인	∙설계 변경 시 검토 내용 원설계자와 검토 의무화 ∙시공계획서에 근접 시설물 관리사항 포함.	∙설계 검토 사항에 대한 기술지원 감리원의 확인	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙토목공사 표준 일반 시방서 2005
			붕괴_우수유입	-		L	∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영) ∙흙막이 설계 시 시공단계별 3차원 해석에 의한 설계	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙건설공사 비탈면표준시방서 2011 ∙토목공사 표준 일반 시방서 2005
			붕괴_우수유입 및 지하수 침투	-		L	∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
			붕괴_응력집중			L	∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011
			붕괴_지지구조물 설치 미흡	-		L	∙근접시공과 관련 영향 검토 실시(해석 및 계측)	∙계획수립 여부 확인	∙설계 변경 시 검토 내용 원설계자와 검토 의무화 ∙시공계획서에 근접 시설물 관리사항 포함.	∙설계 검토 사항에 대한 기술지원 감리원의 확인	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙토목공사 표준일반시방서 2005
			붕괴_코너버팀대의 포스트 파일 일부 미설치	-		L	∙근접시공과 관련 영향 검토 실시(해석 및 계측)	∙계획수립 여부 확인	∙설계 변경 시 검토 내용 원설계자와 검토 의무화 ∙시공계획서에 근접 시설물 관리사항 포함.	∙설계 검토 사항에 대한 기술지원 감리원의 확인	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙토목공사 표준 일반시방서 2005
		흙막이가시설(시설물 인접)	붕괴_설계보다 큰 토압 작용	-		L
		흙막이가시설(접합부)_설계변경	붕괴_설계 및 시공자료 유실	-		L	∙근접시공과 관련 영향 검토 실시(해석 및 계측)	∙계획수립 여부 확인	∙설계 변경 시 검토 내용 원설계자와 검토 의무화 ∙시공계획서에 근접 시설물 관리사항 포함.	∙설계 검토 사항에 대한 기술지원 감리원의 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8.
강구조물공	건립작업	철골기둥_건립	전도_앵커볼트 파손	추락		M			∙적정 시공 계획의 수립(안전조치 포함)	∙시공 계획서의 검토(안전조치 포함) 및 준수 여부 확인
		철골내민보_설치	낙하_콘크리트 벽체와의 연결부 파손	추락		M	∙기존 구조물에 신설구조물 연결 시 상세 검토 및 시공상세도 작성의 의무화		∙연결 검토 및 시공상세도 내용 확인	∙설계 내용에 대한 기술지원 감리의 검토, 확인
		철골보_설치	전도_버팀대 설치 미흡	추락		M			∙시공 원도급자가 직접 시공계획서 수립 -현행 하도급자가 작성하는 경우가 대부분	∙시공계획서의 작성주체 검토
		철골부재_자재 및 부지정리	전도_전도 예방조치 미흡	협착		H			∙시공 원도급자가 직접 시공계획서 수립 - 현행 하도급자가 작성하는 경우가 대부분	∙시공계획서의 작성주체 검토
	건설기계	이동식크레인_인양	충돌_안전대 부착설비 가격	추락		M			∙시공계획서 작성 시 자재의 적재위치, 방법, 방호 조치에 대한 방안 수립 ∙적재 장소의 여건에 따라 필요시 적정한 구조설계에 준한 적치, 보관 ∙자재의 이동(고정, 양중, 운반 등)에 대한 안전계획 수립	∙시공계획 및 안전계획에 준한 자재 적재, 이동의 감독	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		이동식크레인_자재이동	전도_허용하중 미준수	협착		M	∙중장비 시공 계획에 대한 검토 반영		∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		카고크레인_거치	전도_인양장비 무단변경 시공	추락		M	∙중장비 시공 계획에 대한 검토 반영		∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
	접합	위험물저장탱크_용접 및 그라인딩	-	폭발		H
골조공	건설기계	크레인(고소)_설치	-	충돌		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		타워크레인	전도_돌풍	-		L			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영	∙각 종 건설장비 주변 안전조치 여부 확인	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		타워크레인 케이지(고소)_연결	낙하_케이지의 유압잭 결함	추락		H			∙작업 전 주요공정 관련 사전 안전교육(TBM) ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독 ∙위험 공종, 위험 위치에 적정한 안전시설물 설치	∙안전시설의 위치, 설치 적정성의 확인	∙산업안전보건법 시행령
		타워크레인_인양	충돌_작업공간 협소	-		L			∙장비 작업 계획 수립 및 사전 통지 ∙작업자 장비 작업반경내 접근 금지 등 사전교육 ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독		∙산업안전보건법 시행령
			파손_기계적 결함(러핑 브레이크)	-		L
	목조골조	버팀대_골조	전도_자재불량에 의한 파손	추락		M
	지붕골조	지붕트러스	전도_설계기준 미준수	-		L
	철골조	데크플레이트_설치	낙하_탈락	추락		M
		데크플레이트_타설	낙하_탈락	추락		H
		철골(상부)_이동	-	추락		L			∙작업 전 주요공정 관련 사전 안전교육(TBM) ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독 ∙위험 공종, 위험 위치에 적정한 안전시설물 설치	∙안전시설의 위치, 설치 적정성의 확인	∙산업안전보건법 시행령
굴착공	건립작업	철골부재_자재 및 부지정리	전도_전도 예방조치 미흡	충돌		H
	건설기계	전석_상차	낙석	충돌		M			∙작업 전 주요공정 관련 사전 안전교육(TBM) ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독 ∙위험 공종, 위험 위치에 적정한 안전ㅁ시설물 설치	∙안전시설의 위치, 설치 적정성의 확인	∙산업안전보건법 시행령
		천공기_PRD Pile	전도_작업중 충돌	협착		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		카고크레인 붐_이동	전도_붐 삽입하지 않은 상태로 이동	협착		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		항타기_이동	전도_지반침하	협착		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		흙막이가시설(벽체)	전도_과도한 토압	충돌		M	∙설계 시 굴착면 주변의 지반 상황에 부합하는 검토 및 보강 반영 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영) ∙시공단계별 3차원 해석	∙계획수립 여부 확인	∙설계 내용에 대한 시공 전 설계도서 검토 의무 시행. ∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙산업안전보건법 시행령
	굴착	굴착사면(옹벽저판)_철근배근	붕괴_수직굴착	매몰		H	∙안전 Fence Line 설계 시 반영	∙계획수립 여부 확인	∙시공계획서(안전관리계획서)에 Safe Construction Line 설정 → 안전팬스 계획 ∙낮은 굴착 심도도 안식각을 고려한 굴착 시 영향범위를 설정하고 이를 고려하여 작업자 동선 및 공사장 안전팬스 설치	∙설계에 준한 시공계획서 수립여부의 확인 ∙계획서 수행 여부 확인 및 발주처 보고	∙토목공사 표준일반시방서 2005
		굴착사면_관로연결	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M
			붕괴_흙막이 지보공 미설치	매몰		M
		굴착사면_굴착	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M
			붕괴_흙막이 가시설 미설치	매몰		M
		굴착사면_굴착 및 정지	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M
			붕괴_흙막이 가시설 미설치	매몰		M
		굴착사면_레벨측정	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M	∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공범위의 기본설정(설계서 반영) ∙자연 터파기 대상(공사장 환경 반영)과 흙막이 설치에 대한 검토를 설계보고서에 반드시 반영.	∙계획수립 여부 확인	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙상수도공사 표준시방서 2007
			붕괴_흙막이 지보공 미설치	매몰		M	∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공범위의 기본설정(설계서 반영) ∙자연 터파기 대상(공사장 환경 반영)과 흙막이 설치에 대한 검토를 설계보고서에 반드시 반영.	∙계획수립 여부 확인	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙상수도공사 표준시방서 2007
		굴착사면_이동	붕괴_부착토 미제거	매몰		M
		굴착저면(기초바닥)_정지	붕괴_굴착면 기울기	매몰		M
			붕괴_흙막이 지보공 미설치	매몰		M
		흙막이가시설_보수 및 버럭반출	붕괴_과잉굴착	매몰		H
			붕괴_흙막이가시설 설치시기	매몰		H
	기초공	PHC말뚝_인양	낙하_와이어로프 이탈	충돌		M			∙시공계획서 작성 시 자재의 적재위치, 방법, 방호 조치에 대한 방안 수립 ∙적재 장소의 여건에 따라 필요시 적정한 구조설계에 준한 적치, 보관 ∙자재의 이동(고정, 양중, 운반 등)에 대한 안전계획 수립	∙시공계획 및 안전계획에 준한 자재 적재, 이동의 감독	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	기타	맨홀_인양	낙하_로프 강도 불충분	충돌		M
	옹벽	보강토 옹벽	전도_설계도서 임의변경 시공	-		L	∙근접시공과 관련 영향 검토 실시(해석 및 계측)	∙계획수립 여부 확인	∙설계 변경 시 검토 내용 원설계자와 검토 의무화	∙설계 검토 사항에 대한 기술지원 감리원의 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준일반 시방서 2009
		석축옹벽(하부)	낙석_전석제거 미흡	충돌		M
			붕괴_흙막이 가시설 미설치	매몰		M
		옹벽	전도_배면토사 압력	협착		M
		옹벽(고소)_견출	전도_배면토사 압력	매몰		H	∙표준도를 적용하는 경우에도 적용에 대한 적합성(지반, 배면상태) 확인	∙인허가 현황과 연계하여 표준도 적용성 확인 ∙설계도서 검토 의무 확인 ∙감리원(기술지원 감리)의 설계 적정성 검토 여부 확인	∙시공계획서 수립 시 설계도서 검토 사전 시행	∙기술지원 감리원이 설계적정성 사전 검토 ∙시공사의 설계도서 검토 결과 확인	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙토목공사 일반표준시방서 2009
		옹벽(저수조 인접)	붕괴_저수유입	-		L
		옹벽_굴착	붕괴_굴착면 기울기	매몰		H	∙근접시공과 관련 영향 검토 실시(해석 및 계측)	∙계획수립 여부 확인	∙설계 변경 시 검토 내용 원설계자와 검토 의무화 ∙시공계획서에 근접 시설물 관리사항 포함.	∙설계 검토 사항에 대한 기술지원 감리원의 확인	∙산업안전보건법 시행령 ∙콘크리트 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		임시석축(절개지)	붕괴_우수유입			L	∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공범위의 기본설정(설계서 반영)	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙절취, 굴토된 토사 및 암석의 적치 계획 수립.(시공계획서 반영) ∙사용 자재의 적재 위치 및 적정 적재 수량 계획 수립.(시공계획서 반영) ∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토. ∙설계서 및 시공계획서의 준수 여부 확인.	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준 일반 시방서 2009
	흙막이	굴착사면_철근배근	붕괴_굴착면 기울기	매몰		H	∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
			붕괴_흙막이 지보공 미설치	매몰		H	∙안전팬스 설치 라인 도면(평면도, 황단면도)에 표기 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영)	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계자와 시공자의 계획수립 여부 확인	∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙상수도공사 표준시방서 2007 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		석축	붕괴_우수유입			L	∙근접시공과 관련 영향 검토 실시(해석 및 계측)	∙계획수립 여부 확인	∙설계 변경 시 검토 내용 원설계자와 검토 의무화 ∙시공계획서에 근접 시설물 관리사항 포함.	∙설계 검토 사항에 대한 기술지원 감리원의 확인	∙가설공사 표준시방서 2011
		인접도로 및 보도_천공	침하 및 균열	-		L
		흙막이가시설(버팀대)	붕괴_지반 함수량 증가	-		L	∙충분한 지반조사 결과를 반영한 흙막이 설계 준수 ∙기하학정 비정형 흙막이의 설계는 반드시 3차원 모델링(시공 단계별) 후 설계	∙계획수립 여부 확인	∙설계내용을 반영한 계측 시행 ∙계측관리 기준 - 설계 시 구조검토 결과를 반드시 적용	∙상기 설계, 시공 조건의 준수사항 확인 ∙기술지원 감리원의 확인, 검토 필수	∙가설공사 표준시방서 2014.8, 토목공사 표준 일반 시방서 2005
			붕괴_토사의 자중증가 및 기반암석	-		L	∙충분한 지반조사 결과를 반영한 흙막이 설계 준수 ∙기하학정 비정형 흙막이의 설계는 반드시 3차원 모델링(시공 단계별) 후 설계	∙계획수립 여부 확인	∙설계내용을 반영한 계측 시행 ∙계측관리 기준 - 설계 시 구조검토 결과를 반드시 적용	∙상기 설계, 시공 조건의 준수사항 확인 ∙기술지원 감리원의 확인, 검토 필수	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준 일반 시방서 2005
		흙막이가시설(버팀보)_반출	낙하_해체상태 방치	충돌		M
		흙막이가시설(벽체)	붕괴_설계보다 큰 토압 작용	충돌		M	∙설계 시 굴착면 주변의 지반 상황에 부합하는 검토 및 보강 반영 ∙종방향 시공법위의 기본설정(설계서 반영) ∙시공단계별 3차원 해석	∙계획수립 여부 확인	∙설계 내용에 대한 시공 전 설계도서 검토 의무 시행. ∙길이방향 대상 시설물 굴착/해체 시 일정 길이의 구역(5,10,15m 등)을 설정하여 시공	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011 ∙산업안전보건법 시행령
		흙막이가시설(벽체)_설치	붕괴_지반조건설계조건과 상이	매몰		M
			붕괴_흙막이 지보공 미설치	매몰		M	∙흙막이 설계 시 시공단계별 3차원 해석에 의한 설계	∙계획수립 여부 확인	∙3차원 검토 결과에 의한 계측시행 및 계측관리	∙설계 검토 사항에 대한 기술지원 감리원의 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준일반시방서 2005 ∙건축공사 표준시방서 2013.
		흙막이가시설(벽체)_엄지말뚝 인발	붕괴_해체작업시 적재하중	매몰		M	∙시공단계를 고려한 3차원 흙막이 설계 시방서 제시 ∙설계 도면에 흙막이 해체단계의 구주물과 연계상태를 표시	∙설계자와 시공자의 계획수립 및 제출 여부 확인	∙설계 내용을 반영한 시공계획 및 계측 계획 수립 후 시공.	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙가설공사 표준시방서 2014.8
기타	건설기계	고소작업대 붐 와이어_제거	파손	추락		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		고소작업대 붐_설치	파손	추락		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		고소작업대(받침대 연결부)_설치	낙하_장애물 충돌	추락		M			∙시공 전 작업자 안전교육 철저 ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		고소작업대_연결	전도_고소작업대 설치 미흡	추락		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		고소작업대_인양	전도_지지용 로프 풀림	추락		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		이동식크레인	전도_아웃트리거 받침대 파단	충돌		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		이동식크레인_인양	전도_경사각 미준수	충돌		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		지게차_운반	전도_중량물로 인한 무게중심 높은 상태	협착		M
		카고크레인 붐_하역	전도_턴테이블 파단	충돌		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		카고크레인(작업대)_하역	낙하_탈락	충돌		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
	기타	손수레(슬래브 단부)_운반	낙하_불안전한 중량물 운반	추락		M
		인양러그(용접부위)_인양	파단_목표 용접강도 미확보	추락		M			∙시공계획서 작성 시 자재의 적재위치, 방법, 방호 조치에 대한 방안 수립 ∙자재의 이동(고정, 양중, 운반 등)에 대한 안전계획 수립	∙시공계획 및 안전계획에 준한 자재 적재, 이동의 감독	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		철골(캐노피)_설치	낙하_탈락	추락		M
		칸막이벽_철거	낙하_해체방법 미흡	충돌		M
	보수공	선라이트(고소)	낙하_파손	추락		H
	비계	비계파이프_이동	-	전락		L			∙작업 전 주요공정 관련 사전 안전교육(TBM) ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독		∙산업안전보건법 시행령
		작업발판	-	추락		L			∙작업 전 주요공정 관련 사전 안전교육(TBM) ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독		∙산업안전보건법 시행령
	전기공	천정패널_전기배선	붕괴_작업하중	추락		M
	창호공	창호_설치	전도_창호 위치 조정 미숙	추락		M
	콘크리트	슬래브_타설	붕괴_거푸집 용접 불량	추락		M			∙작업 전 주요공정 관련 사전 안전교육(TBM) ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독		∙산업안전보건법 시행령
	흙막이	흙막이가시설(벽체)	붕괴_과잉굴착	-		L
		흙막이가시설(코너 스트러트)	붕괴_응력집중	-		L	∙소규모 공사도 세심한 흙막이 설계(계측 결과를 반영한 3차원 및 시공단계를 반영한 설계)	∙설계자와 시공자의 계획수립 및 제출 여부 확인	∙설계 내용을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행	∙설계서, 시공계획서의 적합성 검토	∙토목공사 표준일반시방서 2005 ∙건설공사 비탈면 표준시방서 2011
		흙막이가시설(코너 스트러트)_굴착	붕괴_지하수압 증가	-		L	∙충분한 지반조사 결과를 반영한 흙막이 설계 준수 ∙필요 시 3차원 모델링(시공 단계별) 후 설계	∙계획수립 여부 확인	∙설계내용을 반영한 계측 시행 ∙계측관리 기준 - 설계 시 구조검토 결과를 반드시 적용	∙상기 설계, 시공 조건의 준수사항 확인 ∙기술지원 감리원의 확인, 검토 필수	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙토목공사 표준 일반 시방서 2005
			붕괴_지형조건과 설계해석조건 상이
	건설기계	고소작업대	-	추락		L			∙시공 전 작업자 안전교육 철저 ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령
도장공	건설기계	고소작업대_도장	충돌_갑작스런 붐 강하	추락		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		고소작업대_이동	전도_실린더힌지 고정판 파단	추락		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
마감공	리모델링	건물 후면부_리모델링	붕괴_작업하중	매몰		M	∙기존 구조물의 사전검토 시행 - 하중변화, 구조변경 여부의 확인		∙설계 내용 확인, 검토 후 시공계획 수립	∙설계, 시공 내용의 확인
		건물_리모델링	붕괴_구조안전성 미검토	매몰		H
	보수공	건물 외벽_보수	붕괴_작업하중	매몰		M	∙기존 구조물의 사전검토 시행 - 하중변화, 구조변경 여부의 확인		∙설계 내용 확인, 검토 후 시공계획 수립	∙설계, 시공 내용의 확인
전기 및 기계설비공	건설기계	트로리_자재운반	충돌_과적운행	충돌		M
절토공	거푸집	절토사면	붕괴_절취면 기울기	매몰		M	∙임시시설에 대한 시공 단계별 구조검토 시행 - 설치, 철거 등의 시공단계를 고려한 검토		∙시공 단계별 구조검토 자료에 준한 시공계획 수립 및 시공계획서 작성	∙시공계획 준수 여부 확인	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙도로교 표준 시방서 2013 ∙토목공사 표준 일반 시방서 2005
	기타	인접구조물 벽체_굴착	붕괴_과잉굴착	-		M	∙근접시공에 대한 설계 시 사전검토 의무화
	옹벽	석축_굴착	붕괴_과잉굴착	-		M	∙근접시공에 대한 설계 시 사전검토 의무화
	흙막이	흙막이가시설(벽체)_굴착	붕괴_과잉굴착	-		M	∙흙막이 임시시설에 대한 설계 개선 - 현행 2차원 해석→ 시공단계를 반영한 3차원 검토		∙시공계획 시 설계내용 반영	∙설계 및 시공계획서의 적정성 확인, 검토
철거공	기타	PSC빔_거치	낙하_인양로프 해체방법 미흡	추락		M			∙시공계획서 작성 시 부재의 이동 운반 방법, 시공 중 방호 조치에 대한 방안 수립 ∙작업 장소의 여건에 따라 필요시 적정한 구조설계에 준한 적치, 보관 ∙자재의 이동(고정, 양중, 운반 등)에 대한 안전계획 수립	∙시공계획 및 안전계획에 준한 자재 적재, 이동, 작업 중 고정작업 등의 감독	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		건물_철거	붕괴_작업하중	매몰		M
		담장_철거	전도_작업하중	협착		M
	슬래브	슬래브_철거	붕괴_작업하중	매몰		M
콘크리트공	거푸집	ACS폼(고소)_인상	낙하_근입심도 부족(Anchor볼트)	추락		M	∙고정앵커에 대한 설계를 반드시 반영		∙설계서에 명기된 앵커 규격 및 시방의 준수 ∙앵커관리 규정 시공계획서에 반영	∙설계 및 시공계획서에 준한 앵커 시공, 규격의 적정성 확인	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		거푸집(고소)_설치	붕괴_거푸집 지지대 위로 인양	추락		M
		거푸집(고소)_자재인양	붕괴_중량물 하중 집중	추락		M
		거푸집_형틀	전도_버팀목 및 지지물 설치 미흡	매몰		M	∙거푸집에 대한 표준 설계도 작성(구조검토 포함) → 동바리 설치 및 지지시스템 설계 시 구조검토 필수		∙거푸집에 대한 동바리 설치 시 정확한 간격 및 변위방지 고정장치 확인		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	건설기계	굴삭기(사면)	전락_유도자 미배치	협착		M			∙제원, 작업반경, 개조의 여부 등 안전성이 확보된 장비의 반입 ∙장비운용 계획(지지방법, 안전팬스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영		∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙기타 장비관련 공인 기술자료
		백호 버켓_정리	-	충돌		M
		펌프카 붐_인양 및 상승	낙하_지지부재 이탈(C.P.B 마스트)	충돌		M			∙시공계획서 작성 시 자재의 적재위치, 이동 및 적재의 방법, 방호 조치에 대한 방안 수립 ∙자재의 이동(고정, 양중, 운반 등)에 대한 안전계획 수립	∙시공계획 및 안전계획에 준한 자재 적재, 이동의 감독	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		펌프카 붐_타설	낙하_붐 연결핀 파단	충돌		M
			낙하_붐 연결핀 파단	충돌		L					∙콘크리트공사 표준시방서 2009, ∙산업안전 보건기본법 시행령
		펌프카_타설	비래_건설기계 작업순서 미흡	충돌		M
			전도_지반침하	충돌		M	∙급사면, 고저차가 큰 부위에 대한 설계 시 중장비 운용에 대한 검토(설계서, 별도 보고서 등에 반영)		∙시공계획서에 장비 운용에 대한 계획 반영		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	동바리	시스템동바리(고소)_타설	붕괴_타설하중 집중	추락		M
			붕괴_상재하중	추락		M	∙현행 : 시스템 동바리 설계시 국부적인 단순 해석으로 전체 구조계 및 하중이 미반영 → 실제 3차원 해석 시공단계를 고려하여 별도의 동바리 설계		∙설계서에 준한 시공계획 및 시공		∙콘크리트공사 표준시방서 2009, ∙가설공사 표준시방서 2014.8
			붕괴_구조안정성 미검토
	비계	비계(고소)_자재이동	붕괴_구조기준 미준수	추락		M	∙고소위치에서 거푸집 해체에 대한 표준 시공 순서도 설계 반영			∙시공계획서의 적정성 확인 ∙설계 및 시공계획서의 준수 여부 확인	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
	슬래브	데크플레이트_타설	붕괴_집중하중	매몰		M
		슬래브(고소)_타설	붕괴_설계도서 미준수	추락		M
		슬래브(고소)_평탄	붕괴_철골빔 앵커 이탈	추락		M
		슬래브_정리	붕괴_구조안전성 미검토 및 조립도 미작성	매몰		M	∙고소위치에서 거푸집 해체에 대한 표준 시공 순서도 설계 반영		∙동바리 설치 시 정확한 간격 및 변위방지 고정장치 확인		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
			붕괴_타설 작업방법 및 순서 미준수
		슬래브_타설	붕괴_부적정한 이음방법	매몰		M	∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체를 고려한 표준도 작성(구조계산 포함)		∙재사용 자재 사용시는 간격과 정밀도에 대한 충분한 검토 후 시공	∙거푸집, 동바리 자재 검수 시 결함, 불량 자재 확인 철저	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
			붕괴_철골보 접합부 불량	매몰		L
		캔틸래버 슬래브_평탄	붕괴_철골빔 앵커볼트 빠짐	추락		M	∙고정앵커에 대한 설계를 반드시 반영		∙설계서에 명기된 앵커 규격 및 시방의 준수 ∙앵커관리 규정 시공계획서에 반영	∙설계 및 시공계획서에 준한 앵커 시공, 규격의 적정성 확인	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙강구조공사 표준시방서 2012
	철근공	수직철근_설치	전도_작업자 하중	추락		M			∙시공 전 작업자 안전교육 철저 ∙위치별, 공종별 주요 안전장구의 착용철저 지시, 감독	∙안전교육 실시 여부의 확인 ∙보호장구의 지급, 착용여부에 대한 일지 등에 대한 검토.	∙산업안전보건법 시행령 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		거푸집(고소)_철근적재	붕괴_지지대 미설치	추락		M
			붕괴_철근 과적재
		벽체_철근배근	붕괴_철근배근 시 자중 및 기타하중	매몰		M			∙시공상세도 작성 후 Shop Dwg에 따른 시공	∙시공상세도 작성 여부 확인	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		슬래브(고소)	붕괴_중량물 하중집중	추락		M	∙중요 또는 위험부 시공 시 가설물에 대한 정확한 설계(필요시 3차원 해석 포함)		∙설계서에 준한 시공계획 및 시공		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
			붕괴_철근 과적재	추락		M	∙중요 또는 위험부 시공 시 가설물에 대한 정확한 설계(필요시 3차원 해석 포함)		∙설계서에 준한 시공계획 및 시공		∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
		옹벽_철근조립	전도_비틀림 방지장치 미설치	-		L	∙시공 위험부위의 설계 시 연계 가설구조물의 정확한 구조설계 및 검토		∙시공상세도 작성 후 Shop Dwg에 따른 시공	∙시공상세도 작성 여부 확인	∙콘크리트공사 표준시방서 2009 ∙가설공사 표준시방서 2014.8
해체 및 철거공	철거공	슬래브(고소)_물뿌리기	붕괴_구조 및 주변상황	추락		M	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성 ∙해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려)	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙도로교 표준 시방서 2013 ∙토목공사 표준일반 시방서 2005
		슬래브_철거	붕괴_작업하중	매몰		M	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성 ∙해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려)	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영 - 시공계획 수립 시 반영	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙도로교 표준 시방서 2013 ∙토목공사 표준일반 시방서 2005
		조적벽체(상부)_해체	붕괴_해체방법 및 순서 불량	매몰		M	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성 ∙해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려)	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영 - 시공계획 수립 시 반영	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙도로교 표준 시방서 2013 ∙토목공사 표준일반 시방서 2005
		조적벽체(하부)_철거	붕괴_구조 및 주변상황	매몰		L	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성 ∙해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려)	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙도로교 표준 시방서 2013 ∙토목공사 표준일반 시방서 2005
	해체공	선라이트	낙하_파손	추락		M
		슬래브_해체	붕괴_철거 잔재물 적치	매몰		M	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성 ∙해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려)	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영 ∙시공계획 수립 시 반영	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙도로교 표준 시방서 2013 ∙토목공사 표준일반 시방서 2005
		슬레이트(고소)_해체	파손_작업하중	추락		H
		조적벽체_해체	낙하_해체계획 미수립	매몰		M	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성 ∙해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려)	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙구조물별(공종별) 임시시설(비계, 거푸집, 동바리, 시스템동바리)의 설치 및 해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립시 반영 - 시공계획 수립 시 반영	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙도로교 표준 시방서 2013 ∙토목공사 표준일반 시방서 2005
			붕괴_작업순서 미흡
		조적벽체_해체	전도_해체작업방법 불량	매몰		M
		철골기둥_철거	낙하_구조조립상태 불량	충돌		M	∙구조물별(공종별) 표준 도면(가시설도) 작성 ∙해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려)	∙시공계획서, 감독확인서 검토 ∙설계 내용 반영 여부 확인	∙시공상세도 작성(구조검토서 포함) ∙설치,해체 순서도 작성 - 표준도면을 참조하여 전체 시공 순서 및 상세도(As Built Dwg.) 작성(구조계산서 포함) - 시공계획 수립 시 반영	∙설계 표준도와 시공 순서 및 상세도의 적합성 검토‧ 확인 ∙시공계획서 확보	∙가설공사 표준시방서 2014.8 ∙도로교 표준 시방서 2013 ∙토목공사 표준일반 시방서 2005

부록Ⅳ: 건설공사 안전관리 지침

국토교통부 고시 제2014-302호

제1장 일반 사항

제1조(목적) 이 지침은 ｢건설기술 진흥법｣ 제62조 및 같은 법 시행령 제100조, 제101조 및 같은 법 시행규칙 제59조, 제60조에 따른 건설공사 안전점검 실시 및 종합보고서 작성․관리에 대한 사항, 안전점검 비용, 안전관리비 계상 및 사용기준에 관한 사항을 정하여 적정한 안전점검을 통해 건설공사의 품질 및 안전 확보에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) 이 지침은 ｢건설기술 진흥법｣ (이하 “법”이라 한다)  제62조 및 같은 법 시행령(이하 “영”이라 한다) 제98조, 같은 법 시행규칙(이하 “규칙”이라 한다) 제60조에 따른 안전관리계획 수립대상 및 안전관리비의 계상 건설공사에 적용한다.

제3조(정의) 이 지침에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “건설공사”란 ｢건설산업기본법｣ 제2조4호에 따른 토목공사․건축공사․산업설비공사․조경공사 및 환경시설공사 등 시설물을 설치․유지․보수하는 공사(시설물을 설치하기 위한 부지조성공사를 포함한다)와 기계설비 등 구조물을 설치 또는 해체하는 공사 등을 말한다.

2. “발주자”란 건설공사를 건설업자에게 도급하는 자를 말한다.

3. “발주청”이란 건설공사 또는 건설기술용역을 발주하는 국가, 지방자치단체, 국가 또는 지방자치단체가 납입자본금의 2분의 1 이상을 출자한 기업체의 장, 그 밖에 영 제3조에서 정하는 기관의 장을 말한다.

4. “시공자”란 ｢건설산업기본법｣ 제2조제7호 또는 ｢주택법｣ 제9조에 따라 면허를 받거나 등록을 하고 건설업 또는 주택건설업을 영위하는 건설업자 또는 주택건설등록업자를 말한다.

5. “건설안전점검기관”이란 ｢시설물의 안전관리에 관한 특별법｣(이하 “｢시특법｣”이라 한다) 제9조에 따라 등록된 안전진단 전문기관과 한국시설안전공단(이하 “공단”이라 한다.)을 말한다.

6. “안전관리계획서”란 법 제62조부터 제65조에 따라 수립하는 건설공사 안전관리계획을 말한다.

7. “안전관리”란 건설공사의 안전을 확보하기 위하여 건설공사의 착공부터 준공까지 공사현장에서 건설기술 진흥법령에 따라 실시하는 계획적이고 체계적인 제반활동을 말한다.

8. “안전점검”이란 영 제100조제1항과 각 호에 따라 시공자가 실시하는 자체 안전점검, 정기 및 정밀 안전점검 등을 말한다.

9. “자체안전점검”이란 영 제100조제1항에 따라 시공자가 건설공사 기간 동안 건설공사의 안전을 위하여 매일 실시하는 안전점검을 말한다.

10. “정기안전점검”이란 영 제100조제1항제1호에 따라 이 지침 별표2의 건설공사별 정기안전점검 실시시기에 발주자의 승인을 얻어 건설안전점검기관에 의뢰하여 실시하는 안전점검을 말한다.

11. “정밀안전점검”이란 영 제100조제1항제2호에 따라 정기안전점검 결과 시설공사 및 가설공사에 물리적․기능적 결함 등이 있을 경우 보수․보강 등의 필요한 조치를 취하기 위하여 건설안전점검기관에 의뢰하여 실시하는 안전점검을 말한다.

12. “초기점검”이란 영 제98조제1항에 해당하는 건설공사에 대하여는 해당 건설공사를 준공 (임시사용을 포함한다)하기 직전에 실시하는 정기안전점검 수준 이상의 안전점검을 말한다.

13. “초기치”란 초기점검시 구하는 향후 점검․진단에 필요한 구조물에 대한 안전성평가의 기준이 되는 값을 말한다.

14. “공사재개 전 안전점검”이란 영 제100조제1항제4호에 따라 건설공사를 시행하는 도중 공사의 중단으로 1년 이상 방치된 시설물이 있는 경우 그 공사를 재개하기 전에 그 시설물에 대하여 실시하는 안전점검을 말한다.

15. “보수”란 구조물에 작용한 위해요인에 따라 발생된 내구성, 방수성 등 내력이외의 기능상 결함을 치유하여 기능을 회복시키는 것을 말한다.

16. “보강”이란 설계하중 이상의 하중 등 위해요인에 따라 손상된 구조물의 내력을 증진시키는 것을 말한다.

17. “종합보고서”란 영 제100조제1항 각 호에 따라 실시한 안전점검의 내용 및 그 조치사항을 작성한 보고서를 말한다.

18. “시스템”이란 ｢시특법｣ 제2조제2호 및 제3호에 따른 1종 시설물 및 2종 시설물에 관한 시설물의 기본현황, 상세제원, 안전점검 및 정밀안전진단 이력, 보수․보강이력 등의 정보를 입력하여 관리하기 위하여 공단이 운영하는 전산시스템(http://www.fms.or.kr)을 말한다.

19. “대가”란 건설공사 안전점검 업무를 수행하는 데 필요한 비용을 말한다.

20. “공사비요율에 의한 방식”이란 점검대상물의 순공사비에 일정 요율을 곱하여 산출한 금액에 추가조사에 필요한 금액과 부가가치세를 합산하여 대가를 산출하는 방식을 말한다.

21. “순공사비”란 전체 공사비에서 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료, 부가가치세를 제외한 공사비를 말하며, 지급자재비는 순공사비에 포함한다.

22. "건설공사 안전관리비"(이하 “안전관리비”라 한다)란 법 제63조제1항에 따라 건설공사의 발주자가 건설공사 계약을 체결할 때에 공사금액에 계상하여야 하는 건설공사의 안전관리에 필요한 비용을 말하며, 규칙 제60조제1항 각 호의 항목으로 구성된다.

23. "작성 비용"이란 규칙 제60조제1항제1호에 따라 안전관리계획을 수립하여야 하는 건설공사의 안전관리계획 작성에 필요한 비용을 말한다.

24. "검토 비용"이란 규칙 제60조제1항제1호에 따라 건설공사의 안전관리계획을 건설안전점검기관에 의뢰하여 검토하는데 필요한 비용을 말한다.

제2장 건설공사 안전점검

제4조(안전점검의 종류 및 절차) ① 시공자는 공사 목적물 및 주변의 안전을 확보하기 위하여 다음 각 호의 안전점검을 실시하여야 한다.

1. 자체안전점검

2. 정기안전점검

3. 정밀안전점검

4. 초기점검

5. 공사재개 전 안전점검

② 영 제100조제3항에 따라 시공자가 정기안전점검 또는 정밀안전점검 등의 실시를 건설안전점검기관에 의뢰하고자 하는 때에는 발주자(발주자가 발주청이 아닌 경우에는 해당 건설공사를 허가·인가·승인 등을 행한 행정기관의 장을 말한다)에게 통보하고 확인을 받아야 한다.

③ 제2항에 따라 통보받은 발주자는 별표1에 따라 건설안전점검기관의 적정성 여부를 확인하고, 필요시 건설안전점검기관의 교체를 요구할 수 있다.

제5조(설계도서 등의 보관) 시공자는 안전점검에 활용할 수 있도록 다음 각 호의 자료를 정리․보관하여야 한다.

1. 설계도서 : 설계도면, 내역서, 공사시방서, 구조계산서, 지질조사서, 수리․수문계산서

2. 시공관련도서 : 계측보고서, 시공계획서, 시공상세도, 안전관리계획서, 공사기록, 공사일지, 설계변경 관련서류, 각종 안전점검보고서, 보수․보강 실시보고서, 사고관련 기록 등

3. 사진 : 주요 공사사진, 인근구조물 현황사진, 비디오테이프

4. 품질관리기록 : 품질관리계획서에 의한 품질시험기록, 부적합 보고서 등

제6조(안전점검의 계획수립) ① 시공자는 규칙 별표7에 따른 “건설공사 안전관리계획 작성기준”에 따라 자체안전점검 및 정기안전점검 계획을 수립한다.

② 정기안전점검 및 정밀안전점검 계획을 수립하는 경우에는 안전점검을 효과적이고 안전하게 수행하기 위해서 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 이미 발생된 결함의 확인을 위한 기존 점검자료의 검토

2. 점검 수행에 필요한 인원, 장비 및 기기의 결정

3. 작업시간

4. 현장기록 양식

5. 비파괴 시험을 포함한 각종시험의 실시목록

6. 붕괴우려 등 특별한 주의를 필요로 하는 부재의 조치사항

7. 수중조사 등 그 밖의 특기사항

제7조(안전점검의 실시시기) ① 시공자는 자체안전점검 및 정기안전점검의 실시시기 및 횟수를 다음 각 호의 기준에 따라 안전점검계획에 반영하고 그에 따라 안전점검을 실시하여야 한다.

1. 자체안전점검 : 건설공사의 공사기간동안 매일 공종별 실시

2. 정기안전점검 : 별표2의 정기안전점검 실시시기를 기준으로 실시. 다만, 발주자는 안전관리계획의 내용을 검토할 때 건설공사의 규모, 기간, 현장여건에 따라 점검시기 및 횟수를 조정할 수 있다.

② 정밀안전점검은 정기안전점검결과 건설공사의 물리적ㆍ기능적 결함 등이 발견되어 보수ㆍ 보강 등의 조치를 취하기 위하여 필요한 경우에 실시한다.

③ 초기점검은 영 제98조제1항제1호에 따른 건설공사를 준공하기 전에 실시한다.

④ 공사재개 전 안전점검은 영 제98조제1항에 따른 건설공사를 시행하는 도중 그 공사의 중단으로 1년 이상 방치된 시설물이 있는 경우 그 공사를 재개하기 전에 실시한다.

제8조(자체안전점검의 실시) ① 안전관리담당자와 수급인 및 하수급인으로 구성된 협의체는 건설공사의 공사기간 동안 해당 공사 안전총괄책임자의 총괄하에 분야별 안전관리책임자의 지휘에 따라  해당 공종의 시공상태를 점검하고 안전성 여부를 확인하기 위하여 해당 건설공사 안전관리계획의 자체안전점검표에 따라 자체안전점검을 실시하여야 한다.

② 점검자는 점검시 해당 공종의 전반적인 시공 상태를 관찰하여 사고 및 위험의 가능성을 조사하고, 지적사항을 안전점검일지에 기록하며, 지적사항에 대한 조치 결과를 다음날 자체안전점검에서 확인해야 한다.

제9조(정기안전점검의 실시) ① 시공자가 정기안전점검을 실시하고자 할 때는 영 제100조제3항에 따라 발주자(발주자가 발주청이 아닌 경우에는 해당 건설공사를 허가ㆍ인가ㆍ승인 등을 행한 행정기관의 장을 말한다)의 확인을 받아 건설안전점검기관에 의뢰하여야 한다.

② 정기안전점검은 해당 건설공사를 발주ㆍ설계ㆍ시공 또는 감리하는 자와 그 계열회사(｢독점규제 및 공정거래에 관한 법률｣ 제2조제3호에 따른 계열회사를 말한다)인 건설안전점검기관에 의뢰하여서는 아니된다. 다만, 발주청이 ｢시특법｣ 제9조에 따라 안전진단전문기관으로 등록된 경우에는 정기안전점검을 실시할 수 있다.

③ 정기안전점검 대상 건설공사가 ｢산업안전보건법 시행규칙｣제120조제2항에 따른 유해․위험방지계획서 작성대상인 경우에는 시공자는 정기안전점검 실시시기를 사전에 한국산업안전보건공단에 통보하여 정기안전점검과 동시에 실시할 수 있다.

④ 정기안전점검을 실시하는 경우 다음 각 호의 사항을 점검하여야 한다.

1. 공사 목적물의 안전시공을 위한 임시시설 및 가설공법의 안전성

2. 공사목적물의 품질, 시공상태 등의 적정성

3. 인접건축물 또는 구조물 등 공사장주변 안전조치의 적정성

4. 이전 점검에서 지적된 사항에 대한 조치사항

⑤ 건설공사의 공종별 세부점검사항은 해당 공사시방서 및 관련시방서를 참조하여 현장의 상황 및 시공조건에 따라 점검목적을 달성할 수 있는 사항으로 정하고 정해진 점검항목으로 세부 안전점검표를 작성한다.

⑥ 안전점검을 실시한 건설안전점검기관은 안전점검실시결과를 발주자, 해당 건설공사의 허가ㆍ인가ㆍ승인 등을 한 행정기관의 장(발주자가 발주청이 아닌 경우에 한정한다), 시공자에게 통보하여야 하며, 점검결과를 통보 받은 발주자 또는 행정기관의 장은 시공자에게 보수ㆍ보강 등 필요한 조치를 요청할 수 있다.

제10조(정밀안전점검의 실시) ① 시공자는 정기안전점검 결과 건설공사의 물리적ㆍ기능적 결함 등이 있는 경우에는 보수․보강 등의 필요한 조치를 취하기 위하여 건설안전점검기관에 의뢰하여 정밀안전점검을 실시하여야 한다.

② 정밀안전점검은 정기안전점검에서 지적된 점검대상물에 대한 문제점을 파악할 수 있도록 수행되어야 하며, 육안검사 결과는 도면에 기록하고, 부재에 대한 조사결과를 분석하고 상태평가를 하며, 구조물 및 가설물의 안전성 평가를 위해 구조계산 또는 내하력 시험을 실시하여야 한다.

③ 점검과정에서 필요한 경우에는 구조물의 종류에 따라 점검대상물 하부 점검용 장비, 비계, 작업선과 같은 특수장비 및 잠수부와 같은 특수기술자를 활용하여야 한다.

④ 정밀안전점검 완료 보고서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 물리적․기능적 결함 현황

2. 결함원인 분석

3. 구조안전성 분석결과

4. 보수․보강 또는 재시공 등 조치대책

제11조(초기점검의 실시) ① 시공자는 영 제98조제1항제1호에 따른 건설공사를 준공(임시사용을 포함한다)하기 전에 문제점 발생부위 및 붕괴유발부재 또는 문제점 발생 가능성이 높은 부위 등의 중점유지관리사항을 파악하고 향후 점검․진단시 구조물에 대한 안전성평가의 기준이 되는 초기치를 확보하기 위하여 정기안전점검 수준 이상의 초기점검을 실시하여야 한다.

② 초기점검에는 별표3에 따른 기본조사 이외에 공사목적물의 외관을 자세히 조사하는 구조물 전체에 대한 외관조사망도 작성과 초기치를 구하기 위하여 필요한 별표3의 추가조사 항목이 포함되어야 한다.

③ 초기점검은 준공 전에 완료되어야 한다. 다만, 준공 전에 점검을 완료하기 곤란한 공사의 경우에는 발주자의 승인을 얻어 준공 후 3개월 이내에 실시할 수 있다.

제12조(공사재개 전 안전점검의 실시) ① 시공자는 건설공사의 중단으로 1년 이상 방치된 시설물의 공사를 재개하는 경우 건설공사를 재개하기 전에 영 100조제1항제4호에 따라 해당 시설물에 대한 안전점검을 실시하여야 한다.

② 제1항에 따른 안전점검은 정기안전점검의 수준으로 실시하여야 하며, 점검결과에 따라 적절한 조치를 취한 후 공사를 재개하여야 한다.

제13조(안전점검에서의 현장조사 및 실내분석) ① 현장조사는 다음 각 호와 같이 육안검사, 기본조사, 추가조사로 구분하며, 해당 조사항목 및 시험 세부사항은 별표3과 같다.

1. 육안검사 : 구조물의 균열, 재료분리 여부, 콜드조인트 등의 발생여부를 육안으로 면밀히 확인하는 것

2. 기본조사 : 비파괴시험장비로 실시하는 콘크리트 강도시험 및  철근배근 탐사 등

3. 추가조사 : 구조안전성 평가 및 보수․보강 판단에 필요한 지질․지반조사, 강재조사, 지하공동탐사, 콘크리트 제체시추조사, 수중조사, 콘크리트 물성시험 등

② 안전점검을 실시하는 자는 다음 각 호에 따라 현장조사를 실시하여야 한다.

1. 정기안전점검 시에는 육안검사, 기본조사를 실시하고 필요할 경우 추가조사를 수행한다.

2. 정밀안전점검 및 초기점검 시에는 육안검사, 기본조사를 수행하며, 추가조사항목은 시공자가 건설안전점검기관과 협의하여 정하도록 한다. 다만, 초기점검 시에는 향후의 유지관리 및 점검․진단에 필요한 구조물 전체에 대한 외관 조사망도 작성 및 교량의 실응답, 터널의 배면공동상태, 댐의 기준점 및 변위측량, 건축물의 주요외부기둥의 기울기 및 주요바닥부재의 처짐 등의 초기치를 얻기 위한 추가조사를 실시하여야 한다.

③ 안전점검을 실시하는 자는 다음 각 호에 따라 실내분석을 실시하여야 한다.

1. 정기안전점검 시에는 육안검사 자료를 도면으로 작성하고, 기본조사 자료를 평가한다.

2. 정밀안전점검 시에는 육안검사, 기본조사 및 추가조사 실시결과를 분석하고 필요한 구조계산을 실시한 후 보수ㆍ보강방안을 제시한다.

제14조(안전점검 장비) ① 안전점검을 실시하고자 할 때에는 다음 각 호의 기준에 따라 장비를 선정하여 사용하여야 한다.

1. 자체안전점검 : 육안조사를 기본으로 하고 자체안전점검표의 점검항목에 따라 필요한 장비를 사용하여 점검

2. 정기안전점검 : 슈미트해머 등 콘크리트 강도조사장비, 철근탐사기 등 기본조사에 필요한 장비를 사용하여 점검

3. 정밀안전점검 : 기본조사 및 추가조사항목에 필요한 장비를 사용하여 점검

4. 초기점검 : 정기안전점검에 필요한 기본장비 및 초기치를 얻기 위한 추가조사항목에 필요한 장비

② 안전점검 책임기술자는 안전점검시 구조부재에 접근할 필요가 있을 경우, 안전하게 점검작업을 실시할 수 있도록 사전에 현장조사를 하여 구조물의 형상이나 주위환경 등을 고려한 고소차 등 적합한 점검용 장비를 선정하여야 한다.

제15조(안전점검시의 안전관리) ① 안전점검 책임기술자는 점검 기구와 장비를 적절히 운용하고 안전관리 위한 계획을 수립하여야 한다.

② 안전점검 책임기술자 및 참여기술자는 안전모, 작업복, 작업화, 필요한 경우 청각, 시각 및 안면보호장비 등을 포함한 개인용 보호장구를 항상 착용하여야 하며 장구 및 기계를 항상 최적의 상태로 정비하여야 한다.

③ 밀폐된 공간에서 점검할 경우에는 유해물질 및 가스와 산소결핍 등에 대한 조사를 하고 그에 대한 대책을 사전에 마련하여야 한다.

제16조(중대한 결함에 대한 조치) 안전점검을 실시하는 자는 현장에서의 안전점검 기간 동안 중대한 결함이 발견된 경우에는 즉시 발주자 및 안전총괄책임자에게 통보하여야 하며, 발주자 및 안전총괄책임자는 다음 각 호와 같은 조치를 취하여야 한다.

1. 발견된 결함에 대한 신속한 평가 및 응급조치

2. 필요시 정밀안전점검 실시

3. 그 밖에 필요한 사항

제17조(안전점검 보고서의 작성 및 제출) ① 정기안전점검 및 정밀안전점검 보고서에는 점검대상물의 결함에 대한 설명과 결함부위의 개략도, 결함부위사진, 기본조사 결과, 추가조사 결과가 포함되어야 한다.

② 제1항에 따른 개략도와 결함부위사진은 구조물 결함의 위치와 특성을 설명하는 보충 수단으로서 결함의 형태와 치수가 명확히 표기되어야 하며, 보고서에 포함된 모든 자료에는 근거가 명확하도록 점검일시와 현장시험 및 실내분석 기록과 결과자료가 첨부되어야 한다.

③ 시공자가 건설공사를 준공한 때에는 영 제100조제1항 각 호에 따라 실시한 안전점검의 주요내용에 대한 요약 및 보수․보강 등 조치사항, 조치사항의 이행여부 및 이행 적정성 등을 작성한 종합보고서를 발주자에게 제출하여야 한다

④ 정기안전점검 보고서, 정밀안전점검 보고서 별표4에 따른 목차를 참조하여 작성하여야 한다.

제18조(안전점검의 결과분석 및 평가) ① 자체안전점검은 해당 건설공사의 안전관리계획에 포함된 자체안전점검 안전점검표에 따라 평가하며, 점검결과 지적사항이 있을 경우 별지 제1호 서식에 기록하여 조치토록하고 다음날 점검시 조치사항을 확인한다.

② 정기안전점검은 공사목적물에 대한 육안검사 및 기본조사 자료에 따라 평가하며, 책임기술자는 육안검사 및 기본조사로부터 발견된 데이터를 근거로 결함의 범위 및 정도를 기록하고 점검대상물의 안전, 시공상태 등을 평가하여 차후 정기 및 정밀안전점검의 기초자료로서 활용 할 수 있도록 한다.

③ 정밀안전점검시에는 정기안전점검을 통하여 나타난 결함의 범위 및 정도에 따라 정밀한 육안조사와 기본조사 및 필요한 추가조사를 실시하고 구조해석 등을 하여 구조안전성을 평가하며, 평가결과에 따라 구조물의 물리적․기능적 결함에 대한 보수ㆍ보강이나 재시공과 같은 대책을 제시하여야 한다.

④ 제3항에 따른 구조안전성 평가를 하는 경우는 부재별 상태평가, 재료시험결과 및 각종 계측, 측정, 조사 및 재하시험 등을 통하여 얻은 결과를 분석하고 이를 바탕으로 구조적 특성에 따른 이론적 계산과 해석을 통하여 구조물의 안전성과 부재의 내하력 등을 평가한다.

⑤ 초기점검시에는 준공 후 시설물의 사용기간 동안 지속적으로 실시되는 유지관리활동 및 점검ㆍ진단의 기초자료를 얻기 위하여 상세한 육안점검에 의해 구조물 전체에 대한 외관조사망도를 작성하고 향후의 점검․진단시 안전성평가의 기준이 되는 초기치를 측정하여야 한다. 이 경우 건설안전점검기관은 육안검사와 현장조사 결과에 따라 붕괴유발부재와 향후 문제점이 발생하기 쉬운 부위를 파악하여 시설물의 유지관리담당자가 효율적인 유지관리를 할 수 있는 방안을 제시하여야 한다.

⑥ 공사재개 전 안전점검시에는 시공된 부분에 대해 상세한 육안검사 및 기본조사를 실시하여 공사계속 여부를 판정하여야 하며 문제점이 있을 경우 건설안전점검기관은 대책을 제시하여야 한다.

제19조(사후조치 및 보수·보강) ① 시공자는 자체안전점검 실시결과를 작성하고 지적사항에 대한 조치사항을 기록하여야 한다.

② 시공자는 정기․정밀 안전점검을 실시하여 지적된 사항을 별지 제1호 서식에 따라 작성하여 조치사항을 기록하고 발주자(감리 또는 감독)의 확인을 받아야 한다.

③ 점검결과에 의한 보수․보강 방법 및 수준은 구조물의 결함정도, 구조물의 중요도, 사용환경조건 및 경제성 등에 따라 정하여야 하며, 보수․보강이 불가능할 경우에는 재시공을 하여야 한다.

④ 보수작업시에는 균열의 원인, 보수의 범위 및 규모, 환경조건, 경제성 등을 고려하여야 하며, 보강작업은 구조안전성 평가 결과와 내력저하 정도, 경제성을 검토하여 실시하도록 하며 보강을 하여도 구조물의 안전성 확보가 곤란하다고 판단되는 경우에는 재시공한다.

제20조(보수·보강의 필요성 판단) 보수․보강의 필요성은 균열 등 발생된 결함의 허용기준과 내구성, 방수성, 내력저하 정도에 대한 분석과 구조해석 결과에 따라 각종 관련시방서, 설계 지침 및 기준 등을 참조하여 책임기술자가 판단하여야 한다.

제3장 안전점검 종합보고서 작성 세부기준 등

제21조(종합보고서의 작성 및 제출) ① 건설업자 또는 주택등록건설업자는 건설공사를 준공한 때에는 별표5에 따른 목차를 참조하여 작성한 종합보고서를 발주자에게 제출하여야 한다.

② ｢시특법｣에 따른 1종 시설물 및 2종 시설물에 관한 건설공사의 발주자(발주자가 발주청이 아닌 경우에는 해당 건설공사를 허가․인가․승인 등을 행한 행정기관의 장을 말한다.)는 해당 건설공사의 준공 후 3개월 이내에 종합보고서를 공단에 제출하여야 한다.

③ 발주자(｢시특법｣에 따른 1종 시설물 및 2종 시설물에 관한 건설공사의 발주자는 제외한다)는 필요시 공단으로 하여금 종합보고서를 보존 및 관리하게 할 수 있다.

제22조(제출방법) ① 발주자 또는 시공자는 종합보고서를 콤팩트디스크(이하 “CD”라 한다)로 제작하여 제출하여야 한다. 다만 ｢시특법｣ 에 따른 1종 시설물 및 2종 시설물에 관한 건설공사의 발주자는 안전점검종합보고서를 시스템을 통해 온라인으로 제출할 수 있다.

② 제1항에 따라 시스템을 통해 종합보고서를 제출하는 경우 시스템 상의 온라인 제출 방법 및 절차에 따른다.

제23조(CD 제작 매체) ① 제22조에 따라 종합보고서를 기록·제출하는 CD는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.

1. CD의 종류 : 이미지 데이터 기록이 가능한 CD

2. CD의 규격 : 직경 12센티미터, CD-ROM, 650메가바이트 이상 및 74분 이상

② CD 수록 형식은 MS-Windows 환경에서 지원이 가능하여야 하며 싱글 세션으로 제작하되, CD의 파일명 및 폴더명이 식별 가능한 문자체계를 유지하도록 제작되어야 한다.

제24조(문서 형식) 종합보고서의 문서부분은 이미지 데이터 형식으로 국제전신전화 자문위원회(CCITT) Group 4에 따른 TIFF 표준 형식으로 제작하여야 한다. 다만, 최저해상도는 300dpi 이상, 색도는 모노, 스캐닝 축척은 1:1로 하여야 한다.

제25조(문서 파일명 및 색인 부여 등) 문서의 내용 식별 및 수록내용 색인을 위해 데이터 파일명, 폴더명 및 색인파일 등을 다음 각 호와 같이 작성하여야 한다.

1. CD명은 □DOCCD일련번호(2자리 숫자)□로 하여 제작하되, 문서별로 폴더를 생성하고 폴더명을 문서명과 일치시킨다.

2. 파일명은 TIFF 표준 형식으로 □일련번호(4자리 숫자).TIF□로 하여 해당 폴더에 위치시켜야 한다.

3. 문서량이 많은 경우 여러 장의 CD에 수록하며 하나의 문서 폴더가 한 장의 CD에 수록될 수 없는 경우에는 동일한 이름의 여러 CD에 수록하여야 한다.

4. CD의 루트 디렉토리에는 별표 6에 따른 공사개요, 시설물개요 등에 관한 정보를 입력한 구성파일(MASTER.XML)과 색인에 관한 정보를 입력한 색인파일(DOCINDEX.XML)을 수록하여야 한다.

제26조(접수 및 확인) 발주자 또는 공단은 종합보고서를 제출받은 경우 이 지침에 따라 적정하게 제출되었는지를 확인하여 접수하여야 한다.

제27조(관리) 종합보고서를 제출받은 발주자 또는 공단은 종합보고서의 원활한 관리를 위하여 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.

1. 종합보고서의 접수․확인, 보존 및 열람․사본발급 요청에 대한 조치

2. 종합보고서에 의한 통계자료의 유지와 자료 신뢰성 확보를 위한 지속적인 시스템 운영 및 개선

3. 그 밖에 종합보고서의 보존과 관리에 필요한 사항

제28조(보존) ① 발주자(제21조에 따라 공단에 종합보고서를 제출한 발주자를 제외한다)는 종합보고서를 해당 공사의 하자담보책임기간만료일까지 보존하여야 한다.

② 공단은 제21조에 따라 제출받은 종합보고서를 시설물의 존속기간까지 보존하여야 한다.

③ 공단은 종합보고서를 항온․항습기 등 부대시설을 갖춘 장소에 보존하여야 하며 종합보고서 별로 등록번호, 등록일자, 제출자, 발주자(관리주체) 등의 내용이 검색 가능하도록 전산화하여 보존하여야 한다.

④ 공단은 종합보고서의 보존을 위하여 관리책임자를 지정하여 파일 등이 손상․분실되지 않도록 하고, 지진 등 자연재해의 피해가 최소화되도록 보안시설 등을 갖추어 수시로 보존상태 확인 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제29조(열람 및 교부) ① 시설물의 관리주체는 시설물의 안전 및 유지관리를 위하여 필요한 경우에는 발주자 또는 공단에 종합보고서의 열람이나 그 사본의 교부를 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 발주자 또는 공단은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다.

② 제1항에 따라 사본을 발급할 때에는 소정의 수수료를 징수할 수 있다.

③ 발주자 또는 공단은 종합보고서를 열람하였거나 사본을 발급하였을 때에는 열람 또는 발급일자, 열람 또는 발급 요청자, 열람 또는 발급내용 등을 기록하여 관리하여야 한다.

제30조(미제출자에 대한 조치) ① 발주자 및 공단은 제21조에 따라 종합보고서를 제출하지 아니한 제출의무자에게 종합보고서를 제출토록 고지하여야 한다.

② 공단은 제출의무자가 종합보고서를 시설물 준공 후 3개월 이내에 제출하지 않은 경우에는 그 현황을 제31조에 따라 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

제31조(보존 및 관리현황 보고) ① 공단은 매 분기 말에 해당하는 달의 다음달 20일까지 제출받은 종합보고서의 보존 및 관리에 관한 현황을 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

② 제1항에 따른 현황 자료에는 제30조제2항에 따른 종합보고서 미제출자 현황을 포함하여야 한다.

제4장 건설공사 안전관리비 계상 및 사용기준

제32조 (안전관리계획의 작성 및 검토 비용) ① 규칙 제60조제1항제1호에 따른 안전관리계획의 작성 및 검토 비용은 별표8의 내역에 대해 ｢엔지니어링산업 진흥법｣ 제31조제2항에 따른 ｢엔지니어링사업대가의 기준｣ 제3조제1호의 실비정액가산방식을 적용하며 직접인건비, 직접경비, 제경비 및 기술료로 구성된다.

② 직접인건비는 발주자 또는 감리원이 확인한 투입인원수를 적용하여 계상하며, 직접경비는 인쇄비, 제경비는 직접인건비의 110～120%, 기술료는 직접인건비에 제경비(손해배상보험료 또는 손해배상공제료는 제외함)를 합한 금액의 20～40%를 적용한다.

제33조(건설공사 안전점검 비용) ① 안전점검 비용 산정에 적용하는 요율은 별표7과 같다. 다만, 공사의 특성 및 난이도에 따라 10%의 범위에서 가산할 수 있다.

② 규칙 제60조제1항제2호에 따른 건설공사 안전점검 비용의 산출은 공사비 요율에 의한 방식을 적용한다.

③ 영 제100조제1항제2호에 따른 정밀안전점검 비용은 ｢엔지니어링사업대가의 기준｣을 적용하여 산출한 금액으로 한다.

④ 영 제100조제1항제3호에 따른 안전점검(초기점검) 비용산정시에는 향후의 유지관리, 점검․진단을 하기 위한 기초자료로서 구조물 전체에 대한 외관 조사망도 작성 및 구조안전성평가의 기준이 되는 초기치를 구하는데 필요한 추가항목에 따라 비용을 별도 계상하여야 한다.

⑤ 별표7의 안전점검대가요율에 포함되지 않는 건설공사의 안전점검비용은 ｢엔지니어링사업대가의 기준｣을 적용하여 산출한 금액으로 한다.

⑥ 공사비 요율에 의한 방식으로 안전점검대가 요율 산정시 시설물 규격이 최소규격보다 작은 경우 또는 두 기준규격의 중간인 경우에는 다음 보간식을 이용하여 해당 안전점검대가 요율을 산정한다. 이때 사용되는 두 기준점은 가장 인접한 두 점을 사용하여야 하며, 원점 등을 사용하여서는 안 된다.

여기서,  x : 해당 규격, x1 : 작은 규격,  x2 :  큰 규격

y : 해당공사비요율, y1 : 작은 규격 요율 y2 : 큰 규격 요율

⑦ 공사비 요율에 의한 방식으로 안전점검대가 요율 산정시 시설물 규격이 최대규격보다 큰 경우에는 다음 보간식을 이용하여 해당 안전점검대가 요율을 산정한다.

여기서,  x : 해당 규격,        x1 : 작은 규격,      x2 :  큰 규격

y : 해당공사비요율,  y1 : 작은 규격 요율 y2 : 큰 규격 요율

⑧ 제13조제1항제3호 및 별표3의 추가조사에 소요되는 비용은 ｢엔지니어링사업대가의 기준｣을 적용하여 산출한 금액으로 한다. 추가조사 항목에 대한 기준은 ｢시특법 시행령｣ 제8조제2항에 따라 고시한 ｢안전점검 및 정밀안전진단 대가(비용산정)기준｣ 별표 7을 적용한다.

제34조 (발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용) 규칙 제60조제1항제3호에 따른 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용은 별표8에 따라 건설공사로 인하여 불가피하게 발생할 수 있는 공사장 주변 건축물 등의 피해를 최소화하기 위한 사전보강, 보수, 임시이전 등에 필요한 비용으로 토목·건축 등 관련 분야의 설계기준을 적용한다.

제35조 (공사장 주변의 통행안전관리대책 비용) 규칙 제60조제1항제4호에 따른 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용은 별표8에 따라 공사시행 중의 통행안전 및 교통소통을 위한 시설의 설치 및 유지관리 비용으로 토목·건축 등 관련 분야의 설계기준을 적용한다.

제36조 (적용절차) 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에 ｢예정가격작성기준｣(계약예규)에 따라 건설공사의 안전관리에 필요한 안전관리비를 공사원가계산서에 안전관리비 항목으로 계상하여야 하며, 비용을 확정하기 어려운 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용 및 통행안전관리대책 비용 등은 발주자 또는 감리원이 확인한 안전관리 활동 실적에 따라 정산할 수 있도록 계상한다. 다만 공사 중 설계변경 등에 의해 안전관리비를 변경․추가할 필요가 있는 경우에는 건설업자 또는 주택건설등록업자가 안전관리비 내역을 작성하여 감리원의 검토‧확인 후 발주자의 승인 후 비용계상을 하여야 한다.

제37조 (사용기준) ① 건설업자 또는 주택건설등록업자는 별표8에 따라 안전관리비를 사용하여야 한다.

② 건설업자 또는 주택건설등록업자는 안전관리비 사용내역에 대하여 필요시 발주자 또는 감리원의 확인을 받아야 한다.

제38조 (정산) 건설업자 또는 주택건설등록업자는 안전관리비를 해당 목적에만 사용하여야 하며, 실제로 납부, 지출, 부담한 객관적인 서류를 근거로 정산하도록 한다.

제39조 (추가조정 등) 발주자는 건설업자 또는 주택건설등록업자가 해당 목적 이외에 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있다.

제5장 보칙

제40조 (재검토기한) ｢훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정｣(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2017년 5월 00일 까지로 한다.

부      칙

이 고시는 2014년 5월 23일부터 시행한다.

[별표 1] 건설안전점검기관 확인사항(제4조 관련)

1. 건설안전점검기관 자격유무

o 영 제100조제2항에 따른 건설안전점검기관 여부

-「시특법」제9조에 따라 등록한 안전진단전문기관

- 한국시설안전공단

o 영 제100조제2항의 단서조항에 해당여부

- 발주자가 ｢시특법｣ 제9조에 따라 등록된 안전진단전문기관인 경우에는 정기안전점검만을 시행할 수 있음

o 영 제100조제3항의 제외기관 해당여부

- 건설업자가 안전점검 실시를 건설안전점검기관에 의뢰하고자 하는 때에는 해당 건설공사를 발주·설계·시공 또는 감리하는 자와 동일계열회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제2조제3호에 따른 계열회사를 말한다)인 건설안전점검기관에 의뢰해서는 아니됨.

o 건설안전점검기관의 영업정지 등에 따른 자격 유지여부

o 건설안전점검기관의 점검장비 보유여부

- 보유장비 : ｢시특법 시행규칙｣ 제6조 및 별표1에 따른 진단장비

2. 건설안전점검기관의 직무분야 등록여부

공사중 안전점검(정기, 초기, 정밀 안전점검 등)의 아래 해당분야에서 실시 여부

직무 분야		실시 대상 시설물
1. 토목 분야	가. 교량 및 터널분야	교량, 터널, 지하차도, 복개구조물 및 지하역사
	나. 수리시설 분야	댐, 하구둑, 수문, 제방, 상하수도, 공업용수도, 공공하수처리시설 및 폐기물매립시설
	다. 항만분야	갑문시설, 계류시설 및 해저송유관시설
2. 건축분야		공동주택, 공동주택 외의 건축물(지상역사를 포함) 및 지하도상가
3. 종합분야		토목 및 건축분야 시설물

비고

1. 직무분야 : ｢시특법｣ 제9조 및 ｢시특법 시행령｣ 제11조제3항에 따른 등록분야를 말함

2. ｢시특법 시행령｣ 별표1의 2종시설물에 해당하는 옹벽 및 절토사면의 안전점검은 토목분야 기술자가 실시하여야 한다.

3. 건설안전점검기관의 해당직무분야 안전점검책임기술자 등 기술자 보유여부

o 영 별표1에 따르는 해당분야 특급기술자

o 해당직무분야(시특법 시행령 별표2의4)에 대한 시특법 시행령 제7조에 따른 안전점검 및 정밀안전진단 교육 이수자

o 안전점검책임기술자는 안전점검을 실시함에 있어서 필요한 경우에는 「시특법 시행령」별표 3의 기술인력의 등록요건란에 규정된 자격요건을 갖춘 자로 하여금 자신의 감독 하에 안전점검을 하게 할 수 있다.

4. 안전점검 실시계획의 적정성 검토

안전관리계획서와 다음 각 호 사항에 대한 적합여부를 검토한다.

o 안전점검 세부시행계획

o 장비 및 인원 투입 계획

o 안전점검비용 사용 및 정산 계획 등

[별표2] 건설공사별 정기안전점검 실시시기

건설공사 종 류				정기안전점검 점검차수별 점검시기
				1차	2차	3차	4차	5차
교 량				가시설공사 및 기초공사 시공시(콘크리트 타설전)	하부공사 시공시	상부공사 시공시	-	-
터 널				갱구 및 수직구 굴착 등 터널굴착 초기단계 시공시	터널굴착 중기단계 시공시	터널 라이닝콘크리트 치기 중간단계 시공시	-	-
댐	콘크리트댐			유수전환시설공사 시공시	굴착 및 기초공사 시공시	댐 축조공사 시공시(하상기초 완료 후)	댐 축조공사 중기단계 시공시	댐 축조공사 말기단계 시공시
	필댐			유수전환시설공사 시공시	굴착 및 기초공사 시공시	댐 축조공사 초기단계 시공시	댐 축조공사 중기단계 시공시	댐 축조공사 말기단계 시공시
하천	수문			가시설공사 완료시 (기초 및 철근콘크리트공사 시공전)	되메우기 및 호안공사 시공시	-	-	-
	제방			하천바닥 파기, 누수방지, 연약지반 보강, 기초처리공사 완료시	본체 및 비탈면 흙쌓기공사 시공시	-	-	-
하구둑				배수갑문 공사중	제체 공사중	-	-	-
상하 수도		취수시설, 정수장,취수가압펌프장, 하수처리장		가시설공사 및 기초공사 시공시 (콘크리트 타설전)	구조체공사 초․중기단계 시공시	구조체공사 말기단계 시공시	-	-
		상수도 관로		총공정의 초․중기단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-	-	-
항만		계류시설		기초공사 및 사석공사 시공시	제작 및 거치공사, 항타공사 시공시	철근콘크리트공사 시공시	속채움 및 뒷채움공사, 매립공사 시공시	-
		외곽시설 (갑문,방파제,호안)		가시설공사 및 기초공사, 사석공사 시공시	제작 및 거치공사 시공시	철근콘크리트공사 시공시	속채움 및 뒷채움공사 시공시	-
건축물		건축물		기초공사 시공시 (콘크리트 타설전)	구조체공사 초․중기단계 시공시	구조체공사 말기단계 시공시	-	-
		리모델링 또는 해체공사		총공정의 초․중기단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-	-	-
폐기물 매립시설				토공사 시공시	총공정의 중기 단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-	-
지하차도,지하상가, 복개구조물				토공사 시공시	총공정의 중기단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-
도로․철도․항만 또는 건축물의 부대시설			옹벽	가시설공사 및 기초공사 시공시(콘크리트 타설전)	구조체공사 시공시	-	-	-
			절토 사면	비탈면 깍기 완료후	비탈면 보호공 시공시	-	-	-
10미터이상 굴착하는 건설공사				가시설공사 및 기초공사 시공시 (콘크리트 타설전)	되메우기 완료후	-	-	-
폭발물을 사용하는 건설공사				총공정의 초․중기단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-	-	-

※ 적용하는 건설공사의 규모, 기간 , 현장여건에 따라 점검시기 및 횟수를 조정할 수 있다.

[별표3] 안전점검 현장조사의 조사항목 및 세부시험 종류

1. 안전점검 현장조사 항목

①육안검사 : 균열, 재료분리, 누수, 콜드조인트 발생여부 등

②기본조사

1. 콘크리트 비파괴강도 (시설물별 5개소 이상 실시)

2. 철근탐사 (시설물별 3개소 이상 실시)

3. 간단히 측정할 수 있는 구조부재의 변위

4. 점검계획 수립시 정한 점검항목

③추가조사

1. 구조물 전체에 대한 외관 조사망도 작성

2. 지질조사 : 시추, 시굴, 코어채취, 공내시험, 암반강도시험 등

3.  지반조사 및 탐사 : 시추 또는 오거보링, 공내시험, 시료채취, 토질시험, GPR 탐사, 지하공동, 지층분석 등

4. 콘크리트 제체 시추조사 : 시추, 공내시험, 시편채취, 강도시험, 물성시험 등

5. 수중조사 : 조사선에 의한 교대・교각기초, 댐・항만 등의 수중조사 등

6. 콘크리트 재료시험 : 코어채취, 강도, 성분, 공기량, 염화물함유량시험 등

7. 강재 비파괴시험 : UT, RT

8. 구조물의 조사에 필요한 가설재의 설치 및 해체 등

9. 교량 및 터널점검차 : 교량의 상부구조 조사 및 터널 내부조사 등을 위한 차량 및 조종원(운전수, 조수)

10. 비파괴재하시험 : 정적 또는 동적 재하시험

11. 구조․지반․수리해석

12. 구조안전성 평가 등 전문기술을 요하는 경우의 전문가 자문

13. 마감재의 해체 및 복구 : 구조물의 육안점검과 접근통로를 위한 기둥, 벽의 미장재, 천정의 부분해체 및 복구

14. 전기 및 기계설비에 대한 조사・시험(건축물 제외)

15. 계측 및 측량 : 구조물의 상태 및 변위를 파악하기 위하여 계측․측량기를 사용하여 실시하는 토압측정, 변위측량 등

16. 그 밖에 점검을 효과적으로 수행하기 위하여 필요한 조사

2. 기본조사 및 추가조사를 위한 각종시험

① 콘크리트 시험

1. 반발경도 : 반발경도시험(Rebound Test)은 콘크리트의 경도를 측정하여 콘크리트의 강도를 추정하는데 사용된다.

2. 초음파법(Ultrasonic Techniques) : 콘크리트 내부의 결함, 균열깊이, 강도 및 품질상태를 검사하는데 사용한다.

3. 자기법(Magnetic Methods) : 자기법은 주로 철근의 피복두께, 위치 및 직경 확인에 사용된다.

4. 레이다법(Radar Techniques) : 지표면 침투 레이다(GPR : Ground
-Penetrating Radar)는 구조물 공동 및 지하매설물 등을 발견하기 위하여 사용된다.

5. 방사선법(Radiography Test) : 감마광선은 콘크리트를 투과할 수 있으므로 필름을 방사선에 노출되게 함으로써 콘크리트 검사에 사용할 수 있다.

② 강재시험

1. 방사선투과시험(Radiographic Test) : 용접 또는 주조의 슬래그 함침(Slag Inclusion)이나 간극과 같은 결함을 쉽게 찾아낼 수 있는 방법이다.

2. 자분탐상시험(Magnetic Particle Test) : 염료침투방법과 같이 표면이나 표면부근의 결함을 찾을 때에 쓰인다.

3. 침투탐상시험(Liquid Penetrant Test) : 염료침투방법을 사용한 점검은 가장 보편적으로 사용되는 방법이다. 이 방법은 비록 구조물 표면의 결함에만 한정되지만 저가로 쉽게 사용할 수 있다.

4. 초음파 탐상시험(Ultrasonic Test) : 내부 결함을 찾기 위하여 재료 내의 소리에 대한 진동 특성을 이용하여 점검하는 방법이다.

③ 실내시험 : 구조물로부터 재료의 일부를 채취하여 실시하는 시험은 특정부분에 대한 자료가 필요하거나 구조안전성 평가에 유용할 경우 사용한다. 현장시험 결과 및 조사된 사항을 보완하기 위하여 다음과 같이 표준화된 실내시험을 실시할 수 있으며 이들 시험은 KS기준에 준하며, KS기준에 없는 시험은 ASTM이나 AASHTO 등의 기준을 적용할 수 있다.

1. 콘크리트시험 :  강도, 수분함량, 공기량, 염화물 함유량 등을 측정

2. 강재시험 :  강도 등을 측정

3. 토질시험 :  입도, 함수비, 애터버그 한계(Atterberg□s Limit), 투수, 다짐, 압밀, 압축시험 등

④ 시험결과의 해석 및 평가 : 콘크리트 및 강재시험, 실내시험 결과는 경험이 있는 자에 의하여 해석되고 평가되어야 하며 이전에 같은 시험이 실시된 경우에는 시험결과를 비교하여 차이점을 분석․평가하여야 하며, 같은 재료 특성을 평가하는데 다른 형식의 시험방법이 사용되는 경우에는 각 시험결과를 비교하여 차이점을 파악하여야 한다. 필요한 경우 기존자료와 현장계측자료를 토대로 예상되는 문제점을 분석하기 위하여 모델링(Modelling)을 통하여 이론적 해석을 할 수 있다.

⑤ 시험보고서 : 콘크리트 및 강재시험, 실내시험 결과는 점검대상물 안전평가에 필요한 자료의 일부로 사용하며, 시험결과는 책임시험자가 서명한 시험기관의 정식 공문으로 제출하여야 한다.

[별표 4] 안전점검 종류에 따른 보고서 목차

Ⅰ. 정기안전점검 보고서

1. 서 두 : 보고서의 표지 다음에는 정기안전점검의 개략을 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.

∙ 제출문

∙ 참여기술진 명단

∙ 보고서 목차

∙ 점검대상물 위치도

∙ 점검대상물의 전경사진

∙ 정기안전점검 실시결과 요약문

2. 정기안전점검의 개요 : 정기안전점검의 범위와 과업내용 등 정기안전점검 계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다.

∙ 점검대상물의 개요

∙ 점검의 범위

∙ 사용장비

∙ 정기안전점검 수행 일정

3. 점검대상물의 평가 : 과업 내용에 의거하여 실시한 조사, 시험 및 측정의 결과분석을 통하여 점검 대상 구조물의 안전상태를 평가하고 결과를 작성한다.

∙ 주요 부재별 외관조사 결과의 분석

∙ 조사, 시험 및 측정자료 검토

∙ 인접건축물 또는 구조물 등 공사장주변 안전조치의 적정성

∙ 임시시설 및 가설공법의 안전성

∙ 건설공사 안전관리 검토

∙ 기본조사 결과 및 분석

4. 종합결론

∙ 정기안전점검 결과의 종합결론

∙ 시공시 특별 관리가 필요한 사항

∙ 그 밖에 필요한 사항

5. 부 록

∙ 결함부위 사진

∙ 균열부위 조사도

∙ 측정 및 시험성과표

∙ 그 밖에 참고자료

Ⅱ. 정밀안전점검 보고서

1. 서 두 : 보고서의 표지 다음에는 정밀안전점검의 개략을 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.

∙ 제출문

∙ 참여기술진 명단

∙ 보고서 목차

∙ 점검대상물의 위치도

∙ 점검대상물의 전경사진

∙ 정밀안전점검 실시결과 요약문

2. 정밀안전점검의 개요 : 정밀안전점검의 범위와 과업내용 등 정밀안전점검 계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다.

∙ 정밀안전점검의 목적

∙ 점검대상물의 개요

∙ 정밀안전점검의 범위 및 과업내용

∙ 사용장비 및 시험

∙ 정밀안전점검 수행 일정

3. 점검대상물의 안전상태 평가 : 과업내용에 의거 실시한 조사, 시험 및 측정의 결과분석과 점검대상물의 안전상태 평가 결과를 작성한다.

∙ 해당 부재의 외관검사 결과 및 분석

∙ 비파괴시험 결과 및 분석

∙ 주요 부재의 평가

4. 점검대상물의 구조안전성 평가 : 과업내용에 의거 실시한 조사결과를 분석하고, 구조계산을 통하여 구조물의 내하력 등을 검토하여 점검대상물의 구조적․기능적 안정성을 평가한다.

∙ 비파괴 재하시험 결과 및 분석

∙ 지형, 지질, 지반 및 토질조사 등 결과 및 분석

∙ 점검대상물의 변위 및 거동 등의 측정결과 및 분석

∙ 구조, 수문, 수리 및 지반 등의 해석결과 및 분석

∙ 부재별 내하력 평가

∙ 구조물 안전성 평가의 결론

5. 보수․보강방법 : 점검대상물의 상태평가와 안전성평가 결과에 따라 손상 및 결함이 있는 부위 또는 부재에 대하여 적용할 보수․보강방법을 제시한다.

∙ 보수․보강방법에 대한 개요, 시공방법, 시공시 주의사항 등

6. 종합결론 및 건의사항

∙ 정밀안전점검 결과의 종합결론

∙ 공사중 특별 관리가 요구되는 사항

∙ 그 밖에 필요한 사항

7. 부 록

∙ 결함부위 사진

∙ 균열 및 기능저하 부위 조사도

∙ 측정, 시험성과표

∙ 구조안전성 평가자료

∙ 그 밖에 참고자료

[별표 5] 안전점검종합보고서 목차

1. 서 두 : 보고서의 표지에는 기 실시한 안전점검의 개략을 알 수 있도록 다음의 사항을 기술한다.

∙ 제출문

∙ 참여기술진 명단

∙ 보고서 목차

∙ 점검대상물의 위치도

∙ 점검대상물의 전경사진

2. 기 실시한 안전점검의 요약 : 기 실시한 안전점검의 범위와 과업내용 등 주요사항을 기술한다.

∙ 점검대상물의 개요

∙ 각 차수별 안전점검 실시현황 (점검기관명, 책임기술자명, 점검기간, 점검비용)

∙ 기 실시한 안전점검의 주요내용

3. 기 실시한 안전점검에 의한 조치사항 및 보수․보강 실시결과 확인․검토

∙ 안전점검에 의한 조치 결과의 확인

∙ 보수ㆍ보강 작업의 실시 및 작업결과의 확인

∙ 조치결과 및 보수․보강작업의 적정성 평가

∙ 기타 사항

4. 종합결론 및 건의사항

∙ 종합결론

∙ 미 조치사항 목록

∙ 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

∙ 기타 필요한 사항

5. 부 록

∙ 확인 사진

∙ 그 밖에 참고자료

[별표6] 건설공사의 안전점검종합보고서 구성파일 및 색인파일 내용

1. 구성파일(MASTER.XML) 내용

항목	태 그	내 용	예
1	<master></master>	태그 사이에 항목2~27을 입력함.
2	<type></type>	건설공사의 안전점검종합보고서로 명시	<type>안전점검종합보고서</type>
3	<version></version>	제작시 사용한 MASTER.XML의 버전	<version>1.0</version>
4	<const_info></const_info>	태그 사이에 항목5~9를 입력함.
5	<const_nm></const_nm>	공사명	<const_nm>XXX건설공사</const_nm>
6	<req_nm></req_nm>	발주자명	<req_nm>OOO</req_nm>
7	<const_ymd_from></const_ymd_from>	공사시작일	<const_ymd_from>20020101</const_ymd_from>
8	<const_ymd_to></const_ymd_to>	공사종료일	<const_ymd_to>20040410</const_ymd_to>
9	<cpl_ymd></cpl_ymd>	준공일 또는 사용승인일	<cpl_ymd>20040415</cpl_ymd>
10	<facil_info></facil_info>	태그 사이에 항목11~12를 입력함.
11	<facil_no></facil_no>	시설물번호	<facil_no>XX2004-9999999</facil_no>
12	<facil_nm></facil_nm>	시설물명	<facil_nm>XXX시설물</facil_nm>
13	<cd_info></cd_info>	태그 사이에 항목14~15를 입력함.
14	<dwg_cd_cnt></dwg_cd_cnt>	도면용 CD 개수(해당없을 경우 0으로 입력)	<dwg_cd_cnt>0</dwg_cd_cnt>
15	<doc_cd_cnt></doc_cd_cnt>	문서용 CD 개수	<doc_cd_cnt>3</doc_cd_cnt>
16	<dwg_cd_info></dwg_cd_info>	태그 사이에 항목17~21을 입력함.
17	<dwg_cd_no></dwg_cd_no>	도면용 CD 일련번호	<dwg_cd_no></dwg_cd_no>
18	<dwg_cd_file_cnt></dwg_cd_file_cnt>	해당 CD에 수록된 이미지화일 개수	<dwg_cd_file_cnt></dwg_cd_file_cnt>
19	<dwg_kind_info></dwg_kind_info>	태그 사이에 항목20~21을 입력함.
20	<dwg_kind_nm></dwg_kind_nm>	서브-디렉토리명(도면종류명)	<dwg_kind_nm></dwg_kind_nm>
21	<dwg_kind_cnt></dwg_kind_cnt>	서브-디렉토리에 수록된 이미지 파일의 개수	<dwg_kind_cnt></dwg_kind_cnt>
22	<doc_cd_info></doc_cd_info>	태그 사이에 항목23~27을 입력함.
23	<doc_cd_no></doc_cd_no>	문서용 CD 일련번호	<doc_cd_no>01</doc_cd_no>
24	<doc_cd_file_cnt></doc_cd_file_cnt>	해당 CD에 수록된 이미지화일 개수	<doc_cd_file_cnt>1670</doc_cd_file_cnt>
25	<doc_kind_info></doc_kind_info>	태그 사이에 항목26~27을 입력함.
26	<doc_kind_nm></doc_kind_nm>	서브-디렉토리명(문서종류명)	<doc_kind_nm>안전점검종합보고서</doc_kind_nm>
27	<doc_kind_cnt></doc_kind_cnt>	서브-디렉토리에 수록된 이미지 파일의 개수	<doc_kind_cnt>1670</doc_kind_cnt>

<비고>

1. 별표1의 3.구성파일 작성예시를 참조하되, 위의 세부내용을 만족하도록 한다.

2. 건설공사의 안전점검종합보고서와 관련한 도면이 본 보고서와 별도로 존재하는 경우 반드시 도면과 문서를 분리하여 사본을 제작하여야 하며, 관련 도면이 없는 경우 항목 14은 0으로, 항목 16~21은 공란으로 둔다. 단, 본 보고서 내에 삽입된 도면의 경우는 문서로 본다.

3. 구성파일의 시작부분에는 반드시 “<?xml version="1.0" encoding="ks_c_5601" ?>” 을 입력 하여야 하며, XML 인코딩을 ks_c_5601(완성형 한글)이 아닌 경우 해당 문자세트를 명시한다.

4. 항목 3의 경우 본 고시에 따른 제작 시에는 반드시 “1.0”을 기재하여야 한다.

5. 항목 10~12은 공사에 포함된 모든 1, 2종 시설물에 대해 반복 작성되어야 하며, 시설물번호는 공단 전산시스템에서 시설물관리대장입력 후 자동 부여되는 번호를 말한다. 1, 2종 시설물이 아닌 경우에는 시설물번호를 생략하고 태그만 기재한다.

6. 항목 16~27은 각각 해당되는 내용이 다수일 경우 해당되는 만큼 반복하여 작성하여야 한다.

7. 항목 17, 23의 CD 일련번호는 두 자리 정수로 입력하여야한다.

8. 구성화일(MASTER.XML)은 제출되는 모든 도면용 CD 및 문서용 CD의 루트 디렉토리에 수록되어야 한다.

2. 색인화일 (DWGINDEX.XML/DOCINDEX.XML) 내용

항목	태 그	내 용	예
1	<index></index>	태그 사이에 항목2~9을 입력함.
2	<type></type>	도면은 dwg, 문서는 doc로 입력	<type>doc</type>
3	<version></version>	제작시 사용한 INDEX.XML의 버전	<version>1.0</version>
4	<kind_info></kind_info>	태그 사이에 항목5~9을 입력함.
5	<kind_nm></kind_nm>	서브-디렉토리명(도면/문서종류명)	<kind_nm>안전점검종합보고서</kind_nm>
6	<title_info></title_info>	태그 사이에 항목7~9을 입력함.
7	<level></level>	해당목차의 레벨을 명시함.	<level>1</level>
8	<title></title>	해당목차의 제목을 명시함.	<title>1. 일반사항</title>
9	<file_from></file_from>	시작이미지파일명을 명시함.	<file_from>0006</file_from>

<비고>

1. 색인파일명은 도면의 경우 DWGINDEX.XML로 문서의 경우 DOCINDEX.XML로 명기한다.

2. 별표1의 4. 색인파일 작성예를 참고하되, 위의 세부내용을 만족하도록 한다.

3. 색인파일의 시작부분에는 반드시 “<?xml version="1.0" encoding="ks_c_5601" ?>” 을 입력 하여야 하며, XML 인코딩을 ks_c_5601(완성형 한글)이 아닌 경우 해당 문자세트를 명시한다.

4. 항목 3의 경우 본 고시에 따른 제작 시에는 반드시 “1.0”을 기재하여야 한다.

5. 항목 4~9은 CD에 포함된 모든 도면/문서종류에 대해 반복 작성되어야 하며, 6~9는 해당 종류별로 각각의 목차에 대해 해당되는 만큼 반복하여 작성하여야 한다.

6. 항목 7의 레벨은 해당 목차의 레벨을 말하며, 예를 들어 표지, 목차, 1장 등의 경우 레벨을 1로, 1.1, 1.2, 2.1 등의 경우 레벨을 2로, 1.1.1, 1.1.2 등의 경우 레벨을 3으로 하여 해당 도면/문서종류에 명시된 목차와 동일하게 6~9를 반복 작성하여야 한다.

7. 항목 9의 시작이미지파일명은 4자리 정수로 0001로 시작하는 연속된 정수로 입력하여야한다.

3. 구성화일 (MASTER.XML) 작성예시

<?xml version="1.0" encoding="ks_c_5601" ?>

<master>

<type>건설공사의 안전점검종합보고서</type>

<version>1.0</version>

<const_info>

<const_nm>XXX건설공사</const_nm>

<req_nm>OOO</req_nm>

<const_ymd_from>20020101</const_ymd_from>

<const_ymd_to>20040410</const_ymd_to>

<cpl_ymd>20040415</cpl_ymd>

</const_info>

<facil_info>

<facil_no>XX2004-9999991</facil_no>

<facil_nm>XX1 시설물</facil_nm>

</facil_info>

<facil_info>

<facil_no>XX2004-9999992</facil_no>

<facil_nm>XX2 시설물</facil_nm>

</facil_info>

<facil_info>

<facil_no>XX2004-9999993</facil_no>

<facil_nm>XX3 시설물</facil_nm>

</facil_info>

<facil_info>

<facil_no>XX2004-9999994</facil_no>

<facil_nm>XX4 시설물</facil_nm>

</facil_info>

<facil_info>

<facil_no>XX2004-9999995</facil_no>

<facil_nm>XX5 시설물</facil_nm>

</facil_info>

<facil_info>

<facil_no>XX2004-9999996</facil_no>

<facil_nm>XX6 시설물</facil_nm>

</facil_info>

<facil_info>

<facil_no>XX2004-9999997</facil_no>

<facil_nm>XX7 시설물</facil_nm>

</facil_info>

<facil_info>

<facil_no>XX2004-9999998</facil_no>

<facil_nm>XX8 시설물</facil_nm>

</facil_info>

<facil_info>

<facil_no>XX2004-9999999</facil_no>

<facil_nm>XX9 시설물</facil_nm>

</facil_info>

<cd_info>

<dwg_cd_cnt>0</dwg_cd_cnt>

<doc_cd_cnt>1</doc_cd_cnt>

</cd_info>

<dwg_cd_info>

<dwg_cd_no></dwg_cd_no>

<dwg_cd_file_cnt></dwg_cd_file_cnt>

<dwg_kind_info>

<dwg_kind_nm></dwg_kind_nm>

<dwg_kind_cnt></dwg_kind_cnt>

</dwg_kind_info>

</dwg_cd_info>

<doc_cd_info>

<doc_cd_no>01</doc_cd_no>

<doc_cd_file_cnt>102</doc_cd_file_cnt>

<doc_kind_info>

<doc_kind_nm>건설공사의 안전점검종합보고서</doc_kind_nm>

<doc_kind_cnt>102</doc_kind_cnt>

</doc_kind_info>

</doc_cd_info>

</master>

4. 문서 색인화일 (DOCINDEX.XML) 작성예시

<?xml version="1.0" encoding="ks_c_5601"?>

<index>

<type>doc</type>

<version>1.0</version>

<kind_info>

<kind_nm>건설공사의 안전점검종합보고서</kind_nm>

<title_info>

<level>1</level>

<title>표지</title>

<file_from>0001</file_from>

</title_info>

<title_info>

<level>1</level>

<title>제출문</title>

<file_from>0003</file_from>

</title_info>

<title_info>

<level>1</level>

<title>요약문</title>

<file_from>0004</file_from>

</title_info>

<title_info>

<level>1</level>

<title>목차</title>

<file_from>0016</file_from>

</title_info>

<title_info>

<level>1</level>

<title>제1장 개요</title>

<file_from>0019</file_from>

</title_info>

<title_info>

<level>1</level>

<title>제2장 대상 건축물 현황</title>

<file_from>0023</file_from>

</title_info>

<title_info>

<level>1</level>

<title>제3장 현장조사 내용</title>

<file_from>0033</file_from>

</title_info>

<title_info>

<level>1</level>

<title>제4장 일반관리사항</title>

<file_from>0086</file_from>

</title_info>

<title_info>

<level>1</level>

<title>제5장 종합평가</title>

<file_from>0086</file_from>

</title_info>

<title_info>

<level>1</level>

<title>부록</title>

<file_from>0089</file_from>

</title_info>

<title_info>

<level>2</level>

<title>1. 참고 사진</title>

<file_from>0090</file_from>

</title_info>

<title_info>

<level>2</level>

<title>2. 균열 및 성능저하부 보수안</title>

<file_from>0092</file_from>

</title_info>

<title_info>

<level>2</level>

<title>3. 시험성적서</title>

<file_from>0102</file_from>

</title_info>

</kind_info>

</index>

[별표7] 안전점검 대가 요율

건설공사 종류		규 격	전체 요율(%)	정기안전점검 요율(%)	초기점검 요율(%)
교량		100m	0.66	0.44	0.22
		300m	0.29	0.20	0.09
		500m	0.20	0.14	0.06
		1,000m	0.11	0.08	0.03
		2,000m	0.08	0.06	0.02
		4,000m	0.05	0.04	0.01
		8,000m	0.03	0.021	0.009
터널		300m	0.37	0.26	0.11
		500m	0.30	0.21	0.09
		1,000m	0.18	0.10	0.08
		2,000m	0.11	0.07	0.04
		4,000m	0.08	0.05	0.03
댐		-	0.15	0.11	0.04
하천	수 문	-	4.86	2.78	2.08
	제 방	1,000m	0.45	0.28	0.17
		2,000m	0.27	0.15	0.12
		4,000m	0.18	0.10	0.08
	부속시설(통문,호안포함)	-	4.86	2.78	2.08
하 구 둑		-	0.17	0.10	0.07
수도	취수시설,	-	0.33	0.22	0.11
	취수가압펌프장	-	0.36	0.23	0.13
	정수장, 배수지	-	0.08	0.05	0.03
	상수도 관로	-	0.08	0.05	0.03
공공하수처리시설		-	0.08	0.05	0.03
항만	계류시설	1만톤급	0.12	0.08	0.04
		5만톤급	0.10	0.06	0.04
		20만톤급	0.06	0.04	0.02
	갑문시설	-	0.17	0.12	0.05
건 축 물		5,000㎡	0.52	0.35	0.17
		10,000㎡	0.34	0.24	0.10
		30,000㎡	0.16	0.11	0.05
		50,000㎡	0.13	0.09	0.04
		100,000㎡	0.11	0.08	0.03
폐기물매립시설		-	1.19	0.78	0.41
옹 벽		100m	3.63	2.06	1.57
		200m	2.59	1.47	1.12
		500m	1.91	1.08	0.83
절토사면		200m	0.99	0.56	0.43
		400m	0.71	0.40	0.31
		800m	0.45	0.26	0.19

※1. 정기안전점검 대가 요율은 별표 2. 건설공사별 정기안전점검 실시시기의 각 차수별 점검비용을 포함한다.

2. 영 제100조제1항에 따른 종합보고서의 작성비용을 포함한다.

[별표 8] 안전관리비 계상 및 사용기준

항 목	내역
1.안전관리계획의 작성 및 검토 비용	가. 안전관리계획 작성 비용 1) 안전관리계획서 작성 비용(공법 변경에 의한 재작성 비용 포함) 2) 안전점검 공정표 작성 비용 3) 안전관리에 필요한 시공 상세도면 작성 비용 4) 안전성계산서 작성 비용 (거푸집 및 동바리 등) ※ 기 작성된 시공 상세도면 및 안전성계산서 작성 비용은 제외한다. 나. 안전관리계획 검토 비용 1) 안전관리계획서 검토 비용 2) 대상시설물별 세부안전관리계획서 검토 비용 - 시공상세도면 검토 비용 - 안전성계산서 검토 비용 ※ 기 작성된 시공 상세도면 및 안전성계산서 작성 비용은 제외한다.
2. 영 제100조제1항제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용	가. 정기안전점검 비용 영 제100조제1항제1호에 따라 본 지침 별표3의 건설공사별 정기안전점검 실시시기에 발주자의 승인을 얻어 건설안전점검기관에 의뢰하여 실시하는 안전점검에 소요되는 비용 나. 초기점검 비용 영 제98조제1항제1호에 해당하는 건설공사에 대하여 해당 건설공사를 준공(임시사용을 포함)하기 직전에 실시하는 영 제100조제1항제3호에 따른 안전점검에 소요되는 비용 ※ 초기점검의 추가조사 비용은 본 지침 [별표8] 안전점검 비용요율에 따라 계상되는 비용과 별도로 비용계상을 하여야 한다.
3. 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용	가. 지하매설물 보호조치 비용 1) 관매달기 공사 비용 2) 지하매설물 보호 및 복구 공사 비용 3) 지하매설물 이설 및 임시이전 공사 비용 4) 지하매설물 보호조치 방안 수립을 위한 조사 비용 ※ 공사비에 기 반영되어 있는 경우에는 계상을 하지 않는다. 나. 발파․진동․소음으로 인한 주변지역 피해방지 대책 비용 1) 대책 수립을 위해 필요한 계측기 설치, 분석 및 유지관리 비용 2) 주변 건축물 및 지반 등의 사전보강, 보수, 임시이전 비용 및 비용 산정을 위한 조사비용 3) 암파쇄방호시설(계획절토고가 10m 이상인 구간) 설치, 유지관리 및 철거 비용 4) 임시방호시설(계획절토고가 10m 미만인 구간) 설치, 유지관리 및 철거 비용 ※ 공사비에 기 반영되어 있는 경우에는 계상을 하지 않는다. 다. 지하수 차단 등으로 인한 주변지역 피해방지 대책 비용 1) 대책 수립을 위해 필요한 계측기의 설치, 분석 및 유지관리 비용 2) 주변 건축물 및 지반 등의 사전보강, 보수, 임시이전 비용 및 비용 산정을 위한 조사비용 3) 급격한 배수 방지 비용 ※ 공사비에 기 반영되어 있는 경우에는 계상을 하지 않는다. 라. 기타 발주자가 안전관리에 필요하다고 판단되는 비용
4. 공사장 주변의 통행안전 및 교통소통을 위한 안전시설의 설치 및 유지관리 비용	가. 공사시행 중의 통행안전 및 교통소통을 위한 안전시설의 설치 및 유지관리 비용 1) PE드럼, PE휀스, PE방호벽, 방호울타리 등 2) 경관등, 차선규제봉, 시선유도봉, 표지병, 점멸등, 차량 유도등 등 3) 주의 표지판, 규제 표지판, 지시 표지판, 휴대용 표지판 등 4) 라바콘, 차선분리대 등 5) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 안전시설 ※ 공사기간 중 공사장 외부에 임시적으로 설치하는 안전시설만 인정된다. 나. 기타 발주자가 안전관리에 필요하다고 판단되는 비용

[별지 제1호 서식] 정기·정밀안전점검 지적사항 조치확인

안전점검 지적사항 조치확인
공 사 명
현 장 소 재 지
점 검 일 시
점검기관(책임자)
대 상 공 종
점 검 항 목
지 적 사 항
조 치 일 시
조 치 자	(인)
조 치 사 항
발주자(감리 또는 감독)확인	(인)

(주) 1. 점검항목별로 별도 작성할 것

2. 지적사항 및 조치사항에 대한 사진을 뒷면에 첨부할 것

부록Ⅵ: 건설사고 발생현황 보고양식

- 건설사고조사 업무매뉴얼 [별지 제2호서식]

건설사고 발생현황 보고
수신		접수일시
보고일시		발신(보고자)		O O O (인)
제목
사고일시	20 년 월 일 시 분 경			기상상태
공사명
시공사			책임자 및 연락처
건설사업관리자			책임자 및 연락처
설계사			책임자 및 연락처
현장주소
사고 종류
인적피해			장비손실
구조물 손실			피해금액
공기지연			진행상황
사고발생 경위 (발생원인)
조치상황
조치조사 방법	1. 직접조사 2. 사고조사위원회조사 3. 고용노동부 재해조사 시 합동조사
비고

※ 사고사진, 개략도 별첨

		건설공사 안전관리업무 메뉴얼의 활용방법

□ 건설공사 안전관리업무 매뉴얼의 활용방법

본 「건설공사 안전관리업무 메뉴얼」은 법적 구속력이 없으며, 관계법령에 적합하게 운영되어야 하므로, 본 메뉴얼에 대하여 의문사항이 있을 경우에는 국토교통부 건설안전과(TEL :     044-201-3581)로 연락하시기 바랍니다.