우편번호 : 54004

주소 : 전라북도 군산시 새만금북로 466

새만금개발공사

건설공사 안전점검 수행기관 지정공고

◦ 모집기간 : 2024. 2. 29. (목) ~ 3. 13. (수) 18:00까지

「건설기술 진흥법」제62조, 동법 시행령 제100조, 제100조의2 및「건설공사 안전관리 업무수행 지침」제18조에 따라 새만금개발공사에서 발주하는 건설공사의 안전점검 수행기관 지정공고를 아래와 같이 공고합니다.

○ 모집절차 및 지원방법 문의 : 재난·안전관리센터 송준범 대리 (☎ 063-440-6836)

2024년 2월 29일

새만금개발공사 사장

Ⅰ		공고명

「새만금 스마트 수변도시 1단계 조성공사」 안전점검 수행기관 지정공고

Ⅱ		공사 개요

공 사 명 : 「새만금 스마트 수변도시 1단계 조성공사」

공사위치 : 새만금 사업지역 복합개발용지 내 선도지구 일원

(전라북도 김제시 진봉면 심포리 2415)

공사기간 : ‘23. 5. 15. ~ ’26. 7. 13.

시 공 자 : 남광토건㈜ 외 6개사

건설사업관리 : ㈜도화엔지니어링 외 3개사

공사금액 : 금 230,186백만원(부가가치세 포함),

* 도급액: 172,587백만원, 관급자재 등 : 57,655백만원

Ⅲ		안전점검 개요

안전점검 대상(「건설기술 진흥법 시행령」제98조제1항, 제101조의2제1항)

ㅇ 천공기가 사용되는 건설공사(10m이상)

ㅇ 항타 및 항발기가 사용되는 공사

ㅇ 1종 및 2종 시설물(교량)

ㅇ 지하 10m 이상 굴착공사

ㅇ 높이 5m 이상 동바리, 높이 2m 이상 흙막이

점검비용 : 금 229,960,500원(부가가치세 포함, 안전관리비 중 안전점검 비용)

안전점검 수행 예정표 (공정진행 상황에 따라 변동 가능)

점검명 (구조물명)		정기점검			초기점검	합계
		1차	2차	3차
교량	진입1교	1 (기초공사중) (‘24. 6月)	1 (하부공사중) (‘24. 8月)	1 (상부공사중) (‘25. 5月)	1 (준공시) (‘26. 7月)	4
	진입2교	1 (기초공사중) (‘24. 8月)	1 (하부공사중) (‘24. 10月)	1 (상부공사중) (‘25. 5月)	1 (준공시) (‘26. 7月)	4
10m 이상 굴착(오수중계펌프장)	제1펌프장	1 (가시설 및 기초공사중) (‘24. 11月)	1 (되메우기 완료후) (‘25. 12月)	-	-	2
	제2펌프장	1 (가시설 및 기초공사중) (‘24. 12月)	1 (되메우기 완료후) (‘25. 12月)	-	-	2
연약지반(천공기)		1 (최초전공시) (‘24. 3月)	1 (천공기 작업말기) (‘24. 11月)	-	-	2
항타 및 항발기 (교량 외 항타)	진입1교 (가교포함)	2 (최초천공시) (‘24. 6月) (‘24. 5月-가교)	2 (항타기 작업말기) (‘24. 6月) (‘24. 5月-가교)	-	-	2
	진입2교 (가교포함)	2 (최초천공시) (‘24. 7月) (‘24. 6月-가교)	2 (항타기 작업말기) (‘24. 7月) (‘24. 6月-가교)	-	-	2
	제1,2오수 중계펌프장	2 (최초천공시) (1-‘25. 2月) (2-‘25. 3月)	2 (항타기 작업말기) (1-‘25. 2月) (2-‘25. 3月)	-	-	2
높이 5m이상 동바리 (중계펌프장)	제1펌프장	1 (최고높이 설치완료시) (‘25. 8月)	1 (최대단면 설치완료시) (‘25. 12月)	-	-	2
	제2펌프장	1 (최고높이 설치완료시) (‘25. 10月)	1 (최대단면 설치완료시) (‘25. 12月)	-	-	2
높이2미터 이상 흙막이	오수시트 파일 흙막이	1 (가시설공사초중기) (‘25. 2月)	1 (가시설공사 말기) (‘25. 10月)	-	-	2
합계		14	14	2	2	32

* 상기 일정은 공사 진행에 따라 변동될수 있음

안전점검은 「건설기술 진흥법 및 동법 시행령」, 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 등 관련 규정 기준을 따르며, 점검완료 후 종합보고서 제출

Ⅳ		신청자격

새만금개발공사 건설공사 안전점검 수행기관 등록명부에 등록된 업체

* 붙임 1 公社 건설공사 안전점검 수행기관 등록명부 공개(‘23.10.6.) 참고

점검대상 건설공사를 발주ㆍ설계ㆍ시공 또는 건설사업관리를 수행하는 자와 그 계열 회사인 안전점검기관은 참여할 수 없음.

안전점검 수행기관 지정요청서 접수마감일(다만, 안전점검 수행기관으로 지정된 자는 계약체결일)까지 국토교통부 시설물통합정보관리시스템(FMS)에 등록상태가 ‘정상’ 상태인 업체

Ⅴ		안전점검 수행기관 지정 방법

붙임 2 사업수행능력 평가방법 및 세부기준에 따라 평가하며 평가 합계가 가장 높은 기관을 수행기관으로 지정하되, 최고점이 2개 이상인 경우 제안 가격이 가장 낮은 기관 지정

구분	심사항목	배점	심사방법
평가항목	수행능력 평가	30점	평점 = 평가점수 X 30%
	제안가격 평가	70점	붙임 2 평가산식에 따른 산정
합계	100점

ㅇ 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 지정된 안전점검 수행기관의 제출서류 등이 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 작성된 것으로 판명 된 때에는 지정결정 취소 및 명부에서 제외되며, 차순위자를 안전점검 수행기관으로 지정

ㅇ 지정된 안전점검 수행기관을 공사 홈페이지 공개하고 「건설기술진흥법 시행령」 제100조의2에 따라 시공자에 지정 통보서 송부

ㅇ 안전점검 수행기관으로 지정된 경우 통보일로부터 7일 이내에 시공자와 계약을 체결하여야 하며, 계약체결 가격은 지정된 업체의 제안 가격으로 함

Ⅵ		신청서 제출 일시 및 방법

접수기간 : ‘24. 2. 29.(목) ~ ’24. 3. 13.(수) 18:00

접수방법 : 방문 및 우편 접수 원칙(방문접수 전 담당자 사전 연락)

* 접수 마감일시 우체국 소인 및 택배 운송장 기록분 접수 유효

** 접수 담당자 : 재난·안전관리센터 송준범 대리(063-440-6836)

*** 마감일시까지 접수여부를 담당자에게 확인 必, 미확인으로 인한 불이익 및 책임은 응모자에게 있음.

접수장소 : 전라북도 군산시 새만금북로 466 새만금개발공사 재난·안전관리센터

제출서류 * 붙임 5 지정신청 제출 서류 양식 참고

1) 안전점검 수행기관 지정신청서 1부(서식1)

2) 안전점검 수행기관 가격제안서 1부(서식2)

3) 사업수행능력평가 신청서(서식3) 및 증빙자료 각 1부.

4) 사업수행능력 자기평가표(서식4)

5) 서약서(서식5)

6) 기타 증빙자료 각 1부. * 사본으로 제출하는 모든 서류는 하단 여백에 원본대조필 날인

- 안전진단전문기관등록증, 사업자등록증, 인감증명서, 사용인감계

Ⅶ		안전점검 수행기관 지정 일정

구분	일정	비고
안전점검 수행기관 지정공고	2024. 2. 29.(목) 15:00	- 새만금개발공사 홈페이지(공고) - 신청자격 : 公社 등록명부 등재 업체
지정 신청서 등 제출서류 접수⦁마감	2024. 2. 29.(목) 15:00 ∼ 2024. 3. 13.(수) 18:00	- 방문, 우편 접수 원칙(접수확인 必) * 접수처 : 재난·안전관리센터
안전점검 수행기관 심사(평가) 및 지정	2024. 3. 14.(목) 09:00 ∼ 2024. 3. 21.(목) 18:00	붙임 2 사업수행능력 평가방법 및 세부기준에 따라 평가
안전점검 수행기관 지정 공개	2024. 3. 21.(목) 18:00	- 새만금개발공사 홈페이지(공개)

Ⅶ		유의사항

제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 응모서류가 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 작성된 것으로 판명된 때에는 안전점검 수행기관 명부에서 제외하고 당해 안전점검 수행기관 지정 결정을 취소할 수 있습니다.

제출서류는 정확하게 작성되어야 하고, 각 평가기준에 따른 증빙서류가 첨부되어야 하며, 증빙서류가 첨부되지 않았거나 내용이 불분명하여 확인이 불가능한 경우에는 해당 평가사항은 인정하지 아니합니다.

모든 증빙서류는 공고일 이후에 발급 또는 작성된 것을 제출하여야 한다.

점검기관으로 지정된 기관이 부적격자로 판명되어 점검기관 지정이 취소된 경우에는 당초 심사 시 차 순위자를 점검기관으로 결정한다.

제출된 서류에 한하여 평가하며, 제출된 서류의 누락·오기 등으로 인한 불이익은 신청자에게 있고, 수행기관으로 지정되지 아니한 신청자에게는 지정결과를 별도 통보하지 않습니다.

안전점검 수행기관으로 지정받은 자가 시공자와 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 안전점검 수행기관 등록명부에서 제외하며, 차기 모집 공고 대상에서도 제외합니다.

세부 일정은 추진상황에 따라 변경될 수 있습니다.

본 공고문에 명기되지 않은 사항에 대해서는 「건설기술 진흥법」 및 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 규정을 우선 적용합니다.

기타 자세한 사항은 새만금개발공사 재난·안전관리센터 송준범 대리(☎063-440-6836)에 문의하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 새만금개발공사 건설공사 안전점검 수행기관 등록명부 1부.

2. 사업수행능력 평가방법 및 세부기준 1부.

3. 사업수행능력평가서 작성지침 1부.

4. 안전점검 대상 시설물 현황 및 주요공정 예정공정표 1부.

5. 지정신청 제출 서류 양식 1식.  끝.

붙임 1		새만금개발공사 건설공사 안전점검 수행기관 등록명부

연번	상호 (등록번호)	대표자	소재지	전문분야
1	한국씨엠이엔지(주) (제 강원-95호)	황용선	강원도 원주시 건강로 21-1, 6층 602호(서영에비뉴파크 2차)(반곡동)	교량 및 터널 수리
2	㈜와텍 (대전 제31호)	이규환	대전광역시 대덕구 대화로 120, 가온비즈타워 508-512호	수리
3	㈜가설안전구조연구 (경남 제60호)	이준성	경남 진주시 진양호로 461, 1,2층	교량 및 터널
4	㈜나단이엔씨 (제 강원-94호)	황정식	강원특별자치도 강릉시 경강로 2234, 2층	교량 및 터널
5	㈜테바에스아이 (전남- 제114호)	김은옥	전라남도 나주시 빛가람로 685, 312호(빛가람동, 비전타워)	교량 및 터널 수리
6	(사)한국건설안전협회 (제 21호)	한경보	서울특별시 송파구 법원로9길 26, 에이치비즈니스파크 D동 7층(문정동)	종합
7	㈜다옴이엔씨 (전남 - 제129호)	황인진 홍록영	전라남도 함평군 나산면 나산원봉길 145	교량 및 터널
8	㈜조아이엔씨 (제 강원-112호)	이기철 박미애	강원특별자치도 동해시 발한로 88, 2층(발한동)	교량 및 터널
9	㈜태성이엔씨 (세종-5호)	양학영	세종특별자치시 대평로 87, 603호	교량 및 터널 수리
10	㈜지엔티 (세종-제02호)	신재명	세종특별자치시 대평로 87, 604호	교량 및 터널 수리
11	㈜윤성이엔지 (제260호)	신윤섭 고문성	대전광역시 유성구 갑동로 74(갑동)	교량 및 터널 수리
12	㈜동인이앤씨 (제 강원-84호)	신선숙	강원도 삼척시 중앙로 290, 3층(교동)	교량 및 터널 수리
13	정보건설엔지니어링(주) (경남 제108호)	박상선	경상남도 양산시 동면 금오13길 10, 301호, 302호(채움리더스)	교량 및 터널 수리
14	㈜대농구조안전연구소 (제051005호)	정철호	부산시 동래구 온천천로399번길 14, 5층	교량 및 터널 수리
15	㈜한국시설안전평가원 (제 서울-302호)	소정임	서울시 송파구 송파대로 167, 테라타워 A동 1015호(문정동, 문정역테라타워)	교량 및 터널
16	㈜남지건설이앤씨 (전북 제72호)	김성모	전북 전주시 덕진구 만성로 82, 1동 202호	교량 및 터널
17	㈜한국구조물안전연구원 (제 서울-145호)	김대호	서울특별시 송파구 송이로 147(가락동, 정이품빌딩)	종합
18	㈜홍익기술단 (충북-2호)	성낙전	충청북도 청주시 흥덕구 풍년로150번길 28(가경동)	종합
19	삼일안전기술원(주) (제 강원-123호)	홍성희	강원도 원주시 입춘로 45, B동 519호, C동 501호,502호(반곡동, 엔터비즈타워)	교량 및 터널
20	㈜한진이앤씨 (경기 제408호)	이종민	경기도 고양시 일산동구 무궁화로 43-55, 3층 306호(장항동, 성우사카르타워)	교량 및 터널
21	㈜태일종합건축사사무소 (경남 제75호)	김윤수	경상남도 창원시 의창구 우곡로217번길 6, 11층 1호(명서동, 경상남도 새마을회관)	종합
22	㈜엠에스건설기술단 (전북 제57호)	구순자	전북 정읍시 수성1로 64-9, 1층	수리

연번	상호 (등록번호)	대표자	소재지	전문분야
23	㈜삼우통상 (제 인천-53호)	황영수	인천광역시 미추홀구 한나루로 573(주안동, 유한빌딩3층)	교량 및 터널
24	㈜대영구조기술단 (제051002호)	안영호	부산광역시 북구 학사로17번길 4, 2층(화명동)	교량 및 터널
25	㈜천세이엔지 (전북 제46호)	김경수	전라북도 전주시 완산구 소태정3길 5, 2층	교량 및 터널 수리
26	㈜건설품질시험원 (전북 제1, 2호)	이재열	전라북도 전주시 완산구 춘향로 5146(색장동)	교량 및 터널 수리
27	㈜정진이앤씨 (전남-제15호)	정찬욱	전라남도 진도군 진도읍 남산로 130-48, (3층)	교량 및 터널 수리
28	㈜대들보구조안전기술단 (전북 제7호)	박태준	전주시 덕진구 동부대로 634(우아동 3가)	교량 및 터널
29	㈜신라이앤씨 (전남-제80호)	신진화	전남 순천시 연향1로 62, 상가2동 201호 (연향동, 부영2차 아파트)	교량 및 터널
30	한국건설연구소(주) (충북-60호)	서진욱	충청북도 청주시 상당구 남일면 쌍수관기길 5-28	교량 및 터널 수리
31	㈜서강이엔씨 (경기 제386호)	홍왕선	경기도 고양시 덕양구 중앙로 559, 2층 210호(고색동, 그랑프리 빌딩)	교량 및 터널
32	㈜대성기술 (전북 제55호)	강대후	전라북도 무주군 무주읍 단천로 99	교량 및 터널 수리
33	㈜내일기술단 (제051044호)	송시영	부산광역시 사상구 모라로 22, 406호(모라동, 부산벤처타워)	교량 및 터널
34	㈜건우이앤씨 (경기-제154호)	김윤경	경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길 118, 제7층 712호,713호,714호,715호 (호계동, 안양2차에스케이브이1센터)	교량 및 터널 수리
35	㈜지우엔지니어링 건축사사무소 (세종-제22호)	성낙훈	세종특별자치시 한누리대로 245, 601,602호(나성동, 에스알파크원)	교량 및 터널
36	㈜지원텍 (제 대구-17호)	신정숙	대구광역시 수성구 청호로95길 23, 201호(범어동)	수리
37	㈜바오건설기술단 (광주 제57호)	정태훈	광주광역시 서구 매월2로 53, 30동 208호, 209호(매월동)	교량 및 터널
38	㈜에스티오이엔지 (경기-제104호)	김남석	경기도 용인시 기흥구 중부대로 184, A동 5층 502호, 503호(영덕동, 힉스유타워)	교량 및 터널
39	㈜에세스엔지니어링 (전남-제59호)	김원중	전라남도 나주시 남평읍 남평1로 49-1, 1층	교량 및 터널 수리
40	㈜정진이엔씨 (경기 제201호)	정태진	경기도 의정부시 호국로 1303, 117-1호(의정부동, 한라비발디루트)	교량 및 터널
41	㈜대한건설기술단 (전남-제24호)	김보현	전라남도 순천시 중앙로 317(가곡동)	교량 및 터널 수리
42	㈜한국안전진단기술원 (제 서울-185호)	이윤종	서울시 송파구 송파대로 167 A동 1014호(문정동, 문정역테라타워)	교량 및 터널
43	㈜그루 (제 경북-171호)	설민영	경상북도 안동시 중앙로 54, 301호(동부동)	교량 및 터널
44	㈜서림 (전남 제4호)	박주원	전남 장성군 남면 나노산단5로 31, 2층	교량 및 터널 수리

연번	상호 (등록번호)	대표자	소재지	전문분야
45	㈜씨티씨 (제051019호)	이희현	부산광역시 동구 조방로 14, 6층 612호(범일동, 동일타워)	교량 및 터널 수리
46	㈜경인엔지니어링 (경기 제125호)	장기정	경기도 하남시 미사대로 510, 6층 601호 (덕풍동, 한강미사 아이에스비즈타워)	교량 및 터널 수리
47	㈜건축과공간메트로 (경기 제92호)	서모경	경기도 화성시 병점1로 216-21, 605호(병점동, 이타운3)	교량 및 터널
48	한국건설안전기술㈜ (제051029호)	이상호	부산광역시 남구 못골로 53번길 45(대연동)	교량 및 터널 수리
49	㈜대신이엔지 (서울-297호)	하상우	서울시 서초구 매헌로6길 55, 4층 403호(양재동, 삼륭빌딩)	교량 및 터널 수리
50	㈜KSR큰사람 (서울-49호)	김무열	서울시 송파구 올림픽로 35가길 11, 912호(신천동, 한신잠실코아오피스텔 9층)	교량 및 터널 수리
51	㈜한국건설안전공사 (대전 제35호)	지성갑	대전광역시 유성구 북유성대로 219, 201호, 202호(지족동, 인앤인주상복합)	교량 및 터널 수리
52	성우구조안전연구소(주) (경남 제84호)	김경태 박혜경	경상남도 김해시 동김해안길 8, 3층 301호(어방동)	교량 및 터널 수리
53	㈜피오에스이엔씨 (경기 제212호)	김의진	경기도 용인시 수지고 정든로 25, 4층 401호(죽전동, 단대프라자)	교량 및 터널
54	㈜신기원이앤씨 (제 인천-50호)	양해익	인천광역시 남동구 구수골로 36	교량 및 터널
55	㈜에스피이앤에스 (경기 제176호)	김진환	경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 201, 401호(고색동)	교량 및 터널 수리
56	㈜본이엔씨 (경북-133호)	서미라	경상북도 구미시 형곡로 208, 2층(형곡동)	교량 및 터널 수리
57	㈜대한이앤씨 (경기 제111호)	박주경	경기도 성남시 수정구 위례서일로6, 4층 (창곡동, 우대빌딩)	종합
58	한세이앤씨(주) (경기 제365호)	박명애	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 1002	종합
59	㈜남경이엔씨 (제051079호)	최지현	부산광역시 서구 부용로 17, 2층(서대신동 1가)	교량 및 터널
60	㈜제이엘건설연구소 (경기 제301호)	한재영	경기도 성남시 수정구 위례서일로 10, 804호(창곡동, 슈퍼스타타워)	교량 및 터널
61	㈜중앙종합안전기술연구원 (제 서울-393호)	장은환	서울특별시 송파구 충민로 52, 비동 514호(문정동, 가든파이브웍스)	종합
62	㈜한국종합안전연구원 (제 강원-141호)	임수연	강원특별자치도 원주시 우무개로 185, 1층(우산동)	교량 및 터널 수리
63	㈜미래구조안전연구원 (충남-126호)	최웅조	충청남도 아산시 도고면 도고산로 658, 씨동 2층	교량 및 터널 수리
64	중앙크리텍(주) (대전 제62호)	배성희	대전광역시 중구 중앙로 79번길 47, 201호(선화동)	교량 및 터널
65	㈜광명엔지니어링 건축사사무소 (경기 제272호)	허태섭	경기도 시흥시 새재로 3, 119~123호 (장현동, 장현2엔플러스빌)	종합